Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-68188/2020

20 мая 2021 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  13 мая 2021 года.

Полный текст решения изготовлен  20 мая 2021 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Киселевой А.О.,

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" (190000, 

<

...>, ЛИТЕРА А, , ОГРН: 

<

***>);

ответчик: :ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС" (адрес:  Россия 187000, г ТОСНО, ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл ТОСНЕНСКИЙ р-н, ул СОВЕТСКАЯ 9Б/44, ОГРН:  

<

***>);

третье лицо: в/у ФИО2 (ИНН: 

<

***>)

о взыскании,

 

при участии

- от истца: представитель ФИО3 (доверенность от 15.02.2021 г.),

- от ответчика не явился, извещен,

- от третьего лица не явился, извещен,

установил:

Государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" (Истец) обратилось в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Строительный альянс" (Ответчик) с требованием о взыскании пени за нарушение сроков выполнения работ в размере 24 997,25 рублей, пени за нарушение условий о предоставлении нового обеспечения исполнения Контракта в размере 24 997,46 рублей, расходов по оплате государственной пошлины. 

Определением от 19.08.2020 г. исковое заявление было принято к рассмотрению в упрощенном порядке.  

От Истца поступили уточнения исковых требований в части увеличения суммы пени за нарушение сроков выполнения работ до 60 993 279,33 рублей, пени за нарушение условий о предоставлении нового обеспечения исполнения Контракта до 15 173 456,63 рублей. Уточнения судом приняты  в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ).

Определением от 12.10.2020 г. суд перешел к рассмотрению по общим правилам искового производства. 

Определением от 18.01.2021 г. дата и время судебного заседания были изменены по причине болезни судьи.

Определением от 25.02.2021 г. к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, был привлечен ФИО2 (ИНН 

<

***>, адрес для направления корреспонденции: 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 90,кв. 2).

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования, заявил уточнения в части увеличения суммы пени за нарушение сроков выполнения работ по контракту от 18.10.2017 № 748/РУ-2017 до 67 770 310,37 рублей, пени за нарушение условий о предоставлении нового обеспечения исполнения контракта от 18.10.2017 № 748/РУ-2017 до 16 859 396,26 рублей. Уточнения судом приняты  в порядке ст. 49 АПК РФ.

Ответчик и третье лицо, извещенные о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом, своих представителей не направили. 

Дело рассмотрено в порядке ч. 3 ст. 156 АПК РФ в отсутствие представителей Ответчика и третьего лица, которые извещены надлежащим образом, о чем в материалах дела имеются соответствующие доказательства в соответствии с требованиями ст. 123 АПК РФ.

При отсутствии возражений сторон, в соответствии с положениями ст. 137 АПК РФ суд подготовил дело к судебному разбирательству, завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в суде первой инстанции.

Заслушав представителя Истца, исследовав и оценив материалы дела, в порядке, предусмотренном ст. 71 АПК РФ, суд установил следующие обстоятельства.

Между Истцом (далее - Заказчик) и Ответчиком (далее - Подрядчик) был заключен контракт от 18.10.2017 № 748/РУ-2017 (далее - Контракт) на выполнение работ по модернизации системы канализации котельной по адресу: 

<

...>, лит. А в части обеспечения очистки сточных вод (СМР, ПСИ) (далее - Объект).

В соответствии с пунктом 3.1.1 Контракта начало выполнения работ -не   позднее   5   календарных   дней   с   момента   заключения   Контракта.

Дата окончания выполнения работ определена в пункте 3.1.2 Контракта: 30.10.2019.

Календарным планом выполнения работ в редакции Дополнительного соглашения от 14.01.2019 № 1 определены сроки выполнения работ по каждому этапу:

Этап № 1. Строительно-монтажные работы: 31.05.2019.

Этап № 2. Приемо-сдаточные испытания: 31.07.2019.

Этап № 3. Благоустройство и озеленение: 30.10.2019.

В настоящее время работы по Контакту в полном объеме не выполнены, соответствующие акты не подписаны.

Таким образом, Ответчиком нарушены сроки выполнения работ по Контракту.

Согласно пункту 3.2 Контракта промежуточные сроки выполнения работ определяются в Календарном плане выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту). Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных Календарным планом выполнения работ.

Как определено пунктом 8.4 Контракта, если Подрядчик не приступил к исполнению Контракта в установленные сроки, либо выполняет работу с нарушением промежуточных сроков (периодов) выполнения работ, установленных Календарным планом выполнения работ, либо Подрядчиком нарушен конечный срок выполнения работ по Контракту, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере, определенном в соответствии с пунктом 8.12 Контракта.

Пунктом 8.12 Контракта установлено, что пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и определяется по формуле:

Пени = (цена Контракта - стоимость выполненных Подрядчиком обязательств) * размер ставки.

Размер ставки = размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К * количество дней просрочки.

Коэффициент К = количество дней просрочки / срок исполнения обязательств по Контракту (количество дней) * 100%.

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за   каждый   день   просрочки    и    принимается   равным    0,03    ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Пени рассчитываются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2015 № 1340 «О применении с 1 января 2016 г. ключевой ставки Банка России» установлено, что к отношениям, регулируемым актами Правительства Российской Федерации, в которых используется ставка рефинансирования Банка России, с 01.01.2016 вместо указанной ставки применяется ключевая ставка Банка России, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно Информации Банка России от 23.04.2021 ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации с 26.04.2021 составляет 5 %.

В соответствии с пунктом 2.1 (в редакции Дополнительного соглашения от 14.03.2019 № 2) цена контракта составляет 251 875 675,20 рублей, в том числе НДС 20%.

При расчете размера пени срок исполнения обязательств по Контракту принимается равным 743 дням (с 18.10.2017 по 30.10.2019).

1. За нарушение конечного срока выполнения работ по этапу № 2 Контракта за период с 01.08.2019 по 31.08.2019 (31 день) Подрядчик обязан уплатить пени, размер которых рассчитан исходя из следующих условий:

Стоимость выполненных Подрядчиком обязательств согласно актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 28.02.2019 № 1, от 31.03.2019 № 2, от 31.05.2019 № 3 составила 20 930 535,00 рублей.

Таким образом, размер пеней за период с 01.08.2019 по 31.08.2019 составляет 3 579 649,67 рублей, исходя из следующего расчета:

Пени(П) = (251 875 675,20-20 930 535,00) * 0,0155 = 3 579 649,67рублей,

где

Коэффициент (К) = (31/743) * 100 % = 4,17 % размер ставки (С) = (5% * 0,01) * 31 день = 0,0155.

2. За нарушение конечного срока выполнения работ по этапу № 2 Контракта за период с 01.09.2019 по 31.10.2019 (61 день) Подрядчик обязан уплатить пени, размер которых рассчитан исходя из следующих условий:

Стоимость выполненных Подрядчиком обязательств согласно актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 28.02.2019 № 1, от 31.03.2019 № 2, от 31.05.2019 № 3, от 31.08.2019 № 4,5 составила 24 789 085,80 рублей.

Таким образом, размер пеней за период с 01.09.2019 по 31.10.2019 составляет 6 926 140,98 рублей, исходя из следующего расчета:

Пени (П) = (251 875 675,20-24 789 085,80) * 0,0305 = 6 926 140,98 рублей,

где

Коэффициент (К) = (61/743) * 100 % = 8,21 % размер ставки (С) = (5% * 0,01) * 61 день = 0,0305.

3.. За нарушение конечного срока выполнения работ по этапу № 2 Контракта за период с 01.11.2019 по 31.12.2019 (61 день) Подрядчик обязан уплатить пени, размер которых рассчитан исходя из следующих условий:

Стоимость выполненных Подрядчиком обязательств согласно актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 28.02.2019 № 1, от 31.03.2019 № 2, от 31.05.2019 № 3, от 31.08.2019 № 4,5, от 31.10.2019 № 6,7 составила 6 144 075,11 рублей.

Таким образом, размер пеней за период с 01.11.2019 по 31.12.2019 составляет 6 826 750,13 рублей, исходя из следующего расчета:

Пени (П) = (251 875 675,20 - 28 047 802,20) * 0,0305 = 6 826 750,13 рублей,

где

Коэффициент (К) = (61/743) * 100 % = 8,21 %

размер ставки (С) = (5% * 0,01) * 61 день = 0,0305.

4. За нарушение конечного срока выполнения работ по этапу № 2 Контракта за период с 01.01.2020 по 25.03.2020 (85 дней) Подрядчик обязан уплатить пени, размер которых рассчитан исходя из следующих условий:

Стоимость выполненных Подрядчиком обязательств согласно актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 28.02.2019 № 1, от 31.03.2019 № 2, от 31.05.2019 № 3, от 31.08.2019 № 4,5, от 31.10.2019 № 6,7, от 31.12.2019 № 8, 9, 10, составила 34 535 386,08 рублей.

Таким образом, размер пеней за период с 01.01.2020 по 25.03.2020 составляет 9 236 962,29 рублей, исходя из следующего расчета:

Пени (П) = (251 875 675,20 - 34 535 386,08) * 0,0425 = 9 236 962,29 рублей,

где

Коэффициент (К) = (85/743) * 100 % = 11,44 % размер ставки (С) = (5% * 0,01) * 85 дней = 0,0425.

5. За нарушение конечного срока выполнения работ по этапу № 2 Контракта за период с 26.03.2020 по 20.07.2020 (117 дней) (дата подачи искового заявления) Подрядчик обязан уплатить пени, размер которых рассчитан исходя из следующих условий:

Стоимость выполненных Подрядчиком обязательств согласно актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 28.02.2019 № 1, от 31.03.2019 № 2, от 31.05.2019 № з, от 31.08.2019 № 4,5, от 31.10.2019 № 6,7, от 31.12.2019 № 8, 9, 10, от 25.03.2020 № 11 составила 37 985 239,68 рублей.

Таким образом, размер пеней за период с 26.03.2020 по 20.07.2020 составляет 12 512 590,48 рублей, исходя из следующего расчета:

Пени (П) = (251 875 675,20 - 37 985 239,68) * 0,0585 = 12 512 590,48 рублей, где

Коэффициент (К) = (117/743) * 100 % = 15,75 % размер ставки (С) = (5% * 0,01) * 117 дней = 0,0585.

6. За нарушение конечного срока выполнения работ по этапу № 3 Контракта за период с 31.10.2019 по 31.12.2019 (62 дня) Подрядчик обязан уплатить пени, размер которых рассчитан исходя из следующих условий:

Стоимость выполненных Подрядчиком обязательств согласно актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 28.02.2019 № 1, от 31.03.2019 № 2, от 31.05.2019 № 3, от 31.08.2019 № 4,5, от 31.10.2019 № 6,7 составила 28 047 802,20 рублей.

Таким образом, размер пеней за период с 31.10.2019 по 31.12.2019 составляет 6 938 664,06 рублей, исходя из следующего расчета:

Пени (П) = (251 875 675,20 - 28 047 802,20) * 0,0310 = 6 938 664,06 рублей,

где

Коэффициент (К) = (62/743) * 100 % = 8,34 % размер ставки (С) = (5% * 0,01) * 62 дня = 0,0310.

7. За нарушение конечного срока выполнения работ по этапу № 3 Контракта за период с 01.01.2020 по 25.03.2020 (85 дней) Подрядчик обязан уплатить пени, размер которых рассчитан исходя из следующих условий:

Стоимость выполненных Подрядчиком обязательств согласно актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 28.02.2019 № 1, от 31.03.2019 № 2, от 31.05.2019 № 3, от 31.08.2019 № 4,5, от 31.10.2019 № 6,7, от 31.12.2019 № 8, 9, 10 составила 34 535 386,08 рублей.

Таким образом, размер пеней за период с 01.01.2020 по 25.03.2020 составляет 9 236 962,29 рублей, исходя из следующего расчета:

Пени (П) = (251 875 675,20 - 34 535 386,08) * 0,0425 = 9 236 962,29 рублей,

где

Коэффициент (К) = (85/743) * 100 % = 11,44 % размер ставки (С) - (5% * 0,01) * 85 дней = 0,0425.

8. За нарушение конечного срока выполнения работ по этапу № 3 Контракта за период с 26.03.2020 по 20.07.2020 (117 дней) (дата подачи искового заявления) Подрядчик обязан уплатить пени, размер которых рассчитан исходя из следующих условий:

Стоимость выполненных Подрядчиком обязательств согласно актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 28.02.2019 № 1, от 31.03.2019 № 2, от 31.05.2019 № 3, от 31.08.2019 № 4Д 0т 31.10.2019 № 6,7, от 31.12.2019 № 8, 9, 10, от 25.03.2020 № 11 составила 37 985 239,68 рублей.

Таким образом, размер пеней за период с 26.03.2020 по 20.07.2020 составляет 12 512 590,48 рублей, исходя из следующего расчета:

Пени (П) = (251 875 675,20 - 37 985 239,68) * 0,0585 = 12 512 590,48 рублей, где

Коэффициент (К) = (117/743) * 100 % = 15,75 % размер ставки (С) = (5% * 0,01) * 117 дней = 0,0585.

Итого сумма пени за просрочку исполнения обязательств по Контракту по состоянию на 20.07.2020 составляет: 3 579 649,67 рублей + 6 926 140,98 рублей + 6 826 750,13 рублей + 9 236 962,29 рублей + 12 512 590,48 рублей + 6 938 664,06 рублей + 9 236 962,29 рублей + 12 512 590,48 рублей = 67 770 310 (Шестьдесят семь миллионов семьсот семьдесят тысяч триста десять) рублей 37 копеек.

1. За нарушение условий о предоставлении нового обеспечения исполнения Контракта за период с 15.02.2020 по 25.03.2020 (40 дней) Подрядчик обязан уплатить пени, размер которых рассчитан исходя из следующих условий:

Стоимость выполненных Подрядчиком обязательств согласно актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 28.02.2019 № 1, от 31.03.2019 № 2, от 31.05.2019 № з, от 31.08.2019 № 4,5, от 31.10.2019 № 6,7, от 31.12.2019 № 8,9,10 составила 34 535 386,08 рублей.

Таким образом, размер пеней за период с 15.02.2020 по 25.03.2020 составляет 4 346 805,78 рублей, исходя из следующего расчета:

Пени (П) = (251 875 675,20 рублей - 34 535 386,08 рублей) * 0,0200 = 4 346 805,78 рублей, где

Коэффициент (К) = (40/743) * 100 % = 5,38 %

размер ставки (С) = (5% * 0,01) * 40 дней = 0,0200.

2. За нарушение условий о предоставлении нового обеспечения исполнения Контракта за период с 26.03.2020 по 20.07.2020 (117 дней) (дата подачи искового заявления) Подрядчик обязан уплатить пени, размер которых рассчитан исходя из следующих условий:

Стоимость выполненных Подрядчиком обязательств согласно актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 28.02.2019 № 1, от 31.03.2019 № 2, от 31.05.2019 № 3, от 31.08.2019 № 4,5, от 31.10.2019 № 6,7, от 31.12.2019 № 8,9,10, от 25.03.2020 № 11 составила 37 985 239,68 рублей.

Таким образом, размер пеней за период с 15.02.2020 по 25.03.2020 составляет 12 512 590,48 рублей, исходя из следующего расчета:

Пени (П) = (251 875 675,20 рублей - 37 985 239,68 рублей) * 0,0585 = 12 512 590,48 рублей, где

Коэффициент (К) = (117/743) * 100 % = 15,75 %

размер ставки (С) = (5% * 0,01) * 117 дней - 0,0585. Итого сумма пеней за нарушение условий о предоставлении нового обеспечения исполнения Контракта по состоянию на 20.07.2020 составляет: 4 346 805,78 рублей + 12 512 590,48 рублей = 16 859 396 (Шестнадцать миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч триста девяносто шесть) рублей 26 копеек.

Общая сумма штрафных санкций за нарушение Подрядчиком своих обязательств по Контракту составляет 84 629 706 (Восемьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать девять тысяч семьсот шесть) рублей 63 копейки.

В связи с нарушением Ответчиком обязательств по Контракту Истцом в адрес Ответчика были направлены: претензия от 14.11.2019 № 07-14/48667 с требованием об уплате пени в срок до 23.11.2019, претензия от 17.03.2020 № 07-14/11902 с требованием об уплате пени в срок до 17.04.2020.

Требования, об уплате пени, указанные в претензиях от 14.11.2019 № 07-14/48667, от 17.03.2020 № 07-14/11902 Ответчиком до настоящего момента не исполнены, в связи с чем Истец обратился в суд.

Выслушав доводы представителя Истца, рассмотрев представленные в материалы дела доказательства, суд считает требование о взыскании задолженности подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ.

В порядке положений статей 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с законом, иными нормативно-правовыми актами и условиями обязательства, притом, что, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Принимая во внимание изложенные Истцом обстоятельства, суд полагает обоснованным расчет неустойки, произведенный Истцом с учетом представленных в материалы дела документов.  

В соответствии с требованиям ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В силу  п. 3.1  ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

Ответчиком в материалы дела не было представлено относимых и допустимых доказательств в опровержение подтвержденных Истцом обстоятельств, не представлено и доказательств оплаты взыскиваемой суммы либо выполнения работ в объеме и сроки, установленные контрактом 

В силу ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему  внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. 

С учетом установленных по делу обстоятельств, суд, проверив представленный расчет пени, полагает требование Истца обоснованным и подлежащим удовлетворению в заявленном размере. 

Основания для снижения размера неустойки судом в порядке положений п. 1 ст. 333 ГК РФ с учетом разъяснений в п. п. 71, 73 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» в рамках настоящего дела отсутствуют. 

В соответствии с п. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Принимая во внимание тот факт, что Истцом было заявлено об увеличении исковых требований, недостающая часть государственной пошлины за рассмотрение дела, в порядке положений ст. ст. 101, 102, 104, 110 АПК РФ, ст. ст. 333.21, 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации, подлежит взысканию в доход федерального бюджета с Ответчика пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительный альянс" в пользу государственного унитарного предприятия "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга":

- пени за нарушение сроков выполнения работ по контракту от 18.10.2017 г. № 748/РУ-2017 в размере 67 770 310,37 рублей, 

- пени за нарушение условий о предоставлении нового обеспечения исполнения контракта от 18.10.2017 № 748/РУ-2017 в размере 16 859 396,26 рублей. 

- расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 000 рублей.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительный альянс" в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 198 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                          Киселева А.О.