АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

672002, Выставочная, д. 6, Чита, Забайкальский край

http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А78-2832/2022

г.Чита

03 июня 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена  24 мая 2024 года

Решение изготовлено в полном объёме 03 июня 2024 года

 

Арбитражный суд Забайкальского края в составе судьи А.А. Курбатовой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.А. Ефимовой., рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению  публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  Федеральному казенному учреждению «Управление Федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании:

процентов за пользование чужими денежными средствами по договору об осуществлении технологического присоединения от 09.06.2021 № 20.7500.749.21 в сумме 816,28 руб. за период с 05.02.2022 по 08.04.2022 года.

задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения от 13.08.2021 № 20.7500.424.21 в сумме 29 513,73 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 11.01.2022 по 22.03.2022 года в размере 713,17 руб., с 23.03.2022 производить начисление процентов за пользование чужими денежными средствами за каждый день просрочки по день фактической оплаты долга.

задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения 13.08.2021 № 20.7500.431.21 в сумме 29 513,73 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 21.12.2021 по 22.03.2022 года в размере 857,51 руб., с 23.03.2022 производить начисление процентов за пользование чужими денежными средствами за каждый день просрочки по день фактической оплаты долга

расходы по оплате государственной пошлины;

по встречному исковому заявлению Федерального казенного учреждения «Управление Федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» об обязании публичного акционерного общества «Россети Сибирь»:

- об обязании публичного акционерного общества «Россети Сибирь» исполнить свои обязательства сетевой организации по договору № 20.7500.424.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» - стационарное электрическое освещение на км 200+176 - км 200+476 автомобильной дороги федерального значения А-350 Чита — Забайкальск - граница с Китайской Народной Республикой надлежащим образом в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу,

- взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» неустойку за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению по договору № 20.7500.424.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за период в размере 0,25 процентов от общего размера платы по договору за каждый день просрочки за период с 14.12.2021 по 15.12.2022 включительно в размере 30090,33 руб., с 16.12.2022 производить начисление неустойки в размере 0,25 процентов от общего размера платы по договору за каждый день просрочки до фактического осуществления технологического присоединения объекта истца к электрическим сетям.

- обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» исполнить свои обязательства сетевой организации по договору № 20.7500.431.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» - стационарное электрическое освещение на км 147+815 - км 148+115 автомобильной дороги федерального значения А-350 Чита - Забайкалъск - граница с Китайской Народной Республикой надлежащим образом в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу,

- взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» неустойку за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению по договору № 20.7500.431.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в размере 0,25 процентов от общего размера платы по договору за каждый день просрочки за период 14.12.2021 по 15.12.2022 включительно в размере 30090,33 руб., с 16.12.2022 производить начисление неустойки в размере 0,25 процентов от общего размера платы по договору за каждый день просрочки до фактического осуществления технологического присоединения объекта истца к электрическим сетям,

- взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» расходы по оплате государственной пошлины;

при участии в судебном заседании:

от истца – представитель явку не обеспечил, извещен надлежащим образом;

от ответчика – ФИО1, представителя по доверенности №14 от 07.05.2024 (до перерыва).

 

Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (далее – первоначальный истец. ПАО «Россети Сибирь») обратилось к Федеральному казенному учреждению «Управление Федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» (далее – ответчик по первоначальному иску, ФКУ «Упрдор «Забайкалье», учреждение) о взыскании задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения от 09.06.2021 № 20.7500.749.21 в размере 29513,73 руб., неустойки за период с 05.02.2022 по 22.03.2022 в размере 3 771,20 руб., с последующим начислением договорной неустойки как 0,25% от общего размера платы за технологическое присоединение по договору от 09.06.2021 № 20.7500.749.21 за каждый день просрочки начиная с 23.03.2022 по день фактической оплаты долга, но не далее 04.02.2023, задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения от 13.08.2021 № 20.7500.424.21 в размере 29 513,73 руб., неустойки за период с 11.01.2022 по 22.03.2022 в размере 5 820,76 руб., с последующим начислением договорной неустойки как 0,25% от общего размера платы за технологическое присоединение по договору от 13.08.2021 № 20.7500.424.21 за каждый день просрочки, начиная с 23.03.2022 по день фактической оплаты долга, но не далее 10.01.2023;  задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения 13.08.2021 № 20.7500.431.21 в размере 29 513,73 руб., неустойки за период с 21.12.2021 по 22.03.2022 года в размере 7 542,40 руб., с последующим начислением договорной неустойки как 0,25% от общего размера платы за технологическое присоединение по договору 13.08.2021 № 20.7500.431.21 за каждый день просрочки начиная с 23.03.2022 по день фактической оплаты долга, но не далее 20.12.2022.

Определением суда от 04.04.2022 исковое заявление принято к производству.

В ходе рассмотрения дела истец заявил о частичном отказе от требования в части взыскания задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения от 09.06.2021 № 20.7500.749.21 в размере 29 513,73 руб. В остальной части требования уточнил, просил: взыскать неустойку по договору об осуществлении технологического присоединения от 09.06.2021 № 20.7500.749.21 в размере 5164,90 руб. за период с 05.02.2022 по 22.03.2022, задолженность по договору об осуществлении технологического присоединения от 13.08.2021 № 20.7500.424.21 в размере 29 513,73 руб., неустойку за период с 11.01.2022 по 22.03.2022 в размере 5 820,76 руб., с последующим начислением договорной неустойки как 0,25% от общего размера платы за технологическое присоединение по договору от 13.08.2021 № 20.7500.424.21 за каждый день просрочки, начиная с 23.03.2022 по день фактической оплаты долга, но не далее 10.01.2023; задолженность по договору об осуществлении технологического присоединения 13.08.2021 № 20.7500.431.21 в размере 29 513,73 руб., неустойку за период с 21.12.2021 по 22.03.2022 года в размере 7 542,40 руб., с последующим начислением договорной неустойки как 0,25% от общего размера платы за технологическое присоединение по договору 13.08.2021 № 20.7500.431.21 за каждый день просрочки начиная с 23.03.2022 по день фактической оплаты долга, но не далее 20.12.2022 (т. 1 л.д. 88).

Определением от 14.06.2022 (резолютивная часть объявлена 08.06.2023) производство по делу в части требований о взыскании задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения от 09.06.2021 №20.7500.749.21 в размере 29 513,73 руб. прекращено.

05.10.2022 ответчиком подано встречное исковое заявление (т.3 л.д. 2-3) в редакции уточнения:

- об обязании публичное акционерное общество «Россети Сибирь» исполнить свои обязательства сетевой организации по договору № 20.7500.424.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» - стационарное электрическое освещение на км 200+176 - км 200+476 автомобильной дороги федерального значения А-350 Чита - Забайкальск - граница с Китайской Народной Республикой в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу; о взыскании с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» неустойку за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению по договору № 20.7500.424.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в размере 0,25 процентов от общего размера платы по договору за каждый день просрочки за период с 14.12.2021 по 27.10.2022 включительно в размере 25990,83 руб., с 28.10.2022 производить начисление неустойки в размере 0,25 процентов от общего размера платы по договору за каждый день просрочки до фактического осуществления технологического присоединения объекта истца к электрическим сетям;

- об обязании публичное акционерное общество «Россети Сибирь» исполнить свои обязательства сетевой организации по договору № 20.7500.431.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» - стационарное электрическое освещение на км 147+815 - км 148+115 автомобильной дороги федерального значения А-350 Чита - Забайкальск - граница с Китайской Народной Республикой в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу; взыскании с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» неустойку за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению по договору № 20.7500.431.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в размере 0,25 процентов от общего размера платы по договору за каждый день просрочки за период с 14.12.2021 по 27.10.2022 включительно в размере 25 990,83 руб. С 28.10.2022 производить начисление неустойки в размере 0,25 процентов от общего размера платы по договору за каждый день просрочки до фактического осуществления технологического присоединения объекта истца к электрическим сетям.

Определением от 31.10.2022 встречный иск принят к производству для рассмотрения совместно с первоначальным иском в рамках дела №А78-2832/2022.

Истец уточнил первоначальные исковые требования (т.3 л.д. 92-92), в редакции от 23.01.2024 просил:

- взыскать с ответчика в пользу ПАО «Россети Сибирь» проценты за пользование чужими денежными средствами по договору об осуществлении технологического присоединения от 09.06.2021 № 20.7500.749.21 в сумме 816,28 руб. за период с 05.02.2022 по 08.04.2022;

- взыскать с ответчика в пользу ПАО «Россети Сибирь» задолженность по договору об осуществлении технологического присоединения от 13.08.2021 №20.7500.424.21 в сумме 29513,73 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 11.01.2022 по 22.03.2022 года в размере 713,17 руб., с 23.03.2022 производить начисление процентов за пользование чужими денежными средствами за каждый день просрочки по день фактической оплаты долга;

- взыскать с ответчика в пользу ПАО «Россети Сибирь» задолженность по договору об осуществлении технологического присоединения 13.08.2021 №20.7500.431.21 в сумме 29513,73 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 21.12.2021 по 22.03.2022 года в размере 857,51 руб., с 23.03.2022 производить начисление процентов за пользование чужими денежными средствами за каждый день просрочки по день фактической оплаты долга; взыскать с ответчика расходы по оплате государственной пошлины.

Протокольным определением от 23.01.2024 уточненное требование истца принято судом к рассмотрению.

Истец по встречному иску 23.05.2024 представил заявление о частичном отказе от требований в части: 

- обязания ПАО «Россети Сибирь» исполнить свои обязательства сетевой организации по договору №20.7500.424.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» - стационарное электрическое освещение на км 200+176 - км 200+476 автомобильной дороги федерального значения А350 Чита – Забайкальск - граница с Китайской Народной Республикой в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу;

- обязания ПАО «Россети Сибирь» исполнить свои обязательства сетевой организации по договору № 20.7500.431.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» - стационарное электрическое освещение на км 147+815 - км 148+115 автомобильной дороги федерального значения А350 Чита - Забайкальск - граница с Китайской Народной Республикой в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу;

- о взыскании неустойки по договору от 02.08.2021 об осуществлении технологического присоединения № 20.7500.431.21,

Также ответчик (истец по встречному иску) в части неустойки требование уточнил, просил взыскать с ПАО «Россети Сибири» неустойку в размере 1639,65 руб. за нарушение срока исполнения обязательства по договору от 02.08.2021 об осуществлении технологического присоединения № 20.7500.424.21.

Протокольным определением от24.05.2024 частичный отказ истца по встречному иску и уточнение требования приняты судом к рассмотрению в порядке статьи 49 АПК РФ.

Участвуя в судебных заседаниях, истец иск поддержал в редакции уточнения от 23.01.2024, по основаниям изложенным в иске, пояснениях, итоговой позиции, доводы ответчика по встречному иску отклонил (т. 1 л.д. 3-7, 90-92, т. 2 л.д. 9-11, 92).

Ответчик, участвуя в судебном заседании 21.05.2024, поддержал встречный иск в части взыскания неустойки.

Дело после объявленного перерыва рассмотрено в порядке части 3 статьи 156 АПК РФ в отсутствие истца и ответчика.

Рассмотрев отказ истца по встречному иску от исковых требований в части обязания ПАО «Россети Сибирь» исполнить свои обязательства сетевой организации по договору №20.7500.424.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» - стационарное электрическое освещение на км 200+176 - км 200+476 автомобильной дороги федерального значения А350 Чита – Забайкальск - граница с Китайской Народной Республикой в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу; обязания ПАО «Россети Сибирь» исполнить свои обязательства сетевой организации по договору № 20.7500.431.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» - стационарное электрическое освещение на км 147+815 - км 148+115 автомобильной дороги федерального значения А350 Чита - Забайкальск - граница с Китайской Народной Республикой в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу и взыскания неустойки по договору от 02.08.2021 об осуществлении технологического присоединения №20.7500.431.21 в размере 30090,33 руб., с последующим начислением до дня фактического исполнения, суд считает его подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Частью 5 статьи 49 АПК РФ предусмотрено, что арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу.

Суд принимает отказ от заявленных требований, так как он не противоречит закону и не нарушает прав других лиц.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

Производство по делу в указанной части подлежит прекращению в порядке пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Таким образом, по первоначальному иску подлежит рассмотрению требование ПАО «Россети Сибири» к ФКУ «Упрдор «Забайкалье» о взыскании с ответчика в пользу ПАО «Россети Сибирь» проценты за пользование чужими денежными средствами по договору об осуществлении технологического присоединения от 09.06.2021 №20.7500.749.21 в сумме 816,28 руб. за период с 05.02.2022 по 08.04.2022; задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения от 13.08.2021 №20.7500.424.21 в сумме 29513,73 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 11.01.2022 по 22.03.2022 года в размере 713,17 руб., с 23.03.2022 процентов за пользование чужими денежными средствами за каждый день просрочки по день фактической оплаты долга; задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения 13.08.2021 №20.7500.431.21 в сумме 29513,73 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 21.12.2021 по 22.03.2022 года в размере 857,51 руб., с 23.03.2022 процентов за пользование чужими денежными средствами за каждый день просрочки по день фактической оплаты долга; расходов по оплате государственной пошлины;

по встречному иску требование ФКУ «Упрдор «Забайкалье» к ПАО «Россети Сибирь» о взыскании неустойки в размере 1639,65 руб. за нарушение срока исполнения обязательства по договору от 02.08.2021 об осуществлении технологического присоединения № 20.7500.424.21.

Рассмотрев материалы дела, исследовав письменные доказательства, суд приходит к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской федерации (далее - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему. 

В соответствии со статьей 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вредя и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе. 

Нормы, регламентирующие договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств содержатся в специальных нормативных актах, закрепляющих правила подключения к системам энергоснабжения. 

Как следует из материалов дела, истец, как сетевая организация, оказывает услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергопринимающих установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям.

Обязательство по совершению технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии возникает у сетевой организации в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» по договору об осуществлении технологического присоединения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона № 35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимися к ней лицом. Указанный договор является публичным.

В силу абзаца 2 пункта 4 и абзаца 5 пункта 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике технологическое присоединение является оказанием услуги. 

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861). 

Пункт 3 Правил №861 обязывает сетевую организацию выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению, а пункт 6 Правил устанавливает обязательность заключения для сетевой организации договора об осуществлении технологического присоединения.

В пункте 7 Правил № 861 установлена процедура технологического присоединения, в соответствии с которой завершающим этапом этой процедуры является составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. 

30.03.2021 ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» обратилось в ПАО «Россети Сибирь» посредством электронного сервиса «личный кабинет» официального сайта Истца с заявкой на заключение договора на технологическое присоединение для электроснабжения линии наружного освещения автомобильной дороги общего пользования федерального значения, расположенной (которая будет располагаться) по адресу: по адресу: Забайкальский край, г. Чита, кадастровый номер земельного участка 75:32:000000:1535 (т. 1 л.д. 20).

К заявке ответчиком по первоначальному иску приложены сведения о координатах точки присоединения (линия наружного освещения на автомобильной дороге74+800-248+035.

В соответствии с пунктом 8 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила № 861), для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с учетом условий, установленных пунктом 8 (1) настоящих Правил. 

В соответствии с пунктом 103 Правил № 861 договор между сетевой организацией и заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, заключается путем направления заявителю выставляемого сетевой организацией счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение и оплаты заявителем указанного счета. 

В соответствии с пунктом 105 Правил № 861 в отношении заявителей, указанных в пунктах в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки размещает на своем официальном сайте или ином официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемом Правительством Российской Федерации, в отдельном разделе (далее - личный кабинет потребителя): условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами для соответствующей категории заявителей, счет, предусмотренный пунктом 103 настоящих Правил; технические условия, содержащие перечень мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с пунктом 25 (1) настоящих Правил, а также срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации, и проект договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица гарантирующего поставщика, указанного в заявке в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил (в случае, если заявитель указал гарантирующего поставщика в качестве субъекта, 3 у которого он намеревается приобретать электрическую энергию); инструкцию, содержащую последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности. 

Размещенные в личном кабинете заявителя условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технические условия признаются офертой, а оплата заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору - акцептом договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технических условий. В случае несогласия с размещенными сетевой организацией в личном кабинете заявителя документами, предусмотренными абзацами вторым - четвертым настоящего пункта, и (или) несоответствия их настоящим Правилам заявитель вправе в течение 5 рабочих дней со дня размещения сетевой организацией таких документов направить сетевой организации мотивированный отказ от заключения договора с предложением об изменении размещенных документов и требованием о приведении их в соответствие с настоящими Правилами. Размещение сетевой организацией указанных документов, приведенных в соответствие с настоящими Правилами, осуществляется с использованием личного кабинета заявителя в течение 10 рабочих дней со дня получения такого требования.

Заявители, указанные в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, после завершения процедуры технологического присоединения вправе обратиться к сетевой организации с требованием о предоставлении документов, которые были размещены сетевой организацией (гарантирующим поставщиком) в личном кабинете потребителя, на бумажном носителе, а сетевая организация (гарантирующий поставщик) в течение 30 календарных дней со дня обращения потребителя обязана направить такие документы, подписанные со стороны сетевой организации, на бумажном носителе заявителю.

Условия типового договора об осуществлении договор об осуществлении технологического присоединения от 09.06.2021 № 20.7500.749.21 (т. 1 л.д. 23) и счет на оплату №1600001955 от 06.04.2021 размещены сетевой организацией в личном кабинете заявителя (т. 1 л.д. 21).

По счету ФКУ «Упрдор «Забайкалье» оплачена сумма 3279,30 руб. согласно платежному поручению №99971 от 09.06.2021 (т. 1 л.д. 22).

Пунктом 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) установлено, что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

Существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения определены пунктом 16 Правил № 861. Пунктом 15, подпунктом "а" пункта 16 Правил технологического присоединения установлено, что технические условия к договору об осуществлении технологического присоединения являются неотъемлемым приложением к договору. 

Согласно пункту 1 статьи 433 ГК РФ договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. 

В платежном поручении № 99971 от 09.06.2021 содержится указание о том, что платеж вносится по договору № 20.7500.749.21. 

Согласно отметке банка, указанное платежное поручение исполнено 09.06.2021.

Таким образом, договор следует считать заключенным с момента внесения заявителем платы за осуществление технологического присоединения – с 09.06.2021. 

Акт об осуществлении технологического присоединения подписан 25.01.2022 (т.1 л.д. 28-29).

Согласно пункту 11 договора размер платы за технологическое присоединение составляет 32793,03 руб. 

В соответствии с пунктом 13 договора внесение плата осуществляется в следующем порядке: 

- 10% платы за технологическое присоединение в размере 3279,30 руб. вносятся в течение 5 рабочий дней со дня выставления счета Сетевой организацией; 

- 30% платы за технологическое присоединение в размере 9837,91 руб. вносятся в течение 60 календарных дней со дня заключения договора; 

- 20% платы за технологическое присоединение в размере 6558,61 руб. вносятся в течение 180 календарных дней со дня заключения договора; 

- 30% платы за технологическое присоединение в размере 9837,91 руб. вносятся в течение 15 календарных дней со дня фактического присоединения; 

- 10% платы за технологическое присоединение в размере 3279,30 руб. вносятся в течение 10 календарных дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. 

Платежным поручением №217383 от 08.04.2022 ответчиком произведена оплата услуг по договору № 20.7500.749.21 в сумме 29513,73 руб. 

Разногласия в отношении исполнения указанного договора, а также в части в части основного долга и неустойки у сторон отсутствуют.

С учетом отсутствия задолженности по договору 20.7500.749.21 истец заявил об отказе от иска в части основного долга в размере 29513,73 руб., который принят судом, производство по делу в указанной части прекращено.

В соответствии с пунктом 20 сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 руб., обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. 

В процессе рассмотрения дела истец с учетом вопросов суда и с учетом Определения Верховного Суда Российской Федерации от 04.04.2022 №305-ЭС21-19954 по делу А41-8343/2020, скорректировал требования в части начисления неустойки по данному договору, просил взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке статьи 395 ГК РФ за период с 05.02.2022 по 08.04.2022 в размере 816,28 руб. (т.3 л.д. 93).

Договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг, к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также общие положения об обязательствах и о договоре (определение Верховного Суда Российской Федерации от 19.01.2018 № 310-ЭС17-11570).

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги (пункт 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. 

В соответствии с пунктами 1, 4 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Расчет процентов за период с 05.02.2022 по 08.04.2022 на сумму 816,28 руб. судом проверен, признан ошибочным в части начисления процентов за период действия моратория, применительно к расчету истца с 01.04.2022 по 08.04.2022.

Согласно пункту 1 статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 №127- ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами (далее для целей настоящей статьи - мораторий), на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» с 01.04.2022 введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. 

Как разъяснено в пункте 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие. В частности, это означает, что не подлежит удовлетворению предъявленное в общеисковом порядке заявление кредитора о взыскании с такого лица финансовых санкций, начисленных за период действия моратория. Лицо, на которое распространяется действие моратория, вправе заявить возражения об освобождении от уплаты неустойки и в том случае, если в суд не подавалось заявление о его банкротстве. 

Таким образом, поскольку требования истца возникли до введения моратория, то подлежат применению указанные положения, соответственно, проценты за период с 01.04.2022 по 08.04.2022 начислению не подлежат.

Размер процентов за период с 05.02.2022 по 31.03.2022 составит 686,90 руб.

Требование истца по первоначальному иску по требованию о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в связи с несвоевременной оплатой по договору об осуществлении технологического присоединения от 09.06.2021 №20.7500.749.21 подлежит удовлетворению в размере 686,90 руб., в остальной части суммы процентов суд отказывает.

24.02.2021 ФКУ «Упрдор «Забайкалье» обратилось в ПАО «Россети Сибирь» посредством электронного сервиса «личный кабинет» официального сайта с заявкой на заключение договора на технологическое присоединение электроустановок линии наружного освещения, расположенной (которая будет располагаться) по адресу: Забайкальский край. Чита-Забайкальск а.д., км 74+800-км248+035 (т. 1 л.д. 32).

Условия типового договора об осуществлении технологического присоединения от 13.08.2021 № 20.7500.424.21 (т. 1 л.д. 35) и счет на оплату №1600000934 от 01.03.2021 (т. 1 л.д. 33) размещены сетевой организацией в личном кабинете заявителя.

По счету учреждением оплачена сумма 3279,30 руб. согласно платежному поручению №138011 от 13.08.2021 (т. 1 л.д. 34).

Таким образом, договор считается заключенным 13.08.2021.

В соответствии с пунктом 1 условий договора, размещенных сетевой организацией в личном кабинете потребителя, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения  энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства  (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств , урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости  строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых устройств 15 кВт;

- категория надежности третья;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,40 кВ;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения линии наружного освещения  автомобильной дороги общего пользования федерального назначения, расположенной (которая будет располагаться) по адресу: Забайкальский край, Чита-Забайкальск а.д., км. 74+800 – км 248-035 (пункт 3 договора).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения договора (пункт 6 договора), то есть до 13.12.2021.

Согласно пункту 7 договора сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию  мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств  заявителя, указанных в технических условиях; обеспечить установку  и допуск в эксплуатацию прибора учета  электричексой энрегии и мощности; разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) осуществить фактичексое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности;  составить в электронной форме и разместить в личном кабинете заявителя акт о выполнении технических условий, содержащий перечень мероприятий, реализованных  в соответствии с техническими  условиями и акт осуществления технологического присоединения, уведомить заявителя о составлении и размещении  в личном кабинете заявителя акта о выполнении  технический условий и акта об осуществлении технологического присоединения.

В соответствии с техническими условиями точка присоединения – максимальная мощность 15 кВт, опора (0,4) – ближайшая опора, расположенная не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя, линия (0,4) – ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП -6-04 ф. Огок, ячейка – №12 ВЛ-10-ОГОК, ПС- 35кв Могойтуй-1 (т. 1 л.д. 37-38). 

В соответствии с актом от 22.12.2021 осуществлено технологическое присоединение (т. 1 л.д. 40-41). 

По счету учреждением оплачена сумма 3279,30 руб. согласно платежному поручению №138011 от 13.08.2021 (т. 1 л.д. 34).

В соответствии с пунктом 11 договора общий размер платы за технологическое присоединение составляет 32793,03 руб.

В соответствии с пунктом 20 сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 руб., обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. 

Согласно подпункту «а» пункта 25.1 Правил №861 (в редакции, действующей на момент заключения договора) в технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктом 12.1 приведенных Правил (юридические лица в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно), должны быть указаны точки присоединения, которые не могут располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

При этом определение точки присоединения вне границ участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя, возможно исключительно в случае, когда такое расположение точки присоединения не налагает на заявителя обязанности по урегулированию отношений с иными лицами, в том числе по оформлению земельно-имущественных отношений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таким образом, данной нормой установлен предел возможного расположения точки присоединения.

Для целей настоящих Правил, под границей участка заявителя, понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка, либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, либо передвижные объекты заявителей, указанные в пункте 13 настоящих Правил, в отношении которых предполагается осуществление мероприятий по технологическому присоединению.

В качестве правоустанавливающего документа земельного участка учреждение представило выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости и план расположения энергопринимающих устройств.

Согласно выписки у ответчика в оперативном управлении находится автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-166 Чита-Забайкальск до границы с Китайской народной Республикой км 381+573-км 475+917 с кадастровым номером 75:08:000000:1312 (т.1 л.д. 125).

В представленной выписке имеются кадастровые номера, в пределах которых расположен указанный объект недвижимости.

Доказательств наличия иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, либо передвижные объекты ответчика, указанные в пункте 13 Правил №861, в отношении которых предполагается осуществление мероприятий по технологическому присоединению, ответчиком не представлено.

Распределение мероприятий по технологическому присоединению и обязанностей по их выполнению заявителем и сетевой организацией производится по границе участка заявителя в соответствии с пунктами 16.1, 16.3, подпунктом "г" пункта 25.1 Правил №861.

Так, в пункте 16.1 Правил № 861 установлено, что заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка. До границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

В пункте 16.3 Правил № 861, определено, что обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Таким образом, действующим законодательством не предусмотрено исполнение обязательств сетевой организацией непосредственно до энергопринимающих устройств заявителя.

Исходя из условий договора, а также порядка и особенностей технологического присоединения, определенных Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861, фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям лежит на самом заявителе.

В соответствии с пунктом 107 Правил № 861 результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке.

В соответствии с пунктом 3 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения линии наружного освещения автомобильной дороги общего пользования федерального назначения, расположенной (которая будет располагаться) по адресу: Забайкальский край, Чита-Забайкальск а.д., км. 74+800 – км 248-035.

Технические условия являются неотъемлемой частью договора и приведены в Приложении № 1.

Согласно пункту 10.2.1 Технических условий сетевая организация обязана выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442).

В пункте 7 Технических условий определено, что точкой присоединения является ближайшая опора, расположенная не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка Заявителя.

Обязательство ПАО «Россети Сибирь» выполнено, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения от 22.12.2021.

Ответчик в итоговой позиции по встречному иску от требования об обязании исполнить свои обязательства сетевой организации по договору №20.7500.424.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» - стационарное электрическое освещение на км 200+176 - км 200+476 автомобильной дороги федерального значения А350 Чита – Забайкальск - граница с Китайской Народной Республикой в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу отказался, отказ от требования принят судом к рассмотрению, производство по данному требованию прекращено.

Учитывая изложенное, разногласий сторон об осуществлении технологического присоединения по договору №20.7500.424.21, его дате у сторон не имеется.

По заявлению истца ответчиком нарушено обязательство в части внесения платежей, подлежащих оплате в срок до 10.01.2022, в размере 29513,73 руб.

За просрочку оплаты истцом начислена неустойка за период с 11.01.2022 по 22.03.2022 в размере 5820,76 руб.

В процессе рассмотрения дела истец скорректировал требования в части начисления неустойки, просил взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке статьи 395 ГК РФ за период с 11.01.2022 по 22.03.2022 в сумме 713,17 руб., с последующим начислением процентов за пользованием чужими денежными средствами по правилам статьи 395 ГК РФ по день фактической оплаты долга (т.3 л.д. 94).

Договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг, к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также общие положения об обязательствах и о договоре (определение Верховного Суда Российской Федерации от 19.01.2018 № 310-ЭС17-11570).

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги (пункт 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. 

В договоре сторонами согласован график уплаты платежей за технологическое присоединение. 

Истец исполнил свои обязательства, осуществив технологическое присоединение электросетей к электроустановкам ответчика, что подтверждается актом от 22.12.2021.

График внесения платежей, установленный в пункте 13 договора, ответчиком не соблюден. 

Задолженность 29513,73 руб. учреждением не оплачена. 

Ответчик доказательства оплаты в материалы дела не представил, в связи с чем, требования истца в части взыскания основного долга в размере 29513,73 руб. подлежат удовлетворению.

Расчет процентов за период с 11.01.2022 по 22.03.2022 на сумму 713,17 руб.  судом проверен, является верным, соответствует действующему законодательству, ответчиком не оспорен. 

Неисполнение ответчиком денежного обязательства позволило ему в течение длительного времени пользоваться денежными средствами истца. Никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения.

Истец просит также взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами по день фактической оплаты долга, что соответствует гражданскому законодательству с  учетом правовой позиции, изложенной  пункте 48 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств», согласно которой  суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

Расчет процентов, начисляемых после вынесения решения, осуществляется в процессе его исполнения судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве).

Поскольку ответчик не представил доказательств оплаты долга на дату вынесения решения судом, суд считает возможным производить взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами, начиная с 23.03.2022 по день фактической оплаты долга (29513,73), по правилам пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации по ставкам Банка России, действующим в соответствующие периоды, за исключением периода моратория с 01.04.2022 по 01.10.2022.

Таким образом, требования истца о взыскании 713,17 руб., процентов за пользования чужими денежными средствами, с последующим начислением процентов начиная с 23.03.2022 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 и по день фактической оплаты суммы основного долга подлежат удовлетворению.

Встречные требования ответчика (истца по встречному иску) по указанному договору скорректированы по размеру неустойки (вх. №А78-Д-4/74542 от23.05.2024), учреждение просило взыскать неустойку за период с 03.12.2021 по 22.12.20212 в размере 1639,65 руб.

Как следует из акта технологическое присоединение объекта осуществлено 22.12.2021.

В соответствии с пунктом 6 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения договора. 

Договор сторонами заключен 13.08.2021.

Следовательно, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек 13.12.2021. 

ПАО «Россети Сибирь» обязательства по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям объекта ответчика исполнены 22.12.2021.

Следовательно, имеет место факт несвоевременного исполнения ПАО «Россети Сибирь» по встречному иску своих обязательств. 

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускает одностороннего отказа от исполнения обязательств.

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой (статья 329 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 

По правилам статьи 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

На основании изложенного, соглашение сторон о размере и порядке начисления пени, изложенное в пункте 20 договора, соответствует требованиям гражданского законодательства.

В соответствии с пунктом 20 договора  сторона договора, нарушавшая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 руб., обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Таким образом, неустойка составит 737,84 руб. за период с 14.12.2021 по 22.12.2021 (9 дн. * 32793,03 руб. * 0,25 %).

В силу пункта 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Ответчиком не представлено доказательств нарушения им срока оплаты в результате непреодолимой силы (чрезвычайного и непредотвратимого при данных условиях обстоятельства).

С учетом изложенного, встречные исковые требования о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору№ 20.7500.424.21 обоснованны, подтверждаются материалами дела и подлежат удовлетворению в части установленной судом, в размере 737,84 руб. В остальной части встречного иска по данному договору надлежит отказать.

24.02.2021 учреждение обратилось в ПАО «Россети Сибирь» посредством электронного сервиса «личный кабинет» официального сайта Истца с заявкой на заключение договора на технологическое присоединение электроустановок линии наружного освещения №6, расположенной (которая будет располагаться) по адресу:Забайкальский край, Чита-Забайкальск а.д., км 74+800-км 248+035, кадастровый номер земельного участка 75:08:000000:1312.

Условия типового договора об осуществлении технологического присоединения от 13.08.2021 № 20.7500.431.21 (т. 1 л.д. 45) и счет на оплату №1600000980 от 03.03.2021 (т. 1 л.д. 43) размещены сетевой организацией в личном кабинете заявителя.

По счету учреждением оплачена сумма 3279,30 руб. согласно платежному поручению №138013 от 13.08.2021 (т. 1 л.д. 44).

Таким образом, договор считается заключенным 13.08.2021.

В соответствии с пунктом 1 условий договора, размещенных сетевой организацией в личном кабинете потребителя, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения  энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства  (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости  строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых устройств 15 кВт;

- категория надежности третья;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,40 кВ;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения линии наружного освещения автомобильной дороги общего пользования федерального назначения, расположенной (которая будет располагаться) по адресу: Забайкальский край, Чита-Забайкальск а.д., км. 74+800 – км 248-035, кадастровый номер земельного участка 75:08:000000:1312 (пункт 3 договора).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения договора (пункт 6 договора), то есть до 13.12.2021.

Согласно пункту 7 договора сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию  мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств  заявителя, указанных в технических условиях; обеспечить установку  и допуск в эксплуатацию прибора учета  электричексой энрегии и мощности; разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) осуществить фактичексое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности;  составить в электронной форме и разместить в личном кабинете заявителя акт о выполнении технических условий, содержащий перечень мероприятий, реализованных  в соответствии с техническими  условиями и акт осуществления технологического присоединения, уведомить заявителя о составлении и размещении  в личном кабинете заявителя акта о выполнении  технический условий и акта об осуществлении технологического присоединения.

В соответствии с техническими условиями точка присоединения – максимальная мощность 15 кВт, точка подключения РУ 0,4 ТП-367 ВЛ-10вВ ф. Челутай, ячейка №7 ВЛ—10-Челутай, ПС 110 кВ «агинская» (т. 1 л.д. 47-48). 

В соответствии с актом от 10.12.2021 осуществлено технологическое присоединение (т. 1 л.д. 50-51). 

По счету учреждением оплачена сумма 3279,30 руб. согласно платежному поручению №138013 от 13.08.2021 (т. 1 л.д. 44).

В соответствии с пунктом 11 договора общий размер платы за технологическое присоединение составляет 32793,03 руб.

В соответствии с пунктом 20 сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 руб., обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. 

В соответствии с пунктом 3 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения линии наружного освещения автомобильной дороги общего пользования федерального назначения, расположенной (которая будет располагаться) по адресу: Забайкальский край, Чита-Забайкальск а.д., км. 74+800 – км 248-035  кадастровый номер земельного участка 75:08:000000:1312.

В оперативном управлении находится автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-166 Чита-Забайкальск до границы с Китайской народной Республикой км 381+573-км 475+917 с кадастровым номером 75:08:000000:1313 (т.1 л.д. 125).

В представленной выписке имеются кадастровые номера, в пределах которых расположен указанный объект недвижимости.

Доказательств наличия иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, либо передвижные объекты ответчика, указанные в пункте 13 Правил №861, в отношении которых предполагается осуществление мероприятий по технологическому присоединению, ответчиком не представлено.

Технические условия являются неотъемлемой частью договора и приведены в Приложении № 1.

Обязательство ПАО «Россети Сибирь» выполнено согласно технических условий, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения от 10.12.2021 (т.1 л.д. 50-51).

Ответчик в итоговой позиции по встречному иску от требования об обязания ПАО «Россети Сибирь» исполнить свои обязательства сетевой организации по договору № 20.7500.431.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» - стационарное электрическое освещение на км 147+815 - км 148+115 автомобильной дороги федерального значения А350 Чита - Забайкальск - граница с Китайской Народной Республикой в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу отказался, отказ от требования принят судом к рассмотрению, производство по данному требованию прекращено.

Учитывая изложенное, разногласий сторон об осуществлении технологического присоединения по договору №20.7500.431.21, его дате у сторон не имеется.

По заявлению истца ответчиком нарушено обязательство в части внесения платежей, подлежащих оплате в срок до 20.12.2021, в размере 29513,73 руб.

За просрочку оплаты истцом начислена неустойка за период с 21.12.2021 по 22.03.2022 в размере 7542,40 руб.

В процессе рассмотрения дела истец скорректировал требования в части начисления неустойки, просил взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке статьи 395 ГК РФ за период с 21.12.2021 по 22.03.2022 в сумме 713,17 руб., с последующим начислением процентов за пользованием чужими денежными средствами по правилам статьи 395 ГК РФ по день фактической оплаты долга (т.3 л.д. 95).

В договоре сторонами согласован график уплаты платежей за технологическое присоединение. 

Истец исполнил свои обязательства, осуществив технологическое присоединение электросетей к электроустановкам ответчика, что подтверждается актом от 10.12.2021.

График внесения платежей, установленный в пункте 13 договора, ответчиком не соблюден. 

Задолженность 29513,73 руб. учреждением не оплачена. 

Ответчик доказательства оплаты в материалы дела не представил, в связи с чем, требования истца в части взыскания основного долга в размере 29513,73 руб. подлежат удовлетворению.

Расчет процентов за период с 21.12.2021 по 22.03.2022 на сумму 857,51 руб. судом проверен, является верным, соответствует действующему законодательству, ответчиком не оспорен. 

Истец просит также взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами по день фактической оплаты долга.

Поскольку ответчик не представил доказательств оплаты долга на дату вынесения решения судом, суд считает возможным производить взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами, начиная с 23.03.2022 по день фактической оплаты долга (29513,73), по правилам пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации по ставкам Банка России, действующим в соответствующие периоды, за исключением периода моратория с 01.04.2022 по 01.10.2022.

Таким образом, требования истца о взыскании 857,51 руб., процентов за пользования чужими денежными средствами, с последующим начислением процентов начиная с 23.03.2022 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 и по день фактической оплаты суммы основного долга подлежат удовлетворению.

Встречные требования ответчика (истца по встречному иску) по указанному договору скорректированы, истец по встречному иску отказался от взыскания неустойки с учетом даты осуществления технологического присоединения и даты исполнения договора в соответствии с пунктом 6 договора (вх. №А78-Д-4/74542 от 23.05.2024, пояснения представителя ответчика в судебном заседании 21.05.2024)

Отказ от встречного иска в данной части судом принят к рассмотрению, производство по делу прекращено согласно тексту настоящего решения, изложенного выше.

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны, а в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Истец по первоначальному иску при обращении в суд оплатил государственную пошлину в размере 5000 руб. по платежным поручениям (т.1 л.д. 12,13).

Исходя из цены иска, с учетом ее уточнения, уплате подлежала государственная пошлина в  размере 2457 руб.

Иск удовлетворен частично (99,79%).

Ответчик не относится к числу лиц, освобожденных от уплаты государственной пошлины, перечень которых установлен в статье 333.37 Налогового кодекса РФ.

Таким образом, уплаченная государственная пошлина подлежит возмещению истцу за счет ответчиков по правилам статьи 110 АПК РФ в размере 2452 руб. 

Излишне оплаченная государственная пошлина подлежит возврату ПАО «Россети Сибирь» из федерального бюджета в размере 2543 руб., государственная пошлина в размере 5 руб. остается на ПАО «Россети Сибирь», в связи с отказом в иске истцу в части.

При обращении в суд со встречным иском истец оплатил государственную пошлину в размере 15000 руб. по платежным поручениям (т. 2 л.д. 145, т. 3 л.д. 4).

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса РФ размер государственной пошлины по неимущественному требованию составляет 6000 рублей.

Судебные расходы на уплату государственной пошлины в соответствии со статьей 110 АПК РФ относятся на сторону, не в пользу которой принят судебный акт.

Таким образом, в силу статьи 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины в размере 6000 руб. остаются на истце.

Встречный иск  в части имущественного требования удовлетворен частично (45%).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации при отказе истца от иска до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины. Не подлежит возврату уплаченная государственная пошлина при добровольном удовлетворении ответчиком требований истца после обращения в арбитражный суд и вынесения определения о принятии искового заявления к производству.

Материалы дела не содержат доказательств добровольного удовлетворения ответчиком по встречному иску требований истца по встречному иску, то возврату истцу по встречному иску подлежит государственная пошлина в размере 70%.

Таким образом, государственная пошлина в размере 900 руб. подлежит возмещению истцу по встречному иску за счет ответчика по встречному иску, государственная пошлина в размере 4700 руб. относится на истца по встречному иску в связи с отказом истцу в части требований (55%) и отказом учреждения от встречного иска не в связи с добровольным удовлетворением требований (30%), государственная пошлина в размере 9400 руб. подлежит возврату истцу по встречному иску как излишне уплаченная и в связи с отказом от встречного иска в части (70%). 

Согласно части 5 статьи 170  АПК РФ при полном или частичном удовлетворении первоначального и встречного  исков в резолютивной части решения  указывается денежная сумма, подлежащая взысканию в результате зачета. 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) проценты по договору №20.7500.749.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 09.06.2021 за пользование чужими денежными средствами за период с 05.02.2022 по 31.03.2022 в размере 686,90 руб., задолженность по договору №20.7500.424.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 13.08.2021 в размере 29513,73 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 11.01.2022 по 22.03.2022 в размере 713,17 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами по правилам пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации по ставкам Банка России, действующим в соответствующие периоды, с последующим начислением с 23.03.2022 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по день фактической оплаты долга (29513,73 руб.), задолженность по договору №20.7500.431.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 13.08.2021 в размере 29513,73 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами с 21.12.2021 по 22.03.2022 в размере 857,51 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами по правилам пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации по ставкам Банка России, действующим в соответствующие периоды, с последующим начислением с 23.03.2022 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по день фактической оплаты долга (29513,73 руб.), расходы по оплате государственной пошлине в размере 2452 руб.

В остальной части первоначального иска отказать.

Возвратить публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» из федерального бюджета государственную пошлину, оплаченную по платежному поручению № 1417 от 27.01.2022, в размере 2543 руб.

Производство по делу по встречному иску в части требований об обязании публичного акционерного общества «Россети Сибирь» исполнить свои обязательства сетевой организации по договору № 20.7500.424.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» - стационарное электрическое освещение на км 200+176 - км 200+476 автомобильной дороги федерального значения А-350 Чита - Забайкальск - граница с Китайской Народной Республикой в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу; об обязании  публичного акционерного общества «Россети Сибирь» исполнить свои обязательства сетевой организации по договору № 20.7500.431.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» - стационарное электрическое освещение на км 147+815 - км 148+115 автомобильной дороги федерального значения А-350 Чита - Забайкальск - граница с Китайской Народной Республикой в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу; о взыскании неустойку за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению по договору № 20.7500.431.21 за период с 14.12.2021 по 15.12.2022 в размере 30090,33 руб. с последующим начислением по день фактического исполнения прекратить.

Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению по договору №20.7500.424.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за период с 14.12.2021 по 22.12.2021 в размере 737,84 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 900 руб.

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать.

Возвратить Федеральному казенному учреждению «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета, государственную пошлину оплаченную по платежным поручениям №240584 от 11.04.2022, № 276761 от 14.06.2022, в общем размере 9400 руб.

Путем произведенного взаимозачета взыскать с Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) задолженность в размере 62099,20,20 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами по правилам пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации по ставкам Банка России, действующим в соответствующие периоды, с последующим начислением с 23.03.2022 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по день фактической оплаты долга (59027,46 руб.).

Возвратить публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» из федерального бюджета государственную пошлину, оплаченную по платежному поручению № 1417 от 27.01.2022, в размере 2543 руб.

Возвратить Федеральному казенному учреждению «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета, государственную пошлину оплаченную по платежным поручениям №240584 от 11.04.2022, № 276761 от 14.06.2022, в общем размере 9400 руб.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия через Арбитражный суд Забайкальского края.

 

Судья                                                                                               А.А. Курбатова