Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения

 

16 июля 2019 года                                                                Дело № А56-54348/2019

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сурков А. А.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

:ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ ПЛЮС" (адрес:  Россия 195221, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>/ЛИТЕР А/ПОМЕЩЕНИЕ 3Н, ОГРН:  

<

***>);

к :Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 Пушкинского района Санкт-Петербурга (адрес:  Россия 196620, Санкт-Петербург, 

<

...>, лит. А, ОГРН:  

<

***>);

о признании недействительным одностороннего отказа ответчика от исполнения государственного контракта от 01.08.2018 № 0372200277218000010-0206662-03 и взыскании по указанному контракту: 109 167 руб. задолженности, 1753,36 руб. пени за просрочку оплаты за период с 28.02.2019 по 01.05.2019, 2000 руб. штрафа за ненадлежащее исполнение контракта, 20 396,61 руб. в возмещение судебных расходов на уплату государственной пошлины и на оплату услуг представителя,

приняв во внимание, что истец письмом от 27.02.2019 № 10 признал наличие недостатков в выполненной работе, но не устранил их в соответствии с пунктом 7.3 Контракта в срок, установленный в акте о выявленных недостатках от 20.02.2019 – из представленных в материалы дела пояснений и документов следует, что результат выполненных работ после устранения недостатков направлен ответчику лишь 19.04.2019,

руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

решил:

В иске отказать.

Решение

 подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

 

Судья                                                                            Сурков А. А.