Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-1025/2023

21 июля 2023 года

город Якутск

 

Резолютивная часть решения объявлена 17 июля 2023 года.

Мотивированное решение изготовлено 21 июля 2023 года.

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Васильевой А.Б. при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в   судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального казённого учреждения Администрация муниципального образования "Посёлок Пеледуй" Ленского района Республики Саха (Якутия) (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Северный регион" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании устранить недостатки,

при участии представителей:

от истца: не явился, извещен; 

от ответчика: ФИО2 директор по паспорту; 

УСТАНОВИЛ:

муниципальное казённое учреждение Администрация муниципального образования "Посёлок Пеледуй" Ленского района Республики Саха (Якутия) обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с исковым заявлением от 10.02.2023 № 245 к обществу с ограниченной ответственностью "Северный регион" об обязании устранить недостатки по муниципальным контрактам от 24.05.2019 № 0116300029519000020-0212196-01, от 19.08.2019 № 0116300029519000029-0212196-01, от 02.07.2020 № 0116300029520000013-0212196-01.

Суд в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проводит судебное заседание в отсутствие надлежаще извещенного о времени и месте проведения судебного заседания истца в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В материалы дела поступили:

от истца: дополнительные документы с приложениями. 

от ответчика: ходатайство о приобщении дополнительных документов с приложениями 

Судом поступившие документы приобщены к материалам дела в порядке ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассматривается уточнение исковых требований, содержащееся в отзыве истца от 16.05.2023 № 741, согласно которому истец просит обязать ответчика в срок до 30 сентября 2023 года устранить недостатки работ согласно актам осмотра от 03.05.2023 с указанием перечня недостатков, выполненных по муниципальным контрактам от 24.05.2019 № 0116300029519000020-0212196-01, от 19.08.2019 № 0116300029519000029-0212196-01, от 02.07.2020 № 0116300029520000013-0212196-01.

Представитель ответчика не возражает против уточнения исковых требований. 

Уточнение исковых требований принимается судом к рассмотрению в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Представитель ответчика пояснил, что планируется устранение недостатков выполненных работ. 

Судом в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв. Информация о времени и месте судебного разбирательства размещена арбитражным судом на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет. После перерыва судебное заседание продолжено.

Суд, исследовав материалы дела, установил следующие обстоятельства.

Между Администрацией муниципального образования "Посёлок Пеледуй" Ленского района Республики Саха (Якутия) (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Северный регион" (исполнитель) заключены следующие контракты:

муниципальный контракт от 24.05.2019 № 0116300029519000020-0212196-01, предметом которого является выполнение работ по  капитальному ремонту дорог с асфальтированием ул. Мира, ул. Юбилейная, ул. Комиссара ФИО4, ул. Калинина, ул. Победы, ул. Молодёжная МО "Посёлок Пеледуй" в соответствие с техническим заданием (приложения №1);

муниципальный контракт от 19.08.2019 № 0116300029519000029-0212196-01, предметом которого является выполнение работ по  капитальному ремонту дороги с асфальтированием ул. Советская МО «Посёлок Пеледуй» Ленского района Республики Саха (Якутия) (участок дороги от ул. Советская,88 до перекрестка ул. Пионерская) протяженностью 1720 метра при ширине дорожного полотна 6 метров в соответствие с техническим заданием (приложения №1);

муниципальный контракт от 20.07.2020 № 0116300029520000013-0212196-01, предметом которого является выполнение работ по  капитальному ремонту дороги с асфальтированием ул. Советская МО «Посёлок Пеледуй» Ленского района Республики Саха (Якутия) (участок дороги от ул. Советская,88 до перекрестка ул. Майская)   в соответствие с Проектной сметной документацией, техническим заданием (приложения №1).

В соответствии с пунктами 7.1. и 7.2. контрактов от 24.05.2019 № 0116300029519000020-0212196-01 и от 19.08.2019 № 0116300029519000029-0212196-01 исполнитель гарантирует надлежащее качество работ  и соответствие результатов их выполнения, указанными в техническом задании. В случае возникновения отклонений и несоответствий от технических условий и других недостатков, выявленных Заказчиком или проектантами (в порядке авторского сопровождения) исполнитель обязан незамедлительно исправить недостатки за свой счет. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результатов выполненных работ и входящих в него оборудования, материалов и работ составляет 3 года со дня подписания сторонами акта выполненных работ. Исправление недостатков в пределах гарантийного срока осуществляется за счет Исполнителя.

Согласно статье 7 контракта от 20.07.2020 № 0116300029520000013-0212196-01: 

7.1. Исполнитель гарантирует надлежащее качество работ  и соответствие результатов их выполнения   указанным в техническом задании.  В случае возникновения отклонений и несоответствий от технических условий и других недостатков, выявленных заказчиком или проектантами (в порядке авторского сопровождения) исполнитель обязан незамедлительно исправить недостатки за свой счет. 

7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результатов выполненных работ и входящих в него оборудования, материалов и работ составляет:  по нижнему слою покрытия – 8 лет; по верхнему слою покрытия – 8 лет; со дня подписания сторонами акта выполненных работ. Исправление недостатков в пределах гарантийного срока осуществляется за счет исполнителя.

7.3.При обнаружении в течение гарантийного срока, указанного в пункте 7.2 контракта, недостатков заказчик должен заявить о них исполнителю в течение 3 рабочих дней с даты их обнаружения. В течение 3 рабочих дней после получения уведомления об обнаруженных заказчиком недостатках стороны составляют акт об обнаружении недостатков (дефектов).

Для составления соответствующего акта стороны вправе привлечь эксперта (экспертную организацию). Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из сторон.

В случае уклонения исполнителя в течение 3 рабочих дней от составления указанного в пункте контракта акта заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно или с привлечением эксперта (экспертной организации). При этом расходы на соответствующую экспертизу несет исполнитель, за исключение случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений исполнителем контракта или причинно-следственной связи между действиями исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

7.4. Течение гарантийного срока прерывается на время устранения недостатков, за которые отвечает исполнитель. При этом исполнитель должен быть извещен о недостатках работ.

7.5. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте 7.2 контракта, исполнитель обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте об обнаружении недостатков (дефектов). При этом заказчик вправе потребовать от исполнителя безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок. Срок исправления выявленных недостатков 90 календарных дней с учетом температурного режима выполнения данного вида работ. 

В случае получения письменного отказа исполнителя от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания указанного в акта об обнаружении недостатков (дефектов) от исполнителя не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения исполнителя от устранения соответствующих дефектов и недостатков, заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с последующим возмещением своих расходов за счет средств исполнителя.

Работы по муниципальным контрактам выполнены, в подтверждение представлены подписанные сторонами:

- акт приемки законченных работ, акт о приемке выполненных работ от 05.09.2019 № 4, справка о стоимости выполненных работ от 05.09.2019 № 4 по контракту от 24.05.2019 № 0116300029519000020-0212196-01;

- акт о приемке выполненных работ от 13.09.2019 № 1, справка о стоимости выполненных работ от 13.09.2019 № 1 по контракту от 19.08.2019 № 0116300029519000029-0212196-01;

- акт о приемке выполненных работ от 11.08.2020 № 1, справка о стоимости выполненных работ от 11.08.2020 № 1 по контракту от 20.07.2020 № 0116300029520000013-0212196-01.

Оплата произведенных работ по спорным контрактам произведена платежными поручениями от 13.09.2019 № 686, от 10.09.2019 № 646, от 10.09.2019 № 645, от 05.09.2019 № 598, от 05.09.2019 № 597, от 19.08.2019 № 589, от 19.08.2019 № 588, от 17.08.2020 № 626.

Муниципальные контракты сторонами были исполнены.

29.09.2022 в ходе осмотра состояния участков улиц заасфальтированных по контракту от 24.05.2019 № 0116300029519000020-0212196-01 выявлены недостатки, о чем составлен акт от 29.09.2022 № 01.

29.09.2022 в ходе осмотра состояния участков улиц заасфальтированных по контракту от 19.08.2019 № 0116300029519000029-0212196-01 выявлены недостатки, о чем составлен акт от 29.09.2022 № 03.

29.09.2022 в ходе осмотра состояния участков улиц заасфальтированных по контракту от 20.07.2020 № 0116300029520000013-0212196-01 выявлены недостатки, о чем составлен акт от 29.09.2022 № 02.

В адрес ответчика направлена претензия от 12.05.2020 № 561 об устранении выявленных недостатков по контрактам от 24.05.2019 № 0116300029519000020-0212196-01 и от 19.08.2019 № 0116300029519000029-0212196-01. Ответчик в ответе от 18.05.2020 № 88 указанную претензию признал обоснованной, обязался в срок до 01.09.2020 произвести работы по устранению недостатков.

Ответчику вручена претензия от 27.07.2021 № 1133 об устранении выявленных недостатков по контрактам от 24.05.2019 № 0116300029519000020-0212196-01, от 19.08.2019 № 0116300029519000029-0212196-01 и от 20.07.2020 № 0116300029520000013-0212196-01.

Ответчику вручена претензия от 25.04.2022 № 569 об устранении выявленных недостатков по спорным контрактам.

Претензии остались без удовлетворения, в связи с чем истец обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Ответчик с требованиями не согласился, представил отзыв.

Определениями суда от 27.03.2023, 25.04.2023 сторонам предложено осуществить совместный осмотр дорог, по итогам которого представить в суд акты осмотра.

07.04.2023 ответчику вручено письмо истца от 07.04.2023 № 537 о согласовании даты совместного осмотра.

Ответчик в ответе от 07.04.2023 № 112 указывает на то, что в случае если по погодным условиям осмотра произвести невозможно просит перенести дату осмотра на другое время после 27.04.2023.

28.04.2023 ответчику вручено письмо от 28.04.2023 № 687 о согласовании даты совместного осмотра на 03.05.2023.

Как следует из пояснений истца от 16.05.2023 № 740, ответчик сообщил истцу о невозможности принятия участия в осмотрах, возражений против проведения осмотра без его участия не выразил.

03.05.2023 в ходе осмотра состояния участков улиц заасфальтированных по контракту от 24.05.2019 № 0116300029519000020-0212196-01 выявлены недостатки, о чем составлен акт от 03.05.2023 № 01.

03.05.2023 в ходе осмотра состояния участков улиц заасфальтированных по контракту от 19.08.2019 № 0116300029519000029-0212196-01 выявлены недостатки, о чем составлен акт от 03.05.2023 № 03.

03.05.2023 в ходе осмотра состояния участков улиц заасфальтированных по контракту от 20.07.2020 № 0116300029520000013-0212196-01 выявлены недостатки, о чем составлен акт от 03.05.2023 № 02.

Ответчик в письме от 05.07.2023 № 245 сообщил, что по акту от 03.05.2023 № 2 возражений нет, по акту от 03.05.2023 № 1 дефект по точке 61 исправлять в рамках гарантийных обязательств отказывается ввиду его возникновения по истечении гарантийного срока (май 2023 года), по точкам 32, 41, 42 акта № 1 и по точкам 20, 21, 22 акта № 3 просит предоставить проектные решения по отводу талых и дождевых вод.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьями 65 и 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд приходит к следующим выводам. 

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом, иных правовых актов, а также действий граждан и юридических лиц, которые, хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей в статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации названы договоры и иные сделки. 

Правоотношения сторон вытекают из контракта на выполнение подрядных работ для государственных и муниципальных нужд, правовое регулирование которого предусмотрено главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

В силу статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные строительные работы, проектные и изыскательские работы, предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с пунктом 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

В силу статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок об их обнаружении (пункт 4 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации). Причем в соответствии с действующим законодательством наличие акта приемки работ, подписанного заказчиком, не препятствует ему заявить в суде возражения по качеству, объему и стоимости работ, одновременно представив доказательства обоснованности этих возражений.

Заказчик вправе предъявить требования, в отношении недостатков результата работы, обнаруженных в течение гарантийного срока (пункт 3 статьи 724 Гражданского кодекса Российской Федерации).

О наличии недостатков заказчик известил подрядчика претензией от 12.05.2020 № 561 об устранении выявленных недостатков по контрактам от 24.05.2019 № 0116300029519000020-0212196-01 и от 19.08.2019 № 0116300029519000029-0212196-01, претензией от 27.07.2021 № 1133 об устранении выявленных недостатков по контрактам от 24.05.2019 № 0116300029519000020-0212196-01, от 19.08.2019 № 0116300029519000029-0212196-01 и от 20.07.2020 № 0116300029520000013-0212196-01 и от 25.04.2022 № 569 об устранении выявленных недостатков по спорным контрактам.

По контракту от 24.05.2019 № 0116300029519000020-0212196-01 работы приняты 05.09.2019 (акт приемки законченных работ, акт о приемке выполненных работ от 05.09.2019 № 4, справка о стоимости выполненных работ от 05.09.2019 № 4). Гарантийный срок согласно пункту 7.2. составляет 3 года со дня подписания сторонами акта выполненных работ. О недостатках по указанному контракту ответчик уведомлен претензией от 12.05.2020 № 561.

По контракту от 19.08.2019 № 0116300029519000029-0212196-01 работы приняты 13.09.2019 (акт о приемке выполненных работ от 13.09.2019 № 1, справка о стоимости выполненных работ от 13.09.2019 № 1). Гарантийный срок согласно пункту 7.2. составляет 3 года со дня подписания сторонами акта выполненных работ. О недостатках по указанному контракту ответчик уведомлен претензией от 12.05.2020 № 561.

По контракту от 20.07.2020 № 0116300029520000013-0212196-01 работы приняты 11.08.2020 (акт о приемке выполненных работ от 11.08.2020 № 1, справка о стоимости выполненных работ от 11.08.2020 № 1). Гарантийный срок согласно пункту 7.2. составляет по нижнему слою покрытия – 8 лет; по верхнему слою покрытия – 8 лет. О недостатках по указанному контракту ответчик уведомлен претензией от 27.07.2021 № 1133.

О наличии недостатков заказчик известил подрядчика в пределах гарантийного срока, установленных спорными контрактами.

В силу пункта 2 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Бремя доказывания обстоятельств того, что выявленные недостатки выполненных работ являются следствием неправильной эксплуатации объекта строительства, либо последствием нормального износа и иных обстоятельств, лежит на ответчике, как подрядчике (статья 755 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 65, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено, законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

Действующим законодательством предусмотрена презумпция вины подрядчикав недостатках, обнаруженных в пределах гарантийного срока. Бремя доказыванияобстоятельств того, что выявленные недостатки выполненных работ являются следствиемнеправильной эксплуатации объекта строительства либо последствием нормальногоизноса, лежит на подрядчике.

По правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса РоссийскойФедерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственномисследовании имеющихся в деле доказательств.  

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса РоссийскойФедерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, накоторые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В рассматриваемом деле факт наличия недостатков в результате работ сторонами 

не оспаривается.

 Оценив имеющиеся в деле доказательства по правилам главы 7 Арбитражногопроцессуального кодекса Российской Федерации, установив факт выполнения работненадлежащего качества, ввиду непредставления ответчиком надлежащих доказательствотсутствия своей вины, возникновения недостатков работ вследствие ненадлежащейэксплуатации объекта, иных причин, находящихся вне сферы ответственностиподрядчика, суд приходит к выводу о том, что недостаткиработ, выявленные в пределах гарантийного срока, подлежат безвозмездному устранениюответчиком.

При таких обстоятельствах, исковые требования подлежат удовлетворению. 

Истец просит обязать ответчика устранить недостатки работ в срок до 30 сентября 2023 года.

Согласно части 1 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

Судебные акты по требованиям об обязании совершить определенные действия должны быть исполнимыми, и эффективному исполнению судебных актов способствует срок исполнения, указанный в судебном акте.

Пункт 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств" предусматривает, что удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено (часть 2 статьи 174 АПК РФ). При установлении указанного срока, суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

С учетом характера имеющихся недостатков (дефектов) и видов работ, необходимых для их устранения, суд полагает, что 45 дневный срок с момента вступления решения суда по настоящему делу в законную силу является разумным и достаточным для исполнения судебного акта.

Истец в силу статьи 105 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации освобожден от уплаты государственной пошлины.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина в размер 6 000 руб. подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» по адресу www.kad.arbitr.ru. 

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Северный регион" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 45 дней с даты вступления настоящего решения в законную силу устранить недостатки по муниципальным контрактам от 24.05.2019 № 0116300029519000020-0212196-01, от 19.08.2019 № 0116300029519000029-0212196-01, от 02.07.2020 № 0116300029520000013-0212196-01 согласно актам от 03.05.2023:

По акту 01:

1. Ул. Мира: на участке ул. Мира, расположенном между ул. Советская и ул. Комсомольская выявлены следующие недостатки:

- точка № 31, координаты точки: 59.620909, 112.746533 – выкрашивание, шелушение (поверхностное и послойное разрушение покрытия). Размер дефекта – 1,7м х 1,4 м. Выбоина 0,5м х 0,1м;

- точка № 32, координаты точки: 59.620975, 112.747877 - отсутствие верхнего слоя асфальто-бетонного покрытия. Размер дефекта 37 м х 3 м.

2. Ул. Юбилейная: на участке ул. Юбилейная между ул. Советская и ул. Комсомольская выявлены следующие недостатки:

- точка № 33, перекресток улиц Юбилейная и Комсомольская, координаты точки: 59.624848,112.747789 - множественные выбоины на участке размером 10 м х 3 м;

- точка № 59, перекресток улиц Советская и Юбилейная, угол примыкания ул. Юбилейная со стороны 

<

...> точки: 59.622411, 112.745763 –  выбоины глубиной до 5 см. Размеры поврежденных участков: 0,5 м х 0,5 м.;

- точка № 60, ул. Юбилейная, в 20 м от ул. Комсомольская. Координаты точки: 59.622514, 112.747115. выкрашивание верхнего слоя покрытия на двух участках размерами по 0,4 м х 0,4 м каждый;

- точка № 61, ул. Юбилейная, в 10 м от ул. Советская. Координаты точки: 59.622496, 112.745963. На участке покрытия 8м х 3,2 м сеть мелких трещин, просадка покрытия.

3. Ул. Комиссара ФИО4: на участке ул. Комиссара ФИО4, между ул. Советская и ул. Комсомольская выявлены следующие недостатки:

- Точка № 39, координаты точки: 59.626601,112.746967 – Просадка покрытия длиной 3 м шириной до 0,7 м;

- Точка № 40, перекресток с ул. Комсомольская, координаты точки: 59.626595,112.747224 – выкрашивание верхнего слоя покрытия на участке 2,9 м х 0,9 м, неровное прилегание к дорожному полотну ул. Комсомольская;

- Точка № 58, ул. Комиссара ФИО4 в 15 м от перекрестка с ул. Комсомольская. Координаты точки: 59.626574,112.747063 - выкрашивание верхнего слоя покрытия на участке длиной 7,5 м и шириной до 0,8 м. 

4. ФИО3: на участке между ул. Советская и ул. Комсомольская выявлены следующие недостатки:

- Точка № 41, координаты точки: 59.628553,112.745522 - продольное выкрашивание покрытия по линии соединения полос движения. Размеры дефекта  46 м х 3,5 м;

- Точка № 42, координаты точки: 59.628590,112.746780 - Выкрашивание левой полосы движения по всей ширине полосы. Длина поврежденного участка 50,3 м, ширина 3,5 м. Перед перекрестком с ул. Комсомольская выкрашивание значительно. 

5. Ул. Победы: на участке между ул. Советская и ул. Комсомольская выявлены следующие недостатки: 

- Точка № 43 перекресток ул. Победы и ул. Советская, координаты точки: 59.630667,112.744910 – выкрашивание угла примыкания и части полосы дорожного движения с правой стороны. Размеры поврежденного участка 3,5 м х 2 м.;  

- Точка № 44 перекресток ул. Победы и ул. Советская, координаты точки - 59.630667,112.744910 - выкрашивание угла примыкания и части полосы дорожного движения с левой стороны. Размеры поврежденного участка 2,8 м х 0,3 м.  

6. Ул. Молодежная на участке между ул. Советская и ул. Комсомольская  выявлены следующие недостатки: 

- Точка № 45 на участке между ул. Советская и ул. Комсомольская, координаты точки 59632012,112.745240 - выкрашивание, шелушение (поверхностное и послойное разрушение покрытия) полотна по ширине улицы, многочисленные выбоины. Размеры дефекта 22,2 м х 6 м;

- Точка № 46 на участке между ул. Советская и ул. Комсомольская, координаты точки 59632012,112.745240 - выкрашивание, шелушение (поверхностное и послойное разрушение покрытия) полотна по левой полосе движения, выбоина, неровное примыкание к полотну ул. Комсомольская. Размеры дефекта 7,5 м х 3,40 м.  

Перечень точек выявленных дефектов

№ точки

Размеры (М)

Глубина (См)

Координаты 

45 

6х22,20

10

Ул.Молодежная  ( 59632012,112.745240) « Бриз»

46

7,50х3,40

10

Ул.Молодежная  ( 59.632045,112.746172) «ДШИ»

43

3,50х2

10

л.Победы (59.630667,112.744910) «Перекресток ФИО5-Ул.Победы»

44

2,80х0,3

10

Ул.Победы (59.630703,112.744903) «Перекресток ФИО5-Ул.Победы»

42

50,30х3,5

10

ФИО3 (59.628590,112.746780) «Перекресток ФИО3-Ул.Комсомольская»

41

46х3,5

10

ФИО3 (59.628553,112.745522) «Перекресток ФИО3-ФИО5»

40

2,90х0,90

10

ФИО4(59.626595,112.747224) «Перекресток ФИО4-Ул.Комсомольская»

39

3х0,70

10

ФИО4(59.626601,112.746967) «Перекресток ФИО4-Ул.Комсомольская»

58

0,8х7,5

2

ФИО4 (59.626574,112.747063)в 15м от перекрёстка с ул. Комсомольская

33

10х3

10

Ул.Юбилейная(59.624848,112.747789) «Перекресток Ул.Юбилейная-Ул.Комсомольская»

60

0,4х0,4;04х0,4

5

Ул.Юбилейная д.(59.622514,112.747115) в 20м от перекрёстка ул.Комсомольская

61

3,20х8

10

Ул.Юбилейная д.(59.622496,112.745963) в 10 м. от перекрёстка ул. Советская

59

0,5х0,5

5

Ул.Юбилейная(59.622411,112.745763) «Перекресток Ул.Юбилейная-ФИО5»

32

37х3

10

Ул.Мира(59.620975,112.747877) «Перекресток Ул.Мира-Ул.Комсомольская»

31

1,70х1,40

10

Ул.Мира(59.620909,112.746533) «Перекресток Ул.Мира – въезд к дому Ул.Мира 1

 

По акту № 02:

1.Точка № 30. На участке улицы Советская от д. №66 до д. №85 длиной 189 м и шириной 6 м (координаты: 59.62377,112.745521) в следствие выкрашивания и шелушения асфальта (поверхностное и послойное разрушение покрытия) образованы многочисленные выбоины;

2.Точка № 62. ФИО5, напротив д. №82 Размеры поврежденного участка: длина 4,5 м ширина 1,5 м глубиной до 5 см (координаты: 59.619290,112.746028). Выкрашивание, шелушение (поверхностное и послойное разрушение покрытия) левой полосы движения, просадка асфальтового покрытия.

Перечень точек выявленных дефектов:

№ точки

Размеры (М)

Глубина (См)

Координаты 

30

189х6

10

ФИО5 от д.66 до д.85 (59.62377,112.745521)

62

1,5х4,5

5

ФИО5  д.82 (59.619290,112.746028)

 

По акту № 03:

1. Точка № 1. Перекресток ул. Советская и ул. Пионерская. Координаты точки: 59.633214, 112.744149.  Выкрашивание, шелушение (поверхностное и послойное разрушение покрытия) угла примыкания и части полосы дорожного движения с правой стороны ул. Советская. Размеры участка повреждение 3 м х 1,4 м; 

2. Точка № 2. Перекресток ул. Советская и ул. Пионерская. Координаты точки: 59.633203, 112.744118. Выкрашивание, шелушение (поверхностное и послойное разрушение покрытия) соединительной линии полос движения и линии примыкания к покрытию ул. Пионерская. Размеры дефекта 3 м х 0,4 м;

3. Точка № 3. Перекресток ул. Советская и ул. Пионерская. Координаты точки: 59.633169, 112.744188. Выбоина. Размер 0,3 м х 0,3 м;

4. Точка № 4. ФИО5 возле д. №16. Координаты точки: 59.633048, 112.744181. Многочисленные выбоины на участки полосы движения. Размеры поврежденного участка: 12 м х  1,5 м;

5. Точка № 5. ФИО5 возле д. №18. Координаты точки: 59.632826, 112.744228. Многочисленные мелкие выбоины на участки полосы движения. Размеры поврежденного участка: 15 м х  3 м;

6. Точка № 6. ФИО5, перекресток с ул. Молодежная. Угол примыкания с левой стороны. Координаты точки: 59.631978,112.744532. Выбоина размером 2 м х 0,5 м;

7. Точка № 7. ФИО5 возле дома №26. Координаты точки: 59.631423, 112.744652. Выбоина размером 0,3 м х 0,2 м;

8. Точка № 8. ФИО5 возле дома №30. Координаты точки: 59.631058, 112.744770. Выбоина размером 0,2 м х 0,2 м;

9. Точка № 9. ФИО5 перед д. №33. Координаты точки: 59.630581, 112.744794. Выкрашивание, шелушение (поверхностное и послойное разрушение покрытия) левой полосы движения. Размеры поврежденного участка 10 м х 3 м;

10. Точка №  10. ФИО5 перед д. №33. Координаты точки: 59.630463, 112.744826. Выкрашивание, шелушение (поверхностное и послойное разрушение покрытия) на левой полосе движения. Размеры поврежденного участка 2 м х 0,7 м;  

11. Точка № 11. ФИО5 возле д. №33. Координаты точки: 59.630374, 112.744830. Выкрашивание, шелушение (поверхностное и послойное разрушение покрытия) левой полосы движения, многочисленные выбоины. Размеры поврежденного участка 9 м х 5,5 м;

12. Точка № 12. ФИО5, участок улицы между д. №33 и д. №35. Координаты точки: 59.630265, 112.744866. Глубокая выбоина. Размер 2,5 м х 1,2 м;

13. Точка № 13. ФИО5, участок улицы между д. №33 и д. №35. Координаты точки: 59.630188, 112.744868. Многочисленные выбоины по разделительной линии. Размеры поврежденного участка 10,5 м х 2,9 м;

14. Точка № 14. ФИО5, участок улицы от д. №35 до д. №39. Координаты точки: 59.629852, 112.744912. Выкрашивание, шелушение (поверхностное и послойное разрушение покрытия) левой полосы движения, многочисленные выбоины слева от разделительной линии. Размеры поврежденного участка 86,5 м х 3,2 м;

15. Точка № 15. ФИО5, участок улицы возле д. №40. Координаты точки: 59.629409, 112.744945. Выкрашивание, шелушение (поверхностное и послойное разрушение покрытия) левой полосы движения, две выбоин. Размеры поврежденного участка 2 м х 0,7 м;

16. Точка № 16. ФИО5, участок улицы возле д. №40. Координаты точки: 59.629319, 112.744907. Выбоина размером 0,2 м х 0,2 м. Поперечная трещина длиной 0,7 м;

17. Точка № 17. ФИО5, возле д. №40. Координаты точки: 59.629209, 112.744938. Три расположенные подряд выбоины. Размер поврежденного участка 2,4 м х 0,8 м. Поперечная трещина длиной 2.2 м;

18. Точка № 18. ФИО5, возле д. №55. Координаты точки: 59.627045, 112.745255. Расположенные в ряд выбоины. Размер поврежденного участка 2,3 м х 0,6 м;  

19. Точка № 19. ФИО5, возле д. №55. Координаты точки: 59.626972, 112.745258. Выбоина размером 0,2 м х 0,2 м;

20. Точка № 20. ФИО5, возле д. №56. Координаты точки: 59.626658, 112.745266. Выбоина, выкрашивание дорожного покрытия. Размер поврежденного участка 4 м х 2,2 м;

21. Точка № 21. ФИО5, возле д. №56. Координаты точки: 59.626649, 112.745290. Выбоина, выкрашивание дорожного покрытия. Размер поврежденного участка 2,3 м х 2,2 м;

22. Точка № 22. ФИО5 перед перекрестком с ул. Комиссара ФИО4. Координаты точки: 59.626430, 112.745316. Выкрашивание, шелушение (поверхностное и послойное разрушение покрытия) покрытия правой полосы движения, мелкие выбоины. Размер поврежденного участка 20 м х 1,2 м;

23. Точка № 23. ФИО5, возле д. №59. Координаты точки: 59.626116, 112.745324. Выбоина размером 0,2 м х 0,2 м;

24. Точка № 24. ФИО5, возле д. №59. Координаты точки: 59.626076, 112.745356. Выбоина размером 4 м х 0,2 м;

25. Точка № 25. ФИО5, возле д. №62. Координаты точки: 59.625732, 112.745359. Последовательный рад мелких выбоин. Размер поврежденного участка 7 м х 0,3 м;

26. Точка № 26. ФИО5, участок улицы между домами №62 и д. №64. Координаты точки: 59.625551, 112.745370. Мелкие выбоины на участке размером 1,8 м х 0,7 м;

27. Точка № 27. ФИО5, возле д. №63. Координаты точки: 59.625308, 112.745394. Две последовательные выбоины. Размер поврежденного участка 2,5 м. х 0,4 м;  

28. Точка № 28. ФИО5 между домами №63 и №65. Координаты точки: 59.625113, 112.745419. Выкрашивание, шелушение (поверхностное и послойное разрушение покрытия) покрытия левой полосы движения, глубокая выбоина. Размер поврежденного участка 31 м х 3 м;

29. Точка № 29. ФИО5, перекресток с ул. Майская. Координаты точки: 59.624825, 112.745442. Глубокая выбоина по линии примыкания дорожного полотна к ул. Майская. Размер поврежденного участка 7 м х 1,5 м;

30. Точка № 47. ФИО5, возле дома №29. Координаты точки: 59.631338, 112.744634. Выкрашивание, шелушение (поверхностное и послойное разрушение покрытия) покрытия левой полосы движения, мелкие выбоины. Размер поврежденного участка 0,4 м х 0,8 м;

31. Точка № 48. ФИО5, возле дома №29. Координаты точки: 59.631494, 112.744581. Выкрашивание, шелушение (поверхностное и послойное разрушение покрытия) покрытия в центральной части дорожного полотна, выбоина глубиной 5 см. Размер поврежденного участка 2,7 м х 0,7 м;

32. Точка № 49. ФИО5, напротив дома №22. Координаты точки: 59.632110, 112.744404. Выкрашивание, шелушение (поверхностное и послойное разрушение покрытия) покрытия левой полосы движения, мелкие выбоины. Размер поврежденного участка 10 м х 2,4 м;

33. Точка № 51. ФИО5, возле дома №30. Координаты точки: 59.631092, 112.744720. Выкрашивание, шелушение (поверхностное и послойное разрушение покрытия) покрытия в центральной части дорожного полотна, мелкие выбоины глубиной до 3 см. Размер поврежденного участка 10,6 м х 0,6 м;

34. Точка № 52. ФИО5, возле дома №30. Координаты точки: 59.630930, 112.744758. Мелкая выбоина размером 0,2 м х 0,2 м. глубиной до 2 см;

35. Точка № 53. ФИО5, возле дома №32. Координаты точки: 59.630463, 112.744825. Выбоина размером 0,5 м х 0,5 м. глубиной 5 см;

36. Точка № 54. ФИО5, возле дома №44. Координаты точки: 59.628783, 112.745095. Выкрашивание, шелушение (поверхностное и послойное разрушение покрытия) покрытия в центральной части дорожного полотна, мелкие выбоины глубиной до 2 см. Размер поврежденного участка 34 м х 0,6 м;

37. Точка № 55. ФИО5, возле дома №47. Координаты точки: 59.628295, 112.745140. Выбоина глубиной до 7 см. Размер поврежденного участка 0,5 м  х 0,5 м;  

38. Точка № 56. ФИО5, возле дома №52. Координаты точки: 59.627478, 112.745194. Мелкая выбоина глубиной 2 см. Размеры поврежденного участка 0,4 м х 0,5 м;

39. Точка № 57. ФИО5, возле дома №56. Координаты точки: 59.626759, 112.745334. Выбоина глубиной до 7 см. Размер поврежденного участка 0,3 м х 0,3 м.  

Перечень точек выявленных дефектов:

№

Размеры (М)

Глубина (См)

Координаты 

1

3х1,40

10

Перекрёсток ул.Советская -ул.Пионерская  (59.633214,112.744149 ) магазин « Флагман»

2

3х0,40

10

Перекрёсток ул.Советская -ул.Пионерская  (59.633203,112.744118 ) магазин « Флагман»

3

0,30х0,30

10

Перекрёсток ул.Советская -ул.Пионерская  (59.633169,112.744188) магазин « Флагман»

4

1,5х12

10

Ул . Советская д.16 (59.633048,112.744181)

5

3х15

10

Ул . Советская д.18 (59.632826,112.744228)

6

2х0,50

10

Ул . Советская перекрёсток Ул. Молодёжная(59.631978,112.744532)

7

0,20х0,30

10

Ул . Советская д.26 (59.631423,112.744652)

8

0,20х0,20

10

Ул . Советская д.30 (59.631058,112.744770)

9

3х10

9

Ул . Советская д.33 (59.630581,112.744794)

10

0,70х2

10

Ул . Советская д.33 (59.630463,112.744826)

11

5,50х9

10

Ул . Советская д.33 (59.630374,112.744830)

12

2,50х1,20

10

Ул . Советская между д.33 –д.35 (59.630265,112.744866)

13

10,5х2,9

10

Ул . Советская между д.33 –д.35 (59.630188,112.744868)

14

86,5х3,20

10

Ул . Советская от  д.35  до д.39 (59.629852,112.744912)

15

2х0,70

10

Ул . Советская д.40 (59.629409,112.744945)

16

0,20х0,20

10

Ул . Советская д.40 (59.629319,112.744907)

17

2,40х0,80

10

Ул . Советская д.40 (59.629209,112.744938)

18

2,30х0,60

10

Ул . Советская д.55 (59.627045,112.745255)

19

0,20х0,20

10

Ул . Советская д.55 (59.626972,112.745258)

20

4х2,20

10

Ул . Советская д.56 (59.626658,112.745266)

21

2,30х2,20

10

Ул . Советская д.56 (59.626649,112.745290)

22

20х1,20

10

Перекрёсток ул.Советская -ул.К.ФИО4  (59.626430,112.745316)

23

0,20х0,20

10

Ул . Советская д.59 (59.626116,112.745324)

24

4х0,20

10

Ул . Советская д.59 (59.626076,112.745356)

25

7х0,30

10

Ул . Советская д.62 (59.625732,112.745359)

26

1,80х0,70

10

Ул . Советская между д.62 –д.64 (59.625551,112.745370)

27

2,50х0,40

10

Ул . Советская д.63 (59.625308,112.745394)

28

31х3

10

Ул . Советская между д.63 –д.65 (59.625113,112.745419)

29

7х1,5

10

Перекрёсток ул.Советская -ул.Майская  (59.624825,112.745442)

47

0,4х0,8

3

ФИО5 д.29(59.631338,112.744634

48

2,70х0,7

5

ФИО5 д.29(59.631494,112.744581

51

0,6х10,6

3

ФИО5 д.30(59.631092,112.744720

52

0,2х0,2

2

ФИО5 д.30(59.630930,112.744758

53

0,5х0,5

5

ФИО5 д.32(59.630463,112.744825

54

0,6х34

2

ФИО5 д.44(59.628783,112.745095

55

0,5х0,5

7

ФИО5 д.47(59.628295,112.745140

56

0,4х0,5

2

ФИО5 д.52(59.627478,112.745194

57

0,3х0,3

7

ФИО5 д.56(59.626759,112.745334

49

10х2,4

5

ФИО5 д.22(59.632110,112.744404

 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Северный регион" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6000 руб. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно –  телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.

Судья

А.Б. Васильева