Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-86134/2016

21 сентября 2017 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  07 сентября 2017 года.

Полный текст решения изготовлен  21 сентября 2017 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "Инерт" (адрес:  Россия 194292, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>/ЛИТЕРА "А", ОГРН:  

<

***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Норманн-строй" (адрес:  Россия 195112, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...> ОГРН:  

<

***>);

о взыскании 752 655 руб. 52 коп.

 

при участии

- от истца: не явился, извещен

- от ответчика: ФИО2 по доверенности от 27.12.2016

установил:

ООО «Инерт» предъявило иск к ООО "Норманн-строй" и после уточнения исковых требований просит взыскать 2 292 098 руб. 01 коп. задолженности по оплате выполненных работ и 204 463 руб. 93 коп. пеней за просрочку платежа на основании договора подряда № 23-03/16 Зар 3-2 котлован от 23.03.2016.

Ответчик иск признал частично – в части 624 163 руб. 89 коп. основного долга, заявил ходатайство об уменьшении неустойки на основании ст. 333 ГК РФ и предъявил встречный иск о взыскании 631 509 руб. 15 коп. неустойки за просрочку выполнения работ. 

Встречный иск принят к рассмотрению совместно с первоначальным на основании ст.132 АПК РФ.

Заявление ООО «Инерт» о замене истца на ООО «ВАЙД Групп» судом отклонено, т.к. по договору уступки права требования (цессии) № 5 от 03.08.2017 уступлена только часть долга. 

В заседании объявлен перерыв с 31.08.2017 по 07.09.2017. 

Судом установлено: 

Между сторонами заключен договор подряда № 23-03/16 Зар 3-2-котлован от 23.03.2016 и три дополнительных соглашения к нему. 

В соответствии с договором ООО «Инерт» - подрядчик обязался выполнить комплекс работ по устройству котлована на объекте по адресу: Санкт-Петербург, пос.Парголово, Торфяное, Ольгинская дорога, участок 5 (северо-восточнее дома 4, литера А по Заречной улице) – 3 этап строительства. 

Срок начала выполнения работ в редакции дополнительного соглашения № 2 от 20.06.2016 – 01.06.2016.

Стоимость работ в редакции дополнительного соглашения № 3 от 11.08.2016 составляет 3 432 114 руб. 96 коп.; срок окончания работ – 17.08.2016. 

Подрядчик выполнил работы частично. Часть работ была выполнена с недостатками, что подтверждается двусторонним актом от 14.09.2016. 

Подрядчик выполнил работы на сумму 1 833 532 руб. 38 коп. 

ООО «Норманн-Строй» - генподрядчик отплатил сумму в размере 1 140 016 руб. 95 коп., что подтверждается платежными поручениями № 2526 от 09.08.2016 и № 2525 от 09.08.2016. 

Согласно п.4.3 договора окончательные расчеты между сторонами производятся в размере 10% после наступления следующих событий: передачи фронта работ для устройства свайного основания или для устройства монолитной фундаментной плиты и устранения подрядчиком всех замечаний генподрядчика, возникших в процессе передачи фронта работ, что оформляется соответствующим актом, подписанным сторонами. Поскольку акты не подписывались, фронт работ подрядчиком генподрядчику не передавался, оснований для оплаты 10% от стоимости работ не имеется. 

Задолженность генподрядчика составляет: 1 833 532 руб. 38 коп. – 1 140 016 руб. 95 коп. – 63 943 руб. 30 коп. = 624 163 руб. 89 коп. 

Претензией от 17.02.2017 исх. № 16496 генподрядчик заявил о расторжении договора.

Неустойка за несвоевременную оплату в соответствии с п.10.2 договора составит за период с 20.12.2016 по 15.02.2017 35 500 руб. 00 коп. 

В остальной части первоначальный иск удовлетворению не подлежит. 

Встречный иск обоснован по праву и размеру. 

Работы в срок до 17.08.2016 подрядчиком не выполнены. 

В соответствии с п. 10.3 договора за нарушение сроков сдачи работ предусмотрена неустойка в размере 0,1 % от общей стоимости работ по договору за каждый день просрочки, которая не должна превышать 20% от общей стоимости работ. Неустойка составляет 631 509 руб. 15 коп. 

Встречный иск подлежит удовлетворению в полном объеме с отнесением расходов по государственной пошлине на подрядчика. 

Суд производит зачет встречных однородных требований. В результате зачета с ООО «Норманн-Строй» в пользу ООО «Инерт» подлежит взысканию 11 426 руб. 28 коп. задолженности, а в доход федерального бюджета 16 193 руб. 00 коп. государственной пошлины по первоначальному иску.     

Руководствуясь статьями 309, 310, 330, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Норманн-строй" в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инерт» по первоначальному иску 659 663 руб. 89 коп., из них: 624 163 руб. 89 коп. основного долга и 35 500 руб. 00 коп. пеней, а в доход федерального бюджета 16 193 руб. 00 коп. государственной пошлины. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инерт» в пользу общества с ограниченной ответственностью "Норманн-строй" по встречному иску 631 509 руб. 15 коп. неустойки и 16 728 руб. 46 коп. расходов по государственной пошлине. 

Произвести зачет встречных требований. 

В результате зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Норманн-строй" в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инерт» 11 426 руб. 28 коп. задолженности. 

Взыскать общества с ограниченной ответственностью "Норманн-строй" в доход федерального бюджета 16 193 руб. 00 коп. государственной пошлины по первоначальному иску.

Выдать исполнительные листы в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Сергеева О.Н.