Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-5121/2020

01 июня 2020 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена 14 мая 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 01 июня 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Нестерова С.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" (адрес: 188653, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, нп военный городок Агалатово, 161, ОГРН: 

<

***>);

к Обществу с ограниченной ответственностью "ЛиК строй" (адрес: 197374, 

<

...>, лит. А, пом. 2-Н, ОФИС 302, ОГРН: 

<

***>);

об обязании,

при участии

- от истца: ФИО2 – по доверенности от 10.03.2020;

- от ответчика: не явился, извещен;

установил:

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" (далее – истец, Фонд) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "ЛиК строй" (далее – ответчик, Общество) об обязании Общества исполнить гарантийные обязательства по договору от 16.08.2016 № 2016-6 в отношении работ по указанным объектам, в составе и объеме, предусмотренными прилагаемыми локальными сметами (приложение № 59) и дефектными ведомостями (приложения № 44-56) в срок не позднее 20 календарных дней с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда, а также 6000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Определением суда от 25.02.2020 исковое заявление принято к производству, судебное заседание назначено на 14.05.2020.

В судебном заседании представитель истца в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) уточнил заявленные исковые требования и просил обязать Общество с ограниченной ответственностью "ЛиК строй" исполнить гарантийные обязательства по договору от 16.08.2016 № 2016-6 в отношении работ по указанным объектам, в составе и объеме, предусмотренными прилагаемыми локальными сметами (приложение № 59) и дефектными ведомостями (приложения № 44-56) в срок не позднее 20 календарных дней с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда, а именно:

<

...> (фасад):

- установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 180 м²;

- сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича 18 отверстий;

- устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада 180 м²;

- заделка гнезд на фасадах после разборки лесов 18 отверстий;

- перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов 180 м²;

- сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли 180 м²;

- окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная 180 м²;

- окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (прим. грунт-эмалью) 4,8 м²;

- ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 36,2 м²;

- обеспыливание поверхности 36,2 м²;

- покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен наружных 36,2 м²;

- сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли 36,2 м²;

- окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная 36,2 м²;

- погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1,752 т;

- перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1,752 т;

<

...> (фасад):

- установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 369,9 м²;

- сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича 37 отверстий;

- устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада             369,9 м²;

- заделка гнезд на фасадах после разборки лесов 37 отверстий;

- отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных                  369,9 м²;

- улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен 369,9 м²;

- сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли 369,9 м²;

- окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная 369,9 м²;

- перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов 101 м²;

- ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 37,8 м²;

- покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен наружных 37,8 м²;

- сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли 37,8 м²;

- окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная 35,28 м²;

- погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1,8322 т;

- перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1,8322 т;

г. Сланцы, М. Горького, д. 6 (фасад):

- установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 495, 5 м²;

- сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича 495, 5 м²;

- заделка гнезд на фасадах после разборки лесов 50 отверстий;

- перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов 495, 5 м²;

- сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли 495, 5 м²;

- окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная 495, 5 м²;

- ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 35,28 м²;

- обеспыливание поверхности 35,28 м²;

- покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен наружных 35,28 м²;

- сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли 35,28 м²;

- окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная 35,28 м²;

- погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1,711 т;

- перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1,711 т;

<

...> (фасад):

- установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 215 м²;

- сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича 22 отверстия;

- устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада                  215 м²;

- заделка гнезд на фасадах после разборки лесов 22 отверстия;

- перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов 214,25 м²;

- шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 214,25 м²;

- окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов 214,25 м²;

- очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов 50,3 м²;

- шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 50,3 м²;

- окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов 50,3 м²;

- погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 0,3 т;

- перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 0,3 т.;

<

...> (фасад):

- установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 100,3 м²;

- сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича 11 отверстий;

- устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада               100,3 м²;

- заделка гнезд на фасадах после разборки лесов 11 отверстий;

- перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов 100,3 м²;

- шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 100,3 м²;

- окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов 100,3 м²;

- ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 59,9 м²;

- шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 59,9 м²;

- окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов 59,9 м²;

- погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 2,9 т;

- перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 2,9 т;

<

...> (фасад):

- установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 10 м²;

- сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича 10 отверстий;

- устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада 10 м²;

- заделка гнезд на фасадах после разборки лесов 10 отверстий;

- ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 7 м²;

- обеспыливание поверхности 7 м²;

- шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 7 м²;

- окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов 7 м²;

- очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов 18 м²;

- отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных 18 м²;

- протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 18 м²;

- улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен 18 м²;

- покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен наружных 18 м²;

- шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 18 м²;

- окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов 18 м²;

- монтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения 0,041 т конструкций;

- окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 4 м² окрашиваемой поверхности;

- устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля 6 м² кровли;

- погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1,21 т;

- перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1,21 т;

<

...> (фасад):

- установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 52 м²;

- с отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича 6 отверстий;

- устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада 520 м² сетки;

- заделка гнезд на фасадах после разборки лесов 6 отверстий;

- ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 40 м² 

отремонтированной поверхности;

- обеспыливание поверхности 40 м² обеспыливаемой поверхности

- шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 40 м² обработанной поверхности;

- окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов 40 м² окрашиваемой поверхности;

- очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов 25 м² расчищенной поверхности;

- отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных 25 м²;

- протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 25 м² протравленной поверхности;

- улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен 25 м² оштукатуриваемой поверхности;

- покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен наружных 25 м² покрытия;

- шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 25 м² обработанной поверхности;

- окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов 25 м² окрашиваемой поверхности;

- погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 3,15 т;

- перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 3,15 т;

<

...> (фасад):

- установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 15 м² вертикальной проекции для наружных лесов;

- сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича 2 отверстия;

- устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада 15 м² сетки;

- заделка гнезд на фасадах после разборки лесов 2 отверстия;

- ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 8 м² отремонтированной поверхности;

- обеспыливание поверхности 8 м² обеспыливаемой поверхности;

- шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 8 м² обработанной поверхности;

- окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов 8 м² окрашиваемой поверхности;

- очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов 4,5 м² расчищенной поверхности;

- отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных 4,5 м²; 

- протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 4,5 м² протравленной поверхности;

- улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен 4,5 м² оштукатуриваемой поверхности;

- покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен наружных 4,5 м² покрытия;

- шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 4,5 м² обработанной поверхности;

- окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов 4,5 м² окрашиваемой поверхности;

- очистка поверхности щетками 3 м² очищаемой поверхности;

- ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов 3 м² отремонтированной площади развернутой поверхности тяг;

- шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 3 м² обработанной поверхности;

- окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов 3 м² окрашиваемой поверхности;

- погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 т;

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1 т;

<

...> (крыша):

- ремонт металлических парапетных решеток 0,4 м решеток;

- разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы 4 м² покрытия;

- устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля 4 м² кровли;

- дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием 1 м²;

- отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных 20 м²;

- обеспыливание поверхности 20 м² обеспыливаемой поверхности;

- штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен 20 м² оштукатуриваемой поверхности;

- окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая 20 м² окрашиваемой поверхности;

- погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 т;

- перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1 т;

г. Сланцы, М. Горького, д. 5/9 (крыша):

- ограждение кровель перилами /снегозадержатели/ 61,6 м ограждения;

- устройство: ходов на чердаке 49,6 п. м ходов;

- антисептическая обработка деревянных конструкций составом ""Пирилакс"" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления 49,6 м² обрабатываемой поверхности;

- монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений (прим. крепление) 0,012 т конструкций;

- штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен 50,4 м² оштукатуриваемой поверхности;

- погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 0,3 т;

- перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 0,3 т;

г. Сланцы, М. Горького, д. 1/11 (крыша):

- укладка ходовых досок 68 м ходов;

- антисептическая обработка деревянных конструкций составом ""Пирилакс"" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления 68 м² обрабатываемой поверхности;

- отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных                  33,92 м²;

- обеспыливание поверхности 33,92 м² обеспыливаемой поверхности;

- штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен 33,92 м² оштукатуриваемой поверхности;

- погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1,64 т;

- перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1,64 т;

г. Сланцы, М. Горького, д. 1/11 (фасад):

- установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 470,88 м² вертикальной проекции для наружных лесов;

- сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича 48 отверстий;

- устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада 470,88 м² сетки;

- заделка гнезд на фасадах после разборки лесов 48 отверстий;

- перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов 470,88 м² перетертой поверхности;

- шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 470,88 м² обработанной поверхности;

- окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов 470,88 м² окрашиваемой поверхности;

- погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 0,3 т;

- перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 0,3 т;

<

...> (фасад):

- установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 70 м² вертикальной проекции для наружных лесов;

- сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича 70 отверстий;

- устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада 70 м² сетки;

- заделка гнезд на фасадах после разборки лесов 70 отверстий;

- перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов 74,9 м² перетертой поверхности;

- очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов 29,5 м² расчищенной поверхности;

- ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 29,5 м² отремонтированной поверхности;

- шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 29,5 м² обработанной поверхности;

- окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов 104,4 м² окрашиваемой поверхности;

- очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов 85,2 м² расчищенной поверхности;

- шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 85,2 м² обработанной поверхности;

- окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов 85,2 м² окрашиваемой поверхности;

- погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1,43 т;

- перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1,43 т;

<

...> (крыша):

- разборка мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 16 м² покрытия;

- устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 16 м² покрытия;

- промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали 16 м² кровли;

- установка приборов: оконных 2 комплекта;

- разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы 47 м² покрытия;

- устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля 47 м² кровли;

- отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных 10 м²;

- обеспыливание поверхности 10 м² обеспыливаемой поверхности;

- штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная 10 м² оштукатуриваемой поверхности;

- окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая 10 м² окрашиваемой поверхности;

- погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 0,5 т;

- перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 0,5 т.

Уточнения приняты судом.

О времени и месте судебного заседания, назначенного на 14.05.2020, ответчик извещен надлежащим образом, в судебное заседание не явился, отзыв на иск не представил, в связи с чем, руководствуясь частью 3 статьи 156 и статьёй 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), суд признал дело подготовленным к рассмотрению, завершил предварительное судебное заседание и перешел к рассмотрению спора по существу.

Как следует из материалов дела, 16.08.2016 между сторонами заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 2016-6 (далее - договор), по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сланцевского муниципального района Ленинградской области по следующим адресам:

г. Сланцы, ул. Ленина, д. 2, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...> 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>.

В соответствии с пунктом 9.1 договора подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах 66 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Согласно пункту 9.2 договора, если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, заказчик должен письменно заявить о них подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

В обоснование исковых требований истец указал, что в соответствии с актами приемки выполненных работ по форме КС-2 работы выполнены ответчиком и сданы истцу 21.10.2016.

Вместе с тем, после завершения выполнения работ в течение периода гарантийного срока обнаружены недостатки (дефекты) в выполненных работах по следующим объектам:

- 

<

...> (фасад);

- 

<

...> (фасад);

- г. Сланцы, М. Горького, д. 6 (фасад);

- 

<

...> (фасад);

- 

<

...> (фасад);

- 

<

...> (фасад);

- 

<

...> (фасад);

- 

<

...> (фасад);

- 

<

...> (крыша);

- г. Сланцы, М. Горького, д. 5/9 (крыша);

- г. Сланцы, М. Горького, д. 1/11 (крыша);

- г. Сланцы, М. Горького, д. 1/11 (фасад);

- 

<

...> (фасад);

- 

<

...> (крыша),

о чем составлены соответствующие акты.

Претензией от 07.11.2019 № И-9703/2019 об исполнении гарантийных обязательств, истец направил подрядчику локальные сметы на устранение недостатков капитального ремонта по указанным объектам и потребовал устранить обнаруженные дефекты в срок не позднее 7 календарных дней с момента получения претензии, которая оставлена Обществом без удовлетворения, что и послужило основанием для обращения Фонда с соответствующим иском в арбитражный суд.

Изучив материалы дела, арбитражный суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

В силу пункта 1 статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

В соответствии с пунктом 1 статьи 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

Согласно пункту 1 статьи 722 ГК РФ, в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721).

Как видно из материалов дела, недостатки работ выявлены в пределах установленного контрактом гарантийного срока.

О выявленных недостатках заказчик известил подрядчика претензией от 07.11.2019 № И-9703/2019, в которой потребовал устранить соответствующие недостатки работ, вместе с тем, указанные недостатки работ ответчиком не устранены.

При таких обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

В связи с удовлетворением исковых требований в полном объеме и в соответствии со статьёй 110 АПК РФ относятся на ответчика и судебные расходы истца по уплате государственной пошлины..

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Иск удовлетворить.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «ЛиК Строй» исполнить гарантийные обязательства по договору от 16.08.2016 № 2016-6 в отношении работ по указанным объектам, в составе и объеме, предусмотренными прилагаемыми локальными сметами (приложение № 59) и дефектными ведомостями (приложения № 44-56) в срок не позднее 20 календарных дней с момента вступления в законную силу решения суда, а именно:

<

...> (фасад):

- установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 180 м²;

- сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича 18 отверстий;

- устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада 180 м²;

- заделка гнезд на фасадах после разборки лесов 18 отверстий;

- перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов 180 м²;

- сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли 180 м²;

- окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная 180 м²;

- окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (прим. грунт-эмалью) 4,8 м²;

- ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 36,2 м²;

- обеспыливание поверхности 36,2 м²;

- покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен наружных 36,2 м²;

- сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли 36,2 м²;

- окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная 36,2 м²;

- погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1,752 т;

- перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1,752 т;

<

...> (фасад):

- установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 369,9 м²;

- сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича 37 отверстий;

- устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада             369,9 м²;

- заделка гнезд на фасадах после разборки лесов 37 отверстий;

- отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных                  369,9 м²;

- улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен 369,9 м²;

- сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли 369,9 м²;

- окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная 369,9 м²;

- перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов 101 м²;

- ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 37,8 м²;

- покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен наружных 37,8 м²;

- сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли 37,8 м²;

- окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная 35,28 м²;

- погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1,8322 т;

- перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1,8322 т;

г. Сланцы, М. Горького, д. 6 (фасад):

- установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 495, 5 м²;

- сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича 495, 5 м²;

- заделка гнезд на фасадах после разборки лесов 50 отверстий;

- перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов 495, 5 м²;

- сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли 495, 5 м²;

- окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная 495, 5 м²;

- ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 35,28 м²;

- обеспыливание поверхности 35,28 м²;

- покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен наружных 35,28 м²;

- сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли 35,28 м²;

- окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная 35,28 м²;

- погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1,711 т;

- перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1,711 т;

<

...> (фасад):

- установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 215 м²;

- сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича 22 отверстия;

- устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада                  215 м²;

- заделка гнезд на фасадах после разборки лесов 22 отверстия;

- перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов 214,25 м²;

- шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 214,25 м²;

- окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов 214,25 м²;

- очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов 50,3 м²;

- шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 50,3 м²;

- окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов 50,3 м²;

- погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 0,3 т;

- перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 0,3 т.;

<

...> (фасад):

- установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 100,3 м²;

- сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича 11 отверстий;

- устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада               100,3 м²;

- заделка гнезд на фасадах после разборки лесов 11 отверстий;

- перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов 100,3 м²;

- шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 100,3 м²;

- окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов 100,3 м²;

- ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 59,9 м²;

- шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 59,9 м²;

- окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов 59,9 м²;

- погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 2,9 т;

- перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 2,9 т;

<

...> (фасад):

- установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 10 м²;

- сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича 10 отверстий;

- устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада 10 м²;

- заделка гнезд на фасадах после разборки лесов 10 отверстий;

- ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 7 м²;

- обеспыливание поверхности 7 м²;

- шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 7 м²;

- окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов 7 м²;

- очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов 18 м²;

- отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных 18 м²;

- протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 18 м²;

- улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен 18 м²;

- покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен наружных 18 м²;

- шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 18 м²;

- окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов 18 м²;

- монтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения 0,041 т конструкций;

- окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 4 м² окрашиваемой поверхности;

- устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля 6 м² кровли;

- погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1,21 т;

- перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1,21 т;

<

...> (фасад):

- установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 52 м²;

- с отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича 6 отверстий;

- устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада 520 м² сетки;

- заделка гнезд на фасадах после разборки лесов 6 отверстий;

- ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 40 м² 

отремонтированной поверхности;

- обеспыливание поверхности 40 м² обеспыливаемой поверхности

- шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 40 м² обработанной поверхности;

- окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов 40 м² окрашиваемой поверхности;

- очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов 25 м² расчищенной поверхности;

- отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных 25 м²;

- протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 25 м² протравленной поверхности;

- улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен 25 м² оштукатуриваемой поверхности;

- покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен наружных 25 м² покрытия;

- шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 25 м² обработанной поверхности;

- окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов 25 м² окрашиваемой поверхности;

- погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 3,15 т;

- перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 3,15 т;

<

...> (фасад):

- установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 15 м² вертикальной проекции для наружных лесов;

- сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича 2 отверстия;

- устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада 15 м² сетки;

- заделка гнезд на фасадах после разборки лесов 2 отверстия;

- ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 8 м² отремонтированной поверхности;

- обеспыливание поверхности 8 м² обеспыливаемой поверхности;

- шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 8 м² обработанной поверхности;

- окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов 8 м² окрашиваемой поверхности;

- очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов 4,5 м² расчищенной поверхности;

- отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных 4,5 м²; 

- протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором 4,5 м² протравленной поверхности;

- улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен 4,5 м² оштукатуриваемой поверхности;

- покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен наружных 4,5 м² покрытия;

- шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 4,5 м² обработанной поверхности;

- окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов 4,5 м² окрашиваемой поверхности;

- очистка поверхности щетками 3 м² очищаемой поверхности;

- ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов 3 м² отремонтированной площади развернутой поверхности тяг;

- шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 3 м² обработанной поверхности;

- окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов 3 м² окрашиваемой поверхности;

- погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 т;

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1 т;

<

...> (крыша):

- ремонт металлических парапетных решеток 0,4 м решеток;

- разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы 4 м² покрытия;

- устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля 4 м² кровли;

- дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием 1 м²;

- отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных 20 м²;

- обеспыливание поверхности 20 м² обеспыливаемой поверхности;

- штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен 20 м² оштукатуриваемой поверхности;

- окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая 20 м² окрашиваемой поверхности;

- погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 т;

- перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1 т;

г. Сланцы, М. Горького, д. 5/9 (крыша):

- ограждение кровель перилами /снегозадержатели/ 61,6 м ограждения;

- устройство: ходов на чердаке 49,6 п. м ходов;

- антисептическая обработка деревянных конструкций составом ""Пирилакс"" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления 49,6 м² обрабатываемой поверхности;

- монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений (прим. крепление) 0,012 т конструкций;

- штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен 50,4 м² оштукатуриваемой поверхности;

- погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 0,3 т;

- перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 0,3 т;

г. Сланцы, М. Горького, д. 1/11 (крыша):

- укладка ходовых досок 68 м ходов;

- антисептическая обработка деревянных конструкций составом ""Пирилакс"" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления 68 м² обрабатываемой поверхности;

- отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных                  33,92 м²;

- обеспыливание поверхности 33,92 м² обеспыливаемой поверхности;

- штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен 33,92 м² оштукатуриваемой поверхности;

- погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1,64 т;

- перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1,64 т;

г. Сланцы, М. Горького, д. 1/11 (фасад):

- установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 470,88 м² вертикальной проекции для наружных лесов;

- сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича 48 отверстий;

- устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада 470,88 м² сетки;

- заделка гнезд на фасадах после разборки лесов 48 отверстий;

- перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов 470,88 м² перетертой поверхности;

- шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 470,88 м² обработанной поверхности;

- окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов 470,88 м² окрашиваемой поверхности;

- погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 0,3 т;

- перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 0,3 т;

<

...> (фасад):

- установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 70 м² вертикальной проекции для наружных лесов;

- сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича 70 отверстий;

- устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада 70 м² сетки;

- заделка гнезд на фасадах после разборки лесов 70 отверстий;

- перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов 74,9 м² перетертой поверхности;

- очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов 29,5 м² расчищенной поверхности;

- ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 29,5 м² отремонтированной поверхности;

- шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 29,5 м² обработанной поверхности;

- окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов 104,4 м² окрашиваемой поверхности;

- очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов 85,2 м² расчищенной поверхности;

- шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов 85,2 м² обработанной поверхности;

- окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов 85,2 м² окрашиваемой поверхности;

- погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1,43 т;

- перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 1,43 т;

<

...> (крыша):

- разборка мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 16 м² покрытия;

- устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 16 м² покрытия;

- промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали 16 м² кровли;

- установка приборов: оконных 2 комплекта;

- разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы 47 м² покрытия;

- устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля 47 м² кровли;

- отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных 10 м²;

- обеспыливание поверхности 10 м² обеспыливаемой поверхности;

- штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная 10 м² оштукатуриваемой поверхности;

- окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая 10 м² окрашиваемой поверхности;

- погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 0,5 т;

- перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза 0,5 т.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ЛиК строй" в пользу Некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" 6 000 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме.

Судья С. А. Нестеров