299/2023-20435(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А24-813/2023

г. Петропавловск-Камчатский

05 мая 2023 года

Решение в виде резолютивной части принято 27 апреля 2023 года. Мотивированное решение изготовлено 05 мая 2023 года. 

Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи О.А. Душенкиной, рассмотрев  в порядке упрощенного производства дело  

по иску общества с ограниченной ответственностью «ВостокСтройЭнергоРемонт»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 690091, 

<

...>)  

к публичному акционерному обществу энергетики и электрификации «Камчатскэнерго»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 683001, 

<

...>)  

о взыскании 135 823 руб. неустойки по договору подряда от 01.11.2019 № 59-19, 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «ВостокСтройЭнергоРемонт» (далее – истец,  ООО «ВСЭР») обратилось в арбитражный суд с иском к публичному акционерному  обществу энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» (далее – ответчик,  ПАО «Камчатскэнерго») о взыскании 135 823 руб. неустойки за период с 10.01.2020 по  06.03.2020.  

Требования заявлены истцом со ссылкой на статьи 309, 310, 746 Гражданского  кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и мотивированы ненадлежащим  исполнением ответчиком обязательств по договору подряда от 01.11.2019 № 59-19,  выразившимся в просрочке оплаты выполненных работ.  

Определением от 03.03.2023 исковое заявление принято к производству суда, дело  назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства в соответствии со  статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее –  АПК РФ). Лица, участвующие в деле, о начавшемся судебном процессе извещены по  правилам статей 121-123 АПК РФ, в том числе путем публикации судебного акта на сайте  суда в сети Интернет, а также путем направления им копии вышеуказанного определения.  

В отзыве на иск ответчик выразил несогласие с заявленными истцом требованиями,  заявил о пропуске срока исковой давности и о применении статьи 333 ГК РФ.  

После истечения сроков, установленных в соответствии с частью 3 статьи 228  АПК РФ, дело рассмотрено по правилам главы 29 АПК РФ в порядке упрощенного  производства без вызова сторон.  

27.04.2023 принято решение путем подписания его резолютивной части,  размещенной на сайте суда в сети Интернет, которым исковые требования удовлетворены  

частично.  

В срок, установленный частью 2 статьи 229 АПК РФ, истец обратился с заявлением  о составлении мотивированного решения.  

При рассмотрении дела в порядке упрощенного производства суд по результатам  исследования представленных документов установил, что 01.11.2019 между истцом  (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен договор подряда № 59-19 «Ремонт пода, с  заменой экранных труб, котлоагрегата, ст. № 10 станции ТЭЦ-1 филиала ПАО  «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ».  

По условиям заключенного договора (пункт 1.1) подрядчик принял на себя  обязательство по заданию заказчика в соответствии с техническим заданием (приложение   № 1) и ведомостью объемов работ (приложение № 1.1) выполнить работы по ремонту  пода, с заменой экранных труб, котлоагрегата, ст. № 10 станции ТЭЦ-1 филиала  ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, и сдать результат работ заказчику, а заказчик –  создать подрядчику указанные в договоре условия для выполнения работ, принять  результат работ и уплатить цену договора.  

Цена договора определена сметным расчетом (приложение № 2) в сумме  7 831 770,89 руб. с НДС (пункт 3.1). Оплата производится в размере 100% от цены  договора в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами документов,  указанных в пункте 4.1 договора, на основании счёта-фактуры, выставленного  подрядчиком, и с учетом пункта 3.5.2 договора.  

В случае нарушения заказчиком сроков оплаты, подрядчик вправе требовать  уплаты заказчиком исключительной неустойки в размере 0,1 % от несвоевременно  оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от несвоевременно  оплаченной суммы (пункт 6.2).  

По факту выполнения работ на сумму 2 716 466,42 руб. и сдачу выполненных работ  заказчику по акту по форме Р-2 и справке по форме Р-3 от 02.12.2019 № 1, которые  заказчиком приняты без замечаний и возражений, подрядчик выставил для оплаты работ  счет-фактуру от 02.12.2019 № 135 на сумму 2 716 466,42 руб.  

Платежными поручениями от 14.02.2020 № 3866 на сумму 716 466,42 руб., от  06.03.2020 № 6292 на сумму 2 000 000 руб. выполненная подрядчиком работа по акту и  справке от 02.12.2019 № 1 заказчиком полностью оплачена.  

Ссылаясь на допущенную просрочку оплаты работ, истец направил ответчику  претензию от 21.12.2022 № 497 с требованием об оплате неустойки.  

В ответе на претензию ответчик указал, что расчет неустойки произведен с  нарушением условий пункта 6.2 договора подряда от 01.11.2019 № 59-19.  

Ссылаясь на отказ ПАО «Камчатскэнерго» в выплате неустойки, истец обратился с  рассматриваемыми требованиями в суд.  

Ответчик, в свою очередь, направил отзыв на иск, в котором заявил о пропуске  истцом срока исковой давности по требованию о взыскании неустойки за период до  26.02.2020.  

Проанализировав содержание положенного в основание иска договора и  документов, связанных с его исполнением, суд пришел к выводу, что сторонами  достигнуто соглашение по всем существенным условиям, присущим для договоров  данного вида, и между истцом и ответчиком сложились правоотношения, регулируемые  по правилам главы 37 ГК РФ, а также общими положениями ГК РФ об обязательствах и  договоре.  

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона  (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную  работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и  оплатить его.  

Исходя из положений пункта 1 статьи 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются  начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в  

договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы  (промежуточные сроки). При этом подрядчик несет ответственность за нарушение как  начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Иное может  быть установлено законом, иными правовыми актами или предусмотрено договором  (абзац второй пункта 1 статьи 708 ГК РФ).  

В силу положений статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона,  иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и  одностороннее изменение его условий не допускаются.  

В соответствии со статьей 329 ГК РФ исполнение обязательств может  обеспечиваться неустойкой, которая по своей правовой природе является мерой  имущественной ответственности.  

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором  денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему  убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ). При этом в силу статьи 331 ГК РФ соглашение о  неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного  обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения  о неустойке.  

Следовательно, для привлечения лица к ответственности в виде неустойки  необходимо установить факт неисполнения либо ненадлежащего исполнения им  принятых на себя обязательств, а также, с учетом положений статьи 331 ГК РФ,  установить, что за нарушение данного обязательства договором либо законом установлена  неустойка.  

Исходя из условий заключенного сторонами договора, сданные подрядчиком  02.12.2019 работы подлежали оплате в срок до 09.01.2020 включительно (с учетом  положений статьи 193 ГК РФ), тогда как фактически оплата произведена заказчиком  14.02.2020 и 06.03.2020.  

Оценив представленные доказательства в их совокупности по правилам статьи 71  АПК РФ, арбитражный суд приходит к выводу, что поскольку факт просрочки  выполнения работ материалами дела подтвержден, ответчиком не оспаривается, а  соглашение о неустойке сторонами достигнуто, требование о применении к  ПАО «Камчатскэнерго» гражданско-правовой ответственности в виде неустойки за  нарушение срока выполнения работ заявлено истцом правомерно.  

Рассмотрев заявление ответчика о пропуске истцом срока исковой давности, суд  пришел к следующему выводу.  

Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право  которого нарушено (статья 195 ГК РФ).  

Пунктом 2 статьи 199 ГК РФ предусмотрено, что исковая давность применяется  судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.  

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в  споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. Причем если  будет установлено, что сторона по делу пропустила срок исковой давности, то при  наличии заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности суд вправе  отказать в удовлетворении требования только по этим мотивам, без исследования иных  обстоятельств дела (пункт 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм  Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» (далее –  Постановление № 43)).  

Согласно статье 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со  дня, определяемого в соответствии со статьей 200 ГК РФ, которая, в свою очередь,  

устанавливает, что если законом не установлено иное, течение срока исковой давности  начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права  и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.  

Пунктом 2 статьи 200 ГК РФ установлено, что по обязательствам с определенным  сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока  исполнения.  

Просрочка исполнения обязательства представляет собой правонарушение,  имеющее длящийся характер, и предусмотренная договором неустойка за просрочку  исполнения представляет собой "текущую" меру ответственности, подлежащую  применению (начислению) за каждый день просрочки исполнения обязательства. Поэтому  срок исковой давности взыскания неустойки должен исчисляться отдельно по каждому  дню просрочки. Соответствующая правовая позиция указана в пункте 25 Постановления   № 43, согласно которому срок исковой давности по требованию о взыскании неустойки  (статья 330 ГК РФ) или процентов, подлежащих уплате по правилам статьи 395 ГК РФ,  исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу, определяемому  применительно к каждому дню просрочки.  

Исходя из того, что пунктом 6.2 договора для заказчика установлена  ответственность за нарушение сроков оплаты в виде неустойки, которая подлежит  начислению за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства, на стороне  ПАО «Камчатскэнерго» каждый день за период с момента истечения сроков оплаты работ  по счету-фактуре от 02.12.2019 № 135 (за период с 10.01.2020) и до момента исполнения  обязательства (то есть до 14.02.2020 на всю сумму долга и до 06.03.2020 на остаток долга)  возникало обязательство по уплате подрядчику неустойки.  

С учетом приведенных разъяснений, срок исковой давности по обязательствам  ответчика оплатить истцу неустойку за нарушение срока оплаты работ подлежит  исчислению применительно к каждому дню просрочки, входящему в период с 10.01.2020  по 06.03.2020.  

При этом с учетом разъяснений, указанных в пункте 16 Постановления № 43 со  ссылкой на пункт 3 статьи 202 ГК РФ, течение срока исковой давности  приостанавливается, если стороны прибегли к несудебной процедуре разрешения спора,  обращение к которой предусмотрено законом, в том числе к обязательному  претензионному порядку. В этих случаях течение исковой давности приостанавливается  на срок, установленный законом для проведения этой процедуры, а при отсутствии такого  срока – на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры (аналогичный вывод  содержится в определении Верховного Суда Российской Федерации от 04.03.2019 № 305- ЭС18-21546).  

Следовательно, требование о взыскании неустойки подлежит удовлетворению в  части, которая входит в трехлетний период, предшествующий дате предъявления иска о  взыскании неустойки, продленный на период, установленный для соблюдения  досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора (аналогичная позиция  изложена, в частности, в определениях Верховного Суда Российской Федерации от  04.03.2019 № 305-ЭС18-21546, от 18.03.2019 № 309-ЭС19-980).  

Согласно пункту 5 статьи 4 АПК РФ гражданско-правовые споры о взыскании  денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие  неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда  после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати  календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или)  порядок не установлены законом или договором.  

Пунктом 16.3 договора установлен срок рассмотрения претензии, равный 15  рабочим дням с момента ее получения.  

Таким образом, с учетом установления соглашением сторон срока на досудебное  урегулирование споров (15 рабочих дней), течение исковой давности по требованиям в  

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора подлежит  приостановлению на указанный срок.  

Следовательно, применительно к рассматриваемым требованиям о взыскании  неустойки за нарушение срока оплаты работ установлен общий трехгодичный срок  исковой давности, подлежащий продлению на 15 рабочих дней, установленных сторонами  для досудебного порядка урегулирования спора (3 года + 15 рабочих дней).  

С учетом вышеназванных положений гражданского законодательства, разъяснений  Пленума Верховного Суда Российской Федерации, правовой позиции высшей судебной  инстанции, истец вправе требовать взыскания с ответчика неустойки за трехлетний  период, предшествующий дате предъявления иска, продленный на 15-дневный (в рабочих  дня) срок, установленный договором для соблюдения претензионного порядка  урегулирования спора.  

Поскольку с настоящим иском истец обратился в суд 27.02.2023, он вправе  требовать уплаты неустойки лишь в той ее части, в какой она начислена за период не  ранее, чем с 05.02.2020 (27.02.2023 минус 3 года исковой давности и минус 15 рабочих  дней на соблюдение претензионного порядка).  

Произведя самостоятельный расчет, суд установил, что размер обоснованной  неустойки, входящей в период срока исковой давности, то есть за период с 05.02.2020 по  06.03.2020 составляет 69 164,66 руб. При расчете судом учтена установленная договором  ставка, а также частичное погашение долга, в связи с чем расчет производился в период с  05.02.2020 по 14.02.2020 на сумму всю долга 2 716 466,42 руб., а с 15.02.2020 по  06.03.2020 на остаток долга 2 000 000 руб.  

Таким образом, требование истца признается нормативно обоснованным в части  суммы неустойки, исчисленной за период с 05.02.2020 по 06.03.2020 в размере  69 164,66 руб., а во взыскании остальной части неустойки суд отказывает в связи с  пропуском срока исковой давности, о применении которого заявлено ответчиком.  

Рассмотрев заявление ответчика об уменьшении начисленной истцом неустойки в  порядке статьи 333 ГК РФ, суд пришел к следующему выводу.  

В соответствии со статьей 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно  несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе ее уменьшить. Если  обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность,  суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.  Аналогичные разъяснения приведены в пункте 71 постановления Пленума Верховного  Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых  положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за  нарушение обязательств» (далее – Постановление № 7).  

При этом по смыслу разъяснений, содержащихся в пункте 77 Постановления № 7,  снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой  организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой  организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход  деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна  последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором  необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ).  

Согласно определению Конституционного Суда Российской Федерации от  14.03.2001 № 80-О снижение неустойки на основании статьи 333 ГК РФ является одним  из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против  злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть по существу  - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации,  согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно  нарушать права и свободы других лиц. Именно поэтому в пункте 1 статьи 333 ГК РФ речь  идет не о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить баланс между  применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не  

возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.  

Степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения  обязательства является оценочной категорией, в силу чего суд вправе дать оценку  указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств  конкретного дела, как того требуют положения статьи 71 АПК РФ. При оценке  соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать,  что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то,  что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более  выгодным для должника, чем условия правомерного пользования.  

Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в  том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие  нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 65  АПК РФ). Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае  могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение неустойки  суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательства; длительность  неисполнения обязательства и так далее (пункт 2 информационного письма Президиума  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.07.1997 № 17 «Обзор  практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса  Российской Федерации»).  

Доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить, в частности,  данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных  средств, выдаваемым кредитными организациями лицам, осуществляющим  предпринимательскую деятельность, либо платы по краткосрочным кредитам,  выдаваемым физическим лицам, в месте нахождения кредитора в период нарушения  обязательства, а также о показателях инфляции за соответствующий период (пункт 75  Постановления № 7).  

Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды  кредитора возлагается на ответчика (пункт 73 Постановления № 7).  

Заявляя ходатайство о применении статьи 333 ГК РФ, ответчик должен  представить доказательства, подтверждающие явную несоразмерность неустойки  последствиям нарушения обязательства.  

В свою очередь, возражая против заявления об уменьшении размера неустойки,  кредитор вправе представлять доказательства того, какие последствия имеют подобные  нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах  разумно и осмотрительно, например, указать на изменение средних показателей по рынку  (пункт 74 Постановления № 7).  

Из системного анализа приведенных правовых норм и разъяснений следует, что  основанием для снижения в порядке статьи 333 ГК РФ предъявленной к взысканию  неустойки (штрафа) может быть только ее явная несоразмерность последствиям  нарушения обязательства.  

Учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под  соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства ГК РФ  предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна  и соизмерима с нарушенным интересом.  

Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут  быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы  неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств;  длительность неисполнения обязательств и др. (пункт 2 Информационного письма  Президиума ВАС РФ от 14.07.1997 № 17). Кроме того, разрешая вопрос о соразмерности  неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя  величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суд может исходить из  двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого  

нарушения (абзаца второй пункта 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333  Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 81)).  

Таким образом, снижение размера неустойки в каждом конкретном случае является  одним из предусмотренных законом правовых способов, которыми законодатель наделил  суд в целях недопущения явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения  обязательства. Возложение законодателем на суды решения вопроса об уменьшении  размера неустойки при ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательств  вытекает из конституционных прерогатив правосудия, которое по своей сути признается  таковым, поскольку отвечает требованиям справедливости.  

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства  необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего  незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными  средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного  пользования.  

Кроме того, необходимо учитывать, что в соответствии с положениями пункта 1  статьи 421 ГК РФ юридические лица и граждане свободны в заключении договора.  Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание  соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422  ГК РФ). Согласно пункту 1 статьи 425 ГК РФ договор вступает в силу и становится  обязательным для сторон с момента его заключения.  

В рассматриваемом случае неустойка в размере 0,1% от несвоевременно  оплаченной суммы применена в соответствии с условиями договора, заключенного  истцом и ответчиком по взаимному согласию и без протокола разногласий. Причем  размер неустойки не превышает пределов, установленных пунктом 6.2 договора (не более  5 % от неоплаченной суммы).  

Исключительности обстоятельств, в силу которых может быть применена статья  333 ГК РФ в истолковании ее применения, предписанного Постановлением № 7, суд не  усматривает. Доказательств в подтверждение наличия исключительных обстоятельств,  которые могут быть положены в основу вывода о необходимости снижения неустойки,  как и доказательств чрезмерности начисленной санкции, получения истцом  необоснованной выгоды в результате начисления неустойки, ответчиком в нарушение  статьи 65 АПК РФ не предоставлено. Доводы ответчика о несоразмерности начисленной  неустойки, обусловленные нарушением истцом своих обязательств по иным договорам  подряда, подлежат отклонению, как не имеющие отношения к рассматриваемому спора.  

Названные обстоятельства свидетельствует о выполнении неустойкой своих  функций как способа обеспечения исполнения обязательства, так и меры гражданско-правовой ответственности, что не нарушает баланс интересов должника и кредитора,  стимулируя должника к правомерному поведению, в то же время, не позволяя кредитору  получить несоразмерное удовлетворение за нарушенное право.  

Ответчик, заявляя о несоразмерности взысканной неустойки последствиям  нарушения обязательства, вопреки положениям статьи 65 АПК РФ, не представил в  материалы дела соответствующие доказательства. Размер неустойки согласован  сторонами при заключении договора по взаимному согласию, а уменьшение суммы  неустойки в отсутствие доказательств ее явной несоразмерности последствиям нарушения  обязательств не соответствует принципу соблюдения баланса интересов сторон и ставит  одну сторону процесса в преимущественное положение по отношению к другой стороне.  

С учетом изложенного, суд не находит правовых оснований для применения  положений статьи 333 ГК РФ, в связи с чем требования истца подлежат удовлетворению в  в сумме 69 164,66 руб. за период с 05.02.2020 до 06.03.2020 (с учетом пропуска срока  исковой давности по части требований).  

Понесенные истцом расходы по оплате государственной пошлины в силу статьи  

110 АПК РФ подлежат возмещению ему за счет ответчика пропорционально размеру  удовлетворенных требований, то есть в сумме 2 584 руб.  

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 226–229 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

иск удовлетворить частично. 

Взыскать с публичного акционерного общества энергетики и электрификации  «Камчатскэнерго» в пользу общества с ограниченной ответственностью  «ВостокСтройЭнергоРемонт» 69 164,66 руб. неустойки и 2 584 руб. расходов по оплате  государственной пошлины; всего – 71 748,66 руб.  

В удовлетворении остальной части иска отказать в связи с пропуском срока  исковой давности.  

В удовлетворении заявления публичного акционерного общества энергетики и  электрификации «Камчатскэнерго» о применении статьи 333 Гражданского кодекса  Российской Федерации отказать.  

Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит  немедленному исполнению.  

Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства  может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный  суд Камчатского края в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.  

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде  апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, может быть  обжаловано в Арбитражный суд Дальневосточного округа через Арбитражный суд  Камчатского края в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в  законную силу, по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 АПК РФ.  

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть  подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке  упрощенного производства, на официальном сайте Арбитражного суда Камчатского края  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.kamchatka.arbitr.ru.  

Судья О.А. Душенкина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 02.03.2023 21:20:00Кому выдана Душенкина Ольга Александровна