208/2018-17593(2) 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А20-5579/2017

г. Нальчик

03 мая 2018 года

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики 

в составе судьи Х.Н. Шогенова 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1, ФИО2,  

рассмотрев дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Автомотострой",  г. Нальчик  

к государственному казенному учреждению Кабардино-Балкарской Республики  «Управление дорожного хозяйства», г. Нальчик  

о продлении сроков выполнения работ, при участии: от истца - ФИО3 (руководителя); от ответчика - ФИО4 по дов. от 01.12.2017; 

руководствуясь статьями 167-170, 198-201 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд   

Р Е Ш И Л:

1. Требование истца удовлетворить в полном объеме. 

2. Обязать государственное казенное учреждение Кабардино-Балкарской  

Республики «Управление дорожного хозяйства» продлить срок действия  

государственного контракта № 14-СР от 12.07.2017 на выполнение подрядных  

работ до 30.04.2018. 

3. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд КБР. 

Судья Х.Н. Шогенов