ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-17158/2019

Дело № А40-252490/18

г. Москва

14 мая 2019 года

Резолютивная часть постановления объявлена 13 мая 2019 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 14 мая 2019 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

Председательствующего судьи: Фриева А.Л.,

Судей: Гончарова В.Я., Титовой И.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу МГТУ им. Н.Э.Баумана на решение Арбитражного суда г. Москвы от 15.02.2019 по делу № А40-252490/18, 

по иску АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "БУРЕВЕСТНИК" (603950, 

<

...>, ОГРН:1085259003664, ИНН: 

<

***>, дата регистрации 30.04.2008) к ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)" (105005, 

<

...>, ОГРН:1027739051779 , ИНН:7701002520 дата регистрации 07.08.2002), о взыскании денежных средств в размере 1 219 967 руб. 30 коп.,

при участии в судебном заседании: 

от истца:  не явился, извещен,

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 29.12.2018г.,

У С Т А Н О В И Л:

Акционерное общество «центральный научно-исследовательский институт «БУРЕВЕСТНИК» обратилось в суд с иском к Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет)» о взыскании денежных средств в размере 1 219 967 руб. 30 коп. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 15.02.2019 исковые требования удовлетворены в полном объеме. 

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции посчитал факт наличия долга документально подтвержденным. 

Ответчик, не согласившись с решением суда, обратился с апелляционной жалобой, в которой просил решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт. 

Ответчик в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы и просил ее удовлетворить.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии с главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Суд апелляционной инстанции, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что основания для отмены или изменения решения Арбитражного суда г. Москвы от 15.02.2019 отсутствуют.

Как следует из материалов дела, между АО «ЦНИИ «Буревестник» (исполнитель) и МГТУ «им. Н.Э. Баумана» (заказчик) был заключен договор № 1618187140032452466001573/33/16 от 22.09.2016 на выполнение составной части научно-исследовательской работы в соответствии с требованиями технического задания (ТЗ) по теме «Исследования по созданию системы комплексирования артиллерийских систем и устройств получения, обработки и передачи информации в электронные устройства на борту снаряда» (шифр «Барьер-НН») далее именуется - СЧ НИР «Барьер-НН».

В соответствии с п. 2.2 договора содержание и сроки выполнения СЧ НИР (этапа) определяются ТЗ и календарным планом выполнения НИР. Цена договора определяется протоколом согласования цены.

Объем работ был разделен на 3-ти самостоятельных этапа СЧ НИР «Барьер-НН» из которых работы по этапу 1 были выполнены АО «ЦНИИ «Буревестник» и оплачены МГТУ «им. Н.Э. Баумана» в полном объеме и установленные сроки.

При этом в ходе выполнения СЧ НИР по этапу 2 АО «ЦНИИ «Буревестник» осуществлялась разработка экспериментальных образцов системы комплексирования (СК) артиллерийских систем и устройств получения, обработки и передачи информации (УПОП) в электронные устройства на борту снаряда и методик их испытаний. 

В соответствии с п. 4.1. ТЗ экспериментальные образцы СК должны были обеспечивать сопряжение УПОП, предоставляемой заказчиком, с артиллерийской системой, предложенной исполнителем СЧ НИР.

Для безусловного выполнения этапа 2 АО «ЦНИИ «Буревестник» было подготовлено предложение по корректировке ТЗ (исх. № 0044/07-593 от 27.07.2017) и выданы МГТУ «им. Н.Э. Баумана» данные, необходимые для разработки УПОП (исх. № 01/19-155сп от 07.08.2017), а также проведена проработка возможного участия ФГЦП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в качестве соисполнителя НИР (исх. № 0044/07-222 от 04.04.2017, исх. № 0044/07-298 от 26.04.2017). 

Поскольку необходимое дополнение к ТЗ на СЧ НИР «Барьер-НН» не было утверждено заказчиком и у исполнителя отсутствовали исходные данные по УПОП и информация для проектирования экспериментальных образцов СК, было принято совместное решение о приостановлении (прекращении) работ по этапу 2. В связи с отсутствием надлежащего ТЗ исполнителем в адрес заказчика было направлено письмо исх. № 0950/29-875 от 11.10.2017 с уведомление о приостановке (прекращении) работ по этапу 2.

Заказчиком был дан письменный ответ исх. № 01.07-10/808 от 13.11.2017 с информацией о досрочном прекращении работ и целесообразностью расторжения договора с гарантированием дальнейшей оплаты затрат.

В установленном п. 6.3 договора порядке аккредитованным 453 ВП МО РФ были оформлены Акты проверки фактических затрат, инвентаризации результатов СЧ НИР «БарьерНН» при выполнении этапа 2 по состоянию на 11.10.2017 (письмо 435 ВП МО РФ исх. № 453/804 от 04.12.2017). 

Согласно выводу вышеуказанного акта ВП МО РФ как уполномоченный орган Министерства обороны РФ установил согласованную величину фактических затрат исполнителя по этапу 2 в сумме 1 219 967,30 руб.

АО «ЦНИИ «Буревестник» с сопроводительным письмом исх. № 0020-11-622 от 28.12.2017 в адрес заказчика были представлены все необходимые документы для согласования фактически произведенных затрат, при этом заказчик обязан был в течение месяца рассмотреть и оформить подписью и печатью протоколы фактических затрат и акты инвентаризации.

Однако сумма по протоколу фактических затрат этапа 2 была изменена путем уменьшения на 916 662,02 руб. несмотря на заключение 453 ВП МО РФ документальное обоснование.

АО «ЦНИИ «Буревестник» не согласилось с таким уменьшением фактических затрат с 1 219 967,30 руб. до 303 305,28 руб., направило в адрес заказчика письменное возражение с приложением отчета о ходе выполнения работ и нового протокола согласования фактических затрат (исх. № 0020/11-119 от 27.02.2018). 

В соответствии с п. 6.17 договора проверка фактических затрат в случае решения о прекращении СЧ НИР производится заказчиком после получения от исполнителя подписанной калькуляции фактических затрат с расшифровками и актов инвентаризации результатов СЧ НИР. По результатам проведения проверки стороны составляют протокол фактических затрат и утверждают акты инвентаризации.

Однако МГТУ «им. Н.Э. Баумана» ответ не представило, протокол фактических затрат и акты инвентаризации не оформило без обоснованных причин.

Согласно статье 769 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ - разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

Статьей 774 Гражданского кодекса Российской Федерации установлена обязанность заказчика принять результаты выполненных работ и оплатить их.

В силу статьи 775 Гражданского кодекса Российской Федерации, если в ходе научно-исследовательских работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя, заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные договором на выполнение научно-исследовательских работ результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в договоре.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Факт выполнения истцом предъявленных к оплате работ по второму этапу подтвержден материалами дела, в том числе актом проверки фактических затрат, выданный 453 ВП МО РФ, согласно которому уполномоченный орган установил согласованную величину фактических затрат АО «ЦНИИ «Буревестник» по этапу 2 в сумме 1 219 967,30 руб.

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательств оплаты суммы долга, предъявленной истцом к взысканию, или некачественного выполнения работ ответчик в материалы дела не представил.

Суд первой инстанции, оценив на основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в материалах дела доказательства, пришел к правомерному выводу о наличии у ответчика обязанности по оплате выполненных истцом работ на сумму 1 219 967,30 руб. в рамках спорного договора и обоснованно удовлетворил заявленные исковые требования.

Судом первой инстанции исследованы обстоятельства, имеющие значение для настоящего дела, дана надлежащая оценка имеющимся в деле доказательствам.

Расходы по уплате госпошлины относятся на заявителя в соответствии со статьями 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 269, 271  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 15.02.2019 по делу № А40-252490/18 оставить без изменения, апелляционную жалобу  - без удовлетворения. 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:  А.Л. Фриев 

Судьи:  В.Я. Гончаров 

 И.А. Титова 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.