АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-19304/2018

г. Ярославль

19 декабря 2018 года

Резолютивная часть решения оглашена  20 ноября 2018 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Лапочкиной И.М.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  Коншиной А.Д.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Промсвязь" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

к  обществу с ограниченной ответственностью "Реминдустрия" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

о   взыскании   5109826.10  руб.,

при участии:

от истца – не явился

от ответчика – не явился

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Промсвязь" обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Реминдустрия" о взыскании 5 109 826,10 руб.

Истец и ответчика о месте и времени судебного разбирательства извещены надлежащим образом.

Ответчик письменный отзыв не представил, в связи с чем несет риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий в соответствии со ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

Дело слушается в порядке, предусмотренном ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в отсутствие лиц, участвующих в деле. 

Исследовав материалы дела, суд установил следующее. 

Между обществом с ограниченной ответственностью "Промсвязь" /Субподрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Реминдустрия" /Генподрядчик/ заключен договор субподряда № 12/02-18 от 05.02.2018 (далее – Договор № 12/02-18), согласно п. 1.1 которого Субподрядчик по заданию Генподрядчика выполняет работы по капитальному ремонту, секций С-100, С-200, С-300, С-400, С-500 КМ-2 согласно графику простоев на территории Заказчика ОАО «Славнефть-ЯНОС».

В соответствии с п. 1.2 Договора № 12/02-18 объемы, виды работ» а также их стоимость и сроки выполнения будут определятся дополнительных соглашениях к настоящему договору.

Стоимость работ, поручаемых Субподрядчику, определяется утвержденными Генподрядчике сметными расчетами, выполненными на основании Регламента определения стоимости работ. Стоимость выполняемых  Субподрядчиком работ подтверждается  протоколом  согласовали договорной цепы, являющимся неотъемлемой частью дополнительного соглашения (п. 2.1 Договора № 12/02-18).

Генподрядчик ежемесячно принимает от Субподрядчика выполненные работы в соответствии с формой: КС-2 (акт приемки выполненных работ - в 3х экз.) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат - в 3х экз.) вместе с отчетом об использовании давальческих материалов (в 3х экз.), переданных ОАО «Славнефть-ЯНОС», и обязательным предоставлением реестра по сданной исполнительной документации, подписанного технадзором Заказчика, авторским надзором и представителем Генподрядчика (п. 4.1 Договора № 12/02-18).

В 5-тидневный срок со дня подписания акта выполненных работ Субподрядчик представляет Генподрядчику счет-фактуру, и соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации. Оплата выполненных работ производится не позднее чем через 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ формы КС-2 и справки стоимости выполненных работ формы КС-3, и представления Генподрядчику счета-фактуры Субподрядчиком, при условии поступления средств от Заказчика (п. 5.1, 5.2 Договора № 12/02-18).

За нарушение Генподрядчиком договорных обязательств – за задержку расчетов за выполненные работы он уплачивает Субподрядчику – пени в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости невыполненных Генподрядчиком обязательств, т.е. от стоимости неоплаченных в срок работ, но не более 5% подлежащих оплате работ (п. 8.9 Договора № 12/02-18).

Между сторонами заключено Дополнительное соглашение № 1 от 26.02.2018, согласно п.п. 1.1, 1.2, 1.3 которого Субподрядчик по заданию Генподрядчика обязуется выполнить строительно-монтажные и пуско-наладочные работ по капитальному ремонту секций С-100, С-200, С-300, С-400, С-500 КМ-2 согласно графику простоев на территории Заказчика ОАО «Славнефть-ЯНОС», согласно проектной документации, указанной в Приложении № 1, а Генподрядчик обязуется их принять и оплатить определенную настоящим дополнительным соглашением цену. Сроки выполнения работ: март • июль 2018г., согласно графику производства работ и освоения средств (Приложение №2). Стоимость работ по настоящему дополнительному соглашению определяется Протоколом согласования договорной цены (Приложение №1), на основании сметных расчетов, утвержденных Генподрядчиком, и составляет 9 382 712,18 руб. (Девять миллионов триста восемьдесят две тысячи семьсот двенадцать рублей 18 копеек), в том числе НДС 18% - 1 431 261,18 руб.

Работы субподрядчиком выполнены и приняты генподрядчиком 31.03.2018, 30.04.2018 на общую сумму 5 025 183,40 руб.

Генподрядчик произвел оплату выполненных работ в размере 852 308,96 руб.

По расчету истца за ответчиком числится задолженность в размере 4 172 874,44 руб.

Между обществом с ограниченной ответственностью "Промсвязь" /Субподрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Реминдустрия" /Генподрядчик/ заключен договор субподряда № 27/03-18 от 28.02.2018 (далее – Договор № 27/03-18), согласно п. 1.1 которого Субподрядчик по заданию Генподрядчика выполняет "Комплекс работ по техническому перевооружению производства КМ-2" согласно выдаваемой Заказчиком проектно-технической документации, на территории Заказчика ОАО «Славнефть-ЯНОС».

В соответствии с п. 1.2 Договора № 27/03-18 объемы, виды работ» а также их стоимость и сроки выполнения будут определятся дополнительных соглашениях к настоящему договору.

Стоимость работ, поручаемых Субподрядчику, определяется сметными расчетами, составленными на основании выданных проектных смет, рассчитанными на основании Регламента (Приложение №1), утвержденными Генподрядчиком, и оформляется дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора с момента их подписания (п. 2.1 Договора № 27/03-18).

Субподрядчик ежемесячно в срок не позднее 20 числа текущего месяца представляет Генподрядчику: акт приемки выполненных работ по форме КС-2 - в 3х экз., справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 3х экз., отчет об использовании давальческих материалов - в 3х экз. и исполнительную документацию на выполненные строительно-монтажные и пусконаладочные работы и ответственные конструкции. Оборудование передастся Актом приема-передачи смонтированного оборудования (п. 5.1 Договора № 27/03-18).

Оплата выполненных работ производится на основании следующих документов: подписанной Генподрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; подписанных Сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2; счета-фактуры, предоставленной Субподрядчиком в течение 5 (Пяти) дней со дня подписания Генподрядчиком акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; справки Субподрядчика об уплате налога на добавленную стоимость (НДС) за период предшествующих Работ, подписанной руководителем организации и главным бухгалтером; выписки из книги продаж Субподрядчика по осуществленным финансово-хозяйственным операциям с ООО «Реминдустрия», удостоверенной надлежащим образом (подпись руководителя, главного бухгалтера). Оплата выполненных работ производится Генподрядчиком в течение 90 (девяносто) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, устранения Субподрядчиком всех выявленных дефектов, получения Генподрядчиком документов в соответствии с п.4.4 Договора и предоставления Субподрядчиком счета-фактуры, при условии поступления денежных средств от Заказчика (п.п. 6 1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.2 Договора № 27/03-18).

За задержку расчетов за выполненные работ Генподрядчик уплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости подлежащих оплате и не оплаченных в срок работ, но не более 10% от просроченной суммы (п. 9.10 Договора № 27/03-18).

Между сторонами заключено Дополнительное соглашение № 1 от 29.03.2018, согласно п.п. 1.1, 1.2, 1.3 которого Субподрядчик по заданию Генподрядчика обязуется выполнить строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по объекту «Комплекс работ по техническому перевооружению производства КМ-2» на территории Заказчика ОАО «Славнефть-ЯНОС», согласно проектной документации, указанной в Приложении №1, а Генподрядчик обязуется их принять и оплатить определенную настоящим дополнительным соглашением цену. Сроки выполнения работ: апрель - июнь 2018г., согласно графику производства работ и освоения средств (Приложение №2). Стоимость работ но настоящему дополнительному соглашению определяется Протоколом согласования договорной цены (Приложение №1), на основании сметных расчетов, утвержденных Генподрядчиком, и составляет 1 889 157,58 руб. (Один миллион восемьсот восемьдесят девять тысяч сто пятьдесят семь рублей 58 копеек), в том числе НДС 18% - 288 176,58 руб.

Работы субподрядчиком выполнены и приняты генподрядчиком 30.04.2018 на общую сумму 1 231 859,82 руб.

Генподрядчик произвел оплату выполненных работ в размере 510 236,89 руб.

По расчету истца за ответчиком числится задолженность в размере 721 622,93 руб.

Претензия субподрядчика исх. № 23 от 24.08.2018 получена генподрядчиком 24.08.2018 и оставлена без удовлетворения.

Неисполнение ответчиком обязанности по оплате за выполненные работы послужило поводом для обращения в  арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив представленные доказательства в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд считает заявленные требования подлежащими   удовлетворению по следующим основаниям.

В силу ст.ст. 309, 310, 314 Гражданского кодекса РФ обязательство должно исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

На основании ст. 702, 711 Гражданского кодекса РФ основанием для оплаты работ является факт сдачи результата работ заказчику.

Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле должно доказать те обстоятельства, на которые ссылается в качестве основания своих требований или возражений.

Факт сдачи результата работ подтверждается документами, представленными истцом в материалы дела: актами о приемке выполненных работ, справками о стоимости выполненных работ и затрат, имеющими печати и подписи представителей сторон, и не оспаривается ответчиком.

По расчету истца за ответчиком числится задолженность по договору № 12/02-18 в размере 4 172 874,44 руб., по договору № 27/03-18 в размере 721 622,93 руб.

Доказательств оплаты задолженности либо наличия ее в меньшем размере ответчиком суду не представлено.

Согласно п.3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса РФ  обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены.

Учитывая, что требования истца основаны на законе, подтверждены представленными в материалы дела документами, требования истца в части основного долга подлежат удовлетворению в полном объеме.

Также истцом  заявлено  требование  о  взыскании  пени по договору № 12/02-18 в  размере 183 577,32 руб. за период с 29.06.2018 по 10.09.2018, по договору № 27/03-18 в размере 31 751,41 руб. за период с 29.07.2018 по 10.09.2018.

При неисполненном денежном обязательстве требование о взыскании неустойки соответствует ст.330 Гражданского кодекса РФ и условиям Договора.

Расчет пени ответчиком не оспорен.

В заявленном размере сумма пени подлежит взысканию с ответчика.

Оснований для применения положений ст. 333 Гражданского кодекса РФ у суда не имеется.

На основании ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ госпошлина за подачу иска в суд относится на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "Реминдустрия" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Промсвязь" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) 4 894 497,37 руб. 215 328,73 руб. пени. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Реминдустрия" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) в доход федерального бюджета 48 549,00 руб. государственной пошлины. 

Исполнительный лист выдать по истечении 10-дневного срока со дня вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья

Лапочкина И.М.