38/2017-175612(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

11 августа 2017 года Дело № А55-30935/2016  

Арбитражный суд Самарской области  

в составе Судьи Бибиковой Н.Д.  при ведении протокола судебного заседания  

секретарем судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании 11 августа 2017года дело по иску, заявлению  Общества с ограниченной ответственностью СК "Город"  

От 07 декабря 2016 года № к Департаменту градостроительства городского округа Самара Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: 1) МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 153 г.о. Самара 

2) Департамент финансов и экономического развития Администрации городского  округа  

О взыскании 8 653 295 руб. 37 коп., а также пени за просрочку платежа с перерасчетом  на дату вынесения решения  

И по встречному иску Департамента градостроительства городского округа Самара к Обществу с ограниченной ответственностью СК "Город", о взыскании 1 333 520руб.- неустойки за нарушение сроков выполнения работ 

при участии в заседании 

От первоначального истца - ФИО2, доверенность от 30.12.2016  От первоначального ответчика – ФИО3, доверенность от 30.12.2016  

Руководствуясь ст. ст.110,168-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации, Р Е Ш И Л: 

 По первоначальному иску: 

 Взыскать с Департамента градостроительства городского округа Самара в пользу  Общество с ограниченной ответственностью СК "Город" , г. Самара 8 840 000руб.- задолженность по муниципальному контракту от 07.06.2016 № 00097 на выполнение  строительно-монтажных работ по объекту: «Детский сад в границах ул. Солнечная, ул.  Димитрова и ул. Демократической в Промышленном районе г. Самары (устройство  дренажа)», 910 209руб.83коп.- неустойка, начисленная за просрочку оплаты  выполненных работ за период с 22.08.2016 по 11.08.2017, а также 66 266руб.-расходы  по госпошлине и 60 000руб- расходы за проведение экспертизы.  

 По встречному иску:  

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью СК "Город", г. Самара  в пользу Департамента градостроительства городского округа Самара 1 333 520руб.- неустойку, начисленную за просрочку выполнения работ в период с 11.09.2016 по  28.11.2016.  

 Путем зачета первоначального иска встречным: 

 Взыскать с Департамента градостроительства городского округа Самара в пользу  Общество с ограниченной ответственностью СК "Город" , г. Самара  

8 542 955руб.83коп. 

 Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный  суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд  Самарской области.  

Судья / Н.Д. Бибикова