Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-105442/2020

24 февраля 2021 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  03 февраля 2021 года.

Полный текст решения изготовлен  24 февраля 2021 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Коросташова А.А.

при ведении протокола судебного заседания: ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью "Современные интеллектуальные системы" (адрес:  Россия 198096, 

<

...> ЛИТЕР ЕС, ПОМЕЩЕНИЕ 315, ОГРН: 

<

***>);

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕГМЕНТ-А" (адрес:  Россия 195009, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 2, ЛИТЕР Л, ОФИС 309, ОГРН: 

<

***>);

о взыскании,

при участии:

- от истца: ФИО2 по доверенности от 02.12.2020,

- от ответчика: не явился, извещен,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Современные интеллектуальные системы"  обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "СЕГМЕНТ-А" 1 019 469 руб. 70 коп. неустойки по договору подряда от 11.02.2019 № 18-277/18-СУБ7, 20 067 руб. 90 коп. неустойки по договору подряда от 03.04.2019 № 18-277/18-СУБ9.

Исходя из положений ст. ст. 158, 137 Арбитражного процессуального кодекса РФ и с учётом мнения представителя истца, арбитражный суд не усмотрел оснований для отложений судебного разбирательства по письменному ходатайству ответчика.  

В порядке ст. ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ суд рассматривает дело в отсутствие ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания.

Арбитражный суд, признав дело подготовленным к судебному разбирательству, завершил предварительное судебное заседание и продолжил рассмотрение дела в судебном заседании в порядке ч. 4 ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

В судебном заседании представитель ООО "Современные интеллектуальные системы"  исковые требования поддержала в полном объеме. 

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителя истца, суд установил следующее

11.02.2019 между ООО  «Современные интеллектуальные системы» (Подрядчик) и ООО «СЕГМЕНТ А» (Субподрядчик) заключен Договор подряда № 18-277/18-СУБ7 (Договор 1).

По Договору 1 Субподрядчик обязался по заданию Подрядчика в соответствии с Расчетом стоимости работ №1 (Приложение №1 к Договору 1), технической документацией выполнить работы по устройству монолитных железобетонных фундаментов, каркаса здания, далее именуемые – Работы, на объекте «Проектирование и строительство объектов научно-клинической лаборатории с питомником для разведения и содержания кабарги в условиях естественной среды обитания на базе филиала «Алтайский» федерального государственного бюджетного учреждения науки «Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск) и проектирование и реконструкция объектов научных подразделений научно-клинической лаборатории федерального государственного бюджетного учреждения науки «Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» (Московская область, Красногорский район, пос. Светлые Горы)» Этап II: «Проектирование и реконструкция объектов научных подразделений научно-клинической лаборатории федерального государственного бюджетного учреждения науки «Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» (Московская область, Красногорский район, пос. Светлые Горы)» по адресу: Россия, Московская область, Красногорский район, пос. Светлые Горы, Экспериментальный научно-клинический центр» (далее – Объект) и сдать результат Работ Подрядчику.

Согласно п. 2.1. Договора 1 цена Договора определяется Расчетом стоимости работ № 1 и составляет 18 535 813 (восемнадцать миллионов пятьсот тридцать пять тысяч восемьсот тринадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % - 3 089 302,17 рублей.

В соответствии с п. 3.1 и 3.2 Договора 1, Субподрядчик обязался выполнить Работы в следующие сроки:

•Дата начала выполнения Работ: «11» февраля 2019 г. 

•Дата окончания Работ: «05» июня 2019 г. 

Сроки выполнения Работ/этапов Работ по Договору 1 были определены Сторонами в «Графике выполнения работ» (Приложение №2 к Договору) и являлись обязательными для исполнения Субподрядчиком.

15.02.2019 представитель Субподрядчика принял от Подрядчика по акту приема-передачи строительную площадку для выполнения работ и подписал акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории строительной площадки, подтвердив тем самым фактическую готовность площадки, получение необходимой технической документации, а также отсутствие препятствий к выполнению комплекса работ предусмотренных Договором 1.

В соответствии с п. 2.3.1. Договора 1 Подрядчик выплачивает Субподрядчику авансовые платежи в следующем порядке:

- первый авансовый платеж в размере 650 000,00 рублей в течение 5 (пяти) банковских дней с даты заключения Договора 1;

- второй авансовый платеж в размере 650 000,00 рублей в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Субподрядчиком акта приема-передачи строительной площадки.

ООО «ЭмАй Системс» как Подрядчик, выполнило условия Договора 1 в соответствии с п. 2.3.1. Договора 1 и Субподрядчику 14 февраля 2019 года и 07 марта 2019 года выплачены авансовые платежи.

По состоянию на 17.07.2019 года Субподрядчик, предъявил только часть выполненных работ по Договору 1. В порядке, предусмотренном п. 5.2. Договора 1, Стороны подписали Акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 на общую сумму 4 434 153 рубля 20 копеек. Данные работы были приняты и оплачены Подрядчиком.

Согласно «Графика выполнения работ» Субподрядчик должен завершить выполнение работ по устройству монолитных железобетонных конструкций в следующие сроки:

Устройство фундамента (п. 1.1-1.4) в срок до 09.03.2019 г.

Устройство стен на отм. «-0,40» до «+0,70» (п. 2.1) в срок до 22.05.2019 г.

Устройство колонн Км1.1…Км2.2 (п. 2.2) в срок до 22.05.2019 г.

Устройство перекрытие на отм. +4.100 (п. 2.5) в срок до 13.04.2019 г.

Устройство перекрытие на отм. +8.250 (п. 2.6) в срок до 10.05.2019 г.

Устройство перекрытие на отм. +12,280 (п. 2.7) в срок до 05.06.2019 г.

Монтаж элементов сборных лестниц (п. 3.1 и 3.2) в срок до 01.06.2019 г.

По состоянию на 17.07.2019 года работы, выполнены частично, о чём свидетельствует отсутствие подписанных сторонами Актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 в соответствии с порядком, предусмотренным пунктами 5.1 и 5.3 Договора 1. 

Сумма не выполненных Субподрядчиком по Договору 1 работ составляет 14 101 659 рублей 80 копеек.

В связи с тем, что Субподрядчиком были нарушены сроки выполнения работ, в адрес последнего была отправлена претензия о неисполнении обязательств по Договору 1 за исх. №780/07 от 12.07.2019 года, в которой Подрядчик уведомил Субподрядчика о расторжении Договора 1 в одностороннем порядке, просил выплатить неустойку за нарушение конечного срока выполнения работ, ответа на данную претензию до настоящего времени не поступило.

В силу п. 1 ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Статьей 708 ГК РФ предусмотрено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с п. 6.3 Договора 1 за нарушение конечного срока выполнения Работ по вине Субподрядчика, предусмотренного п. 3.1, 3.2. Договора 1, Подрядчик вправе начислить и взыскать с Субподрядчика неустойку в размере 0,1% от цены Договора, указанной в пункте 2.1. за каждый день просрочки. 

Работы должны быть выполнены до 05 июня 2019 года.

Следовательно, неустойка за нарушение срока выполнения работ будет рассчитываться с 06 июня 2019 года по 30 июля 2019 года.

Размер неустойки составляет 1 019 469 (один миллион девятнадцать тысяч четыреста шестьдесят девять) рублей 70 копеек, исходя из следующего расчета:

Стоимость Договора 1: 18 535 813,00 рублей.

Период просрочки с 06.06.2019 года по 30.07.2019 года: 55 дней.

 Кроме того, 03 апреля 2019 года между ООО  «Современные интеллектуальные системы» (Подрядчик) и ООО «СЕГМЕНТ А» (Субподрядчик) заключен Договор подряда № 18-277/18-СУБ9 (далее – Договор 2).

По Договору 2 Субподрядчик обязался по заданию Подрядчика в соответствии с Расчетом стоимости работ №1 (Приложение №1 к Договору 1), технической документацией выполнить работы по строительству наружных сетей хозяйственно-бытовой К1 и ливневой канализации К2, наружных сетей водоснабжения, далее именуемые – Работы, на объекте «Проектирование и строительство объектов научно-клинической лаборатории с питомником для разведения и содержания кабарги в условиях естественной среды обитания на базе филиала «Алтайский» федерального государственного бюджетного учреждения науки «Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск) и проектирование и реконструкция объектов научных подразделений научно-клинической лаборатории федерального государственного бюджетного учреждения науки «Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» (Московская область, Красногорский район, пос. Светлые Горы)» Этап II: «Проектирование и реконструкция объектов научных подразделений научно-клинической лаборатории федерального государственного бюджетного учреждения науки «Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» (Московская область, Красногорский район, пос. Светлые Горы)» по адресу: Россия, Московская область, Красногорский район, пос. Светлые Горы, Экспериментальный научно-клинический центр» (далее – Объект) и сдать результат Работ Подрядчику.

Цена Договора 2 была изменена дополнительным соглашением № 1 от 01.08.2019 года к Договору 2 и составляет 955 616 (девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 62 копейки, в том числе НДС 20 % - 159 269,44 рублей.

В соответствии с п. 3.1 и 3.2 Договора 2, Субподрядчик обязался выполнить Работы в следующие сроки:

•Дата начала выполнения Работ: «08» апреля 2019 г. 

•Дата окончания Работ: «31» июля 2019 г. 

Сроки выполнения Работ/этапов Работ по Договору 2 были определены Сторонами в «Графике выполнения работ» (Приложение №2 к Договору) и являлись обязательными для исполнения Субподрядчиком.

04 апреля 2019 года представитель Субподрядчика принял от Подрядчика по акту приема-передачи строительную площадку для выполнения работ и подписал акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории строительной площадки, подтвердив тем самым фактическую готовность площадки, получение необходимой технической документации, а также отсутствие препятствий к выполнению комплекса работ предусмотренных Договором 2.

В соответствии с п. 2.3.1. Договора 2 Подрядчик выплатил Субподрядчику авансовый платеж в размере 650 000,00 рублей.

ООО «ЭмАй Системс» как Подрядчик, выполнило условия Договора 2 в соответствии с п. 2.3.1. Договора 2 и Субподрядчику 09 апреля 2019 года выплачен авансовый платеж.

По состоянию на 16.12.2019 года Субподрядчик, предъявил только часть выполненных работ по Договору 2. В порядке, предусмотренном п. 5.2. Договора 2, Стороны подписали Акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 на общую сумму 611 233 рубля 25 копеек. Данные работы были приняты и оплачены Подрядчиком.

Согласно «Графика выполнения работ» Приложение №2 к Договору 2 Субподрядчик должен завершить выполнение работ по строительству наружных сетей хозяйственно-бытовой К1 и ливневой канализации К2, наружных сетей водоснабжения В1 в следующие сроки: Ливневая канализация К2 участок К1-К-55 (п.1-8) в срок до 28.07.2019 г., хозяйственно-бытовая канализация К1 (п. 9-11) в срок до 16.06.2019 г., наружные сети водоснабжения В1 (п. 12) в срок до 07.07.2019 г.

По состоянию на дату составления искового заявления работы, указанные в Приложении №2 к Договору 2 выполнены в полном объеме, однако с нарушением конечного срока, предусмотренного разделом 3 Договора 2.

Поскольку Субподрядчиком нарушены сроки выполнения работ, в адрес последнего была отправлена претензия о неисполнении обязательств по Договору 2 за исх. №857/08 от 09.08.2019 года, в которой Подрядчик уведомил Субподрядчика о расторжении Договора 2 в одностороннем порядке, просил выплатить неустойку за нарушение конечного срока выполнения работ. Данная претензия была получена Ответчиком 21 августа 2019 года.

Однако требование, указанное в претензии оставлено без удовлетворения.

В соответствии с п. 6.3 Договора 2 за нарушение конечного срока выполнения Работ по вине Субподрядчика, предусмотренного п. 3.1, 3.2. Договора 2, Подрядчик вправе начислить и взыскать с Субподрядчика неустойку в размере 0,1% от цены Договора, указанной в пункте 2.1. за каждый день просрочки. 

Работы должны быть выполнены до 31 июля 2019 года.

Следовательно, неустойка за нарушение срока выполнения работ будет рассчитываться с 01 августа 2019 года по 21 августа 2019 года.

Размер неустойки составляет 20 067 (двадцать тысяч шестьдесят семь) рублей 90 копеек, исходя из следующего расчета:

Стоимость Договора 2: 955 616,62 рубля.

Период просрочки с 01.08.2019 года по 21.08.2019 года: 21 день.

Неустойка итого за период: 955 616,62 * 0,1% * 21 дней=20 067 рублей 94 копейки.

 Ответчик обстоятельства, положенные в обоснование иска, не оспорил.

С учётом изложенного исковые требования признаны судом доказанными как по праву, так и по размеру. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СЕГМЕНТ-А" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Современные интеллектуальные системы" неустойку на общую сумму 1 039 537 руб. 60 коп., а также 23 395 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Коросташов А.А.