Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-8549/2018

27 декабря 2018 года

город Якутск

Резолютивная часть решения объявлена 20.12.2018.

Мотивированное решение изготовлено 27.12.2018.

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Николаевой Г.Л., при ведении протокола помощником судьи Борисовой С.И., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Делайн» (ИНН 1435134178, ОГРН 1031402045630) к публичному акционерному обществу «Якутскэнерго» (ИНН 1435028701, ОГРН 1021401047260) о взыскании 1 825 482,24 руб.,

с участием представителей:

от истца: ФИО1 по доверенности от 16.08.2017;

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 13.09.2017 № И00003965,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Делайн» обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с иском к публичному акционерному обществу «Якутскэнерго» о взыскании 1 825 482,24 руб. задолженности по договору № 858 от 27.06.2014 об осуществлении технологического присоединения.

10.10.2018 от ответчика поступил отзыв на исковое заявление, в котором сообщает суду, что считает обязательства по договору выполненными, просит в удовлетворении иска отказать в полном объеме.

Представленные документы приобщены в материалы дела в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Истец определение суда от 20.09.2018, 11.10.2018 не исполнил; платежные поручения от 01.07.2015 № 62, от 30.12.2015 № 305, от 11.03.2016 № 56, от 01.04.2016 № 85, от 28.12.2016 № 697, от 30.01.2017 № 41, от 09.02.2017 № 78, от 09.02.2017 № 77, от 14.02.2017 № 93 в качестве доказательства внесения оплаты за технологическое присоединение в сумме 1 825 482,24 руб. не представил, возражения на отзыв ответчика не представил.

В судебном заседании представители истца и ответчика поддержали свои правовые позиции, выступили с пояснениями, ответили на вопросы суда.

Заслушав представителей истца и ответчика, изучив материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, 

27.06.2014 между ОАО АК «Якутскэнерго» (сетевая организация) и ООО «Делайн» (заказчик) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 858, по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: жилой комплекс с магазином, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 252,1 кВт, в т.ч. 1-я очередь – 67,6 кВт; 2-я очередь 184,5 кВт: жилая часть – 154,5 кВт, магазин – 30 кВт.

категория надежности – III;

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – 0,4 (кВ);

ранее присоединенная в точке присоединения, указанная в пункте 3 настоящего договора, мощность – нет.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: Жилой комплекс с магазином, ул. Маяковского в 86 квартале г. Якутска (пункт 2).

Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии не далее 25 метров от границ участка заявителя, на котором располагаются присоединяемые объекты заявителя (пункт 3).

Технические условия для присоединения к электрическим сетям, приведенные в приложении № 1, и технические требования на средства учета электрической энергии в приложении № 2 являются неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия технических условий составляет 4 года со дня заключения настоящего договора (пункт 4).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истекает: 1 очередь – 4 квартал 2015 года, 2-ая очередь – 2 квартал 2017 года (пункт 5).

В соответствии с пунктом 10 размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с утвержденной постановлением Правления ГКЦ-РЭК РС (Я) от 20.12.2013г. № 320 «Об утверждении размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО АК «Якутскэнерго» и составляет 4 313 705, 59 руб., в т.ч. НДС 18% 658 022,89 руб. по Приложению № 4.

Согласно пункту 11 внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет сетевой организации в соответствии с графиком платежей по Приложению № 3.

18.05.2015 между сторонами заключено дополнительное соглашение № 1, в соответствии с которым договорились пункт 5 договора изложить в следующей редакции: «Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истекает: 1 очередь – 1 квартал 2016 года, 2-ая очередь – 2 квартал 2017 года».

В соответствии с дополнительным соглашением от 08.09.2015 № 2 стороны договорились пункт 1 изложить в следующей редакции: «максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 252,1 кВт, в т.ч. 1-я очередь 67,6 кВт: жилая часть – 52,6 кВт, электрокотел – 15кВт; 2-я очерель 184,5 кВт: жилая часть – 109 кВт, магазин – 30 кВт, электрокотел – 45,5 кВт».

Дополнительным соглашением от 04.03.2016 № 3 стороны изложили пункт 5 договора в следующей редакции: «Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истекает: 1 очередь – 3 квартал 2016 года, 2-ая очередь – 3 квартал 2017 года»; дополнительным соглашением от 23.09.2016 № 4 стороны договорились изложить пункт 5 договора в следующей редакции: «Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истекает: 1 очередь – 20 октября 2016 года, 2-ая очередь – 3 квартал 2017 года».

01.12.2016 между истцом и ответчиком заключено дополнительное соглашение № 5, в соответствии с которым стороны договорились пункт 1 абзац 2 договора изложить в следующей редакции: «максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 191,6 кВт, в т.ч. 1-я очередь: жилая часть – 52,6 кВт; 2-я очередь – 139 кВт, из них: жилая часть – 109 кВт, магазин – 30 кВт»; пункт 10 договора изложить в следующей редакции: «Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с утвержденной постановлением Правления ГКЦ-РЭК РС (Я) от 20.12.2013 № 320 «Об утверждении размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО АК «Якутскэнерго» и составляет 3 214 108, 98 рублей, в т.ч. НДС 490 287, 81 рублей по Приложению № 2».

В приложении № 3 к дополнительному соглашению от 01.12.2016 № 5 установлены следующие сроки оплаты услуг:

725 482 руб. 24 коп. – 2015 год;

200 000 руб. – II квартал 2016 года;

1 002 983 руб. 15 коп. -  IV квартал 2016 года;

964 232 руб. 69 коп. – 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

321 410 руб. 90 коп. – 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Платежными поручениями от 01.07.2015 № 62, от 30.12.2015 № 305, от 11.03.2016 № 56, от 01.04.2016 № 85, от 28.12.2016 № 697, от 30.01.2017 № 41, от 09.02.2017 № 78, от 09.02.2017 № 77, от 14.02.2017 № 93 истец внес оплату суммы 1 825 482 руб. 24 коп. 

29.11.2017 между истцом и ответчиком был подписан без замечаний акт № 858 от 29.11.2017 о выполнении технических условий.

01.12.2017 между истцом и ответчиком был подписан без замечаний акт № 1196 об осуществлении технологического присоединения.

Ответчик полагая, что истцом работы по договору № 858 от 27.06.2014 не были выполнены на общую сумму 1 825 482,24 руб. направил ответчику претензию с требованием о признании акта об осуществлении технологического присоединения № 1196 от 01.12.2017 недействительным, произвести перерасчет реально выполненных работ по спорному договору и возвратить стоимость невыполненных  работ в размере 1 825 482,24 руб.

Ответчик претензию оставил без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) по делу № А58-522/2018 исковое заявление публичного акционерного общества «Якутскэнерго» к обществу с ограниченной ответственностью «Делайн» о взыскании 1 791 579,59 руб. задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 27.06.2014 № 858 удовлетворено частично:

с общества с ограниченной ответственностью «Делайн» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества «Якутскэнерго» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) взыскано 1 919 485,04 руб., в том числе основной долг в размере 1 388 626,74 руб., неустойка в размере 530 858,30 руб.; а также расходы по уплате государственной пошлины 21 765,09 руб. В остальной части иска отказано.

В рамках дела № А58-522/2018 судом установлено, что акт об осуществлении технологического присоединения от 01.12.2017 сторонами  подписан без замечаний, ООО «Делайн» произвел оплату 1 825 482,24 руб., в следствие чего задолженность составила 1 388 626,74 руб. (3 214 108, 98 руб. - 1 825 482,24 руб.).

Не согласившись с выводами суда первой инстанции общество с ограниченной ответственностью «Делайн» обжаловало вышеуказанное решение в апелляционном порядке.

Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 05.12.2018 решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 25.04.2018 по делу А58-522/2018 оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.

Обстоятельства, установленные судебными актами по делу № А58-522/2018, имеют преюдициальное значение при рассмотрения настоящего дела.

Суд приходит к выводу о том, что данный иск направлен не на достижение самостоятельной правовой цели, а на преодоление вступившего в законную силу судебного акта по делу № А58-522/2018, что противоречит задачам арбитражного судопроизводства, установленным статьей 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении требований истца.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина относится на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

в иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Республики Саха (Якутия).

СудьяНиколаева Г.Л.