АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102

http://kirov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А28-15296/2024

г. Киров

25 марта 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 18 марта 2025 года.

В полном объеме решение изготовлено 25 марта 2025 года.

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Шамовой О.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Чураковой А.Д.,

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению

акционерного общества «Вятские автомобильные дороги» (ИНН:

<

***>, ОГРН:

<

***>, место нахождения: 610025, Россия, 

<

...>)

к открытому акционерному обществу «Коммунэнерго» (ИНН:

<

***>; ОГРН:

<

***>, место нахождения: 610045, Россия, 

<

...>),

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, временный управляющий ФИО1

об обязании выполнить действия,

без участия в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле,

установил:

акционерное общество «Вятские автомобильные дороги» (далее – истец, АО «Вятские автомобильные дороги») обратилось в Арбитражный суд Кировской области с иском к открытому акционерному обществу «Коммунэнерго» (далее - ответчик, ОАО «Коммунэнерго») о возложении обязанности выполнить предусмотренные договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 02.02.2024 №25-208-003/24/В мероприятия по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения асфальтобетонного завода, расположенного по адресу: Кировская область, п.Опарино, кадастровый участок 43:23:330104:172.

Исковые требования основаны на положениях статей 12, 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила № 861) и мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по Договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 02.02.2024 №25-208-003/24/В (далее - Договор).

Определением суда от 19.12.2024 дело было принято судом к производству.

Стороны и третье лицо явку представителей в судебное заседание не обеспечили, уведомлены надлежащим образом о времени и месте судебного заседания в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). 

Истец направил в суд ходатайство о проведении судебного заседания в его отсутствие, на удовлетворении исковых требований настаивает. 

Ответчик представил отзыв на исковое заявление, в котором указал, что ОАО «Коммунэнерго» не отказывается от исполнения Договора, в соответствии с условиями которого срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям установлен - до 02.02.2025. Ответчик выполнил часть работ по договору; для выполнения остальной части работ требуется привлечение подрядных организаций. Ответчик неоднократно проводил конкурсные процедуры (закупки) на заключение договоров подряд, однако они были признаны несостоявшимися по причине отсутствия участников закупки. Кроме того, в настоящее время ответчик испытывает финансовые трудности.

Третье лицо отзыв на исковое заявление не представило. 

На основании части 3 статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие представителей сторон и третьего лица.

Исследовав представленные доказательства, судом установлено следующее.

02.02.2024 между ОАО «Коммунэнерго» (сетевая организация) и АО «Вятские автомобильные дороги» (заявителем) заключен Договор, по которому сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (асфальтобетонный завод), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями Договора (п.1 Договора).

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения асфальтобетонного завода, расположенного по адресу: Кировская область, п.Опарино, кадастровый участок 43:23:330104:172 (п.2 Договора).

Согласно п.4 Договора технические условия являются неотъемлемой частью договора и приведены в приложении №1. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения Договора. 

Согласно п.5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора.

Соответственно, сетевая организация обязана осуществить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям асфальтобетонного завода в срок не позднее 01.02.2025.

В соответствии с п.10 Технических условий сетевая организация осуществляет: все необходимые мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, в том числе проектирование и строительство новой ВЛ-10 кВ от опоры №102 ВЛ-10 кВ Ф №8 ПС «Опарино» до границы участка заявителя; монтаж линейного разъединителя на концевой опоре; мероприятия по монтажу и допуску в эксплуатацию прибора учета электрической энергии в соответствии с разделом X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Фактические действия по присоединению к электрическим сетям ОАО «Коммунэнерго» энергопринимающего устройства заявителя.  

Письмом от 05.11.2024 №3626 АО «Вятские автомобильные дороги» просило Ответчика незамедлительно приступить к исполнению работ и предоставить в срок до 07.11.2024 актуальную информацию о выполнении работ по Договору.

Письмом от 20.11.2024 №3779 АО «Вятские автомобильные дороги» вновь просило ответчика приступить к исполнению работ по Договору. В случае финансовой невозможности закупки материалов для выполнения СМР ответчику было предложено заключить дополнительное соглашение к Договору с уменьшением общей стоимости размера платы за технологическое присоединение, а закупку необходимых материалов осуществит заявитель АО «Вятские автомобильные дороги».

Письмом от 06.12.2024 № 20.03/7329 ответчик указал, что подготовил проектную документацию для выполнения работ по Договору; в настоящее время он находится в тяжелом финансовом положении, что привело к невозможности приобретения материалов, оборудования для выполнения мероприятий по технологическому присоединению и производству ремонтных работ, а также приобретению топлива для транспортных средств и спецтехники. Со стороны ОАО «Коммунэнерго» принимаются меры по изысканию денежных средств исполнению обязательств по Договору.

До настоящего момента ответчиком не осуществлено фактическое присоединение энергопринмающих устройств истца к электрическим сетям, что явилось основанием для обращения с настоящим иском в арбитражный суд.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд приходит к следующим выводам.

Согласно статье 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности

Согласно статьям 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Договор технологического присоединения, порядок его заключения, исполнения и расторжения регулируется Правилами № 861.

Правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики и потребителей электрической энергии установлены Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Федеральный закон № 35-ФЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона №35-ФЗ технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Правила №861 в пункте 7 устанавливают следующую процедуру технологического присоединения:

а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил;

б) заключение договора;

в) выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором:

г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". В случае технологического присоединения объектов лиц, указанных в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, объектов лиц, указанных в пунктах 12(1), 13, 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, которые используются физическими лицами для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также в отношении объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения заявителя, получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 года № 85 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» с учетом положений пунктов 18(1) - 18(4) настоящих Правил не требуется;

д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено»). Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).

В соответствии с пунктом 3 Правил №861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением (пункт 6 Правил №861).

В силу стастьи12 ГК РФ присуждение к исполнению обязанности в натуре является одним из предусмотренных законом способов защиты нарушенного права.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 АПК РФ).

Факт неисполнения до настоящего времени ответчиком принятых на себя обязательств перед истцом в рамках договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям установлен судом; ответчиком также не оспаривается, что срок исполнения мероприятий по Договору со стороны ответчика наступил.

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу об обоснованности исковых требований истца о возложении на ответчика обязанности выполнить предусмотренные Договором мероприятия по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения асфальтобетонного завода, расположенного по адресу: Кировская область, п.Опарино, кадастровый участок 43:23:330104:172, в связи с чем иск подлежит удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Обязать открытое акционерное общество «Коммунэнерго» (ИНН:

<

***>; ОГРН:

<

***>, место нахождения: 610045, Россия, 

<

...>) выполнить мероприятия по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям, предусмотренные Договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 02.02.2024 № 25-208-003/24/В, для электроснабжения асфальтобетонного завода, расположенного по адресу Кировская область, п. Опарино, кадастровый участок № 43:23:330104:172.

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Жалобы подаются через Арбитражный суд Кировской области.

Судья                                                                                                 О.В. Шамова