28/2023-292154(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-23726/2023

г. Новосибирск

10 октября 2023 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой  О.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску  заявлению Муниципального казенного учреждения города Новосибирска  "Управление технического надзора за ремонтом жилищного фонда" (ОГРН  

<

***>), г. Новосибирск,  

 к обществу с ограниченной ответственностью СУ "Сибстрой" (ОГРН  

<

***>), г. Новосибирск,  

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО УК «Ново- Николаевск 1893» (ОГРН 

<

***>),  

о понуждении к исполнению гарантийных обязательств, при участии: 

от истца: ФИО2 доверенность № 4 от 20.06.2023, паспорт,  диплом;  

от ответчика: не явился, извещен; 

от третьего лица: ФИО3, доверенность б/н от 16.08.2023 (онлайн- участие),  

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования Муниципального казенного учреждения города  Новосибирска "Управление технического надзора за ремонтом жилищного  фонда" удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью СУ "Сибстрой"  (ОГРН 

<

***>) в срок до 01.11.2023 исполнить гарантийные  обязательства по устранению дефектов произведенных работ по договору №  11 от 08.09.2021 по ул. Менделеева, 6, а именно:  

- заделать (зачеканить) места отбора проб (вырубки) в асфальтобетонном  покрытии на тротуаре у подъездов 2,3,4, а также на проезде у подъезда № 3;  

- восстановить сломанные секции водоотводных лотков путем их замены;  

- устранить скопление дождевой воды на асфальтобетонном покрытии  (АБП) с торца подъезда № 7 на проезде;  

- устранить просадку грунта вокруг горловины колодца, расположенного  на газоне придомовой территории.  

В случае неисполнения решения суда об устранении недостатков  выполненных работ по настоящему делу в установленный в решении срок,  взыскать с общества с ограниченной ответственностью СУ "Сибстрой" (ОГРН  

<

***>) в пользу Муниципального казенного учреждения города  Новосибирска "Управление технического надзора за ремонтом жилищного  фонда" (ОГРН 

<

***>) в качестве компенсации за неисполнение  судебного акта 5 000 рублей за каждый день неисполнения решения суда.  

Взыскать общества с ограниченной ответственностью СУ "Сибстрой"  (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 6 000 рублей.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его  принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух  

месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Судья О.В. Суворова