Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-69615/2021

10 мая 2022 года

г.Санкт-Петербург

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Хорошева Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

акционерного общества Строительная корпорация «РосСтрой» (ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 15.01.2003, ИНН: 

<

***>, КПП: 781301001, Санкт-Петербург, конкурсный управляющий - ФИО2) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка» (ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 05.05.2010, ИНН: 

<

***>, Ленинградская область) 

о взыскании 

при участии

- от истца: ФИО3, по доверенности от 09.02.2022,

- от ответчика: ФИО4, по доверенности от 30.12.2021

установил:

акционерное общество Строительная корпорация «РосСтрой» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка» о взыскании 

100 450 000 руб. – предоплаты по договору № 30/01-2013/5 от 01.08.2013 об оказании услуги по обеспечению возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения объектов,

 18 021 687, 95 руб. – процентов.

Определением от 08.09.2021 исковое заявление принято к производству, назначены предварительное и судебное основное заседания.

На основании статьи 137 АПК РФ в судебном заседании 26.10.2021 суд открыл основное судебное заседание.

Рассмотрение дела откладывалось в связи с удовлетворением ходатайств сторон и по другим причинам.

При рассмотрении настоящего дела арбитражный суд пришел к следующим выводам:

Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-83217/2015 от 09 февраля 2021 года, АО СК «Росстрой» (ОГРН: 

<

***> ИНН 

<

***>, 197022, 

<

...>) признан банкротом, введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим назначен ФИО2 (ИНН 

<

***> СНИЛС 

<

***>) член Союза Арбитражных Управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>).

Между ЗАО СК «РосСтрой» (далее - Истец) и ЗАО «СУ-155» (далее - Застройщик) были заключены договоры № РС-49/11-Я от 26.04.2011, № РС-50/11-Я от 26.04.2011, № РС-48/11-Я от 26.04.2011 и № PC-30/10-Я от 10.06.2010 (копии-прилагаются), в соответствии с которыми Истец исполнял по заданию Застройщика функции технического заказчика по строительным объектам Застройщика.

В соответствии с п. 1.1 указанного Договора, ООО «СМЭУ «Заневка» приняло на себя обязательства оказать услугу по обеспечению возможности подключения сетей водоснабжения и водоотведения Объектов Заказчика, в том числе объекта расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Янино-Восточный», кадастровый номер земельного участка 47:07:10-39-001:039 (строительный шифр объекта: Ян-В-П);

к сетям водоснабжения и водоотведения Исполнителя в точках подключения указанных в Технических условиях № 1, № 2, № 3, № 4 для подачи питьевой воды и принятия сточных вод, а именно выполнить действия по подготовке систем коммунального водопровода и канализации Исполнителя к подключению, включающие мероприятия по строительству водоводов, реконструкции существующего водовода, строительства канализационных насосных станций, реконструкции существующих канализационных насосных станций, реконструкции магистрального коллектора, строительства самотечных коллекторов, строительства напорных коллекторов, а Заказчик оплатить оказанные услуги в порядке и сроки предусмотренные Договором.

 Общая стоимость услуг по Договору составляет 800 000 000 (Восемьсот миллионов) руб., которая должна была быть оплачена в период с 05.09.2013 по 05.12.2015.

 По данным ответчика, после отчуждения части объектов, стоимость услуг подлежащих оплате по настоящему договору составила 558 290 500,50 руб.

В соответствии с указанными договорами ЗАО СК «РосСтрой» по заданию ЗАО «СУ-155» осуществляло все полномочия технического заказчика, в том числе с правом заключения договоров.

В соответствии с п.2.1.1, п.3 вышеуказанных договоров обеспечение полного и своевременного финансирования строительных Объектов осуществляется Застройщиком.

Во исполнение принятых на себя обязательств по указанным выше договорам,                  01 августа 2013 года ЗАО СК «РосСтрой» действующего в интересах ЗАО «СУ-155» с ООО «СМЭУ «Заневка» заключен договор № 30/01-2013/5 об оказании услуги по обеспечению возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения объектов (далее - Договор).

Согласно п. 4.1. Договора, Исполнитель приступает к оказанию Услуги после осуществления первого платежа в соответствии с Графиком платежей. Согласно Графику платежей АО СК «РосСтрой» оплачивает ООО «СМЭУ «Заневка» денежные средства с 05.09.2013 по 05.12.2015.

Во исполнение условий Договора АО СК «РосСтрой» перечислило на счет ООО «СМЭУ «Заневка» денежные средства в счет авансовых платежей - общей суммой                 100 450 000 рублей (копии платежных поручения прилагаются).

В соответствии с п. 4.2. Договора, срок оказания Услуги по Договору не позднее 36 месяцев, с даты заключения Договора в соответствии с календарным графиком выполнения мероприятий по обеспечению возможности подключения Объекта Заказчика к сетям инженерно-технического обеспечения.

В связи с отсутствием выполнения работ в силу п. 6.4 Договора АО СК «РосСтрой» в одностороннем порядке отказалось от Договора, направив 27.07.2018 письменный отказ (исх № 305-18, копия прилагается) с требованием возврата до 13.08.2018 ранее перечисленных денежных средств в размере 100 450 000 руб. Номер почтового отправления 19713723018235. Письмо было получено адресатом 10.08.2018.

В целях соблюдения досудебного претензионного порядка, установленного ст.4 АПК РФ, 26 июня 2021 АО СК «РосСтрой» направило в адрес ООО «СМЭУ «Заневка» претензию, в которой повторно просило погасить задолженность в размере 100 450 000 руб. в течение 5 рабочих дней после получения претензии. Номер почтового отправления 11963360013843. Письмо было получено адресатом 09.07.2021. Вместе с тем, претензия была оставлена без ответа.

До настоящего время денежные средства ООО «СМЭУ «Заневка» в пользу АО СК «РосСтрой» не перечислены.

Ответчиком заявлено об истечении трехгодичного срока исковой давности, поскольку обязательства должны были быть исполнены в течение 36  месяцев со дня заключения договора (01.08.2013), началом течения срока исковой давности является 01.08.2016, который истек 01.08.2019.

Кроме того, ответчиком представлен акт о подключении  (технологическом присоединении) объекта с приложениями.

Исследовав материалы дела, оценив доводы сторон, арбитражный суд пришел к следующим выводам:

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Правоотношения сторон вытекают из договору № 30/01-2013/5 от 01.08.2013, последний не поименован в Гражданском кодексе Российской Федерации, однако может быть квалифицирован в качестве договора подрядного типа ввиду выполнения работ по осуществлению технологического присоединения энергопринимающего устройства заявителя и как договора об оказании услуг ввиду оказания нематериальных услуг по запланированным мероприятиям (главы 37 и 39 Гражданского кодекса Российской Федерации – далее ГК РФ).

Срок оказания услуги технологического присоединения - не позднее 36 месяцев,  с даты заключения Договора, то есть, не позднее 01 августа 2016 г.

Истцом в период с 27.09.2013 по 01.12.2014 произведена оплата на сумму                          100 450 000 руб. Иных платежей в адрес ООО «СМЭУ «Заневка» не поступало.

В свою очередь, с 29 апреля 2016 года, в соответствии с договором № 1 -12/2015-ТЗ от 25.12.2015 в редакции дополнительного соглашения № 9 от 29.04.2016, техническим заказчиком в целях достройки указанных выше объектов стало ООО «Инвестиционная компания «Триумфальная арка», субтехзаказчиком ООО «СК «Анер». Таким образом, функции технического заказчика ЗАО СК «РосСтрой» прекратило осуществлять с момента истечения вышеуказанного срока.

В свою очередь, ООО «СМЭУ «Заневка» принятые на себя обязательства по Договору исполнены. В ходе производства по указанному делу, ООО «СМЭУ «Заневка» в адрес Истца предоставлялся пакет документов, подтверждающий выполнение принятых обязательств. Согласно отзыву ЗАО СК «РосСтрой», следует, что данная документация принята последним и подтверждает полностью выполнение работ на произведенную оплату в размере 100 450 000,00 руб. 

 

Согласно ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

         В соответствии с ч. 2 ст.200 ГК РФ по обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Ответчик полагает, что если учитывать, что обязательства должны были быть исполнены в течение 36 месяцев со дня заключения договора (01.08.2013), началом течения срока исковой давности является 01.08.2016., который истек 01.08.2019. 

В соответствии со ст.450.1 ГК РФ, в случае, если право на односторонний отказ от договора предоставлено стороне на основании закона или договора, договор считается расторгнутым или измененным, с момента получения уведомления. 

Согласно п.6.4. Договора, Заказчик вправе отказаться от его исполнения в одностороннем порядке. 

Односторонний отказ получен  10.08.2018. Иск предъявлен в день поступления материалов по иску на почту, то есть 27.07.2021.

Вместе с тем, ввиду исполнения обязательств по договору односторонний отказ от договора считается недействительным.

При принятии иска к производству судом предоставлена  отсрочка уплаты государственной пошлины.

При цене иска – 18 471 687, 95 руб., уплате в федеральный бюджет подлежит 200 000 руб. государственной пошлины, которая взыскивается с истца ввиду отказа в удовлетворении иска.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с акционерного общества Строительная корпорация «РосСтрой» в доход федерального бюджета 200 000 руб. государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Хорошева Н.В.