Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А20-5140/2023

г. Нальчик

12 февраля 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 07 февраля 2024 года

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики

в составе судьи  А.В. Выборнова                            

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Е.В. Баглай,

 рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление муниципального унитарного предприятия «Теректеплосбыт» (ОГРН 

<

***>  ИНН 

<

***>), г. Терек

к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа им. С.А.Карданова сельского поселения Терекское" Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (ОГРН  

<

***>  ИНН 

<

***>), с.п.Терекское" 

о взыскании 556 737рублей 27 копеек,

при участии в судебном заседании представителей:

от ответчика – ФИО1 по доверенности от 26.10.2023, ФИО2 – директора

УСТАНОВИЛ:

муниципальное унитарное предприятие «Теректеплосбыт» обратилось в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с исковым заявлением к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа им. С.А. Карданова сельского поселения Терекское» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики о взыскании 711 903 рубля 15 копеек, в том числе: 694372 рубля 50 копеек – задолженность по отоплению за период с ноября 2022 года по январь 2023 года; 17530 рублей 65 копеек – неустойка.

Истец, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного заседания (в том числе путем размещения информации в картотеке арбитражных дел в информационно-телекоммуникационной сети Интернет), в суд не явился.

В связи с этим, дело рассмотрено по правилам статьи 156 АПК РФ -  без участия истца.

Представитель ответчика в судебном заседании 31.01.2024 просил в иске отказать, пояснил, что в рамках реализации государственной программы «Развитие образования», капитальный ремонт в МКОУ СОШ им. С.А. Карданова с.п. Терекское в помещении школы в заявленный период на основании муниципального контракта проводились ремонтные работы С 01.09.2022 по 31.05.2023 занятия обучающихся проводились в здании дошкольного отделения МКОУ СОШ им.С.А.Карданова с.п.Терекское в две смены, которая находится по адресу 

<

...>. Так как школа и дошкольное отделение являются одним юридическим лицом, был заключен только один договор, в котором были указаны оба объекта.

В судебном заседании 31.01.2024 объявлялся перерыв до 07.02.2023.

07.02.2024 от ответчика поступили письменные пояснения и дополнительные документы, которые приобщены к материалам дела.

Представитель ответчика в судебном заседании 07.02.2024 просил в иске отказать, по основаниям, изложенным в письменных пояснениях, поддержал ранее изложенные возражения на иск.

Рассмотрев и оценив в порядке 75 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства и оценив их в совокупности, проанализировав доводы искового заявления, выслушав позицию представителя ответчика,  суд установил следующие обстоятельства.

Между истцом (поставщик) и ответчиком (потребитель) заключен договор поставки тепловой энергии №16 от 26.01.2023, по условиям которых поставщик обязуется поставлять потребителю с 01.01.2023 тепловую энергию на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды для объектов, указанных в пункте 1.1 договора. 

Согласно пункту 2.1. договора поставка и отбор тепловой энергии без учета ее количества не допускаются. Количество поставленной тепловой энергии определяется  по показаниям контрольно-измерительных приборов, установленных на узле учета потребителя.

 В случае если у потребителя отсутствуют приборы учета, количество поставленной тепловой энергии определяется по показаниям приборов поставщика или по нормативам (п.2.3).

Пунктом 3.3. контракта предусмотрено, что окончательные расчеты за поставленную теплоэнергию  (или (ГВС) производится в срок до 10-го числа месяца, следующего за месяцем поставки.

Во исполнение указанного договора истец в феврале, марте и апреле 2023 года отпустил ответчику тепловую энергию, о чем  составлены акты  сдачи приемки-работ №123 от 28.02.2023, №227 от 31.03.2023 и №329 от 30.04.2023. 

Для оплаты стоимости поставленной тепловой энергии поставщик выставил ответчику для оплаты счета-фактуры №223 от 28.02.2023, №227 от 31.03.2023, №329 от 30.04.2023.

Однако, в нарушение своих обязательств, ответчик не оплатил стоимость потребленной тепловой энергии на дату подачи иска в суд в полном объеме.

Согласно актам сверки взаимных расчетов за спорный период задолженность составляет 503104 рубля 77 копеек.

Направленная в адрес  ответчика претензия оставлена без исполнения,  что послужило основанием для обращения истца с рассматриваемым иском в арбитражный суд. 

Правоотношения сторон по договорам поставки на теплоснабжение регулируются параграфом 6 главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон № 190-ФЗ).

 Правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, а также права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций установлены Законом № 190-ФЗ.

 В соответствии с пунктом 9 статьи 2 Закона № 190-ФЗ потребитель тепловой энергии - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 6 основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления.

 Согласно части 1 статьи 19 Закона № 190-ФЗ количество тепловой энергии, теплоносителя, поставляемых по договору теплоснабжения или договору поставки тепловой энергии, а также передаваемых по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, подлежит коммерческому учету. Учитывая, что у учреждения отсутствуют приборы учета тепловой энергии, предприятие определяло объем поставленного ассоциации ресурса расчетным способом. 

Согласно пункту 1 статьи 548 Гражданского кодекса Российской Федерации правила, предусмотренные статьями 539 - 547 данного Кодекса, применяются к отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенною сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. 

Пунктом 1 статьи 544 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. 

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом 

Часть 1 статьи 65 АПК РФ обязывает каждое лицо, участвующее в деле, доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

В обоснование своей позиции ответчиком представлены письменные пояснения, а именно муниципальный контракт, локальный сметный расчет, график выполненных работ, акты выполненных работ № 1 от 17.10.2022, № 2 от 13.12.2022, № 3 от 26.12.2022, № 5 от 18.09.2023.

 Из указанных документов следует, что между ответчиком (заказчик) и ООО «ЭлитСтрой» (исполнитель) на основании протокола подведения итогов открытого электронного конкурса от 06.04.2022 заключен муниципальный контракт № 01-22 от 18.04.2022 на выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ «Средняя общеобразовательная школа им. С.А. Карданова сельского поселения Терекское» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики».

 В соответствии с пунктом 1.1 муниципального контракта исполнитель обязуется выполнить работы по капитальному ремонту здания МКОУ «Средняя общеобразовательная шкала км. С.А Карданова с-п. Терекское Терского муниципального района КБР (далее работа) в соответствии с условиями настоящего контракта а также локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, и сдать выполненные работы заказчику, в объеме и сроки, предусмотренные контрактом, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего контракта.

 Срок выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта до 01.08.2023 (1 этап до 31.12.2023, 2 этап с 01.01.2023 до 01.08.2023) (пункт 3.1 контракта). 

В соответствии с пунктом 3.8 контракта заказчик вправе производить промежуточную приемку и оплату выполненных исполнителем работ в порядке, предусмотренном контрактом при отсутствии претензий к качеству и объему выполненных работ. Место выполнения работ: 361214, КБР, Терский район, с.п. Терекское, ул. Ленина, 7(пункт 3.10 контракта).

 20.05.2022 ответчиком в адрес истца направлено письмо № 133, в котором, сообщая, что в здании школы проводится капитальный ремонт (плановое окончание работ 01.08.2023), указывает, что до завершения ремонтных работ в подаче теплоэнергии в здании школы не нуждается. 

В ответ на письмо от 20.05.2022 № 133, истец направляет письмо от 24.05.2022 № 140, в котором указывает, что в здании школы находится помещение амбулатории, с которым заключен отдельный договор поставки тепловой энергии, в связи с чем, подача тепловой энергии в отопительный сезон 2022-2023 будет производится в полном объеме. 

 Ответчик, возражая против заявленных требований по основаниям, изложенным в письменных пояснениях, пояснил, что в рамках реализации государственной программы «Развитие образования», капитальный ремонт в МКОУ СОШ им. С.А. Карданова с.п. Терекское в помещении школы в заявленный период на основании муниципального контракта проводились ремонтные работы с 01.09.2022 по 31.05.2023 занятия обучающихся проводились в здании дошкольного отделения МКОУ СОШ им. С.А.Карданова с.п.Терекское в две смены, которая находится по адресу 

<

...>. 

Так как школа и дошкольное отделение являются одним юридическим лицом, был заключен только один договор, в котором были указаны оба объекта.

 Изучив представленные в суд акты о приемку выполненных работ, суд установил следующее. 

В соответствии с актом выполненных работ № 2 от 13.12.2022 в период с 01.11.2022 по 13.12.2022 в здании школы проводились следующие работы: - разборка трубопровода из подогазопроводимых труб диаметром до 25 мм. (пункт 196); - разборка трубопровода из подогазопроводимых труб диаметром до 32 мм. (пункт 197). 

В соответствии с актом выполненных работ № 3 от 26.12.2022 в период с 14.12.2022 по 31.12.2022 в здании школы проводились следующие работы: - прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из многослойных труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром до 25 мм. (пункт 201); - установка радиаторов: биометариал (пункт 251). В соответствии с актом выполненных работ № 5 от 18.09.2023 в период с 01.01.2023 по 18.09.2023 в здании школы проводились следующие работы: - разборка трубопровода из подогазопроводимых труб диаметром до 25 мм. (пункт 91); - разборка трубопровода из подогазопроводимых труб диаметром до 32 мм. (пункт 92); - прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных труб полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром до 50 мм. (пункт 93); - сборка узла трубопровода и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр 20 мм. (пункт 100); 9 - сборка узла трубопровода и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр 25 мм. (пункт 107); - сборка узла трубопровода и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр 32 мм. (пункт 100); - демонтаж радиаторов до 80 кг. (пункт 142); - установка радиаторов биометалл (пункт 143); - прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром 20 мм. (пункт 151); - прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром 25 мм. (пункт 154); - сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр 20 мм. (пункт 157); - сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр 25 мм. (пункт 161).

 В соответствии с пунктом 3 утвержденного календарного графика выполнения работ по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ им.С.А.Карданова с.п.Терекское, сантехнические работы (отопление, водопровод и водоотведение) проводились с июня 2022 года по июнь 2023 года. 

Указанными документами подтверждается факт того, что демонтаж-монтаж системы отопления ответчика производился в период с декабря 2022 по сентябрь 2023 года. Фактически работы по монтажу и подключению системы отопления ответчика завершены в сентябре 2023 года. 

Тепловая энергия является самостоятельным благом, и обязанность ее оплаты может быть возложена на субъект гражданского оборота только в случае потребления им такого блага.

 Пунктом 1 Правил учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденных Министерством топлива и энергетики Российской Федерации от 12.09.1995 года № ВК4936 и зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.09.1995 10 № 954, предусмотрено, что потребитель тепловой энергии - это юридическое или физическое лицо, которому принадлежат теплопотребляющие установки, присоединенные к системе теплоснабжения энергоснабжающей организации. 

Система теплоснабжения - это совокупность взаимосвязанных источников теплоты, тепловых сетей и систем теплопотребления. Система теплопотребления - это комплекс теплопотребляющих установок с соединительными трубопроводами и тепловыми сетями. 

Согласно пункту 3.44 СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» отопительными приборами являются радиаторы секционные или панельные одинарные; радиаторы секционные или панельные спаренные или одинарные для помещений, в которых отсутствует выделение пыли горючих материалов; отопительные приборы из гладких стальных труб. 

В силу статьи 2 Закона о теплоснабжении под теплопотребляющей установкой понимается устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии; под тепловой сетью - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок; под системой теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.

 В качестве потребителя тепловой энергии пунктом 9 названной статьи определено лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления.

 Для удостоверения факта получения абонентом тепловой энергии подлежит установить наличие у абонента возможности принимать поставленную тепловую энергию, то есть наличие теплопотребляющей установки в помещении абонента. 

В период с 01.11.2022 по 08.09.2023 в здании МКОУ «СОШ им. С.А. Карданова с.п. Терекское Терского муниципального района КБР» проводился капитальный ремонт, то есть отсутствовала кровля, трубопроводы центрального отопления, отопительные приборы (радиаторы), что подтверждается актами о приемке выполненным работ. Более того, 20.05.2022 администрация МКОУ СОШ им. С.А. Карданова с.п. Терекское обращалась в адрес генерального директора МУП «Теректеплосбыт» с просьбой не подавать теплоэнергию в связи с капитальным ремонтом здании школы. 

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что в спорный период в помещении ответчика отсутствовали теплопринимающие устройства, а следовательно фактическое потребление тепловой энергии, принятое посредством тепловыделения от изолированного трубопровода отопления и горячего водоснабжения, проходящего через помещение ответчика. 

Исследовав и оценив представленные в дело доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, что, истцом не представлено в материалы дела достаточных и допустимых доказательств поставки тепловой энергии в спорный период в помещение ответчика. Поэтому, суд приходит к выводу о том, что истцом не представлено доказательств поставки тепловой энергии в спорный период в помещение ответчика. 

С учетом изложенного суд не находит оснований для удовлетворения требований истца в части взыскания суммы основного долга за период с ноября 2022 года по январь 2023 года  в размере 503104,77 руб.

Требование о взыскании с ответчика пени за просрочку оплаты потребленной тепловой энергии, суд также признает необоснованным, поскольку пени являются производными от требования о взыскании суммы основного долга - не подлежащего удовлетворению.

В соответствии с частью 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при принятии решения арбитражный суд, в том числе, распределяет судебные расходы

   В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

           При подаче иска в суд  истцу предоставлена отсрочка уплаты госпошлины, в связи с чем, с исковой суммы 556 737рублей 27 копеек, размер государственной пошлины составляет 14 135 рублей, которая относится на ответчика и подлежит взысканию в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд      

Р Е Ш И Л :

1. В удовлетворении исковых требований отказать.

2. Взыскать с муниципального унитарного предприятия «Теректеплосбыт» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 14 135 рублей.

3. Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики в течении месяца со дня принятия (изготовления в полном объеме).

 

Судья                                                                               А.В. Выборнов