ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Батюшкова, д.12, г. Вологда, 160001

E-mail: 14ap.spravka@arbitr.ru, http://14aas.arbitr.ru

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

(д о п о л н и т е л ь н о е)

Дело № А05-8992/2021

г. Вологда

04 мая 2022 года

 

Резолютивная часть постановления (дополнительного) объявлена 28 апреля 2022 года.

В полном объеме постановление (дополнительное) изготовлено 04 мая 2022 года.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Колтаковой Н.А., судей Ралько О.Б. и                  Черединой Н.В., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания                   ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании вопрос об установлении срока выполнения работ по устройству покрытия крылец входной группы со стороны пр. Троицкий здания театра кукол с использованием керамо-гранитной плитки по делу А05-8992/2021,

у с т а н о в и л:

Государственное казенное учреждение Архангельской области «Главное управление капитального строительства» (адрес: 163000, 

<

...>; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с иском к закрытому акционерному обществу «Новая Эра» (адрес: 195220, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 33, корп. 2; ОГРН 

<

***>,                           ИНН 

<

***>) об обязании устранить недостатки работ, выполненных по государственному контракту на выполнение завершающих строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства «Пристройка сценическо-зрительного комплекса к основному зданию и реконструкция существующего здания Архангельского областного театра кукол»                          от 04.12.2017 № 0124200000617005945_246648.

К участию в деле третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено государственное автономное учреждение культуры Архангельской области «Архангельский театр кукол».

Решением суда от 30.12.2021 в удовлетворении иска отказано.

Учреждение с решением суда не согласилось, обратилось с апелляционной жалобой, в которой просило решение отменить, принять по делу новый судебный акт. 

Четырнадцатым арбитражным апелляционным судом 06.04.2022 вынесено постановление, изготовлена и оглашена его резолютивная часть, об отмене решения Арбитражного суда Архангельской области от 30 декабря 2021 года по делу № А05-8992/2021; удовлетворении иска государственного казенного учреждения Архангельской области «Главное управление капитального строительства»; обязании закрытого акционерного общества «Новая Эра» выполнить работы по устройству покрытия крылец входной группы со стороны пр. Троицкий здания театра кукол с использованием керамо-гранитной плитки; взыскании с закрытого акционерного общества «Новая Эра» в доход федерального бюджета 9 000 руб. государственной пошлины за рассмотрение иска и апелляционной жалобы. Полный текст постановления изготовлен 11 апреля 2022 года.

При этом судом не разрешен вопрос об установлении срока выполнения работ по устройству покрытия крылец входной группы со стороны пр. Троицкий здания театра кукол с использованием керамо-гранитной плитки.

Для рассмотрения данного вопроса назначено судебное заседание.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте судебного заседания, своих представителей не направили, в связи с этим вопрос об установлении срока выполнения работ по делу А05-8992/2021 рассмотрен без участия представителей указанных лиц в соответствии со статьями 123, 156, 266 АПК РФ. 

В связи с отпуском судьи Зайцевой А.Я. на основании статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации                        (далее – АПК РФ) произведена замена в составе суда на судью Чередину Н.В., о чем имеется соответствующее определение. 

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 3.12 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011  № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона                            от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», в данном случае положение части 5 статьи 18 АПК РФ об осуществлении судебного разбирательства с самого начала не применяется, так как постановление по делу уже принято.

Истец в поступившем ходатайстве просит установить срок выполнения работ – до 20.06.2022.

Ответчик в пояснениях от 15.04.2022 просит установить срок для выполнения работ в течение двух месяцев со дня получения ответчиком, утвержденной в установленном порядке проектной документации.

Применительно к пункту 2 части 1 статьи 178 АПК РФ арбитражный суд, вынесший постановление по своей инициативе или по заявлению лица, участвующего в деле, вправе вынести дополнительное постановление в случае, если суд, разрешив вопрос о праве, не указал в постановлении размер присужденной денежной суммы, подлежащее передаче имущество или не указал действия, которые обязан совершить ответчик. 

В соответствии с частью 1 статьи 174 АПК РФ при вынесении постановления, обязывающего ответчика совершить определенные действия, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения

Апелляционная коллегия, разрешив вопрос о праве, не указала срок, в течение которого ответчик обязан совершить действия по выполнению работ по устройству покрытия крылец входной группы со стороны пр. Троицкий здания театра кукол с использованием керамо-гранитной плитки. 

Учитывая изложенное, суд полагает возможным вынести дополнительное постановление, установив в соответствии с пунктом 1 статьи 174 АПК РФ ответчику срок для выполнения работ по устройству покрытия крылец входной группы со стороны пр. Троицкий здания театра кукол с использованием керамо-гранитной плитки – до 20.06.2022, считая такой срок достаточным, разумным с учетом обстоятельств дела, соответствующим интересам сторон и позволяющим соблюсти баланс между правами лиц, участвующих в деле.

Руководствуясь статьями 174, 178, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд

п о с т а н о в и л :

установить закрытому акционерному обществу «Новая Эра» срок для выполнения работ по устройству покрытия крылец входной группы со стороны пр. Троицкий здания театра кукол с использованием керамо-гранитной плитки - один месяц по делу № А05-8992/2021 до 20.06.2022.

Дополнительное постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия. 

Председательствующий

Н.А. Колтакова

 

Судьи

О.Б. Ралько

Н.В. Чередина