68/2017-23627(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А13- 17446/2016

город Вологда

07 марта 2017 года

 

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Вологодской области  

р е ш и л:

внести в муниципальный контракт от 20.04.2016 между обществом с  ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительное  проектирование» и Администрацией Бабаевского муниципального района  изменение, изложив пункт 2.1 в следующей редакции:  

«2.1. Общий срок выполнения работ: с момента заключения  муниципального контракта до 01.04.2017 г.».  

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.  

Судья А.А. Фадеева