АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

672002, Выставочная, д. 6, Чита, Забайкальский край

http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А78-5586/2023

г.Чита

26 сентября 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена  19 сентября 2023 года

Решение изготовлено в полном объёме 26 сентября 2023 года

 

Арбитражный суд Забайкальского края в составе судьи Малышева Л.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Доржиевой С.Б., рассмотрел в открытом судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу: 672000, 

<

...>, дело

по иску общества с ограниченной ответственностью «Разрезуголь» (ОГРН  

<

***>; ИНН  

<

***>)

к  обществу с ограниченной ответственностью «Альфадор» (ОГРН  

<

***>, ИНН  

<

***>)

о взыскании 226250 рублей штрафа за неисполнение своих обязательств по договору оказании услуг от 09.06.2022 №68/ОХД/2022,

 

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, представитель по доверенности от 01.01.2023;

от ответчика – представитель не явился.

 

Общество с ограниченной ответственностью «Разрезуголь» обратилось к обществу с ограниченной ответственностью «Альфадор» о взыскании 226250 рублей штрафа за неисполнение своих обязательств по договору оказании услуг от 09.06.2022 №68/ОХД/2022.

Определением от 14.07.2023 г. суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

В судебном заседании истец исковые требования поддержал.

Ответчик исковые требования не оспорил, явку представителя в суд не обеспечил, о времени и месте судебного заседания считается извещенным надлежащим образом.

Дело рассмотрено в порядке частей 1 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Иск мотивирован следующим.

09.06.2022г. между ООО «Разрезуголь» и ООО «АльфаДор» заключен договор на оказание услуг № 68/ОХД/2022 от 09.06.2022г. (далее также - договор).

В соответствии с условиями договора Исполнитель оказывает услуги: по селективной экскавации и добыче каменного угля (с предварительным рыхлением при возникновении потребности) на участке №1 Зашуланского месторождения; по погрузке и перевозке каменного угля на угольный штабель участка №1 Зашуланского месторождения, с сооружением и содержанием внутрикарьерных автодорог до угольного штабеля; по организации погрузки каменного угля в автотранспорт на угольном штабеле участка №1 Зашуланского месторождения.

Согласно п.5.1. договора стоимость услуг определяется в зависимости от ежемесячного объема оказываемых услуг и составляет 110,50 руб./тонна без НДС (в том числе: услуги по экскавации каменного угля - 27,00 руб. за 1 тонну без НДС; услуги по погрузке и перевозке каменного угля на угольный штабель участка №1 Зашуланского месторождения с сооружением и содержанием внутрикарьерных автодорог до угольного штабеля из расчета стоимости услуг по перевозке 1 т-км по маршруту, указанному в пункте 1 Договора, составляет - 63,50 руб. за 1 тонну без НДС; услуги по погрузке угля в автотранспорт на угольном штабеле участка №1 Зашуланского месторождения - 20,00 руб. за 1 тонну).

Согласно Графику оказания услуг (Приложение №1 к договору):

-    объем селективной экскавации и добычи, погрузки и перевозки угля автомобильным транспортом на угольный штабель на участке № 1 Зашуланского месторождения каменного угля в Красночикойском районе Забайкальского края составляет:

-    в мае 2022г. - 20 000 тонн;

-    в июне 2022г. - 20 000 тонн;

-    в июле 2022г. - 20 000 тонн;

-   в августе 2022г. - 15 000 тонн;

-   объем погрузки угля в автотранспорт на угольном штабеле участка № 1 Зашуланского месторождения каменного угля в Красночикойском районе Забайкальского края составляет:

-   в мае 2022г. - 20 000 тонн;

-   в июне 2022г. - 20 000 тонн;

-   в июле 2022г. - 20 000 тонн;

-   в августе 2022г. - 15 000 тонн.

В противоречие условиям договора Исполнитель в период с мая 2022 г. по август 2022г. услуги по договору не оказывал.

В соответствии с п.6.5. договора за невыполнение Исполнителем ежемесячного объема оказания услуг, определяемого в соответствии с п. 2.1. и п 2.9. Договора, Заказчик вправе потребовать с Исполнителя оплаты штрафа в размере 10% от суммы соответствующего тарифа с учетом НДС за каждую не вывезенную тонну угля. Оплата сумм неустойки может производиться путем удержания Заказчиком денежных средств из суммы, подлежащей оплате за выполненные объемы за месяц.

28.09.2022г. Заказчиком в адрес Исполнителя направлена претензия (№ РУ-Исх-22-883) с требованием об уплате штрафных санкции начисленных на основании п. 6.5. договора.

Сумма штрафных санкций, подлежащая взысканию с ООО «АльфаДор», составила 828 750,00 руб. (восемьсот двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек без НДС, что складывается из следующего:

110,50 * 10% * 75 000 = 828 750,00 руб., где

-   110,50 руб. - стоимость за 1 тонну оказываемых услуг без НДС;

-   10% - договорной штраф;

-   75 000 тонн - объем не оказанных услуг за период: май 2022г. - август 2022г. (согласно Приложению № 1 к договору).

Не согласившись с произведенным Заказчиком расчетом на основании объемов, указанных в Приложении №1 к договору, 10.11.2022г. Исполнитель направил Заказчику письмо № 90 от 10.11.2022г. с требованием произвести перерасчет штрафных санкций исходя из объемов услуг, указанных в заявках.

Своим письмом ООО «АльфаДор» подтверждает, что ООО «Разрезуголь» подавались заявки с плановыми объемами по отгрузке и транспортировке угля в июне, июле, августе2022г.

ООО «Разрезуголь» согласно Заявкам, направленным Заказчиком, объем селективной экскавации и добычи, погрузки и перевозки угля автомобильным транспортом на угольный штабель на участке № 1 Зашуланского месторождения каменного угля в Красночикойском районе Забайкальского края составляет:

-   в мае 2022г. - 0 тонн (заявка не подавалась);

-   в июне 2022г. - 15 000 тонн;

-   в июле 2022г. - 5 000 тонн;

-   в августе 2022г. - 5 000 тонн.

При этом указанные услуги в период с мая 2022г. по август 2022г. ООО «АльфаДор» не оказывались.

В связи с этим сумма штрафа, подлежащая взысканию с ООО «АльфаДор», исходя из объемов услуг, указанных в заявке, составляет 226 250,00 руб. без НДС, что складывается из следующего: 90,50 * 10% * 25 000 = 226 250,00 руб., где

-   90,50 руб. - стоимость за 1 тонну услуг по добыче (где 27,00 руб. - услуги по экскавации каменного угля, 63,50 руб. - услуги по погрузке и перевозке каменного угля на угольный штабель участка №1);

-   10% - договорной штраф;

- 25000 тонн - объем не оказанных услуг за период: май 2022г. - август 2022г. (согласно Заявкам Заказчика).

Требование (претензию) истца от "14" марта 2023г. N РУ- Исх-23-302 о выплате неустойки (или: пени, штрафа) за нарушение сроков оказания услуг в размере 226 250 (двести двадцать шесть тысяч двести пятьдесят) рублей ответчик добровольно не удовлетворил.

В связи с отсутствием оплаты истец обратился с иском в суд.

Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона (статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускает одностороннего отказа от исполнения обязательств.

В соответствии с пунктом 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно пункту 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.  

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой (статья 329 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно статье 331 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

Истец, в соответствии с пунктом 6.5 договора, заявил требование о взыскании с ответчика 226250 рублей штрафа за неисполнение своих обязательств по договору оказании услуг от 09.06.2022 №68/ОХД/2022

Расчет неустойки судом проверен и является правильным.

Ответчик доказательств, опровергающих доводы истца в суд не представил. 

Таким образом, требование истца о взыскании с ответчика 226250 рублей штрафа обоснованно и подлежит удовлетворению на основании статей 8, 307, 309, 779, 781, 330, 331 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Расходы по госпошлине по правилам части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит возложить на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Альфадор» (ОГРН  

<

***>, ИНН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Разрезуголь» (ОГРН  

<

***>; ИНН  

<

***>) 226250 руб. штрафа, 7525 руб. расходов по оплате государственной пошлины, всего 233775 руб.

 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия.

 

Судья                                                                                               Л.В. Малышев