ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело№ А40-266633/24-15-2135

19 марта 2025 г.

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 06 марта 2025 года. 

Решение в полном объеме изготовлено 19 марта 2025 года.

Арбитражный суд в составе: судьи Ведерникова М.А.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Зайченко О.И.

рассматривает в открытом судебном заседании иск

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "18 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОГРН 

<

***>)

к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТОЧНЫХ ПРИБОРОВ" (ОГРН 

<

***>)

о взыскании неустойки в размере 27125 руб.

и приложенные к исковому заявлению документы,

при участии представителей сторон:

от истца: ФИО1 по дов. №17 от 20.08.2024

от ответчика: ФИО2 по дов. №38/2025 от 24.01.2025

УСТАНОВИЛ:

ФГУП "18 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к АО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТОЧНЫХ ПРИБОРОВ" (далее – ответчик) о взыскании неустойки (пени) по договору № 91/5203 от 11.02.2019 за период с 11.11.2021 по 15.12.2021 в размере 27 125 руб.

Истец требования поддержал в полном объеме по доводам изложенным в исковом заявлении.

Ответчик представил отзыв на исковое заявление в котором ходатайствовал о применении норм ст. 333 ГК РФ.

Изучив материалы дела, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требование заявителя подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно материалам дела, между Федеральным государственным унитарным предприятием «18 Центральный научно-исследовательский институт» Министерства обороны Российской Федерации (далее - Исполнитель или ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ) и Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт точных приборов» (далее - Заказчик или АО «НИИ ТП») был заключен договор № 91/5203 от 11.02.2019 на выполнение составной части опытно-конструкторской работы (далее - СЧ ОКР).

Согласно п. 1.1 Договора Исполнитель обязуется в установленный Договором срок выполнить работу в объеме, соответствующую качеству, результату и иным требованиям, установленным Договором, и своевременно сдать Заказчику ее результаты, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

В протоколе № 1 согласования фиксированной цены к Договору стороны определили стоимость этапа № 2 СЧ ОКР в размере 6 200 000,00 руб.

На основании платежного поручения от 20.06.2019 № 05890 Заказчиком на расчетный счет Исполнителя был перечислен авансовый платеж в размере 3 100 000,00 руб.

Пунктом 4.1 Договора установлено, что СЧ ОКР выполняется в сроки, установленные в ведомости исполнения (Приложение № 1 к Договору).

В соответствии с ведомостью исполнения к Договору срок выполнения этапа № 2 СЧ ОКР - 15.03.2019-14.11.2019. Однако Заказчиком в письме от 31.10.2019 исх. № НТК-4/0862 срок выполнения этапа № 2 СЧ ОКР изменен до получения Исполнителем фактических результатов.

Исполнителем этап № 2 по Договору выполнен и сдан Заказчику 28.05.2021, что подтверждается актом сдачи-приемки.

Пунктом 6.3 Договора установлено, что оплата выполненного этапа СЧ ОКР осуществляется после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненного этапа СЧ ОКР, оформленного актом сдачи-приемки выполненного этапа СЧ ОКР, путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя.

На основании п. 6.7 Договора оплата этапа СЧ ОКР производится в размере фиксированной цены, в соответствии с протоколом согласования фиксированной цены, согласованной в установленном порядке, в течение 10 банковских дней, с даты поступления денежных средств от Государственного заказчика, с учетом ранее выплаченного аванса.

АО «НИИ ТП» денежные средства для окончательного расчета по Договору от Государственного заказчика в рамках государственного контракта № 18/201/ОКР от 04.05.2018 были получены на основании платежного поручения от 26.10.2021 № 1168.

С учетом требований п. 6.7 Договора, Заказчик должен был оплатить выполненный этап № 2 СЧ ОКР в размере 3 100 000,00 руб. в период с 26.10.2021 по 10.11.2021, однако окончательный расчет в указанном размере был перечислен Заказчиком на основании выставленного Исполнителем счета от 03.06.2021 № 102К с просрочкой на 35 дней, что подтверждается платежным поручением от 15.12.2021 № 14250.

Согласно п. 8.8 Договора в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по окончательному расчету за выполненные работы, предусмотренному Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от размера просроченного окончательного расчета за выполненные работы за каждый факт просрочки.

В соответствии с Указанием Банка России от 11.12.2015 № 3894-У «О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России» с 01.01.2016 значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую дату.

Согласно п. 8.8 Договора с АО «НИИ ТП» подлежит взысканию неустойка в размере 27 125,00 руб.

Непосредственно исследовав доводы истца изложенные выше, суд пришел к выводу об обоснованности заявленных исковых требований в силу следующих обстоятельств.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой (пеней, штрафом), предусмотренной законом или договором.

Согласно ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Суд считает, что поскольку ответчиком были нарушены условия договора, у истца возникло право на взыскание с ответчика неустойки пени в размере 27 125 руб. за период с 11.11.2021 по 15.12.2021.

Расчет истца суммы неустойки судом проверен, признан законным и обоснованным, ответчик факт нарушения обязательств не оспаривал, представил ходатайство о применении норм ст. 333 ГК РФ. Однако, оснований для применения норм ст. 333 ГК РФ судом не установлено. Каких-либо доказательств несоразмерности последствиям нарушения обязательства ответчиком не представлено.

Таким образом, суд считает требования истца правомерными и подлежащими удовлетворению, а неустойка в сумме 27 125 руб. подлежит принудительному взысканию с ответчика в пользу истца, так как от него не поступили документы в суд, подтверждающие ее оплату и так как односторонний отказ от исполнения обязательств, в данном случае денежных, противоречит ст. ст. 309, 310 ГК РФ.

В силу п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

При таких обстоятельствах, суд считает требования истца правомерными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

В силу п. 1 ст. 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь ст. 8, 11, 12, 307-309, 329, 330, 702, 711, ГК РФ, ст.ст. 4, 9, 64-66, 71, 75, 110, 156, 167-171 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТОЧНЫХ ПРИБОРОВ" (ОГРН 

<

***>) в пользу ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "18 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОГРН 

<

***>) сумму договорной неустойки в размере 27 125 руб., а также государственную пошлину в размере 10 000 руб.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.

СУДЬЯ:М.А. Ведерников