22_943883  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  Коммунистический проспект, д. 28, г. Южно-Сахалинск, 693000  тел./факс 460-945, http://sakhalin.arbitr.ru, info@sakhalin.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-4821/2018

г. Южно-Сахалинск

24 января 2020 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Зуева М.В.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно- Сахалинск» «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «Строй-Альянс» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) о понуждении к исполнению гарантийных обязательств,  взыскания штрафа за неисполнение гарантийных обязательств и судебной  неустойки,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 174 и 176 АПК РФ, 

решил:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Строй-Альянс»  в течение тридцати календарных дней после вступления решения суда в  законную силу исполнить принятые на себя обязательства по  муниципальному контракту от 29.10.2015 № 032-141-15 и произвести все  необходимые работы по устранению выявленных недостатков на объекте в  рамках гарантийных обязательств, а именно:  

- заменить бордюрный камень БР100*30*15 в количестве 239 м.п. на  участке от ул. 2-я Хабаровская до ул. 30 лет Победы на новый;  

- провести санацию и ремонт продольной трещины вблизи  поликлиники в объеме 25 м.п. на оси проезжей части в соответствии с п.  5.7 ОДМ 218.3.036-2013 «Рекомендации по технологии санации трещин и  швов в эксплуатируемых дорожных покрытиях» применительно к  широким трещинам (разрывы от 20 до 30 мм. и более);  

- выкрашивание и отсутствие асфальтобетонного покрытия в объеме  20 кв.м вблизи жилого дома по пер. Железнодорожный, д. 14 устранить в  рамках проведения ремонта асфальтобетонного покрытия в соответствии с  технологией производства работ согласно КТП 1.01.2001 «Ямочный  ремонт асфальтобетонных покрытий при глубине выбоин до 50 мм» и  ГОСТ Р 54401-2011 «Дороги автомобильные общего пользования.  Асфальтобетон дорожный литой горячий. Технические требования»;  

- заделать вырубки в асфальтобетонном покрытии в количестве 1  штуки.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй- Альянс» в пользу муниципального казенного учреждения городского  округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление дорожного хозяйства и  благоустройства» 575 110 рублей 36 копеек штрафа.  

В случае неисполнения судебного акта взыскать с общества с  ограниченной ответственностью «Строй-Альянс» в пользу  муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно- Сахалинск» «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»  судебную неустойку из расчета: 30 000 рублей за каждый календарный  день неисполнения решения, начиная с тридцать первого календарного дня  после даты вступления в законную силу решения; 40 000 рублей за каждый  календарный день неисполнения решения, начиная с шестьдесят первого  календарного дня после даты вступления в законную силу решения; 50 000  рублей за каждый календарный день неисполнения решения, начиная с  девяносто первого календарного дня после даты вступления в законную  силу решения до дня его фактического исполнения.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй- Альянс» в доход федерального бюджета 20 502 рубля государственной  пошлины.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в  полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области, в  кассационном порядке – в Арбитражный суд Дальневосточного округа в  течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.  

Судья М.В. Зуев