Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А41-76520/2022

г. Москва

20 февраля 2023 года.

Резолютивная часть решения объявлена 08 февраля 2023 года.

Мотивированное решение изготовлено 20 февраля 2023 года.

Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-76520/2022 по иску ООО «ХАРВАЛ ЭНТЕРПРАЙЗИС» (ОГРН 

<

***>) к ООО «ВИНАЛЮМ» (ОГРН 

<

***>) о взыскании 12 900 000,00 руб. неотработанного аванса по договору № 5 от 21.05.2021, 1 570 987,19 руб. неустойки, при участии в судебном заседании: согласно протоколу,

УСТАНОВИЛ:

ООО «ХАРВАЛ ЭНТЕРПРАЙЗИС» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к ООО «ВИНАЛЮМ» (далее – ответчик) о взыскании 12 900 000,00 руб. неотработанного аванса по договору № 5 от 21.05.2021 и 1570987,19 руб. неустойки.

Исковые требования мотивированны неисполнением ответчиком своих обязательств по договору подряда в установленные сроки.

В судебном заседании представитель истца требования искового заявления поддержал в полном объёме, а представитель ответчика против удовлетворения исковых требований возражал, полагая доводы истца необоснованными.

Рассмотрев материалы искового заявления ООО «ХАРВАЛ ЭНТЕРПРАЙЗИС», исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, выслушав представителей сторон, суд полагает, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражный суд осуществляет защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Как следует из материалов дела, 21.05.2021 между ООО «ХАРВАЛ ЭНТЕРПРАЙЗИС» (подрядчик) и ООО «ВИНАЛЮМ» (субподрядчик) заключен договор подряда № 5 (далее – договор), согласно которому подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить предусмотренный договором комплекс работ по изготовлению чертежей КМ и КМД, изготовлению и монтажу светопрозрачных конструкций, на объекте строительства, а подрядчик обязуется принять результат работ и произвести оплату в соответствии с условиями договора (п. 1.1 договора).

Стоимость работ по договору определяется в соответствии с согласованным сторонами приложением № 1 к договору «Состав, объем и стоимости работ» и составляет 21 747 567,82 руб. (п. 7.1 договора).

Сроки выполнения работ по договору: начало работ – 21.05.2021, окончание работ – 23.08.2021 (раздел 4 договора).

09.08.2021 между истцом и ответчиком заключено дополнительное соглашение № 1 к договору, предусматривающее выполнение субподрядчиком дополнительных работ по ограждению балконов. Общая стоимость работ по договору, с учетом дополнительного соглашения, составила 23 447 567,82 руб. Срок выполнения работ по договору в редакции дополнительного соглашения – 30.09.2021.

Как указал истец, ООО «ХАРВАЛ ЭНТЕРПРАЙЗИС» в счет оплаты аванса за выполнение работы в будущем перечислило ООО «ВИНАЛЮМ» денежные средства по договору субподряда на общую сумму 12 900 000 руб. 00 коп., что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями (т. 1, л.д. 26-27) и не оспаривается ответчиком по существу.

Вместе с тем, ответчик к выполнению работ не приступил, работы в установленный договором срок не выполнены.

Письмом от 29.10.2021 № 382 истец уведомил ответчика о расторжении договора подряда в одностороннем порядке, в связи с неисполнением субподрядчиком своих обязательств и потребовал возвратить перечисленный по договору аванс.

Ответчик денежные средства не вернул, что послужило для истца основанием обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением.

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В пункте 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Право заказчика на отказ от исполнения договора подряда предусмотрено положениями статей 715, 717 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В связи с нарушением субподрядчиком срока выполнения работ подрядчик отказался от исполнения договора и потребовал вернуть аванс (письмо от 29.10.2021 № 382).

Пунктом 1 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора).

Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (п. 2 ст. 450.1 ГК РФ).

Письмо истца от 29.10.2021 № 382 направлено в адрес ответчика 03.11.2022 (почтовый идентификатор № 14150865001483)

Согласно сведениям сайта Почта России почтовое отправление возвращено отправителю 08.12.2021.

В соответствии с пунктом 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю; сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Согласно разъяснениям, содержащимся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 №25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 25), юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в ЕГРЮЛ либо по адресу, указанному самим юридическим лицом, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя; сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не находится по указанному адресу (пункт 63); юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) (пункт 67).

Таким образом, спорный договор подряда расторгнут с 08.12.2021.

Согласно пункту 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации при расторжении договора обязательства сторон прекращаются. Полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала, являются неосновательным обогащением получателя (пункт 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении»).

В соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, исходя из представленных доказательств; каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статьи 64 (часть 1), 65 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу (статья 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (статья 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

 Частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Принимая во внимание совокупность изложенных обстоятельств дела, учитывая отсутствие в материалах дела доказательств выполнения ответчиком работ в установленный договором срок на сумму перечисленного аванса, установленный факт расторжения договора подряда и отсутствие правовых оснований для удержания ответчиком денежных средств в сумме 12 900 000,00 руб., требования истца о взыскании 12 900 000,00 руб. неотработанного аванса по договору № 5 от 21.05.2021 подлежит удовлетворению в полном объеме.

Каких-либо доказательств передачи подрядчику результата работ на сумму 12 900 000 руб. 00 коп. по договору подряда или возврата указанных денежных средств, субподрядчиком при рассмотрении судом настоящего дела не представлено.

Доводы о том, что сумма аванса ответчиком частично отработана ввиду осуществления закупки материалов в рамках исполнения обязательств по договору на общую сумму 9 570 447 руб. 59 коп., что подтверждается представленными в материалы дела универсальными передаточными документами (УПД), отклоняются судом ввиду их несостоятельности. 

Согласно п. 1 ст. 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу. 

Представленные ответчиком УПД не содержат указания на спорный договор, в связи с чем не представляется возможным их соотнести с договором № 5 от 21.05.2021  и работами, определенными данным договором. 

Представленные в материалы дела документы не позволяют сделать вывод, что данные материалы были закуплены ответчиком именно в целях исполнения спорного договора с истцом и в настоящее время находятся у подрядчика. 

Доказательств того, что закупленные материалы обладают уникальными свойствами, не могут быть использованы при выполнении ответчиком работ на объектах других заказчиком, либо реализованы третьим лицам, не представлено. 

Доказательств передачи истцу закупленных ответчиком материалов и оборудования не представлено.

Ссылка ответчика на понесенные им расходы по разработке комплекта рабочей конструкторской документации по разделам КМ и КМД в размере 250 000 руб. и расходов по договору строительного подряда № 15 от 17.01.2022 в размере 488 150 руб. также не принимается судом.

Основание и размер возмещения понесенных субподрядчиком затрат должны быть подтверждены документами, предусмотренными спорным договором.

Ответчиком не представлены в материалы дела акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат на спорные суммы, которые несут безусловное обязательство по оплате работ.

Довод ответчика о сдаче истцу работ по договору на сумму 18 543 818 руб. 42 коп. суд находит необоснованными в силу следующего.

Спорный договор расторгнут 08.12.2021, при этом, акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3 № 1 на сумму 18 543 818 руб. направлены ответчиком после подачи настоящего иска в суд.

После расторжения договора у истца отсутствуют обязательства по подписанию каких-либо актов по договору, в том числе, обязанность по направлению каких-либо мотивированных возражений по таким актам.

Вместе с тем, письмом № 165 от 26.12.2022 истец мотивированно отказался от подписания актов.

Ответчиком, в нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации также не представлена суду какая-либо исполнительная документация на спорный объем выполненных работ, в т.ч. акты освидетельствования скрытых работ, журнал производства работ, сертификаты, технические паспорта на материалы, акты испытаний по видам работ и т.д.

Ходатайство о проведении судебной строительно-технической экспертизы ответчиком не заявлено.

В соответствии со статьёй 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с пунктом 15.1.2 договора подряда, в случае, если субподрядчиком допущено нарушение сроков сдачи работ по договору, подрядчик вправе начислить субподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по договору за каждый день просрочки, но не более 20 % от стоимости работ.

Ввиду нарушения сроков выполнения работ субподрядчиком, истец заявил требования о взыскании с ответчика 1 570 987,19 руб. неустойки, начисленной за период с 24.08.2021 по 29.10.2021.

Вместе с тем, истец не учитывает срок выполнения работ, согласованный сторонами в рамках дополнительного соглашения, с учетом положений которого, неустойка не может быть начислена ранее 30.09.2021.

Судом произведен перерасчет неустойки с учетом конечного срока выполнения работ, согласованного сторонами в рамках дополнительного соглашения. Сумма подлежащей взысканию неустойки за период с 01.10.2021 по 29.10.2021 составляет 679 979 руб. 47 коп.

Представителем ответчика заявлено ходатайство о применении положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации к спорным правоотношениям в связи с несоразмерностью размера подлежащей взысканию неустойки последствиям неисполнения ответчиком своих обязательств по спорному договору.

В соответствии с пунктом 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

В соответствии с пунктом 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 июля 1997 года №17 «Обзор применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» основанием для применения названной нормы может служить только явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств. Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки сумме возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, длительность неисполнения обязательства и другие обстоятельства.

Пунктом 69 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» установлено, что подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 73 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ).

Согласно пунктам 74, 75 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» возражая против заявления об уменьшении размера неустойки, кредитор не обязан доказывать возникновение у него убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ), но вправе представлять доказательства того, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно, например, указать на изменение средних показателей по рынку (процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, валютных курсов и т.д.). При этом при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).

Доказательств, подтверждающих явную несоразмерность заявленной к взысканию суммы неустойки последствиям нарушения своих обязательств ответчик не представил.

Принимая во внимание обстоятельства настоящего дела, длительность неисполнения ответчиком своих обязательств по договору, отсутствие признаков явной несоразмерности подлежащей взысканию неустойки нарушенному обязательству, суд не находит предусмотренных законом бесспорных оснований для снижения суммы неустойки согласно положениям статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного, требования истца о взыскании неустойки подлежат удовлетворению в размере 679 979,53 руб. за период с 01.10.2021 по 29.10.2021.

Принимая во внимание указанные обстоятельства дела, отсутствие в материалах дела доказательств выполнения ответчиком своих обязательств по спорному договору подряда, при наличии документально подтвержденных требований истца, суд полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению в указанном объеме.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «ВИНАЛЮМ» (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО «ХАРВАЛ ЭНТЕРПРАЙЗИС» (ОГРН 

<

***>) 12 900 000,00 руб. неотработанного аванса по договору № 5 от 21.05.2021, 679 979,53 руб. неустойки за период с 01.10.2021 по 29.10.2021, а также 89 484 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия если не подана апелляционная жалоба.

Судья                                 П.И. Машин