АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 610017, 

<

...> http://kirov.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

Дело № А28-10996/2024

г. Киров

20 октября 2025 года

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Татаренковой Е.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем Шулятевой Т.Л., рассмотрел в судебном заседании исковое заявление 

общества с ограниченной ответственностью «Северный берег» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 610047, 

<

...>)  

к некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 610017, 

<

...>, помещ. 500-512)  

об обязании выполнить работы, 

без участия в судебном заседании представителей. 

Руководствуясь статьями 49, 110, 112, 156, 167-170, 176, 180, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Северный берег» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 610047, 

<

...>) удовлетворить.  

 Обязать некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 610017, 

<

...>, помещ. 500-512) провести капитальный ремонт крыши и фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...> течение одного календарного года с момента вступления решения суда в законную силу с выполнением следующих работ, а именно:  

1. Разработать техническую документацию для проведения работ по капитальному  

ремонту; 

2. Провести техническое обследование дома в целях определения необходимого  

объема и стоимости работ; 

3. Подготовить проектную документацию с последующим проведением  

государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы, если  

законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение такой  

экспертизы. 

4. Провести следующие виды работ по капитальному ремонту крыши: 

- демонтаж существующего покрытия; - полная замена обрешетки; - частичная замена и усиление элементов стропильной системы; 

- выполнить полную замену покрытия кровли на профнастил оцинкованный НС35, толщиной 0,7 мм, при монтаже предусмотреть устройство подкладного бруса под стык листов профнастила;  

- произвести огнебиозащитную обработку всех деревянных конструкций и элементов крыши;  

- выполнить разборку существующего утеплителя (шлак);  

- по очищенному от шлака перекрытию уложить слой пароизоляции рулонного типа, затем выполнить укладку утеплителя из плит теплоизоляционных (негорючих) на основе базальтовых пород толшиной S=250мм. По верху утеплителя уложить слой паропроницаемой гидро-ветрозащитной пленки;  

- выполнить ходовые доски, мостики, трапы для обслуживания инженерных систем и элементов стропильной системы и кровли  

- выполнить замену существующих слуховых окон заменой обшивки боковых поверхностей и установкой жалюзийных решеток из оцинкованной стали;  

- выполнить восстановление кирпичной кладки, устройство штукатурного и окрасочного слоя вентканалов, установить защитные колпаки на оголовках вентканалов;  

- выполнить замену люков выхода на чердак на огнестойкие, соответствующие пределу огнестойкости Ei30;  

- вывести фановые стояки за пределы кровли 

- устройство защитного ограждения и снегозадержателей на кровле;  

- устройство водоотведения кровли, с заменой желобов, водосборных воронок, водосточных труб, наружных и внутренних изделий;  

- устройство рым-гаек (рым-болтов) на крыше шагом 3 м;  

- устройство не менее двух коньковых аэраторов с защитными колпаками размером не менее 500 * 500 мм.  

5. Провести следующие виды работ по капитальному ремонту фасада: 

- демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление), утепление цоколя, обработку гидрофобизирующими составами;  

- установка и разборки инвентарных лесов; 

-демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) наружных стен, включая штукатурные работы;  

- восстановление (включая усиление) с частичной перекладкой кирпичей кладки стен;  

-инъектирование трещин кирпичной кладки стен; 

- очистки и промывка наружных стен фасада из кирпича; - окраска стен фасада  

- демонтаж, монтаж, восстановление деформационных швов; - окраска оконных рам, оконных откосов; - замена оконных отливов, отливов балконных плит; 

- демонтаж, монтаж, восстановление или замена ограждающих и несущих конструкций открытых балконов и лоджий с восстановлением гидроизоляции;  

- демонтаж, монтаж, восстановление, устройство продухов для вентиляции подвального помещения с утепленными открывающимися створками;  

- демонтаж, монтаж, восстановление, установка домового знака; 

- демонтаж, монтаж, восстановление, установка решеток по периметру стен  

фасада на продухи чердачного помещения; - замена дверей входа в подъезды; 

- демонтаж, монтаж, восстановление, замена устройство подвальных окон,  

приямков, спусков в подвал и дверей входа в подвал; 

- демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство системы наружного  

водостока; 

- демонтаж, монтаж, восстановление, замена покрытий козырьков балконов  

верхних этажей; 

- демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство козырьков над входами  

в подъезды, подвалы; 

- установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или  

разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей  

ремонтируемых (заменяемых) конструкций, установленных по строительному  

проекту многоквартирного дома. 

 Взыскать с некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 610017, 

<

...>, помещ. 500-512) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Северный берег» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 610047, 

<

...>) 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.  

 Взыскать с некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 610017, 

<

...>, помещ. 500-512) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Экспертнадзор» (ИНН 

<

***>, адрес: 610014, 

<

...>) 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек расходов за проведение экспертизы.  

Исполнительные листы выдаются в порядке, установленном разделом VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Кировской области.  

Судья Е.А. Татаренкова