именем Российской Федерации

решение

13 сентября 2019 г.                                    Дело № А40-152138/19-89-906

Резолютивная часть решения объявлена                                03.09.2019 г. 

Решение в полном объеме изготовлено                                    13.09.2019 г.

Арбитражный суд г.Москвы в составе: председательствующего судьи Акименко О.А.

протокол судебного заседания вел помощник судьи Грачев М.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Стройтехно» 

к ответчику Акционерное общество «Желдорипотека»

о взыскании задолженности в размере 1 141 702 руб. 63 коп. по договору №41-ХБР(СМ,В)

В соответствии со ст. 63 АПК РФ суд проверил полномочия лиц, явившихся в заседание.

в судебное заседание явились:

от истца: ФИО1 по дов от 04.03.2019г.

от ответчика: ФИО2 по дов от 20.08.2019г.

УСТАНОВИЛ:

Иск  заявлен о взыскании задолженности в размере 1 141 702 руб. 63 коп. по договору №41-ХБР(СМ.В).

Требования  заявлены  на  основании  309-310, 702, 711 ГК РФ, ст. 27, 35, 106, 110, 125, 126, АПК РФ.

Истец исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал по доводам, изложенным в отзыве.

Рассмотрев материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, заслушав мнение лиц, участвующих в деле, арбитражный суд установил, что требования ООО «Стройтехно»  подлежат удовлетворению последующим основаниям.

Как усматривается судом из материалов дела, между ООО «Стройтехно» и АО «Желдорипотека» было заключен договор выполнение работ по строительству модульных жилых домов №41-ХБР(СМ.В) от 17.11.2016г., предметом которого, в соответствии с п. 1.1., является выполнение работ по строительству жилых домов на ст. Высокогорная.

По договору подрядчик обязуется в установленный договором срок, с надлежащим качеством, по твердой договорной цене, выполнить работы в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документацией,  определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также в соответствии с условиями Договора и требованиями нормативной документации, произвести испытания смонтированного оборудования, выполнить технические условия и подключить Объект к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, своевременно устранить недоделки, дефекты и все иные недостатки, выявленные в ходе сдачи-приемки Работ или после приемки в течение гарантийного срока, ввести Объект в эксплуатацию, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить обусловленную Договором цену.

В соответствии с п. 3.1. договора, цена работ, подлежащих выполнению по договору, включая выполнение подрядчиком всех своих обязательств по нему, составляет 4 552 538 руб. 65 коп.

Во исполнение условий договора, истцом были выполнены работы в полном объеме и надлежащего качества, что подтверждается подписанным в двустороннем порядке справкой о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 №5 от 25.12.2018г. на общую сумму 1 201 792 руб. 24 коп.

Претензий по качеству, объему и срокам выполненных работ от ответчика не поступало.

Таким образом, ответчик принял без возражений и замечаний работы в соответствии с вышеуказанными документами.

Однако ответчик ненадлежащим образом выполнил принятые на себя обязательства по оплате выполненных работ, в связи с чем, за ним образовалась задолженность в размере 1 141 702 руб. 63 коп.

Статьей 307 Гражданского кодека Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) установлено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе.

В соответствии со статьёй 401 Гражданского кодекса, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно части 1 статьи 711 Гражданского кодекса установлена обязанность заказчика уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно положениям статьи 753 Гражданского кодекса заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Как следует из пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По смыслу гражданско-правового регулирования отношений сторон в сфере подряда и согласно сложившейся в правоприменительной практике правовой позиции, основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 января 2000 г. № 51).

Таким образом, с учетом отсутствия доказательств оплаты задолженности, суд считает, что требование о взыскании задолженности заявлено правомерно и подлежит удовлетворению в полном объеме в размере 1 141 702 руб. 63 коп.

Государственная пошлина подлежит распределению в порядке ст.110 АПК РФ.

Суд, руководствуясь ст.ст. 309-310, 702, 711, 753 ГК РФ и ст.ст. 4, 65,69, 75, 110, 156, 170-175 АПК РФ,

РЕШИЛ:

Взыскать с Акционерного общества «Желдорипотека» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Стройтехно» задолженность в размере 1 141 702 (один миллион сто сорок одна тысяча семьсот два) руб. 63 коп.

Взыскать с Акционерного общества «Желдорипотека» в доход федерального бюджета госпошлину в размере 24 417 (двадцать четыре тысячи четыреста семнадцать) руб. 03 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                          О.А. Акименко