АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-2716/2019

г. Ярославль

09 апреля 2019 года

Резолютивная часть решения оглашена  28 марта 2019 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Лапочкиной И.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Волгоградсервис" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

к  обществу с ограниченной ответственностью "Реминдустрия" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

о   взыскании   29589190.90  руб.,

при участии:

от истца - ФИО2 по доверенности от 26.03.2019, ФИО3 генеральный директор по выписке из ЕГРЮЛ 

от ответчика - не явился 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Волгоградсервис" обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Реминдустрия" о взыскании 29 589 190,90 руб.

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме. 

Ответчик о дате и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом, письменный отзыв не представил, в связи с чем несет риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий в соответствии со ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

Дело слушается в порядке, предусмотренном ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в отсутствие ответчика.

Заслушав представителей истца, исследовав материалы дела, суд установил следующее. 

Между обществом с ограниченной ответственностью "Волгоградсервис" /Субподрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Реминдустрия" /Генподрядчик/ заключен договор субподряда № 18/02-18 от 20.02.2018 (далее – договор № 18/02-18), согласно п. 1.1 которого Субподрядчик но заданию Генподрядчика выполняет «Комплекс работ но техническому перевооружению производства КМ-2» согласно выдаваемой Заказчиком проектно-технической документации, на территории Заказчика ОАО «Славнефть-ЖОС».

В соответствии с п. 1.2 Договора № 18/02-18 объемы, виды работ, а также их стоимость и сроки выполнения будут определяться в дополнительных соглашениях к настоящему договору.

Стоимость работ, поручаемых Субподрядчику, определяется сметными расчетами, составленными, на основании выданных проектных смет, рассчитанными на основании Регламента (Приложение №1), утвержденными Генподрядчиком, и оформляется дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора с момента их подписания (п. 2.1 Договора № 18/02-18).

Субподрядчик ежемесячно в срок не позднее 20 числа текущего месяца представляет Генподрядчику: акт приемки выполненных работ по форме КС-2 - в 3х экз., справку о стоимости выполненных работ и затрат и КС-3 - в 3х экз., отчет об использовании давальческих материалов - в 3х экз., и исполнительную документацию на выполненные строительно-монтажные и пусконаладочные работы и ответственные конструкции. Оборудование передается Актом приема-передачи смонтированного оборудования. Генподрядчик подписывает акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3 в течение 5 (пять) рабочих дней, либо направляет мотивированный отказ с указанием доработок (п. 5.2 Договора № 18/02-18).

Оплата выполненных работ производится Генподрядчиком в течение 90 (девяносто) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных работ формы KC-2 справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, устранения Субподрядчиком всех выявленных дефектов, получения Генподрядчиком документов в соответствии с п. 4.4 Договора и предоставления Субподрядчиком счета-фактуры, при условии поступления денежных средств от Заказчика (п. 6.2 Договора № 18/02-18).

Между сторонами заключено Дополнительное соглашение № 1 от 01.03.2018, согласно п.п. 1.1, 1.2, 1.3 которого Субподрядчик по заданию Генподрядчика обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту «Комплекс работ по техническому перевооружению производства КМ-2» на территории Заказчика ОАО «Славнефть-ЯНОС», согласно проектной документации, указанной в Приложении № 1, а Генподрядчик обязуется их принять и оплатить определенную настоящим дополнительным соглашением цену. Сроки выполнения работ: март 2018г. - май 2018г. Стоимость работ по настоящему дополнительному соглашению, определяется Протоколом согласования договорной цены (Приложение №1), на основании сметных расчетов, утвержденных Генподрядчиком, и составляет 8 915 295,30 руб. (Восемь миллионов девятьсот пятнадцать тысяч двести девяносто пять рублей) 30 копеек, в том числе НДС 18% - 1 359 960,30 руб.

Работы по договору № 18/02-18 субподрядчиком выполнены и приняты генподрядчиком на общую сумму 8 727 854,66 руб.

По расчету истца за ответчиком числится задолженность в размере 7 415 471,89 руб.

Между обществом с ограниченной ответственностью "Волгоградсервис" /Субподрядчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Реминдустрия" /Генподрядчик/ заключен договор субподряда № 19/02-18 от 20.02.2018 (далее – договор № 19/02-18), согласно п. 1.1 которого Субподрядчик по заданию Генподрядчика выполняет работы по капитальному ремонту, секций С-100, С-200, С-300, С-400, С-500 КМ-2 согласно графику простоев на территории Заказчика ОАО «Славнефть-ЯНОС».

В соответствии с п. 1.2 Договора № 19/02-18 объемы, виды работ, а также их стоимость и сроки выполнения будут определятся в дополнительных соглашениях к настоящему договору.

Стоимость работ, поручаемых Субподрядчику, определяется утвержденными Генподрядчике сметными расчетами, выполненными на основании Регламента определения стоимости работ. Стоимость выполняемых  Субподрядчиком работ подтверждается  протоколом  согласовали договорной цепы, являющимся неотъемлемой частью дополнительного соглашения (п. 2.1 Договора № 19/02-18).

Генподрядчик ежемесячно принимает от Субподрядчика выполненные работы в соответствии с формой: КС-2 (акт приемки выполненных работ - в 3х экз.) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат - в 3х экз.) вместе с отчетом об использовании давальческих материалов (в 3х экз.), переданных ОАО «Славнефть-ЯНОС», и обязательным предоставлением реестра по сданной исполнительной документации, подписанного технадзором Заказчика, авторским надзором и представителем Генподрядчика (п. 4.1 Договора № 19/02-18).

В 5-тидневный срок со дня подписания акта выполненных работ Субподрядчик представляет Генподрядчику счет-фактуру, и соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации. Оплата выполненных работ производится не позднее чем через 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ формы КС-2 и справки стоимости выполненных работ формы КС-3, и представления Генподрядчику счета-фактуры Субподрядчиком, при условии поступления средств от Заказчика (п. 5.1, 5.2 Договора № 19/02-18).

Между сторонами заключено Дополнительное соглашение № 1 от 01.03.2018, согласно п.п. 1.1, 1.2, 1.3 которого Субподрядчик по заданию Генподрядчика выполняет строительно-монтажные работы по Капитальному ремонту секций С-500 установки КМ-2 согласно графику простоев на территории Заказчика ОАО "Славнефть-ЯНОС" в соответствии с проектной документацией, указанной в Приложений №1, а Генподрядчик обязуется их принять и оплатить определенную настоящим дополнительным соглашением цену. Сроки выполнения работ: март 2018г. – май 2018г. Стоимость работ по настоящему дополнительному соглашению определяется Протоколом согласования договорной цены (Приложение на основании сметных расчетов, утвержденных Генподрядчиком, и составляет 17 494 902,88 руб. (Семнадцать миллионов четыреста девяносто четыре тысячи девятьсот два рубля 88 копеек), в том числе НДС 18% - 2 668 714,00руб.

Работы по договору № 19/02-18 субподрядчиком выполнены и приняты генподрядчиком на общую сумму 22 701 879,44 руб.

По расчету истца за ответчиком числится задолженность в размере 20 411 592,21 руб.

Претензии субподрядчика оставлены генподрядчиком без удовлетворения.

Неисполнение ответчиком обязанности по оплате за выполненные работы послужило поводом для обращения в  арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив представленные доказательства в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд считает заявленные требования подлежащими   удовлетворению по следующим основаниям.

В силу ст.ст. 309, 310, 314 Гражданского кодекса РФ обязательство должно исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

На основании ст. 702, 711 Гражданского кодекса РФ основанием для оплаты работ является факт сдачи результата работ заказчику.

Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле должно доказать те обстоятельства, на которые ссылается в качестве основания своих требований или возражений.

Факт сдачи результата работ подтверждается документами, представленными истцом в материалы дела: актами о приемке выполненных работ, справкой о стоимости выполненных работ и затрат, имеющими печати и подписи представителей сторон, и не оспаривается ответчиком.

По расчету истца за ответчиком числится задолженность в размере 27 827 064,10 руб., в том числе по договору № 18/02-18 в размере 7 415 471,89 руб., по договору № 19/02-18 в размере 20 411 592,21 руб.

Доказательств оплаты задолженности либо наличия ее в меньшем размере ответчиком суду не представлено.

Согласно п.3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса РФ  обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены.

Учитывая, что требования истца основаны на законе, подтверждены представленными в материалы дела документами, требования истца в части основного долга подлежат удовлетворению в полном объеме.

Также истцом  заявлено  требование  о  взыскании  пени по договору № 18/02-18 в размере 741 547,19 руб. за период с 29.06.2018 по 28.01.2019, по договору № 19/02-18 в размере 1 020 579,61 руб. за период с 29.06.2018 по 28.01.2019.

В соответствии со ст. 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

За задержку расчетов за выполненные, работы Генподрядчик уплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости подлежащих оплате и неоплаченных в срок работ, но не более 10% от просроченной суммы (п. 9.10 Договора № 18/02-18).

За нарушение Генподрядчиком договорных обязательств – за задержку расчетов за выполненные работы он уплачивает Субподрядчику – пени в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости невыполненных Генподрядчиком обязательств, т.е. от стоимости неоплаченных в срок работ, но не более 5% подлежащих оплате работ (п. 8.9 Договора № 19/02-18).

При неисполненном денежном обязательстве требование о взыскании неустойки соответствует ст.330 Гражданского кодекса РФ и условиям Договоров.

По расчету истца пени по договору № 18/02-18 за период с 29.06.2018 по 28.01.2019 с учетом ограничения 10 % составляют 741 547,19 руб., по договору № 19/02-18 за период с 29.06.2018 по 28.01.2019 с учетом ограничения 5 % составляют 1 020 579,61 руб..

Расчет пени ответчиком не оспорен.

Оснований для применения положений ст. 333 Гражданского кодекса РФ у суда не имеется.

В заявленном размере сумма пени подлежит взысканию с ответчика.

На основании ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ госпошлина за подачу иска в суд относится на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "Реминдустрия" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Волгоградсервис" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) 27 827 064,10 руб. долга, 1 762 126,80 руб. пени, 170 945,95 руб. в возмещение расходов по оплате госпошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья

Лапочкина И.М.