АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4  

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  резолютивная часть

Дело № А79-3898/2024

г. Чебоксары

21 июня 2024 года

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи  Манеевой О.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Павловой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании 17.06.2024-21.06.2024  

дело по иску 

бюджетного учреждения Чувашской Республики «Канашская центральная  районная больница им. Ф.Г. Григорьева» Министерства здравоохранения  Чувашской Республики, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Россия 429310,  с. Шихазаны, Канашский район, Чувашская Республика, ул. Епифанова, д. 12  

к обществу с ограниченной ответственностью «Сельмаш Строй», ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>, Россия 429335, г. Канаш, Чувашская  Республика, ул. К. Маркса д. 3А, эт. 2, пом. 229  

об обязании устранить недостатки, 

при участии от истца: ФИО1 - доверенность от 03.04.2023 (сроком  действия 3 года),  

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Сельмаш Строй»,  ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, устранить за свой счет выявленные в  период гарантийного срока по государственному контракту от 31.05.2021 № 76 в  фельдшерско- акушерском пункте по адресу 

<

...> недостатки (дефекты):  

1 вертикальные трещины под окном в кабинете приема фельдшера 

диной 50 см и шириной 1 мм; 

2 вертикальные трещины длиной 305 см и шириной 1-3 мм во 

внутренних углах в помещении персонала, уборочного  инвентаря;  

3 горизонтальные трещины в местах стыка потолка и стен длиной 

150 см и шириной 1-2 мм в санузле; 

4 трещины в потолке длиной 100см, шириной 1-2 мм, следы 

протекания на потолке, площадью 1 кв.м. в помещении  персонала, протечки воды в местах примыкания  

вентиляционных каналов и кровли, протечки межчердачного перекрытия, 

5 отслоение напольного керамогранита: в тамбуре, площадью 4,6 кв.м., 

в теплогенераторной- площаью 5,9 кв.м.,  в ожидальной –площадью 9,7 кв.м.,  

в санузле – площадью 3,2. кв.м., 

в помещении уборного инвентаря – площадью 2,8. кв.м.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сельмаш Строй»,  ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, в пользу бюджетного учреждения  Чувашской Республики «Канашская центральная районная больница им. Ф.Г.  Григорьева» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>, 6 000 (Шесть тысяч) руб. в возмещение  понесенных истцом расходов по оплате государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний  Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого  арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух  месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления  арбитражного суда.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики –  Чувашии.  

Судья О.В. Манеева