233/2017-1465(1) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 09 января 2017 года 

по делу № А33-21247/2016 Красноярск

09 января 2017 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Красноярск  ТелеКоммуникации» удовлетворить.  

Внести изменения в муниципальный контракт № 83 от 30.11.2015 на выполнение работ  по капитальному ремонту МБДОУ № 77 для создания дошкольных мест г. Красноярска,  заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Красноярск  ТелеКоммуникации» и Главным управлением образования администрации города  Красноярска, изложив пункт 3.1. в следующей редакции:  

 « Сроки выполнения работ по настоящему контракту: Срок начала выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта. Срок завершения работ - 30.09.2016 г.». 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

 Судья О.В. Сысоева