Арбитражный суд Пензенской области

Кирова ул., д. 35/39, Пенза г., 440000,

тел.: +78412-52-99-97, факс: +78412-55-36-96, http://www.penza.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А49-3177/2017

11 июля 2017 г.

г. Пенза

Резолютивная часть решения оглашена 4 июля 2017 г.

Полный текст решения изготовлен 11 июля 2017 г.

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Кудинова Р.И. при ведении протокола помощником судьи Овчинниковой Ю.А., рассмотрев в отрытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Богуновъ" (Революционная ул., д. 71, Пенза г., Пензенская область, 440000; Володарского 

<

...>, Пенза г., Пензенская область, 440600; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "Дельта" (Московская ул., д. 8А, Пенза г., Пензенская область, 440000; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о понуждении к передаче исполнительной документации,

установил:

истец – ООО "Богуновъ" обратился в арбитражный суд с уточненным 11.04.2017 исковым заявлением к ООО СК "Дельта" (далее – ответчик), в котором на основании ст. ст. 309, 726 ГК РФ просил обязать ответчика передать исполнительную документацию по договорам строительного подряда от 25.05.2015 № 25/05/15-ПЦ/мжк, № 25/05/15-ПЦ/пщб, а именно:

1. Исполнительная схема бетонирования (армирования) стен и перекрытий и др., а именно: по КС-2, КС-3 от 12.10.2015 – исполнительная схема бетонирования (армирования) колонн 1 этажа, исполнительная схема бетонирования (армирования) балок 1 этажа, исполнительная схема бетонирования (армирования) плиты перекрытия 1 этажа в осях И-М/10-13, исполнительная схема бетонирования (армирования) плит перекрытия в осях А-И/10-13, исполнительная схема бетонирования (армирования) лифтовых шахт № 3, № 4, № 5, № 6. № 7, № 8 1-го этажа, исполнительная схема бетонирования (армирования) лестницы № 3, исполнительная схема бетонирования (армирования) приямков в осях 13/А-Б, 10/А-В, 10/Б-В, исполнительная схема бетонирования (армирования) колонн 2-го этажа в осях Г-М/10-13, исполнительная схема бетонирования (армирования) балок 2-го этажа в осях Г-М/10-13, исполнительная схема бетонирования (армирования) плиты перекрытия 2-го этажа в осях Г-М/10-13, исполнительная схема бетонирования (армирования) лифтовых шахт № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 2-го этажа исполнительная схема бетонирования (армирования) колонн 3-го этажа, исполнительная схема бетонирования (армирования) балок 3-го этажа, исполнительная схема бетонирования (армирования) плиты перекрытия 3-го этажа, исполнительная схема бетонирования (армирования) лифтовых шахт № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 3-го этажа, исполнительная схема бетонирования (армирования) балок 4-го этажа, исполнительная схема бетонирования (армирования) плиты перекрытия 4-го этажа; 

по КС-2, КС-3 от 05.11.2015 – исполнительная схема бетонирования (армирования) колонн 2-го этажа в осях А-В/10-13, исполнительная схема бетонирования (армирования) колонн 4-го этажа в осях Г-М/10-13, исполнительная схема бетонирования (армирования) балок 2-го этажа в осях А-В/10-13, исполнительная схема бетонирования (армирования) плиты перекрытия 2-го этажа в осях А-В/10-13, исполнительная схема бетонирования (армирования) лифтовых шахт № 3, № 4, № 5, № 6. № 7, № 8 4-го этажа, исполнительная схема бетонирования (армирования) лестницы № 2 (стены) 1-го этажа, исполнительная схема бетонирования (армирования) лестницы № 2 (стены) 2-го этажа, исполнительная схема бетонирования (армирования) лестницы 3 2 (стены) 3-го этажа, исполнительная схема бетонирования (армирования) лестницы № 2 (стены) 4-го этажа, исполнительная схема бетонирования (армирования) лестницы № 5 (стены, ПМ) 2-го этажа, исполнительная схема бетонирования (армирования) лестницы № 5 (стены, ПМ) 3-го этажа, исполнительная схема бетонирования (армирования) лестницы № 5 (стены, ПМ) 4-го этажа, исполнительная схема бетонирования (армирования) лестницы № 5 (стены, ПМ) 5-го этажа, исполнительная схема бетонирования (армирования) лестницы № 3 1-го этажа (стены), исполнительная схема бетонирования (армирования) колонн 5-го этажа в осях И-Н/10-13, исполнительная схема бетонирования (армирования) балок 5-го этажа в осях И-Н/10-13, исполнительная схема бетонирования (армирования) плиты перекрытия 5-го этажа в осях И-Н/10-13, исполнительная схема бетонирования (армирования) колонн 3-го этажа в осях И-М/1-5, исполнительная схема бетонирования (армирования) балок 3-го этажа в осях И-М/1-5, исполнительная схема бетонирования (армирования) плиты перекрытия 3-го этажа в осях И-М/1-5, исполнительная схема бетонирования (армирования) лестницы № 1 (стены), лифта 3-го этажа в осях К-Л/1-3, исполнительная схема бетонирования (армирования) колонн 4-го этажа в осях И-М/1-5, исполнительная схема бетонирования (армирования) балок 4-го этажа в осях И-М/1-5, исполнительная схема бетонирования (армирования) плиты перекрытия 4-го этажа в осях И-М/1-5, исполнительная схема бетонирования (армирования) лестницы № 1 (стены), лифта 4-го этажа в осях К-Л/1-3;

по КС-2, КС-З от 26.11.2015 – исполнительная схема бетонирования (армирования) колонн 5-го этажа в осях Г-И/10-13, исполнительная схема бетонирования (армирования) лифтовых шахт № 3, № 4, № 5, № 6. № 7, № 8 5-го этажа, исполнительная схема бетонирования (армирования) лестницы № 2 (стены) 5-го этажа, исполнительная схема бетонирования (армирования) балок 5-го этажа в осях Г-И/10-13, исполнительная схема бетонирования (армирования) плиты перекрытия 5-го этажа в осях Г-И/10-13, исполнительная схема бетонирования (армирования) колонн 6-го этажа в осях И-Н/10-13, исполнительная схема бетонирования (армирования) лестницы № 5 (стены, ПМ) 6-го этажа, исполнительная схема бетонирования (армирования) балок 6-го этажа в осях И.Н./10-13, исполнительная схема бетонирования (армирования) плиты перекрытия 6-го этажа в осях И-Н/10-13, исполнительная схема бетонирования (армирования) колонн 5-го этажа в осях И-М/1-5, исполнительная схема бетонирования (армирования) балок 5-го этажа в осях И-М/1-5, исполнительная схема бетонирования (армирования) плиты перекрытия 5-го этажа в осях И-М/1-5, исполнительная схема бетонирования (армирования) лестницы № 1 (стены), лифта 5-го этажа в осях К-Л/1-3;

2. Паспорта и сертификаты на материалы (бетон, ВЗО, бетон В30\У6, бетон М400 П4 (ПЦ М500) амд-5, раствор М-100);

3. Лабораторное заключение на применяемый бетон;

4. Акты освидетельствования скрытых работ, а именно: по КС-2, КС-З от 12.10.2015 акт освидетельствования скрытых работ устройства колонн 1 этажа, акт освидетельствования скрытых работ устройства балок 1 этажа, акт освидетельствования скрытых работ устройства плиты перекрытия 1 этажа в осях И-М/10-13, акт освидетельствования скрытых работ плит перекрытия в осях А-И/10-13, акт освидетельствования скрытых работ лифтовых шахт № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 1-го этажа, акт освидетельствования скрытых работ лестницы № 3, акт освидетельствования скрытых работ приямков в осях 13/А-Б, 10/А-В, 10/Б-В, акт освидетельствования скрытых работ колонн 2-го этажа в осях Г-М/10-13, акт освидетельствования скрытых работ балок 2-го этажа в осях Г-М/10-13, акт освидетельствования скрытых работ плиты перекрытия 2-го этажа в осях Г-М*/10-13, акт освидетельствования скрытых работ лифтовых шахт № 3, № 4, № 5, № 6. № 7, № 8 2-го этажа, акт освидетельствования скрытых работ колонн 3-го этажа, акт освидетельствования скрытых работ балок 3-го этажа, акт освидетельствования скрытых работ плиты перекрытия 3-го этажа, акт освидетельствования скрытых работ лифтовых шахт № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 3-го этажа, акт освидетельствования скрытых работ балок 4-го этажа, акт освидетельствования скрытых работ плиты перекрытия 4-го этажа; 

по КС-2, КС-3 от 05.11.2015 – акт освидетельствования скрытых работ колонн 2-го этажа в осях А-В/10-13, акт освидетельствования скрытых работ колонн 4-го этажа в осях Г-М/10-13, акт освидетельствования скрытых работ балок 2-го этажа в осях А-В/10-13, акт освидетельствования скрытых работ плиты перекрытия 2-го этажа в осях А-В/10-13, акт освидетельствования скрытых работ лифтовых шахт № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 4-го этажа, акт освидетельствования скрытых работ лестницы № 2 (стены) 1-го этажа, акт освидетельствования скрытых работ лестницы № 2 (стены) 2-го этажа, акт освидетельствования скрытых работ лестницы 3 2 (стены) 3-го этажа, акт освидетельствования скрытых работ лестницы № 2 (стены) 4-го этажа, акт освидетельствования скрытых работ лестницы № 5 (стены, ПМ) 2-го этажа, акт освидетельствования скрытых работ лестницы № 5 (стены, ПМ) 3-го этажа, акт освидетельствования скрытых работ лестницы № 5 (стены, ПМ) 4-го этажа, акт освидетельствования скрытых работ лестницы № 5 (стены, ПМ) 5-го этажа, акт освидетельствования скрытых работ лестницы № 3 1-го этажа (стены), акт освидетельствования скрытых работ колонн 5-го этажа в осях И-Н/10-13, акт освидетельствования скрытых работ балок 5-го этажа в осях И-Н/10-13, акт освидетельствования скрытых работ плиты перекрытия 5-го этажа в осях И-Н/10-13, акт освидетельствования скрытых работ колонн 3-го этажа в осях И-М/1-5, акт освидетельствования скрытых работ балок 3-го этажа в осях И-М/1-5, акт освидетельствования скрытых работ плиты перекрытия 3-го этажа в осях И-М/1-5, акт освидетельствования скрытых работ лестницы № 1 (стены), лифта 3-го этажа в осях К-Л/1-3, акт освидетельствования скрытых работ колонн 4-го этажа в осях И-М/1-5, акт освидетельствования скрытых работ балок 4-го этажа в осях И-М/1-5, акт освидетельствования скрытых работ плиты перекрытия 4-го этажа в осях И-М/1-5, акт освидетельствования скрытых работ лестницы № 1 (стены), лифта 4-го этажа в осях К-Л/1-3; 

по КС-2, КС-3 от 26.11.2015 – акт освидетельствования скрытых работ колонн 5-го этажа в осях Г-И/10-13, акт освидетельствования скрытых работ лифтовых шахт № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 5-го этажа, акт освидетельствования скрытых работ лестницы № 2 (стены) 5-го этажа, акт освидетельствования скрытых работ балок 5-го этажа в осях Г-И/10-13, акт освидетельствования скрытых работ плиты перекрытия 5-го этажа в осях Г-И/10-13, акт освидетельствования скрытых работ колонн 6-го этажа в осях И-Н/10-13, акт освидетельствования скрытых работ лестницы № 5 (стены. ПМ) 6-го этажа, акт освидетельствования скрытых работ балок 6-го этажа в осях И.Н./10-13, акт освидетельствования скрытых работ плиты перекрытия 6-го этажа в осях И-Н/10-13, акт освидетельствования скрытых работ колонн 5-го этажа в осях И-М/1-5, акт освидетельствования скрытых работ балок 5-го этажа в осях И-М/1-5, акт освидетельствования скрытых работ плиты перекрытия 5-го этажа в осях И-М/1-5, акт освидетельствования скрытых работ лестницы № 1 (стены), лифта 5-го этажа в осях К-Л/1-3; 

5.Протоколы испытаний контрольных образцов бетона на прочность, сварные соединения.

6.Температурные листы прогрева бетона.

Истец явку представителя в судебное заседание не обеспечил, в заявлении просил требования удовлетворить, рассмотрев дело в его отсутствие. Ответчик в отзыве с заявленными исковыми требованиями не согласился, пояснив, что работы и документация по договорам приняты истцом без замечаний, в подтверждение чего просил приобщить к материалам дела КС-2, КС-3, а также реестры переданной документации истцу (л.д. 55, 56-70 (документация)). С учетом надлежащего извещения сторон и неявки их представителей в судебное заседание, суд рассмотрел спор в их отсутствие (ст. ст. 123, 156 АПК РФ).

Исследовав представленные доказательства, суд находит иск не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Между ООО "БогуновЪ" и ООО СК "Дельта" заключены договор строительного подряда № 25/05/15-ПЦ/мжк от 25.05.2015 и договор подряда № 25/05/15-ПЦ/пщб от 25.05.2015.

По своей правовой природе данные договоры являются договорами строительного подряда и для регулирования правоотношений сторон подлежат применению положения Главы 37 ГК РФ.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Истец указал, что 14.12.2016 им ответчику была направлена претензия с требованием предоставить исполнительную документацию, однако претензия была оставлена без ответа, в связи с чем он обратился в суд.

Согласно п. 8.2 договоров, совместный осмотр результата выполненных работ осуществляется сторонами в течение десяти рабочих дней с даты получения заказчиком от подрядчика письменного извещения о готовности результата выполненных работ к сдаче.

Исходя из п. 8.3 договоров одновременно с извещением о готовности результата работ к сдаче подрядчик обязан передать заказчику: шесть экземпляров исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам; сертификаты либо иные документы, подтверждающие качество и происхождение использованных материалов; письменное руководство/инструкцию по надлежащей эксплуатации и обслуживанию результата работ; отчет о расходе материалов по форме М-29; иные документы, передача которых предусмотрена действующим законодательством либо настоящим договором.

В соответствии с п. 8.13 договора, приемка результата выполненных работ производится в течение 15 дней после даты получения заказчиком письменного извещения от подрядчика о его готовности.

Каких-либо приложений к данным договорам, содержащих конкретный перечень исполнительной документации, которую подрядчик обязан был передать по согласованию с заказчиком последнему, истцом в материалы дела не представлено.

Вместе с тем, ответчиком в опровержение доводов истца представлены акты о приемке выполненных работ, а также реестры переданной исполнительной документации ООО СК "Дельта" по объекту Перинатальный центр 

<

...> (объект работ по вышеуказанным договорам подряда) (л.д. 54-70), подписанные представителями истца без каких-либо замечаний.

Акты КС-2, КС-3, а также реестры переданной документации истцом под сомнения не поставлены, возражения истца на отзыв ответчика в материалы дела не поступили. 

В силу ч. 3.1 ст. 70 ГК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Истец в судебных заседаниях и письменных пояснениях по делу уклонился от объяснений по представленным ответчиком допустимым доказательствам, что следует расценивать как отсутствие возражений, признание доводов ответчика, поскольку истцом они прямо не оспорены, несогласие с этими обстоятельствами не вытекает из других доказательств, поэтому этот факт передачи документации является обстоятельством, признанным сторонами. Заявлений о фальсификации представленных доказательств в порядке ст. 161 АПК РФ также не поступило.

Суд, оценив в порядке ст. ст. 9, 65, ч. 3.1 ст. 70 и ст. 71 АПК РФ имеющиеся в деле доказательства, приходит к выводу, что требуемая истцом от ответчика исполнительная документация по объекту "Перинатальный центр 

<

...>" находится у истца, о чем свидетельствуют реестры, приобщенные в качестве доказательств к материалам дела и акты КС-2, КС-2, в связи с чем оснований для удовлетворения исковых требований не имеется.

Кроме того, суд считает, что иск не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (п. 1 ст. 740 ГК РФ).

В соответствии с требованиями ст. 726 ГК РФ подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.

Гражданским кодексом Российской Федерации установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (ст. 309 ГК РФ).

Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 утверждены требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006).

Согласно вышеуказанным Требованиям (подп. 5.1 - 5.6, п. 6) в состав исполнительной документации входят: акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства; акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности; акты освидетельствования скрытых работ; акты освидетельствования ответственных конструкций; акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения; комплект рабочих чертежей; исполнительные геодезические схемы; исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения; акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения; результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий); иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

В соответствии с п. 4 Требований исполнительная документация подлежит хранению у застройщика или технического заказчика до проведения органом государственного строительного надзора проверки законченного строительством объекта капитального строительства. На время проведения проверки законченного строительством объекта капитального строительства исполнительная документация в полном объеме передается застройщиком или техническим заказчиком в орган государственного строительного надзора. После выдачи органом государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, исполнительная документация передается застройщику на постоянное хранение не позднее пяти рабочих дней после выдачи заключения о соответствии.

Проанализировав вышеназванные нормы, суд находит, что императивных норм, устанавливающих обязанность подрядчика передать заказчику исполнительную документацию, а также определяющих состав исполнительной документации подлежащей передаче подрядчику, нормы действующего законодательства не содержат.

В этой связи, в случае закрепления в договоре подряда обязанности подрядчика по передаче исполнительной документации сторонами должны быть согласованы условия о составе исполнительной документации, подлежащей передаче подрядчиком, позволяющие определить перечень такой документации.

При этом суд отмечает, что истцом документы (проектная документация либо выписки из нее, приложения к договорам), на основании которых возможно было бы установить данный перечень, не представлены.

Оценив условия договора (ст. 431 ГК РФ), суд приходит к выводу, что перечень документации, подлежащей передаче ответчиком, ни договором, ни другими соглашениями сторон не определен. 

С учетом изложенного, суд считает, что истцом не доказан факт наличия у ответчика обязанности по предоставлению истребуемых документов, в связи с чем отказывает ему в иске также и по данному основанию. 

Расходы по делу суд относит на истца (ст. 110 АПК РФ).

На основании изложенного, и, руководствуясь ст. ст. 167-170 АПК РФ,

решил:

в иске отказать, расходы отнести на истца.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пензенской области в месячный срок с момента его принятия.

СудьяКудинов Р.И.