1155/2023-58927(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А47-21128/2022

г. Оренбург

24 марта 2023 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи 

Пархомы С.Т., при ведении протокола секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  «Управляющая компания Грачевское жилищно-коммунальное хозяйство»,  с.Грачевка Грачевского района Оренбургской области (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

 к муниципальному образованию Грачевский район Оренбургской  области в лице Администрации муниципальному образованию Грачевский  район Оренбургской области, с.Грачевка Грачевского района  Оренбургской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о внесении изменений в концессионное соглашение № 1 от 10.01.2020,  

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Внести в Концессионное соглашение № 1 от 10.01.2020, заключенное  между обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая  компания Грачевское жилищно-коммунальное хозяйство» и  муниципальным образованием Грачевский район Оренбургской области,  от имени которого выступает администрация муниципального образования  Грачевский район Оренбургской области в отношении объектов  теплоснабжения муниципального образования Грачевский район  Оренбургской области следующие изменения:  

1) в пункте 9.16 Концессионного соглашения сумму расходов  «...3293792,00 рублей...» заменить на «...3490312,00 рублей...»;  

2) в пункте 13.2 Концессионного соглашения сумму расходов  «....3293792,00 рублей.» заменить на «…3490312,00 рублей.»;  

3) Приложение № 3 к концессионному соглашению в отношении  объектов теплоснабжения муниципального образования Грачевский район  Оренбургской области читать в новой редакции:  

Задание и основные мероприятия по Реконструкции путем 

модернизации Объектов соглашения 

Цели Концессионного соглашения: 

- повышение качества и надёжности теплоснабжения Потребителей в  границах муниципального образования Грачевский район Оренбургской  области;  

- снижение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой  тепловой энергии;  

- повышение эффективности производства тепловой энергии и  поставки Потребителям;  

- снижение себестоимости поставляемой Потребителям тепловой  энергии.  

Концессионер обязан осуществить следующие основные  мероприятия по реконструкции путем модернизации Объекта соглашения:  

 № п/п 

Наименование объекта 

Адрес 

Описание мероприятия 

Предельные  

расходы на  реконструк-цию  (тыс.руб., с НДС)  Концессионер/  

концедент 

Сроки ввода объекта в эксплуатацию 

1 

Котельная МБОУ  «Александровская  СОШ», S-23,1 кв.м,  

инв. №  40:БН:Б:КВ:2287  

<

...>  

2020г.  1.Замена автоматики  

РГУ 1 шт. 

2.Замена САОГ.  3.Поверка и ремонт RVG  

G40, Pt-500, TC-210.  

2021г.  1.Замена автоматики  

САБК 2 шт. 

2.Поверка и ремонт RVG  G40, Pt-500, TC-210.  

2022г.  1. Замена котла КЧМ-5  

на RSA 

2023г.  Замена оборудования  

котельной с целью обеспечения бесперебойного и надежного теплоснабжения 

310,716 /297,524 

2020г.  Июнь  

2021г. 

Июль 

2022г. 

2023г. 

 

потребителей 

 

2 

Котельная МБОУ  «Верхнеигнашкинс  кая СОШ» S-15,6  

с.Верхнеигнашкино, ул. Новая,4, 

2020г. 

1.Замена автоматики  БАРГ 1 шт. 2021г.  

194,979 / 140,470 

2020г. 

 

кв.м, инв. № 2289,  

2.Замена насоса на  энергоэффективный  

OASIS- 32/8 2023г. 

Замена оборудования  котельной с целью  обеспечения  

бесперебойного и  надежного  

теплоснабжения потребителей 

Август  

2021г.  Июль  2023г.  

3 

Котельная МБОУ  «Ероховская  

ООШ» S-29,7 кв.м.,  инв.  

 № 40:БН:Б:КВ:2290  

<

...> 

31 

2020г.  1.Замена автоматики  

РГУ 

2.Замена запорной  арматуры.  

2021г.  1.Замена консольного  

насоса на  энергоэффективный VILO  

65/13.   2.Замена котла КЧМ-5 .  

2023г.  Замена оборудования  

котельной с целью  обеспечения  

бесперебойного и  надежного  

теплоснабжения потребителей 

248,118 / 318,778 

2020г.  Июль  

 Июль  2021г.  Июль  

Июль 

Август 2023г. 

4 

Котельная МБОУ  «Ключевская  

СОШ» 

S-22,9 кв.м., инв.   № 40:БН:Б:КВ:2281  

с.Ключи, ул. 

Советская,1А 

2020г.  

1.Замена автоматики  РГУ  

2.Замена запорной  арматуры.  

2021г. 

1.Замена автоматики  РГУ 1 шт.  

2023г. 

Замена, ремонт и  поверка оборудования  

котельной с целью  обеспечения бесперебойного  

и надежного теплоснабжения  потребителей  

2024г. 

Замена, ремонт и  поверка оборудования  

котельной с целью  обеспечения бесперебойного  

и надежного теплоснабжения  потребителей  

190,755 / 156,574 

2020г.  Июль  

 Июль 

2021г.  Июль  

2023г. 

2024г. 

5 

Котельная МБОУ  «Петрохерсонецкая  СОШ» S-12 кв.м.,  

инв. 

 № 40:БН:Б:КВ:2286  

<

...>  

2020г.  

1.Замена автоматики  РГУ 1 шт.  

2.Поверка и ремонт ВК  

G25, Pt-500, TC-210.  

240,686 / 147,425 

2020г.  Июнь  Июль  

 

2021г.  

1.Замена консольного  насоса на  

энергоэффективный  VILO 65/13.  

2.Замена 

теплообменника котла  Хопер-100  

2023г. Замена, ремонт и 

поверка оборудования  котельной с целью  

обеспечения бесперебойного и надежного теплоснабжения потребителей 2024г. 

Замена оборудования  котельной с целью  

обеспечения бесперебойного и надежного теплоснабжения потребителей 

2021г.  Июль  Июль  

2023г. 

2024г. 

6 

Котельная МБОУ  «Побединская  

СОШ» 

S-24,7 кв.м., инв.   № 40:БН:Б:КВ:2280  

<

...>  

79 

2020г.  

1.Замена автоматики  РГУ 1 шт.  

2.Поверка и ремонт  RVG G40, Pt-500, TC-210.  

3.Замена 

теплообменника котла  Хопер-100.  

2021г. 

1.Замена автоматики  РГУ 1 шт.  

2.Замена котла ЯИК-80.  2022г.  

1.Замена котла КЧМ-5 на  котел PSA 2023г.  

Замена, ремонт и  поверка оборудования  

котельной с целью  обеспечения  

бесперебойного и  надежного  

теплоснабжения потребителей 

2024г.  

Замена оборудования  

котельной с целью  обеспечения  

бесперебойного и  надежного  

теплоснабжения потребителей 

238,882/  488,524  

2020г.  Июнь  

Июнь  Июль  2021г.  

Июль 

Август 

2022г.  Июль  

2023г. 

2024г. 

7 

Котельная МБОУ  «Подлесная ООШ»  S-30,2 кв.м., инв.   № 2279.  

<

...>  

2020г.  

1.Замена автоматики  РГУ 1 шт.  

2.Замена 

теплообменника котла  Хопер-100.  

278,222 / 507,848 

2020г.  Июль  Август  

 

2021г.  

1.Замена консольного  насоса на  

энергоэффективный  VILO 65/13.  

2.Замена котла КЧМ-5.  2022г.  

3.Замена котла КЧМ-5  на котел RSA  

2023г. 

Замена оборудования  котельной с целью  

обеспечения бесперебойного и надежного теплоснабжения потребителей 

2024г. 

Замена оборудования  котельной с целью  

обеспечения бесперебойного и надежного теплоснабжения потребителей 

2021г.  Июль  

Август 

2022г. 

2023г. 

2024г. 

8 

Котельная МБОУ  «Русскоигнашкинс  кая СОШ» S-31,9  

кв.м., инв.   № 40:БН:Б:КВ:1699  

с.Русскоигнашки  

но, ул.  Центральная,1  

2020г.  

1.Замена автоматики  РГУ 1 шт.  

2021г. 

1.Замена запорной  арматуры.  

2.Поверка и ремонт ВК  G25, Pt-500, TC-210.  

2023г. 

Замена оборудования  котельной с целью  

обеспечения бесперебойного и надежного теплоснабжения потребителей 

2024г. 

Замена оборудования  котельной с целью  

обеспечения бесперебойного и надежного теплоснабжения потребителей 

225,802 / 271,450 

2020г. 

Июль 

2021г. 

Август 2023г. 

2024г. 

9 

Котельная МБОУ 

«Старояшкинская  СОШ»  

S-25,6 кв.м., инв. №  40:БН:Б:КВ:2288  

<

...> «а»  

2020г.  1.Замена автоматики  

РГУ 1 шт. 

2021г.  1.Замена автоматики САБК  

1 шт. 

2.Поверка и ремонт  

249,959 / 309,319 

2020г. 

 Июль 

2021г. 

Август 

Август 

 

Aktaris G40, Pt-500, TC-210.  

2023г.  

Замена, ремонт и  поверка оборудования  

котельной с целью  обеспечения бесперебойного  

и надежного теплоснабжения  потребителей  

2024г. 

Замена, ремонт и  поверка оборудования  

котельной с целью  обеспечения бесперебойного  

и надежного теплоснабжения  потребителей  

2023г. 

 2024г. 

10 

Котельная МБОУ 

«Таллинская СОШ» 

S-25,7 кв.м., инв. №  40:БН:Б:КВ:1697  

<

...>  

2020г.  1.Замена автоматики РГУ 1  

шт. 

2.Поверка и ремонт ВК G25,  Pt-500, TC-220.  

 3.Замена 

теплообменника котла 

Хопер-100. 

2021г.  1.Замена автоматики РГУ 1  

шт. 

2023г.  Замена оборудования  

котельной с целью обеспечения 

бесперебойного и надежного  теплоснабжения  

потребителей 

2024г.  Замена оборудования  

котельной с целью обеспечения бесперебойного и надежного теплоснабжения потребителей 

2020г.  

225,462 / 313,496 

2020г.  ФИО2  2021г.   Август  

2023г. 

2024г. 

11 

Котельная МБОУ  «Ягодинская  

СОШ» 

S-32,2 кв.м., инв. №  2278  

<

...>  

1.Замена автоматики САБК  

1 шт. 

2.Поверка и ремонт  RVG G25, Pt-500, TC-  

210. 2021г. 

1.Замена консольного  насоса на  

энергоэффективный VILO 65/13. 2023г. 

Замена, ремонт и  

поверка оборудования  

216,229 / 166,979 

2020г. Август 

Август  2021г.  Июль  

2023г. 

 

12 

Котельная МБДОУ  «Грачевский  

детский сад № 1» S-  19,5 кв.м., инв. №  

2330 

<

...>  

котельной с целью обеспечения бесперебойного 

и надежного теплоснабжения  потребителей  

2020г.  

1.Замена автоматики  РГУ 1 шт.  

2.Поверка и ремонт  RVG G25, Pt-500, TC-  

210. 3.Замена 

теплообменника котла  Хопер. 2021г.  

1.Замена консольного  насоса на  

энергоэффективный VILO 65/13. 2023г. Замена оборудования котельной с целью 

обеспечения бесперебойного  и надежного теплоснабжения  потребителей  

2024г. 

Замена, ремонт и поверка  оборудования котельной с  целью обеспечения  

бесперебойного и надежного  теплоснабжения  

потребителей 

204,246 /266,966 

2020г.  Июль  

Июль Август 

2021г. 

Август 

Август 

2023г. 

2024г. 

13 

Котельная  

МАОУДО «Центр  развития  

творчества детей и  юношества»  

S-18,5 кв.м., инв. №  53:215:002:0005973  70  

<

...>  

2020г.  

1.Замена автоматики  РГУ 1 шт.  

2.Замена 

теплообменника котла  Хопер-100.  

2021г 

1.Замена насоса на  GRUNDFOS.  

2023г. Замена оборудования котельной с целью обеспечения бесперебойного и надежного теплоснабжения потребителей 

2024г. Замена оборудования котельной с целью обеспечения бесперебойного и надежного теплоснабжения 

204,143 / 

283,543 

2020г. Август 

Август 

2021г. 

Август 

2023г. 

2024г. 

 

14 

Котельная МДОУ  «Александровский  детский сад».  

<

...>  

50 

2020г.  

1.Замена автоматики  РГУ 1 шт. 2021г.  

Замена автоматики РГУ. 2022г. 

1.Замена насоса на  энергоэффективный VILO  

ТОР 32/8. 2.Замена котла ЯИК-40 . 2023г. 

Замена оборудования  котельной с целью  

обеспечения бесперебойного  и надежного  

139,501 / 82,715 

2020г.  Август  

2021  2022г.  Июль  Август  

2023г. 

 

теплоснабжения потребителей 

 

15 

Котельная МДОУ  «Русскоигнашкинс кий  

детский сад» 

с. 

Русскоигнашкино , ул. 

Новая, 7б 

2020г.  

1.Замена автоматики РГУ 1  шт.  

2.Замена котла ЯИК-63. 2021г. 

1.Замена насоса на  энергоэффективный  

VILO ТОР 32/8. 2022г. 

1.Замена насоса на  энергоэффективный  

VILO ТОР 32/8. 

2. Замена котла ЯИК-  31,5 на котел ЯИК-63.  

2024г. Замена 

оборудования котельной с  целью обеспечения  

бесперебойного и надежного  теплоснабжения  

потребителей 

169,247 / 165,980 

2020г.  Август  

Август 

2021г.  Июль  

2022г. 

2024г. 

16 

Котельная МДОУ  «Ероховский детский  

сад» 

<

...> «б»  

2020г.  

1.Замена автоматики РГУ 1. Шт. 2021г. 

1.Замена насоса на  энергоэффективный  

VILO ТОР 32/8. 2022г. 

1. Замена насоса на  энергоэффективный  

VILO ТОР 32/8. 

2.Замена котла ЯИК-40 2023г.  

Замена оборудования  котельной с целью  

обеспечения бесперебойного и надежного теплоснабжения 

153,365 / 255,400 

2020г.  Сентябрь  

2021г.  Август  

2022г. 

2023г. 

 

2024г. 

Замена, ремонт и поверка  оборудования котельной с  целью обеспечения  

бесперебойного и надежного теплоснабжения потребителей 

2024г. 

 

Итого: 

х 

Х 

238,882/ 488,524 

- 

- Приложение № 5 к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения  муниципального образования Грачевский район Оренбургской области читать в новой  редакции:  

Предельный размер расходов Концедента на реконструкцию путем модернизации 

Год действия 

концессионного соглашения  

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

Всего 

Котельная МБОУ «Александровская  СОШ»  

0 

0 

136,300 

161,224 

0 

297,524  

Котельная МБОУ 

«Верхнеигнашкинская СОШ»  

0 

0 

0 

140,470 

0 

140,47 

Котельная МБОУ «Ероховская ООШ»  

0 

151,799 

0 

166,979 

0 

318,778  

Котельная МБОУ «Ключевская СОШ»  

0 

0 

0 

156,574 

0 

156,574  

Котельная МБОУ «Петрохерсонецкая  СОШ»  

0 

52,451 

0 

94,974 

0 

147,425  

Котельная МБОУ «Побединская СОШ»  

52,451 

127,700 

136,300 

172,073 

0 

488,524  

Котельная МБОУ «Подлесная  ООШ»  

52,451 

151,799 

136,300 

167,298 

0 

507,848  

Котельная МБОУ 

«Русскоигнашкинская СОШ»  

0 

0 

0 

166,979 

104,471 

271,45 

Котельная МБОУ «Старояшкинская  СОШ»  

0 

0 

0 

309,319 

0 

309,319  

Котельная МБОУ «Таллинская СОШ»  

52,451 

0 

0 

156,574 

104,471 

313,496  

Котельная МБОУ «Ягодинская СОШ»  

0 

0 

0 

166,979 

0 

166,979  

Котельная МБДОУ 

«Грачевский детский сад № 1»  

52,451 

0 

0 

110,044 

104,471 

266,966  

Котельная МАОУДО «Центр развития  творчества детей и юношества»  

52,451 

0 

0 

110,044 

121,048 

283,543  

отельная МДОУ «Александровский  детский сад»  

0 

0 

82,715 

0 

0 

82,715 

Котельная МДОУ 

«Русскоигнашкинский детский сад»  

63,850 

0 

102,130 

0 

0 

165,980  

Котельная МДОУ «Ероховский детский  сад»  

0 

0 

82,715 

172,685 

0 

255,4 

Итого: 

326,105 

483,749 

676,46 

2252,216 

434,461 

4172,991  

- Приложение  № 6 к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения  муниципального образования Грачевский район Оренбургской области читать в новой  редакции:  

Предельный размер расходов Концессионера на реконструкцию путем модернизации 

объекта соглашения (тыс. руб). 

Год действия концессионного соглашения 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

Всего  

Котельная МБОУ «Александровская  СОШ»  

92.474 

74.903 

70,775 

72,564 

0 

310,716  

Котельная МБОУ «Верхнепгнашкп  некая СОШ»  

16.334 

40.997 

0 

99,947 

3 7.701 

194,979  

Котельная МБОУ «Ероховская  ООШ»  

52.943 

76.440 

0 

118,735 

0 

248,118  

Котельная МБОУ «Ключевская  СОШ»  

52.148 

14.728 

0 

111,412 

12.467 

190,755  

Котельная МБОУ 

«Петрохерсонецкая СОШ»  

61,075 

89.403 

0 

52,507 

37,701 

240,686  

Котельная МБОУ «Победннская  СОШ»  

68.124 

27.592 

46.053 

78.508 

18.605 

238,882  

Котельная МБОУ «Подлесная  ООШ»  

19.896 

77.603 

66.422 

95.696 

18.605 

278,222  

Котельная МБОУ «Русскоигнашкм  некая СОШ»  

18.071 

74.527 

0 

113,799 

19.405 

225,802  

Котельная МБОУ «Старояшкпнекая  СОШ»  

27.649 

66.965 

0 

136.740 

18.605 

249,959  

Котельная МБОУ «Таллинская  СОШ»  

58.669 

14.728 

0 

132,660 

19,405 

225,462  

Котельная МБОУ «Ягодпнская  СОШ»  

51.682 

77,312 

0 

87.235 

0 

216,229  

Котельная МБДОУ «Грачевский  детский сад № 1»  

58.119 

60.194 

0 

66,528 

19,405 

204,246  

Котельная МАОУДО «Центр 

развития таорчества детей п  юношества»  

[7.588 

60.194 

0 

51.915 

74.446 

204,143  

Котельная МДОУ 

«Александровский детский сад»  

15,485 

24.231 

77.887 

21,898 

0 

139,501  

Котельная МДОУ 

«Русскоигнашкинскип детский сад»  

46.633 

24.89] 

75.826 

0 

21.897 

169,247  

Котельная МДОУ «Ероховскпй 

детский сад» 

13.582 

24.782 

75.349 

17.755 

21,897 

153,365  

Итого; 

670,472 

829,490 

412,312 

1257,899 320,139 

3490,312  

Взыскать с муниципального образования Грачевский район  Оренбургской области в лице Администрации муниципальному образованию  Грачевский район Оренбургской области за счет средств бюджета в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания  Грачевское жилищно-коммунальное хозяйство» государственную пошлину в  размере 6 000 руб. 00 коп.  

Исполнительный лист выдается взыскателю после вступления судебного  акта в законную силу по его ходатайству в порядке статей 319, 320  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  

месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Оренбургской области. 

Судья С.Т. Пархома 

Электронная подпись сформирована некорректно. Подписьне соответствует файлу или подписанный файл был изменёнДанные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 03.03.2023 3:38:00

 Кому выдана Пархома Светлана Тагировна