АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Резолютивная часть

Дело №А43-50621/2018

г.Нижний Новгород                                                                                         22 марта 2019 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Беляниной Евгении Владимировны (шифр 37-2768),

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело

по иску общества с ограниченной ответственностью «Нижегородспецгидрострой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Элит-Альянс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

о взыскании 401 419 руб. 67 коп.,

без вызова сторон,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Нижегородспецгидрострой» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Элит-Альянс» о взыскании 401 419 руб. 67 коп., в том числе:

- 160 006 руб. 93 коп. неотработанного аванса по договору от 14.08.2017 №1-Н/2017 (претензия от 15.08.2018 №193 с требованием возвратить сумму неотработанного аванса и уплатить неустойку по состоянию на 07.03.2018 с указанием на возможность ее дальнейшего начисления),

- 241 412 руб. 74 коп. договорной неустойки по состоянию на 07.03.2018.

Отзывом на иск ответчик исковые требования отклонил со ссылкой на то, что по состоянию на 25.11.2017 им выполнены работы на сумму 1 773 931 руб., что свидетельствует о необоснованности расчета неустойки; в любом случае ответчик полагает подлежащую уплате неустойку явно несоразмерной последствиям нарушения обязательства и просит суд снизить неустойку применительно к положениям статьи 333 Гражданского кодекса РФ.

Поскольку в настоящее время договор от 14.08.2017 №1-Н/2017 является действующим (с учетом положений пунктов 12, 13.1 договора и формулировок претензии от 15.08.2018 №193), и принимая во внимание то, что по состоянию на 25.11.2017 ответчиком выполнены работы на сумму 739 112 руб. 80 коп. (доводы ответчика об ином не подтверждены материалами дела), и то, что по состоянию на 07.03.2018 просрочка в выполнении работ составляет 102 дня (а не 208 дней), а ключевая ставка - 7,5% (а не 7,25%), суд, руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-182, 228-229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении ходатайства ответчика о рассмотрении дела по общим правилам искового производства отказать. 

Ходатайство ответчика о применении положений статьи 333 Гражданского кодекса РФ удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Элит-Альянс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; зарегистрировано 25.07.2013 Инспекцией ФНС России по Сормовскому району г.Н.Новгорода; 

<

...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Нижегородспецгидрострой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; зарегистрировано 11.08.2015 Инспекцией ФНС России по Канавинскому району г.Н.Новгорода; 

<

...>) 50 000 руб. неустойки, 6 627 руб. 83 коп. государственной пошлины. 

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Мотивированное решение составляется по заявлению лица, участвующего в деле. Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано в Арбитражный суд Нижегородской области в течение 5 дней со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Арбитражного суда Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по истечении 15 дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае составления мотивированного решения оно вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы. В случае подачи апелляционной жалобы настоящее решение, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Исполнительный лист выдать после вступления настоящего решения в законную силу. Исполнительный лист до истечения срока на обжалование настоящего решения в апелляционном порядке выдать по заявлению взыскателя.

Настоящее решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в срок, не превышающий 15 дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения - со дня принятия решения в полном объеме. Настоящее решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в том же порядке и только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

Судья                                      Е.В.Белянина