Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040 

факс (84012)530484

E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru

http://www.kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Калининград

Дело №

А21-4428/2017

«29»

августа

2017 года

Резолютивная часть решения объявлена  

«23»

августа

2017 года

Решение изготовлено в полном объеме   

«29»

августа

2017 года

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО "ЗБР" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО "ОСТАС ЦЕЛТНИЕКС" (ЕРН 41203004237, ИНН филиала в г. Калининграде 9909384488) о взыскании 834 731,97 рубля 

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности;

от ответчика: ФИО3 по доверенности;

установил.

Общество с ограниченной ответственностью "ЗБР" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ОСТАС ЦЕЛТНИЕКС" (ЕРН 41203004237, ИНН филиала в г. Калининграде 9909384488) о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 834 731,97 рубля.

Судом установлено.

Решением Арбитражного суда Калининградской области от 05.04.2016 по делу № А21-7245/2015 установлено, что во исполнение обязательств по государственному  контракту № 91 на выполнение работ по реконструкции правобережной дамбы реки Луговая, Славский район, Калининградская область», заключенному 20.08.2013 между ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Калининградской области» (заказчик) и ООО "ОСТАС ЦЕЛТНИЕКС" (генеральный подрядчик), 09 июля 2014 года ООО "ОСТАС ЦЕЛТНИЕКС", как генподрядчик, и ООО "ЗБР", как субподрядчик, заключили договор субподряда № 1-л/14 на выполнение работ по реконструкции правобережной дамбы реки Луговая Славский район, Калининградская область». Сроки выполнения работ стороны оговорили в разделе 3 договора, согласно которому, работы по договору должны быть выполнены не позднее 30 сентября 2015 года. В соответствии с пунктом 2.1 договора стоимость работ по договору составила 64 602 898,95 рубля. Дополнительным соглашением № 1 от 12 января 2015 года стоимость работ по договору согласована в сумме 58 959 996,12 рубля. В пункте 4.1 договора стороны установили следующий порядок оплаты: в целях исполнения обязанности по оплате выполненных субподрядчиком работ ежемесячно генеральный подрядчик направляет в ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Калининградской области» уведомление об оплате на расчетный счет субподрядчика выполненных субподрядчиком работ во исполнение контракта № 91 от 20.08.2013 с приложением копии договора субподряда, подписанных заказчиком и генеральным подрядчиком, субподрядчиком актов о приемке работ, счета-фактуры субподрядчика на оплату выполненных работ в течение трех дней с момента подписания актов выполненных работ. Плательщик перечисляет денежные средства субподрядчику по уведомлению в течение десяти банковских дней с момента его получения с приложением документов. Перед началом выполнения работ генеральный подрядчик осуществляет субподрядчику авансовый платеж в сумме 2 000 000 рублей.

Вышеуказанным решением суда от 05.04.2016 по делу № А21-7245/2015 с ООО "ОСТАС ЦЕЛТНИЕКС" в пользу ООО «ЗБР» взысканы 9 400 332 рубля основного долга, 149 785,84 рубля процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 16.09.2015. Решение суда вступило в законную силу, по делу выданы исполнительные листы. 

По настоящему делу истец просит взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 17.09.2015 по 18.01.2017. Согласно расчету истца за период с 17.09.2015 по 18.01.2017 ответчику начислены проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 834 731,97 рубля, в связи с несвоевременной оплатой основного долга по договору от 09.07.2014 № 1-л/14.

Ответчик в судебном заседании против иска возражал, доказательств уплаты процентов не представил.  

Расчет процентов проверен судом, признан обоснованным. 

Требования истца подлежат удовлетворению на основании положений статьи 395 ГК РФ.

Руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью ООО «ОСТАС ЦЕЛТНИЕКС» (Латвийская Республика, единый регистрационный номер 41203004237) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЗБР» (ОГРН 

<

***>) проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 834 731,97 российских рублей, в доход Федерального бюджета госпошлину  в сумме 19 694,64 российских рублей.

Решение может быть обжаловано в  месячный срок в арбитражный апелляционный суд.

Судья          О.Н. Шкутко