АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть объявлена 12.10.2023 г.)

Дело № А82-4668/2023

г. Ярославль

02 ноября 2023 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Бессоновой И.Ю. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Дыбцыной Е.А., секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление муниципального казенного учреждения "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ" города Ярославля (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Строительно монтажная компания "Крепость" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о   взыскании   182922.14  руб.,

при участии:

от истца – ФИО2 - представитель по доверенности от 28.09.2022 г.

от ответчика – не явились

установил:

Муниципальное казенное учреждение "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ" города Ярославля обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Строительно монтажная компания "Крепость" о взыскании 361 841 руб. 16 коп., в том числе 17 643 руб. 90 коп. пени по п. 12.8 контракта, 2 000 руб. штраф по п. 12.5 контракта, 244 917 руб. 36 коп. штраф по п. 12.9 контракта, 97 279 руб. 90 коп. стоимость возвратного материала.

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 05.10.2023 г. суд определил выделить в отдельное производство для отдельного рассмотрения требования муниципального казенного учреждения "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ" города Ярославля о взыскании 97 279 руб. 90 коп. задолженности (возвратный материал), 81 639 руб. 12 коп. штрафа в отдельное производство. Делу присвоен № А82-16994/2023.

Судом рассматривается требование Муниципального казенного учреждения "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ" города Ярославля к обществу с ограниченной ответственностью "Строительно монтажная компания "Крепость" о взыскании 17 643 руб. 90 коп. штраф, предусмотренный по п. 12.8 контракта, 163 278 руб. 24 коп. штраф, предусмотренный п. 12.9 контракта, 2 000 руб. штраф, предусмотренный п. 12.5 контракта.

Истец в заседании требования поддержал.

Ответчик в заседание не явился, извещен, в ходе судебного рассмотрения спора направлял отзыв на иск, требования в части пени не оспорил, указал, что 25.11.2022 г. истцом было принято Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, основанием для принятия которого, явилось формальное неисполнение Ответчиком в полном объеме работ по Муниципальному контракту в установленные сроки. Ответчик полагает, что истец взыскивает несколько штрафов за одно и тоже нарушение - факт неисполнения контракта. Истец предъявляет штраф за неисполнение контракта, и также заявляет требование о взыскании штрафа за неисполнение предписания №155 от 10.11.2022 г. о необходимости исполнять контракт. Ответчик полагает, что штраф за неисполнение предписания должен составлять 1 000,00 рублей согласно п.12.5 контракта. Полагает, что начисление штрафа за одно и тоже нарушение дважды недопустимо. Ответчик указал, что неисполнение Муниципального контракта произошло, в том числе по вине Истца, а именно, последний не представил Ответчику проектную документацию и иные документы, необходимые для надлежащего и своевременного исполнения договора подряда по заключенному контракту. В документации, размещенной на электронной площадке при проведении электронного аукциона, проектная документация по установленной законом форме отсутствовала. В приложении к проекту контракта были проложена «схема» участка проведения работ, которые не содержала в себе ни границ проведения работ, ни размеров и площадей, ни высотных отметок и геодезических точек. Указанная схема составлены в форме скрин-шота из публичных карт, на которой были цветными линиями отмечены приблизительные границы, фактически несоответствующие дефектным ведомостям, также размещенным на электронной площадке. Ответчик указал, что предпринимал все усилия для своевременного и надлежащего исполнения своих обязательств по контракту, своевременно приступило к выполнению работ, однако в связи с тем, что в конкурсной документации отсутствовали полноценные чертежи или проектные решения по указанному объекту, имелось лишь схематичное отображение объекта, Ответчик был вынужден за свой счет нанять кадастрового инженера для составления схемы проезда с целью определения точных границ и объемов выполняемых работ, что заняло дополнительное время. Указанные действия производились совместно с сотрудниками Заказчика, которые также не имели достоверной информации о границах работ, однако также оказывали содействие Подрядчику при проведении работ. Ответчик указал, что причиной неисполнения контракта явились следующие обстоятельства: сметной документацией по спорному контракту была предусмотрена укладка асфальтобетонных смесей марок А8ВН, А16ВН, А16НН, которые являются новыми смесями, производятся только на новых современных асфальтобетонных заводах, имеющих возможность производства 5-ти компонентных асфальтобетонных смесей. Таких заводов в г.Ярославле не более 4-х, при этом ни один из них не согласился предоставить Ответчику отсрочку по оплате асфальтобетонных смесей для своевременного исполнения контрактов. В связи с аномальными морозами и неблагоприятными погодными условиями от Заказчика поступил запрет на укладку асфальта, а поставщик, сославшись на отрицательные температурные показатели, сообщил, что завод не имеет технической возможности производить выпуск асфальтобетонных смесей. Заказчик принял решения об одностороннем отказе от исполнения 8 Муниципальных контрактов заключенных с Ответчиком. Ответчик полагает, что наступление аномальных морозов и неблагоприятных погодных условий в виде постоянных дождей и впоследствии снега также не позволило завершить выполнение работ и не зависело от его воли. Ответчик указал, что между Истцом сторонами всего было заключено 8 Муниципальных контрактов на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования (в том числе проездов), являющихся подъездными путями к объектам социальной сферы по г. Ярославлю на 2022 год: № 198/22 от 22.08.2022, № 208/22 от 30.08.2022, № 221/22 от 02.09.2022, №232/22 от 05.09.2022,  №236/22 от 12.09.2022, №238/22 от 19.09.2022, №241/22 от 19.09.2022. Заказчиком произведено недостаточное финансирование. Ответчик заявил о несоразмерности неустойки, так как неустойка в общем размере 361 841,16 руб., что составляет 44 % от общей суммы контракта.

В судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ объявлялся перерыв до 05.10.2023 г. до 16 час. 40 мин., до 12.10.2023 г. до 09 час. 20 мин.

Информация о перерыве размещена на официальном сайте суда.

После перерыва судебное заседание продолжено без участия представителей сторон.

Выслушав представителя истца, рассмотрев материалы дела, суд установил следующее.

07.09.2022 года между МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» г. Ярославля (далее - Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «КРЕПОСТЬ» (далее -Подрядчик) был заключен муниципальный контракт № 212/22 (далее - Контракт) на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования (в том числе проездов), являющихся подъездными путями к объектам социальной сферы по г. Ярославлю на 2022 г. (лот 15), согласно п.п. 1.1, 4.1, 6.1, 12.1, 12.5, 12.8, 12.9 которого Подрядчик приникает на себя обязательство выполнить работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования (в том числе проездов), являющихся подъездными путями к объектам социальной сферы по г. Ярославлю па 2022 год (лот 1S) (далее - работы, объект) в соответствии с условиями Контракта, Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту), сметной документацией (Приложение № I к Описанию объекта закупки), графиком производства работ (Приложение №2 к Контракту), являющимися неотъемлемой частью Контракта, я Заказчик обязуется принять надлежащим образом выполненные работы и оплатить их. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта, включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других, обязательных платежей я иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту. Цена Контракта составляет: 816 391 (восемьсот шестнадцать тысяч триста девяносто один) руб. 20 коп., в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов. Срок выполнения работ: дата начала исполнения контракта - 07.09.2022; дата окончания исполнения контракта - 20.09.2022. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000 рублей. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и факт чески исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном в постановлении Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и составляет 81 639,12 рублей.

Во исполнение условий контракта ответчиком начато выполнение работ.

19.10.2022г. сторонами подписан акт выполненных работ № 1 от 19.10.2022г. на сумму 322 704 руб.

10.11.2022 г. произведен осмотр объекта, составлен акт выявленных нарушений, ответчику выписано предписание № 155 об устранении нарушений от 22.08.2022 г. № 212/22, согласно которому в целях устранения указанных нарушений, ответчику предложено организовать выполнение мероприятий в срок до «15» ноября 2022 г., а именно: предоставить график производства работ,  произвести ремонт проезжей части, ремонт тротуаров, ремонт колодцев на проезжей части, установить дорожные знаки.

18.11.2023 г. состоялся повторной осмотр объекта, составлен акт выявленных нарушений,  согласно которому было установлено, что предписание № 155 от 10.11.2022 г. не исполнено.

В связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, в соответствии с пунктами 17.3 муниципального контракта № 212/22 от 07.09.2022 года, 25.11.2022г. Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

23.01.2023 года решение вступило в законную силу.

24.01.2023 г. истец направил ответчику претензию, в которой просил оплатить неустойки, начисленные связи с неисполнением контракта.

Отсутствие исполнения требования послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Изучив материалы дела, суд считает требования  подлежащими удовлетворению частично по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определённую работу и сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несёт ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно ст.ст. 330, 331 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

Факт ненадлежащего исполнения обязательства по контракту ответчиком подтвержден материалами дела, ответчиком не оспорен.

При наличии доказанного факта неисполнения обязательства требование о взыскании неустойки является обоснованным, соответствует ст. 330 ГК РФ, разделу 12 Контракта.

Доводы ответчика об отсутствии вины в неисполнении обязательства оценены судом, отклонены.

Из условий контракта не следует, что заказчик обязан предоставить подрядчику проектную документацию на объект. Работы должны выполняться в соответствии с Контрактом, техническим заданием, сметной документацией. Ответчик в порядке статьи 718 ГК РФ перенесения сроков исполнения работы от истца не требовал. Непредставление заводами отсрочки по оплате асфальтобетонных смесей, невозможность отгрузки и перегрузка мощностей заводов, неисполнение обязательств субсубподрядчиком не свидетельствуют об отсутствии вины в неисполнении обязательства.

Согласно пункту 9.1 контракта подрядчик отвечает за действия или ошибки любого субподрядчика, соисполнителя (в случае привлечения), а также за его представителей или персонал, привлечённого им для выполнения работ, как за свои собственные.

Довод о заключении 8 контрактов не свидетельствует об отсутствии вины подрядчика, так как при принятии обязательства по муниципальным контрактам ответчик должен был оценить материальные и трудовые ресурсы, объективные возможности одновременного выполнения нескольких обязательств. Заключая спорный контракт, ответчик принял на себя обязательства по выполнению работ в полном объеме и в согласованные сроки.

По расчету истца сумма пени за просрочку выполнения работ составляет 17 643 руб. 90 коп.

Расчет неустойки (пени) ответчиком не оспорен, контррасчет не представлен, возражения не заявлены.

В заявленном размере неустойка подлежит взысканию с ответчика.

Истцом заявлено требование о взыскании штрафа в размере 163 278 руб. 24 коп., предусмотренного п. 12.9 контракта, а также штраф в размере 2 000 руб., предусмотренный п. 12.5 Контракта.

Ответчик, возражая против удовлетворения требования, указал, что в силу п.12.9 Контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 81 639,12 рублей и далее заявляет требование о взыскании данного штрафа за: - отказ от исполнения контракта в связи с неисполнением Ответчиком муниципального контракта; - неисполнение предписания об устранении нарушений №155 от 10.11.2022 г. Таким образом, Истец полагает, что вправе дважды начислить неустойку за сам по себе факт неисполнения Ответчиком контракта, поскольку в предписании №155, по сути, указано на необходимость исполнения Ответчиком своих обязательств по контракту.

Условиями контракта установлен фиксированный размер штрафа в сумме 81 639 руб. 12 коп. (п. 12.9 Контракта), 1 000 руб. (п.12.5 Контракта).

В ходе выполнения контракта истцом выявлены нарушения при выполнении работ по муниципальному контракту, данные нарушения зафиксированы в акте от 10.11.2022, предписании № 155 от 10.11.2022, основаны на неисполнении ответчиком условий контракта в целом и отдельного условия в части предоставления Графика производства работ. Данные же нарушения имелись в составе нарушений, которые послужили основанием для расторжения контракта. Вместе с тем, определение ответчиком указанных нарушений как два разных факта выявления нарушений, судом признается необоснованным ввиду характера поименованных нарушений.

По смыслу части 8 статьи 34 Закона N 44-ФЗ в случае совершения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) нескольких нарушений своих обязательств по государственному (муниципальному) контракту допустимо взыскание штрафа за каждый случай нарушения (пункт 37 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017). Однако из приведенной правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации также следует, что при исследовании вопроса об обоснованности начисления нескольких штрафов необходимо учитывать характер спорных отношений из контракта и характер допущенного нарушения.

В данном случае все выявленные нарушения поименованы в акте от 10.11.2022, предписании от 10.11.2022 и акте от 18.11.2022. В актах зафиксировано неисполнение контракта в целом и непредоставление Графика производства работ. Само по себе удостоверение выявленных нарушений двумя разными актами не свидетельствует о допущении подрядчиком самостоятельных нарушений. Суд приходит к выводу, что выявленные обстоятельства сами по себе не образуют самостоятельных составов нарушения обязательств по контракту и в совокупности составляют каждый одно нарушение, допущенное ответчиком (одно нарушение - неисполнение контракта в целом, одно нарушение - непредоставление Графика производства работ).

Иное толкование обстоятельств дела может повлечь за собой искусственное увеличение размера ответственности подрядчика за одно и то же нарушение исключительно по произвольному усмотрению заказчика, который может удостоверить выявленные нарушения качества одним или несколькими актами.

Применение штрафа в однократном его размере не исключит обеспечительную функцию неустойки как инструмента правового воздействия на участников гражданского оборота, не создаст ситуацию, при которой нарушение должником принятых на себя обязательств фактически может не повлечь для него имущественных последствий, стимулирующих его в дальнейшем избегать подобных нарушений и исполнять обязательства надлежащим образом.

Таким образом, суд приходит в выводу, что за ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по Контракту (неустранение допущенных нарушений) подлежит начислению штраф в однократном размере, равном 81 639 руб. 12 коп. (согласно пункту 12.9 Контракта), а также штраф в однократном размере, равном 1 000 руб., за непредоставление Графика производства работ (согласно п. 12.5 Контракта).

Ответчиком заявлено ходатайство об уменьшении неустойки.

Согласно пункту 1 статьи 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Согласно пункту 73 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – Постановление № 7) бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ).

В силу пункта 75 Постановления № 7 при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).

В пункте 77 Постановления N 7 разъяснено, что снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ).

Между тем превращение института неустойки в способ обогащения кредитора недопустимо и противоречит ее компенсационной функции (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.07.2014 N 5467/14 по делу N А53-10062/2013).

Учитывая изложенное, а также исполнение ответчиком части обязательств по контракту, на основании положений статьи 333 ГК РФ размер предусмотренного контрактом штрафа подлежит уменьшению судом с начислением его на цену невыполненных работ (493 687 руб. 20 коп.), что составляет 49 368 руб. 72 коп.

В указанном размере штраф подлежит взысканию с ответчика. Оснований для дальнейшего уменьшения штрафа суд не усматривает, так как  каких-либо исключительных обстоятельств  судом не установлено.

В части штрафа за неисполнение обязательства, не имеющего стоимостного выражения, оснований для уменьшения штрафа суд не усматривает: обязательство не исполнено в полном объеме, доказательств чрезмерности неустойки не представлено.

Общая сумма штрафов, подлежащая взысканию с ответчика, составляет 50368 руб. 72 коп.

Доводы Общества о том, что спорным муниципальным контрактом установлены несправедливые и несопоставимые меры ответственности для заказчика и подрядчика, рассмотрены и подлежат отклонению в силу следующего.

Согласно статье 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена ГК РФ, законом или добровольно принятым обязательством.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 ГК РФ).

Спорный контракт регулируется нормами Закона N 44-ФЗ. Как отмечалось ранее, в соответствии с пунктом 5 статьи 34 Закона N 44-ФЗ штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Подписывая спорный договор, подрядчик полагал возможным выполнение работ в установленные контрактом сроки и выражал свое согласие относительно сроков выполнения работ, следовательно, сознательно принял на себя риск негативных последствий своей деятельности, учитывая, что предпринимательская деятельность осуществляется на свой страх и риск и каждая из сторон несет риск негативных последствий невыполнения условий договора.

В силу ст. 110 АПК РФ госпошлина по делу подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительно монтажная компания "Крепость"  (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу Муниципального казенного учреждения "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ" города Ярославля  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 17 643 руб. 90 коп. пени, 50 368 руб. 72 коп. штрафы.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительно монтажная компания "Крепость" в доход федерального бюджета 2 377 руб. государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать по истечении 10-дневного срока со дня вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме). Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, - через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

 

Судья

И.Ю. Бессонова