АРБИТРАЖНЫЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Магадан Дело № А37-2431/2015  26.07.2017   

Арбитражный суд Магаданской области в составе судьи Макаревич Е.М., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению областного  государственного бюджетного учреждения «Магаданский областной эксплуатационный  центр» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 685000, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «ТехноСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, место нахождения: 410003, 

<

...>)  

о взыскании 451 693 рублей 14 копеек, об обязании безвозмездно устранить недостатки  выполненных работ  

и по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  «ТехноСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 410003,  

<

...>) 

к областному государственному бюджетному учреждению «Магаданский областной  эксплуатационный центр» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения:  685000, 

<

...>)  

о взыскании 191 187 рублей 00 копеек 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора -  областное государственное казённое учреждение «Государственный архив Магаданской  области» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 685000, 

<

...>)  

Руководствуясь статьями 49, 106, 109, 110, 112, 156, 159, 167-171, 174, 176, 180, 181  

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

1. Принять заявленное областным государственным бюджетным учреждением  «Магаданский областной эксплуатационный центр» уточнение требований от  25.07.2017 № 780 в части срока безвозмездного устранения недостатков выполненных  работ – в срок до 30.07.2018.  

2. Исковые требования областного государственного бюджетного учреждения  «Магаданский областной эксплуатационный центр» удовлетворить полностью.  

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТехноСтрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу областного государственного бюджетного  учреждения «Магаданский областной эксплуатационный центр» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) пени в размере 28 785 рублей 66 копеек, штраф в  размере 327 907 рублей 48 копеек, расходы на оплату внесудебной экспертизы в  размере 95 000 рублей 00 копеек, расходы на уплату госпошлины в размере 18 034  рублей 00 копеек, расходы на оплату судебной экспертизы в размере 250 000 рублей  00 копеек, а всего – 719 727 рублей 14 копеек.  

4. Обязать общество с ограниченной ответственностью «ТехноСтрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в срок до 30.07.2018 устранить недостатки  выполненных работ по капитальному ремонту кровли административного здания,  расположенного по адресу: 

<

...>, а именно  выполнить работы по:  

- устройству выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, единица  измерений – 100 м2 стяжки, количество – 9,5246;  

- устройству выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять  к норме 12-01-017-01, единица измерений – 100 м2 стяжки, количество – 9,5246;  

- устройству пароизоляции оклеечной в один слой, единица измерений – 100 м2  изолируемой поверхности, количество – 9,5246;  

- утеплению покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике  в один слой, единица измерений – 100 м2 утепляемого покрытия, количество – 9,3894;  - утеплению покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к норме 1201-013-01, единица измерений – 100 м2 утепляемого покрытия, количество – 9,3894;  

- утеплению покрытий плитами из экструзионного пенополистирола на битумной  мастике в один слой (устройство разуклонки), единица измерений – 100 м2  утепляемого покрытия, количество – 9,5246;  

- утеплению покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к норме 1201-013-01, единица измерений – 100 м2 утепляемого покрытия, количество – 9,3894;  

- устройству выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, единица  измерений – 100 м2 стяжки, количество – 9,3894;  

- устройству выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять  к норме 12-01-017-01, единица измерений – 100 м2 стяжки, количество – 9,3894;  

- армированию подстилающих слоев и набетонок, единица измерения – 1 т;  количество - 2,81682;  

- устройству кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, единица  измерения – 100 м2 кровли; количество - 9,5246;  

- огрунтовке оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный  ковер готовой эмульсией битумной, единица измерения – 100 м2 кровли; количество9,5246;  

- устройству примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам  высотой более 600 мм с одним фартуком, единица измерения – 100 м примыканий;  количество - 3,073;  

- смене мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных  материалов карнизных свесов, единица измерения – 100 м покрытия; количество1,5214;  

- устройству покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали, единица  измерения – 100 м2 покрытия; количество - 0,6748;  

- монтажу металлического ограждения, единица измерения – 100 м ограждения;  количество - 1,47;  

- погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: погрузка мусора  строительного с погрузкой вручную, единица измерения – 1 тонна груза; количество -  по факту;  

- перевозке грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих  вне карьера на расстоянии до 7 км 1 класса груза; единица измерений – 1 тонна груза,  количество – по факту. Исполнительный лист выдать истцу после вступления  решения в законную силу.  

5. Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «ТехноСтрой» удовлетворить частично.  

6. Взыскать с областного государственного бюджетного учреждения «Магаданский  областной эксплуатационный центр» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  

пользу общества с ограниченной ответственностью «ТехноСтрой» (ОГРН  1116450007145, ИНН 6452093971) пени в размере 85 664 рублей 07 копеек.  

7. В остальной части встречных исковых требований обществу с ограниченной  ответственностью «ТехноСтрой» отказать.  

8. Произвести между сторонами зачет встречных требований на сумму 85 664 рубля 07  копеек.  

9. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТехноСтрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу областного государственного бюджетного  учреждения «Магаданский областной эксплуатационный центр» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) штраф в размере в размере 271 029 рублей 07  копеек, расходы на оплату внесудебной экспертизы в размере 95 000 рублей 00  копеек, расходы на уплату госпошлины в размере 18 034 рублей 00 копеек, расходы  на оплату судебной экспертизы в размере 250 000 рублей 00 копеек, а всего – 634 063  рубля 07 копеек. Выдать исполнительный лист взыскателю после вступления решения  в законную силу.  

10. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТехноСтрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину в  размере 3 718 рублей 00 копеек. Выдать исполнительный лист налоговому органу  после вступления решения в законную силу.  

11.  Взыскать с областного государственного бюджетного учреждения «Магаданский  областной эксплуатационный центр» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  доход федерального бюджета госпошлину в размере 3 018 рублей 00 копеек. Выдать  исполнительный лист налоговому органу после вступления решения в законную силу.  

12. Бухгалтерии Арбитражного суда Магаданской области перечислить с депозитного  счета Арбитражного суда Магаданской области обществу с ограниченной  ответственностью «Северо-Восточный научно-производственный центр» плату за  проведение судебной экспертизы по делу № А37-2431/2015 в размере 250 000 рублей  00 копеек согласно счету от 04.04.2017 № А37-2431/2015 (получатель ООО «Северо- Восточный научно-производственный центр», ИНН 

<

***>, КПП 490901001, р/сч  

<

***> в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске, г. Хабаровск,  БИК 040813727, кор. сч. 30101810400000000727).  

13. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Шестой  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Магаданской области.  

14. Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Дальневосточного округа через  Арбитражный суд Магаданской области при условии, что оно было предметом  

рассмотрения Шестого арбитражного апелляционного суда или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной  жалобы.  

Судья Макаревич Е.М.