Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-45043/24-191-338

г. Москва

13 июня 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 30 мая 2024 года

Полный текст решения изготовлен 13 июня 2024 года 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи  Волковой Е.И., единолично 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Попковой И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (119019, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 27.02.2003, ИНН: 

<

***>)

к ответчику АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИЕ БАЗОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (117105, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 22.09.2008, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 9 499 801 руб. 11 коп.

при участии в заседании: согласно протоколу, 

 

УСТАНОВИЛ:

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИЕ БАЗОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" о взыскании неустойки по государственному контракту от 19.05.2020 № 2021187348201412539025118 в размере 9 499 801 руб. 11 коп.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 АПК РФ информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме, представил письменные пояснения.

Представитель ответчика требования оспорил, указал, в том числе на не начисление штрафных санкций в период с 01.04.2022 по 01.10.2022, а также необходимость списания неустойки, размер которой не превысил 5%

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание иска, исследовав и оценив представленные по делу доказательства, заслушав пояснения представителей сторон, арбитражный суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, между Министерством обороны Российской Федерации (далее - Заказчик) и АО «НПО РусБИТех» (далее - Поставщик) заключен государственный контракт от 19.05.2020 № 2021187348201412539025118 на изготовление и поставку (с вводом в эксплуатацию) «Программно-аппаратный комплекс поддержки принятия решения начальника связи армии, оперативно-стратегического командования (по спецификации)» для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2020-2021 годах (далее - Контракт, Товар).

В соответствии с пунктом 2.1. Контракта Поставщик обязуется в установленный Контрактом срок поставить Заказчику Товар в количестве, комплектности, соответствующий качеству и иным требованиям, установленным Контрактом, путем его передачи Грузополучателю на условиях, установленных Контрактом, включая монтажные и пусконаладочные работы, инструктаж (обучение) специалистов Заказчика (Грузополучателя) по пользованию и эксплуатации поставленного Товара.

Пунктом 16.2. Контракта определено, что поставка Товара, включая монтажные и пусконаладочные работы, инструктаж (обучение) специалистов Заказчика (Грузополучателя) по пользованию и эксплуатации поставленного Товара, должна быть осуществлена в сроки, установленные подпунктом 3.2.2. Контракта.

Согласно пункту 8.4 части 1 статьи 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 44-ФЗ) под отдельным этапом исполнения контракта понимается часть обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя), в отношении которого контрактом установлена обязанность заказчика обеспечить приемку (с оформлением документа о приемке) и оплату поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

С учетом положений пункта 8.4 части 1 статьи 3 ФЗ № 44-ФЗ, в соответствии с пунктами 3.2.2, 4.2.1, 4.2.2 Контракта (в редакции дополнительного соглашения от 8 сентября 2023 г. № 3 к Контракту), Поставщик обязуется поставить Товар в следующие сроки: в 2020 году - в срок до 10.11.2020 (этап № 1) на общую сумму 19 267 359,65 руб.; в 2021 году - в срок до 31.03.2021 (этап № 2) на сумму 8 430 503,00 руб.

Датой поставки Товара является дата подписания Грузополучателем Акта  ввода  Товара  в  эксплуатацию  и  проведения  инструктажа  (обучения) специалистов (Приложение № 3 к Контракту) (пункт 7.6. Контракта).

Товар на сумму 19 267 359,65 руб., предусмотренный к поставке в 2020 году, поставлен Поставщиком с просрочкой, что подтверждается Актами ввода Товара в эксплуатацию и проведения инструктажа (обучения) специалистов от 20.09.2023 №№ 1, 2, подписанными Грузополучателями 29.09.2023 и 03.10.2023 соответственно.

Товар на сумму 8 430 503,00 руб., предусмотренный к поставке в 2021 году, поставлен Поставщиком с просрочкой, что подтверждается Актом ввода Товара в эксплуатацию и проведения инструктажа (обучения) специалистов от 20.09.2023 № 3, подписанным Грузополучателем 26.09.2023.

Требование Заказчика о взыскании неустойки за нарушение срока поставки Товара за период с 10.11.2020 по 30.07.2021 рассмотрено в рамках арбитражного дела №А40-113577/22-45-765.

Просрочка исполнения обязательств по поставке Товара, подлежащего поставке в 2020 году, с 31.07.2021 по 03.10.2023 составила 795 дней.

Просрочка исполнения обязательств по поставке Товара, подлежащего поставке в 2021 году, с 31.07.2021 по 26.09.2023 составила 788 дней.

В соответствии с п. 11.1 Контракта стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на даты исполнения обязательств -13%.

Согласно расчету истца неустойки за просрочку исполнения обязательств по этапу № 1 составляет:

(19 267 359,65 руб. -0 руб.) х 1/300 х 13% х 791 день  = 6 604 208,64 руб.

(19 267 359,65 руб. - 9 542 335,91 руб.) х 1/300 х 13% х 4 дня = 16 856,71 руб.

Неустойка за просрочку исполнения обязательств по этапу № 2 составляет: (8 430 503,00 руб. - 0 руб.) х 1/300 х 13% х 788 дней  = 2 878 735,76 руб.

Итого размер неустойки за просрочку исполнения обязательств по этапам №№ 1, 2 составил 9 499 801,11 руб.

В соответствии с положениями статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. При этом односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

Согласно ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе неустойкой (штрафом, пеней), которой, согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Неустойка одновременно является способом обеспечения обязательства и одной из форм гражданско-правовой ответственности. Основанием для применения неустойки является факт неправомерного поведения стороны в обязательстве.

Действующее гражданско-правовое регулирование института ответственности по общему правилу исходит из того, что лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство, несет ответственность при наличии вины (пункт 1 статьи 401 ГК РФ).

В соответствии с п. 8.1 Контракта стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

В соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчикам, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Ответчик требования оспорил, указал:

В отношении в/ч 71609: срок исполнения обязательств — 10.11.2020.

Обязательства   по  поставке   Товара  в   в/ч     71609   исполнены   27.01.2021,   что подтверждается   Актом   приема-передачи   от   27.01.2021   №   1, соответствующим счетом-фактурой от 27.01.2021 № 5, товарной накладной форме ТОРГ-12 от 27.01.2021 № 5.

В соответствии с п.8.1 Контракта в целях монтажа и ввода Товара в эксплуатацию, проведения инструктажа (обучения) специалистов Заказчика (Грузополучателя) пользованию и эксплуатации Товара Поставщиком составляется, подписывается и скрепляется печатью Акт приема-передачи, содержащий информацию о поставляемом Товаре и иную информацию в соответствии с условиями Контракта, передается Грузополучателю вместе с Товаром и проверяется Грузополучателем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем поставки Товара в место поставки.

В соответствии с п. 8.2  Контракта Акта приема-передачи подтверждает доставку указанного в нем количества тары, упаковок, коробок и т. д. с Товаром и контроль наличия и (или) отсутствия внешних повреждений тары, упаковок и т. д. с Товаром.

Обязательства по проведению инструктажа (обучения) в отношении специалистов в/ч 71609 исполнены 05.03.2021, что подтверждается соответствующими зачетными ведомостями. С учетом того, в соответствии с п.2.1 Контракта инструктаж (обучение) специалистов Заказчика осуществляется на поставленном Товаре, по состоянию на 05.03.2021 все обязательства АО «НПО РусБИТех» по Контракту в отношении в/ч 71609 были исполнены надлежащим образом и в полном объеме.

Однако в связи с внесением изменений в Спецификацию (в связи со снятием с производства комплектующих, включенных Государственным заказчиком в первоначальную спецификацию) АО «НПО РусБИТех» не могло получить удостоверение 504 ВП МО РФ на продукцию, а также на монтажные и пусконаладочные работы до заключения Дополнительного соглашения № 2 от 05.08.2022 к Контракту. Соответствующее указание дано государственным заказчиком 504 военному представительству Министерства обороны Российской Федерации в письме от 18.12.2020 № 248/4/13819дсп.

О наличии проблемных вопросов в процессе выполнения Контракта в связи с отсутствием дополнительного соглашения, уточняющего спецификацию, государственный заказчик уведомлялся в т.ч. 22.11.2021 письмом № 23/8/4-6361. Фактически в отсутствие собственных виновных действий АО «НПО РусБИТех» больше года было лишено возможности предъявить к сдаче выполненные в рамках Контракта обязательства.

10.11.2022 в 504 ВП МО РФ было представлено извещение № 507/22 о поставке Товара в в/ч 71609. Удостоверение № 504/147/2022 на Товар было выдано 30.12.2022, т. е. через 50 дней после получения извещения.

11.11.2022 в 504 ВП МО РФ было представлено извещение № 508/22 о проведении монтажных и пусконаладочных работ в в/ч 71609. Удостоверение № 504/148/2022 на монтажные и пусконаладочные работы было выдано 30.12.2022, т. е. через 49 дней после получения извещения. Т.е. факт выполнения всех обязательств подтвердило также представительство государственного заказчика.

16.01.2022 письмом 23/8/4-130 командир в/ч 87406 был уведомлен о полном исполнении обязательств по поставке и монтажу и пуско-наладке по Контракту. Весь следующий срок был посвящен предоставлению и рассмотрению расчетно-калькуляционных материалов на фиксированную цену вспомогательных работ, при том, что заключение на фиксированную цену № 504/1034 было выдано 504 ВП МО РФ еще 25.10.2021.

Подписание Акта ввода в эксплуатацию 20.09.2023 обусловлено долгой подготовкой дополнительного соглашения № 3 от 08.09.2023, которым была введена в действие фиксированная цена на Товар, монтажные и пусконаладочные работы, а также услуги по обучению (консультации) специалистов. При этом Акт ввода Товара в эксплуатацию подписаны на основании счета-фактуры от 27.01.2021 № 5, товарной накладной по форме ТОРГ-12 от 27.01.2021 № 5, а также удостоверений 504 ВП МО РФ № 504/147/2022 от 30.12.2022 и № 504/148/2022 от 30.12.2022. Кроме того, в Акте указано, что инструктаж специалистов также проведен в сроки, установленные Контрактом.

С учетом того, что по состоянию на 05.03.2021 все обязательства в рамках Контракта по в/ч 71609 были исполнены в полном объеме, и принимая факт взыскания неустойки за период по 30.07.2021, требование о взыскании неустойки с 31.07.2021 по 20.09.2023 является незаконным и необоснованным.

В отношении в/ч 40105: срок исполнения обязательств — 10.11.2020.

Извещением № 37/21 от 04.03.2021 504 ВП МО РФ было уведомлено о предъявлении изделия зав. № 200007 на приемосдаточные испытания и приемку. На основании указанного извещения 18.03.2021 504 ВП МО РФ выдало заключение о готовности изделия к отгрузке заказчику.

Обязательства по поставке Товара в в/ч 40105 исполнены 16.04.2021, что подтверждается Актом приема-передачи, подписанным представителем Грузополучателя 16.04.2021, соответствующим счетом-фактурой № 30 от 29.03.2021, товарной накладной по форме ТОРГ-12 № 30 от 29.03.2021.

Акт выполнения монтажных и пусконаладочных работ утвержден ВрИО командира в/ч 40105 - 16.04.2021.

Обязательства по проведению инструктажа (обучения) в отношении специалистов в/ч 105 исполнены 24.06.2021, что подтверждается соответствующими зачетными ведомостями 1/2021 и № 2/2021. Таким образом, по состоянию на 24.06.2021 все обязательства АО «НПО РусБИТех» по Контракту  в отношении в/ч 40105 были исполнены надлежащим образом и в полном объеме.

Однако в связи с внесением изменений в Спецификацию (в связи со снятием с производства комплектующих, включенных Государственным заказчиком в первоначальную спецификацию) АО «НПО РусБИТех» не могло получить удостоверение 504 ВП МО РФ на продукцию, а также на монтажные и пусконаладочные работы.

01.11.2022 в 504 ВП МО РФ было представлено извещение № 481/1/22 о поставке Товара в/ч 40105. Удостоверение № 504/123/2022 на Товар было выдано 16.12.2022, т. е. через 45 дней после получения извещения.

02.11.2022 в 504 ВП МО РФ было представлено извещение № 483/22 о проведении монтажных и пусконаладочных работ в в/ч 40105. Удостоверение № 7124/2022 на монтажные и пусконаладочные работы было выдано 16.12.2022, т. е. через 44 дня после получения извещения.

16.01.2022 письмом 23/8/4-130 командир в/ч 87406 был уведомлен о полном исполнении обязательств по поставке и монтажу и пусколадке по Контракту. Весь последующий срок был посвящен предоставлению и рассмотрению расчетно-калькуляционных материалов на фиксированную цену вспомогательных работ, при том, что заключение на фиксированную цену № 504/1034 было выдано 504 ВП МО РФ еще 25.10.2021.

Подписание Акта ввода в эксплуатацию 20.09.2023 обусловлено долгой подготовкой дополнительного соглашения № 3 от 08.09.2023, которым была введена в действие фиксированная цена на Товар, монтажные и пусконаладочные работы, а также услуги по обучению (консультации) специалистов. При этом Акты ввода Товара в эксплуатацию подписаны на основании счета-фактуры № 30 от 29.03.2021, товарной накладной по форме ТОРГ-12 № 30 от 29.03.2021. Кроме того, в Акте указано, что инструктаж специалистов также проведен в сроки, установленные Контрактом.

С учетом того, что по состоянию на 24.06.2021 все обязательства в рамках Контракта по в/ч 40105 были исполнены в полном объеме, и принимая факт взыскания неустойки за период по 30.07.2021, требование о взыскании неустойки с 31.07.2021 по 20.09.2023 является незаконным и необоснованным.

В отношении в/ч 25801: срок исполнения обязательств — 31.03.2021.

Обязательства по поставке Товара в в/ч 25801 исполнены 14.12.2022, что подтверждается Актом приема-передачи № 3/1 от 14.12.2022, соответствующим счетом-фактурой № 206 от 14.12.2022, товарной накладной по форме ТОРГ-12 № 206 от 14.12.2022.

Однако в связи с внесением изменений в Спецификацию (в связи со снятием с производства комплектующих, включенных Государственным заказчиком в первоначальную спецификацию) АО «НПО РусБИТех» не могло получить удостоверение 504 ВП МО РФ на продукцию, а также на монтажные и пусконаладочные работы. При этом заключение 504 ВП МО РФ о готовности товара к отгрузке выдано еще 27.04.2021.

02.12.2022 в 504 ВП МО РФ было представлено извещение № 589/22 о поставке Товара в 125801. Удостоверение № 504/130/2022 на Товар было выдано 19.12.2022, т. е. через 17 дней после получения извещения.

26.12.2022 в 504 ВП МО РФ было представлено извещение № 665/22 о проведении монтажах и пусконаладочных работ в в/ч 25801. Удостоверение № 136/2022 на монтажные и пусконаладочные работы было выдано 29.12.2022.

Обязательства по проведению инструктажа (обучения) в отношении специалистов в/ч 25801 исполнены 14.02.2023, что подтверждается соответствующими зачетными ведомостями. Таким образом, по состоянию на 14.02.2023 все обязательства АО «НПО РусБИТех» по Контракту в отношении в/ч 25801 были исполнены надлежащим образом и в полном объеме: факт выполнения всех обязательств подтвердил как Грузополучатель, так и 504 МО РФ.

Подписание Акта ввода в эксплуатацию 20.09.2023 обусловлено долгой подготовкой дополнительного соглашения № 3 от 08.09.2023, которым была введена в действие фиксированная цена на Товар, монтажные и пусконаладочные работы, а также услуги обучению (консультации) специалистов.

В соответствии с п. 3 ст. 405 Гражданского кодекса Российской Федерации, должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки штора.

Сроки рассмотрения извещений и выдачи заключений представительством государственного заказчика (504 ВП МО РФ), а также сроки рассмотрения расчетно-калькуляционных материалов на фиксированную цену не входят в срок исполнения АО «НПО РусБИТех» своих обязательств и не могут включаться в период просрочки Поставщика (при расчете заказчиком пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения обязательства, в период просрочки исполнения обязательства не подлежат включению дни, потребовавшиеся заказчику для приемки выполненной работы (ее результатов) и оформления итогов такой приемки   (Определение   ВС   РФ   от   15.10.2019   №   305-ЭС19-12786)).   Установление государственным заказчиком срока предоставления Поставщиком отчетных документов для перевода ориентировочной цены Контракта в фиксированную для последующих расчетов по контракту не является обязательством ответчика. Такой срок установлен для регламентации процедуры расчетов по Контракту, но не цели определения срока исполнения Поставщиком обязательств по Контракту.

В соответствии с позицией Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 17.12.2013 № 12945/13, момент окончания оказания услуг (выполнения работ) не должен определяться датой утверждения заказчиком акта сдачи-приемки, так как это ставит приемку работ в зависимость исключительно от усмотрения заказчика. Согласно позиции Министерства финансов Российской Федерации, выраженной в письме от 07.11.2017 № 24-03-08/73293, исходя из системного толкования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», установленные заказчиком в контракте сроки приемки выполненной работы (ее результатов), а также сроки оформления результатов такой приемки не входят в срок исполнения основного обязательства, предусмотренного контрактом. Таким образом, момент выполнения работ определяется не датой подписания заказчиком акта приема-передачи, а моментом фактического их выполнения. Исполнитель не может повлиять на сроки утверждения и подписания Заказчиком акта сдачи-приемки, в связи с чем не может нести ответственность за действия Заказчика.

Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" с 01.04.2022 на территории РФ сроком на 6 месяцев введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей (за исключением лиц, указанных в пункте 2 данного постановления).

На основании пункта 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 № 44 "О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса РФ), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац 10 пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве).

Из анализа вышеприведенных правовых норм и разъяснений Пленума Верховного Суда РФ следует, что в период действия моратория (с 01.04.2022 до 01.10.2022) на требования, возникшие до введения моратория, финансовые санкции не начисляются.

Правила о моратории, установленные Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497, распространяют свое действие на всех участников гражданско-правовых отношений (граждане, включая индивидуальных предпринимателей, юридические лица), за исключением лиц, прямо указанных в пункте 2 данного постановления (застройщики многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов), независимо от того, обладают они признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества либо нет.

С учетом изложенного, начисление истцом неустойки за период начиная с 01.04.2022 по 01.10.2022 на задолженность, возникшую до введения моратория, признается судом неправомерным.

В настоящем случае при расчете неустойки следует исходить из ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день фактического исполнения обязательства, а также стоимости конкретного этапа работ и фактического количества дней просрочки.

По поставке 2020 год в в/ч 71609 судом установлено, что обязательства в полном объеме выполнены 11.11.2022 (дата направления уведомления о проведении монтажных и пусконаладочных работ) до этого момента Заказчик в лице Грузополучателя не мог пользоваться поставленным Товаром, который не имел никакой потребительской ценности без проведения обучения и инструктажа и выдачи Удостоверения ВП МО РФ.

Таким образом, цена этапа поставки в 2020 г. в в/ч 71609 является неразделимой и составляет 9 542 335,91 руб.

Довод Ответчика о поставке Товара в срок установленный Контрактом является необоснованным. Без получения Удостоверения ВП МО РФ Товар использоваться не может. Извещение о поставке Товара в адрес 504 ВП МО РФ направлены 10.11.2022. Извещение в адрес 504 ВП МО РФ о пусконаладочных и монтажных работах направлено 11.11.2022.

Таким образом, этап выполнен 11.11.2022 и период неустойки составляет 469 дней (с 31.07.2021 по 11.11.2022), учитывая мораторий на начисление неустойки  равный   184 дням  (с  01.04.20222  по  01.10.2022) период взыскиваемой неустойки составляет 285 дней: 9 542 335,91 руб. х 1/300 х 7,5% х 285 = 679 891, 43 руб.

По поставке 2020 года в в/ч 40105 судом установлено, что обязательства в полном объеме выполнены 02.11.2022 (дата направления уведомления о проведении монтажных и пусконаладочных работ) до этого момента Заказчик в лице Грузополучателя не мог пользоваться поставленным Товаром, который не имел никакой потребительской ценности без проведения обучения и инструктажа и выдачи Удостоверения ВП МО РФ.

Таким образом, цена этапа поставки в 2020 г. в в/ч 40105 является неразделимой и составляет 9 725 023,74 руб.

Довод Ответчика о поставке Товара в срок установленный Контрактом является необоснованным. Без получения Удостоверения ВП МО РФ Товар использоваться не может. Извещение о поставке Товара в адрес 504 ВП МО РФ направлены 01.11.2022. Извещение в адрес 504 ВП МО РФ о пусконаладочных и монтажных работах направлено 02.11.2022.

Таким образом, этап выполнен 02.11.2022 и период неустойки составляет 460 дней (с 31.07.2021 по 02.11.2022), учитывая мораторий на начисление неустойки равный 184 дням (с 01.04.20222 по 01.10.2022) период взыскиваемой неустойки составляет 276 дней: 9 725 023,74руб. х 1/300 х 7,5% х 276 = 671 026,63руб.

По поставке 2021 года в в/ч 25801 судом установлено, обязательства в полном объеме выполнены 14.02.2023, до этого момента Заказчик в лице Грузополучателя не мог пользоваться поставленным Товаром, который не имел никакой потребительской ценности без проведения обучения и инструктажа.

Таким образом, цена этапа поставки в 2021 г. является неразделимой и составляет 8 430 503,00 руб.

Довод Ответчика о поставке Товара 14.12.2022 является необоснованным. Без получения Удостоверения ВП МО РФ Товар использоваться не может. Удостоверение ВП МО РФ выдано 19.12.2022. Удостоверение ВП МО РФ о пусконаладочных и монтажных работах датировано 29.12.2022. Обязательства по проведению инструктажа выполнены 14.02.2023.

Таким образом, этап выполнен 14.02.2023 и период неустойки составляет 564 дня (с 31.07.2021 по 14.02.2023), учитывая мораторий на начисление неустойки равный 184 дням (с 01.04.2022 по 01.10.2022) период взыскиваемой неустойки составляет 380 дней: 8 430 503,00руб. х 1/300 х 7,5% х 380 дней = 800 897,78руб.

Таким образом неустойка за три этапа поставки составляет: 679 891,43 руб. + 671 026,63 руб. + 800 897,78 руб. = 2 151 815,84 руб., т.е. 7,76%. 

Условием необходимым для списания неустойки является не превышение ее 5% барьера, в данном случае неустойка составляет 7,76%, что исключает ее списание.

Поскольку в ходе рассмотрения настоящего спора просрочка исполнения ответчиком обязательств подтверждена материалами дела, суд пришел к выводу о том, что правовые основания для взыскания с ответчика неустойки имеются в размере 2 151 815,84 руб., в остальной части иска по неустойке отказано.

Расходы по госпошлине в порядке ст. 110 АПК РФ относятся на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Руководствуясь ст.ст. 8, 11, 12, ГК РФ, ст.ст. 9, 41, 65, 110, 123, 156, 167-171, 180, 181 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИЕ БАЗОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (117105, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 22.09.2008, ИНН: 

<

***>) в пользу МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (119019, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 27.02.2003, ИНН: 

<

***>) неустойку по государственному контракту от 19.05.2020 № 2021187348201412539025118 в размере 2 151 815 (два миллиона сто пятьдесят одна тысяча восемьсот пятнадцать) руб. 84 коп.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИЕ БАЗОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (117105, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 22.09.2008, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 15 968 (пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят восемь) руб. 85 коп.

            Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья:

Е.И. Волкова