1449/2017-17670(1) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 25 января 2017 года 

по делу А33-28142/2016 Красноярск 

25 января 2017 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.  

Внести изменения в п. 3.3. Муниципального контракта № 2 от 26.02.2016 на выполнение  

работ по строительству объекта «Детский сад на 190 мест в п. Ангарский Богучанского  

района», изложив его в следующей редакции: «Работы должны быть выполнены до 30.05.2017 г.». 

Внести изменения в п. 17.4 Муниципального контракта № 2 от 26.02.2016 на выполнение  

работ по строительству объекта «Детский сад на 190 мест в п. Ангарский Богучанского  

района», изложив его в следующей редакции: «Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 30.05.2017 г.». 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  

в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  

арбитражный апелляционный суд. 

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд  

Красноярского края. 

Судья Л.К. Бычкова