АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443001, 

<

...>, тел. 

<

***>

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть)

Дело № А55-21951/2025

18 декабря 2025 года

г. Самара

Арбитражный суд Самарской области

в составе судьи Рогулёва С.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания – ФИО1, после перерыва – помощником судьи Чупахиной А.О.,

рассмотрев в судебном заседании 25 ноября - 18 декабря 2025 года с использованием системы веб-конференции дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «ГЕО-Проект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к общество с ограниченной ответственностью «ДСК Дортранс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 85 508 347 руб. 49 коп.

и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «ДСК Дортранс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «ГЕО-Проект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 3 643 843 руб. 66 коп.

третье лицо - Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали ордена Ленина «Москва-Санкт-Петербург» Федерального дорожного агентства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

при участии в заседании

от ООО «ГЕО-Проект» – 25.11.2026, 18.12.2026 - ФИО2, доверенность № 30/25-ГП от 13.03.2025 (путем использования веб-конференции); 09.12.2026 – ФИО3, доверенность № 80/25-ГП от 27.11.2025 (путем использования веб- конференции);

от ООО «ДСК Дортранс» – не явился, извещен; 09 - 18.12.2026 - ФИО4, доверенность от 30.06.2025;

от третьего лица – не явился, извещен;

Руководствуясь ст. 49, ч.1 ст. 110, ст.ст. 167-170, 176, 180, 319 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Ходатайство общества с ограниченной ответственностью «ДСК Дортранс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об увеличении размера исковых требований удовлетворить.

Встречный иск общества с ограниченной ответственностью «ДСК Дортранс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) считать заявленным о взыскании неустойки в общем размере 5 031 974 руб. 57 коп. за период с 11.02.2025 по 09.04.2025, в том числе:

по договору от 13.06.2024 № СУБ-060-2024 в размере 1 624 580 руб. 58 коп., по договору от 10.09.2024 № СУБ-132-2024 в размере 1 867 705 руб. 06 коп., по договору от 10.09.2024 № СУБ-133-2024 в размере 1 539 688 руб. 93 коп.

Принять признание обществом с ограниченной ответственностью «ДСК Дортранс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) исковых требований общества с ограниченной ответственностью «ГЕО-Проект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в части основного долга в сумме 82 473 065 руб. 27 коп., в том числе:

по договору от 13.06.2024 № СУБ-060-2024 задолженности за выполненные работы в размере 28 841 434 руб. 97 коп.,

по договору от 10.09.2024 № СУБ-132-2024 задолженности за выполненные работы в размере 28 846 777 руб. 68 коп.,

по договору от 10.09.2024 № СУБ-133-2024 задолженности за выполненные работы в размере 24 784 852 руб. 62 коп.

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «ГЕО-Проект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ДСК Дортранс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ГЕО-Проект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 78 995 945 руб. 44 коп., в том числе:

по договору от 13.06.2024 № СУБ-060-2024 задолженность за выполненные работы в размере 27 341 434 руб. 97 коп., пени за нарушение обязательств по оплате в размере 112 481 руб. 60 коп. за период с 13.05.2025 по 20.06.2025, с последующим начислением неустойки в размере 0,01 % за каждый день просрочки по оплате основного долга с 21.06.2025 по день фактической оплаты основного долга;

по договору от 10.09.2024 № СУБ-132-2024 задолженность за выполненные работы в размере 26 846 777 руб. 68 коп., пени за нарушение обязательства по оплате в размере 748 763 руб. 38 коп. за период с 13.05.2025 по 20.06.2025, с последующим начислением неустойки в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату оплаты долга, за каждый день просрочки по оплате основного долга с 21.06.2025 по день фактической оплаты основного долга;

по договору от 10.09.2024 № СУБ-133-2024 задолженность за выполненные работы в размере 23 284 852 руб. 62 коп., пени за нарушение обязательства по оплате в размере 661 635 руб. 09 коп. за период с 13.05.2025 по 20.06.2025, с последующим начислением неустойки в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату оплаты долга, за каждый день просрочки по оплате основного долга с 21.06.2025 по день фактической оплаты основного долга;

а также 277 266 руб. 00 коп. - расходы по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований общества с ограниченной ответственностью «ГЕО-Проект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ГЕО-Проект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из дохода федерального бюджета 637 617 руб. 00 коп. - расходы по оплате государственной пошлины.

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «ДСК Дортранс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ГЕО-Проект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ДСК Дортранс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в общем размере 4 945 216 руб. 37 коп. за период с 11.02.2025 по 08.04.2025, в том числе:

по договору от 13.06.2024 № СУБ-060-2024 в размере 1 596 570 руб. 57 коп., по договору от 10.09.2024 № СУБ-132-2024 в размере 1 835 503 руб. 25 коп.,

по договору от 10.09.2024 № СУБ-133-2024 в размере 1 513 142 руб. 57 коп., а также 134 315 руб. 00 коп. - расходы по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований общества с ограниченной ответственностью «ДСК Дортранс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) отказать.

Путем зачета встречных обязательств взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ДСК Дортранс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ГЕО-Проект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 74 050 729 руб. 07 коп., в том числе:

по договору от 13.06.2024 № СУБ-060-2024 задолженность за выполненные работы в размере 25 744 864 руб. 40 коп., пени за нарушение обязательств по оплате в размере 112 481 руб. 60 коп. за период с 13.05.2025 по 20.06.2025, с последующим начислением неустойки в размере 0,01 % за каждый день просрочки по оплате указанного размера основного долга с 21.06.2025 по день фактической оплаты основного долга, кроме того пени, начисленные на сумму основного долга в размере 3 096 570 руб. 57 коп. за период с 21.06.2025 по 18.12.2025 в размере 0,01 % за каждый день просрочки по оплате данной части основного долга;

по договору от 10.09.2024 № СУБ-132-2024 задолженность за выполненные работы в размере 25 011 274 руб. 43 коп., пени за нарушение обязательства по оплате в размере 748 763 руб. 38 коп. за период с 13.05.2025 по 20.06.2025, с последующим начислением неустойки в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату оплаты долга, за каждый день просрочки по оплате указанного размера основного долга с 21.06.2025 по день фактической оплаты основного долга, кроме того пени, начисленные на сумму основного долга в размере 3 835 503 руб. 25 коп. за период с 21.06.2025 по 18.12.2025 в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ (16,5% годовых), за каждый день просрочки по оплате данной части основного долга и пени, начисленные на сумму основного долга в размере 5 000 000 руб. 00 коп. за период с 21.06.2025 по 22.07.2025 в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ (20% годовых), за каждый день просрочки по оплате данной части основного долга;

по договору от 10.09.2024 № СУБ-133-2024 задолженность за выполненные работы в размере 21 771 710 руб. 05 коп., пени за нарушение обязательства по оплате в размере 661 635 руб. 09 коп. за период с 13.05.2025 по 20.06.2025, с последующим начислением неустойки в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату оплаты долга, за каждый день просрочки по оплате указанного размера основного долга с 21.06.2025 по день фактической оплаты основного долга, кроме того пени, начисленные на сумму основного долга в размере 3 013 142 руб. 57 коп. за период с 21.06.2025 по 18.12.2025 в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ (16,5% годовых), за каждый день просрочки по оплате данной части основного долга и пени, начисленные на сумму основного долга в размере 5 000 000 руб. 00 коп. за период с 21.06.2025 по 22.07.2025 в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ (20% годовых), за каждый день просрочки по оплате данной части основного долга;

а также 142 951 руб. 00 коп. - расходы по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья / С.В. Рогулёв