Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-93120/2020

18 июня 2021 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  26 мая 2021 года.

Полный текст решения изготовлен  18 июня 2021 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Коросташова А.А.

при ведении протокола судебного заседания: ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ЛЕНЭНЕРГО" (адрес:  Россия 191124, 

<

...> ЛИТ А, ОГРН:  

<

***>);

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСЭНЕРГО" (адрес:  Россия 196105, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, ПРОСПЕКТ ЮРИЯ ГАГАРИНА, ДОМ 1, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 24Н, ОГРН: 

<

***>);

о взыскании,

при участии:

- от истца: ФИО2 по доверенности от 21.12.2020,

- от ответчика: не явился, извещен,

установил:

Акционерное общество "ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ЛЕНЭНЕРГО" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "РОСЭНЕРГО" о взыскании штрафных санкций в размере 36 534 руб. 45 коп. по договору подряда от 12.11.2019 № 19-837.

В порядке ст.ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ суд рассматривает дело в отсутствие ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания.

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителя истца, суд установил следующее.

12.11.2019 между АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» (далее — Заказчик) и ООО «РосЭнерго» (далее - Подрядчик) заключен Договор подряда № 19-837 (далее - Договор), согласно которому Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить проектные и изыскательские работы по титулу: «Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ВЛ-10/04 кВ ориентировочно 0,05 км, для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ТСН «СЛАВЯНКА» 17-54305» (далее — работы), а также обеспечить согласование в установленном порядке проектной, рабочей документации, являющейся результатом работ по Договору, с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, правообладателями/собственниками земельных участков и объектов недвижимости, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить работы в порядке и размере, предусмотренном Договором.

Согласно п. 2.2. Договора сроки выполнения работ по Договору - не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора, то есть не позднее 12.12.2019.

В соответствии с п. 6.1.1. Договора Подрядчик по итогам выполнения работ направляет Заказчику Акт сдачи-приемки проектных и изыскательских работ, накладную с приложением 5 (пяти) экземпляров разработанной проектно-сметной документации, а также 2 (двух) экземпляров в электронном виде на носителях типа CD или DVD. Текстовая и графическая части проекта представляются в стандартных форматах программ, MS Office, AutoCAD или Acrobat Reader.

Работы выполнены Подрядчиком 24.01.2020, что подтверждается актом от 24.01.2020 № 1 сдачи-приемки проектных и изыскательских работ к Договору, накладной от 24.01.2020.

Таким образом, Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, предусмотренные Договором. Просрочка выполнения работ по Договору составляет 43 календарных дня.

Письменного уведомления от Подрядчика в адрес Заказчика о выявлении обстоятельств, являющихся причиной срыва сроков выполнения работ, не поступало. Также не поступало уведомления о наличии обстоятельств, освобождающих от ответственности за несвоевременное выполнение работ.

Согласно п. 8.1, п. 8.1.1, п. 8.1.2 Договора, при нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты санкций, а Подрядчик, в случае наличия соответствующего требования Заказчика, обязан уплатить за нарушение сроков выполнения работ - пени в размере 20 % от стоимости невыполненных работ и пени в размере 1 % от стоимости невыполненных работ за каждый день до фактического исполнения обязательства, в случае превышения сроков выполнения работ свыше 30 (тридцати) календарных дней в дополнение к п. 8.1.1 Договора -пени в размере 30 % от стоимости невыполненных работ.

Стоимость работ, в соответствии с актом от 24.01.2019 № 1 сдачи-приемки проектных и изыскательских работ к Договору, составляет 39 284,35 руб. (тридцать девять тысяч двести восемьдесят четыре рубля 35 копеек).

Таким образом, сумма штрафных санкций составляет 36 534,45 руб. (тридцать шесть тысяч пятьсот тридцать четыре рубля 45 копеек).

В соответствии с п. 11.2 Договора предусмотрен претензионный порядок урегулирования споров, срок для ответа на претензию - 30 дней с момента ее получения.

Истцом в адрес Ответчика направлена претензия от 06.08.2020 № ЭСКЛ/16/1200 в связи с просрочкой выполнения работ и оплате штрафных санкций. 

Поскольку требования претензии оставлены без удовлетворения, предъявлен иск в арбитражный суд.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ в их совокупности и взаимной связи, суд приходит к следующим выводам.

Как разъяснено в п. 7 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.12.2001 N 65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований» статья 410 ГК РФ не требует, чтобы предъявляемое к зачету требование вытекало из того же обязательства или из обязательств одного вида. 

В рамках дела № А56-76465/2020 истец против требований ответчика о взыскании долга заявил, что ООО "РОСЭНЕРГО" нарушены сроки выполнения работ на 43 календарных дня, в связи с чем им была начислена неустойка по пунктам 8.1, 8.1.1, 8.1.2 неустойка, размер которой составил в общей сумме 36 534,45 руб. (в рамках настоящего дела АО "ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ЛЕНЭНЕРГО" также предъявило иск о взыскании указанной неустойки).

При рассмотрении дела № А56-76465/2020 судом установлено, что АО "ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ЛЕНЭНЕРГО" направило в адрес ООО "РОСЭНЕРГО" уведомление о зачете от 06.08.2020 № эскл/16/1200 путем выплаты суммы, подлежащей оплате за выполненные работы (39 284,35 руб.) уменьшенной на сумму неустойки в размере (36 534,45 руб.). После произведенного зачета размер задолженности ответчика за выполненные истцом работы составил 2 749,90 руб., в связи с чем иск был удовлетворен частично.

С учётом изложенного в рамках настоящего дела оснований для повторного взыскания неустойки, ранее которая была зачтена истцом в счет оплаты выполненных работы, не имеется. 

При таких обстоятельствах в иске следует отказать. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Коросташов А.А.