АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А13-8389/2024

город Вологда

20 декабря 2024 года

 

Резолютивная часть решения вынесена 19 декабря 2024 года. Полный текст решения изготовлен 20 декабря 2024 года. 

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Фадеевой А.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Золотовой О.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению администрации Сокольского муниципального округа Вологодской области к обществу с ограниченной ответственностью «Термоизолстрой» об обязании устранить недостатки выполненных работ,  

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, муниципального унитарного предприятия «Коммунальные системы»,  

при участии от ответчика ФИО1 по доверенности от 02.02.2024, от третьего лица ФИО2 по доверенности от 09.01.2024,  

у с т а н о в и л:

администрация Сокольского муниципального округа Вологодской области (ОГРН 

<

***>, далее – Администрация) обратилась в Арбитражный суд Вологодской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Термоизолстрой» (ОГРН 

<

***>, далее – Общество) об обязании в срок до 01.07.2025 устранить недостатки работ, выполненных по муниципальному контракту от 10.06.2020, а именно:  

1) в здании станции второго подъёма: 

- устранить многочисленные разрушения наружного косметического покрытия здания;  

- в машинном зале – устранить многочисленные протечки воды в нижнем уровне здания, восстановить гидроизоляционное покрытие;  

- в машинном зале – устранить разрушение косметического слоя верхнего уровня внутренних помещений;  

- завершить работы по автоматизации цеха: вывести интерфейс  

управления на пульт управления оборудованием со зданий: станции 1 и 2  

подъёмов, реагентного хозяйства, включая горизонтальные отстойники;  

- подключить два промывных насоса, произвести настройку трёх  

городских насосов для работы в автоматическом режиме по давлению; - запустить промывной насос № 7 в автоматическом режиме; 

- выполнить установку счетчика расхода воды на микрорайон РМЗ; - установить откосы въездных ворот;  

2) в здании станции первого подъёма: 

- завершить в полном объеме косметически ремонт, восстановить  

козырьки; - отцентровать новые насосы № 1, 2; 3) в здании фильтров: - привести в рабочее состояние фильтр № 1; - привести в рабочее состояние фильтр № 6; 

- осуществить настойку работы автоматического и ручного включения и  

выключения фильтров; - привести в рабочее состояние все тепловентиляторы; 

- завершить работы по автоматизации цеха: вывести интерфейс  

управления на пульт управления оборудованием со зданий – станций 1 и 2  

подъёмов, реагентного хозяйства, включая горизонтальные отстойники; 

- вывести интерфейс управления турбокомпрессоров на пульт; 

- установить зонты над оборудованием в помещении лаборатории;  

- в кабинете главного технолога (3 этаж) устранить отслоение потолочной  

штукатурки, осуществить ремонт крыши; 

-восстановить наружный штукатурный слой здания, осуществить ремонт  

швов; 

-осуществить демонтаж и повторную установку отливов на парапете  

здания в целях предотвращения попадания воды из отлива на стены здания; -установить систему водоотведения с кровли; 

-восстановить внутренний косметический слой внутри помещений;  

-устранить течи в оборудовании: теплообменник (заводской номер 894),  

тепловентилятор; -восстановить работоспособность затвора 800 мм; -устранить протечку кровли по трубам вентиляции; -восстановить слой гидроизоляции всех фильтров; 4) в здании отстойников: -восстановить стены горизонтального отстойника; 

-привести в рабочее состояние автоматику на секции № 1  

горизонтального отстойника; 

-восстановить штукатурное и лакокрасочное покрытие наружных стен  

здания; 

-восстановить гидроизоляционный слой здания (устранить протечки по  

нижнему уровню, по стенкам отстойников; 

-восстановить внутренний косметический слой внутри помещений;  

-выполнить ремонт откосов входных групп; 

-восстановить кровельное покрытие над отстойником № 5 по 5 п.м. с каждой стороны и установить кровельное покрытие по краю со стороны р. Сухона по 5 п.м.;  

5) в здании реагентного хозяйства: 

-восстановить штукатурное и лакокрасочное покрытие наружных стен здания;  

-демонтировать и установить вновь отливы окон таким образом, чтобы избежать их повреждения при падении снега с крыши;  

-восстановить внутренний защитный слой растворных баков; 

-устранить протечку в корпусе бака-хранилища № 2 сульфата алюминия на высоте 2,8 м;  

-завершить работы по укладке плитки керамической в помещениях; -завершить в полном объёме лакокрасочные работы в машинном зале;  

-устранить протечку на кровле в месте примыкания вентиляционного канала;  

-восстановить внутренний косметический слой внутри помещений.  

Исковые требования указаны с учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) уточнения.  

В обоснование требований истец сослался на обнаружение в период гарантийного срока недостатков в выполненных ответчиком работах, а также статьи 309, 723 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).  

Определением суда от 30 июля 2024 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные системы» (далее – Предприятие).  

Представитель ответчика в судебном заседании подтвердил наличие недостатков выполненных работ, после перерыва в судебном заседании поступило признание ответчиком уточненных исковых требований в полном объеме.  

Признание иска Обществом принято судом в порядке статьи 49 АПК РФ.  

Представитель третьего лица в судебном заседании полагал исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.  

Администрация, надлежащим образом извещенная судом о времени и месте рассмотрения дела, представителя в судебное заседание не направила.  

Дело рассмотрено по правилам статьи 156 АПК РФ при имеющейся явке.  

Исследовав материалы дела, заслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, оценив собранные по делу доказательства, арбитражный суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению в связи со следующим.  

Как следует из материалов дела, 10.06.2020 между Администрацией (заказчик) и Обществом (подрядчик) заключен муниципальный контракт (идентификационный код закупки 203352701162035270100100050014221414),  

согласно которому подрядчик принял на себя обязательство по реконструкции очистных сооружений водозабора г. Сокола Вологодской области.  

20.12.2021 подписан акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.  

В дальнейшем представителями Администрации, Общества и Предприятия составлен акт недостатков (дефектов), выявленных после исполнения муниципального контракта, от 18.06.2024.  

Протоколом комиссии от 18.06.2024 подрядчику был установлен срок устранения выявленных недостатков – 30.06.2024. Поскольку недостатки выполненных работ не устранены, требования претензии не удовлетворены, Администрация обратилась в суд с настоящим иском.  

Обязательства сторон в рассматриваемом случае установлены контрактом, правовое регулирование которого определяется главой 37 ГК РФ и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

В силу пункта 2 статьи 763 ГК РФ по муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их муниципальному заказчику, а муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.  

Поскольку муниципальные контракты на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд являются разновидностью договоров подряда, то, если иное не установлено правилами ГК РФ, правоотношения по контрактам на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд, регулируются как общими положениями о подряде, так и специальными положениями о подряде на выполнение отдельных видов работ, предусмотренными ГК РФ.  

Согласно пункту 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.  

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.  

Качество выполненной подрядчиком работы согласно статье 721 ГК РФ должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или  

определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.  

В силу пункта 1 статьи 754 ГК РФ подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная мощность предприятия.  

В подтверждение наличия недостатков выполненных работ администрация представила акт от 18.06.2024, протокол от 18.06.2024. Ответчик факт наличия недостатков признал.  

Подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Установленный законом гарантийный срок может быть увеличен соглашением сторон (пункт 1 статьи 755 ГК РФ).  

Как следует из статей 756, 724 ГК РФ заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока. При этом, если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком.  

Пунктом 14.3 контракта установлен гарантийный срок на качество выполненных работ, который составляет 5 лет со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта.  

Поскольку акт приемки законченного строительством объекта подписан 20.12.2021, то гарантийный срок на работы распространяется по 20.12.2026.  

Таким образом, недостатки в выполненных работах обнаружены в пределах гарантийного срока, предусмотренного контрактом.  

Как указано в пункте 2 статьи 755 ГК РФ, подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.  

Поскольку недостатки выполненных работ возникли в период гарантийного срока, бремя доказывания причин возникновения недостатков возложено законом на подрядчика.  

Общество не представило суду доказательств того, что обнаруженные недостатки произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его  

эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.  

В силу пункта 1 статьи 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:  

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены;  

возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда.  

В данном случае истец просит безвозмездного устранения недостатков. 

Ответчик исковые требования признал в полном объеме и признание иска принято судом.  

При таких обстоятельствах исковые требования Администрации подлежат удовлетворению судом.  

В связи с удовлетворением требований, заявленным ответчиком признанием иска, государственная пошлина в размере 30 % от подлежащей уплате (а именно в сумме 1800 руб.) по правилам статьи 110 АПК РФ подлежит взысканию в доход федерального бюджета непосредственно с ответчика.  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области  

р е ш и л:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Термоизолстрой» в срок до 01.07.2025 в рамках исполнения гарантийных обязательств по муниципальному контракту от 10.06.2020, идентификационный код закупки 203352701162035270100100050014221414, выполнить следующие работы:  

1) в здании станции второго подъёма: 

- устранить многочисленные разрушения наружного косметического покрытия здания;  

- в машинном зале – устранить многочисленные протечки воды в нижнем уровне здания, восстановить гидроизоляционное покрытие;  

- в машинном зале – устранить разрушение косметического слоя верхнего уровня внутренних помещений;  

- завершить работы по автоматизации цеха: вывести интерфейс управления на пульт управления оборудованием со зданий: станции 1 и 2 подъёмов, реагентного хозяйства, включая горизонтальные отстойники;  

- подключить два промывных насоса, произвести настройку трёх городских насосов для работы в автоматическом режиме по давлению;  

- запустить промывной насос № 7 в автоматическом режиме;  

- выполнить установку счетчика расхода воды на микрорайон РМЗ; - установить откосы въездных ворот;  

2) в здании станции первого подъёма: 

- завершить в полном объеме косметически ремонт, восстановить  

козырьки; - отцентровать новые насосы № 1, 2; 3) в здании фильтров: - привести в рабочее состояние фильтр № 1; - привести в рабочее состояние фильтр № 6; 

- осуществить настойку работы автоматического и ручного включения и  

выключения фильтров; - привести в рабочее состояние все тепловентиляторы; 

- завершить работы по автоматизации цеха: вывести интерфейс  

управления на пульт управления оборудованием со зданий – станций 1 и 2  

подъёмов, реагентного хозяйства, включая горизонтальные отстойники; 

- вывести интерфейс управления турбокомпрессоров на пульт; 

- установить зонты над оборудованием в помещении лаборатории;  

- в кабинете главного технолога (3 этаж) устранить отслоение потолочной  

штукатурки, осуществить ремонт крыши; 

-восстановить наружный штукатурный слой здания, осуществить ремонт  

швов; 

-осуществить демонтаж и повторную установку отливов на парапете  

здания в целях предотвращения попадания воды из отлива на стены здания; -установить систему водоотведения с кровли; 

-восстановить внутренний косметический слой внутри помещений;  

-устранить течи в оборудовании: теплообменник (заводской номер 894),  

тепловентилятор; 

-восстановить работоспособность затвора 800 мм; -устранить протечку кровли по трубам вентиляции;  

-восстановить слой гидроизоляции всех фильтров; 4) в здании отстойников:  

-восстановить стены горизонтального отстойника;  

-привести в рабочее состояние автоматику на секции № 1  

горизонтального отстойника; 

-восстановить штукатурное и лакокрасочное покрытие наружных стен  

здания; 

-восстановить гидроизоляционный слой здания (устранить протечки по  

нижнему уровню, по стенкам отстойников; 

-восстановить внутренний косметический слой внутри помещений; -выполнить ремонт откосов входных групп;  

-восстановить кровельное покрытие над отстойником № 5 по 5 п.м. с  

каждой стороны и установить кровельное покрытие по краю со стороны  

р. Сухона по 5 п.м.; 5) в здании реагентного хозяйства: 

-восстановить штукатурное и лакокрасочное покрытие наружных стен  

здания; 

-демонтировать и установить вновь отливы окон таким образом, чтобы  

избежать их повреждения при падении снега с крыши; -восстановить внутренний защитный слой растворных баков; 

-устранить протечку в корпусе бака-хранилища № 2 сульфата алюминия  

на высоте 2,8 м; 

-завершить работы по укладке плитки керамической в помещениях; -завершить в полном объёме лакокрасочные работы в машинном зале;  

-устранить протечку на кровле в месте примыкания вентиляционного  

канала; 

-восстановить внутренний косметический слой внутри помещений.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  

«Термоизолстрой» в доход федерального бюджета государственную пошлину в  

сумме 1800 руб. 

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  

апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия. 

Судья А.А. Фадеева