﻿

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru         E-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А83-12604/2021

01 декабря  2021 года

город  Симферополь

Резолютивная часть решения объявлена 29 ноября  2021 года.

Полный текст решения изготовлен 01 декабря  2021 года.

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гаврилюк М.П., при ведении протокола судебного заседания и его аудиозаписи секретарем судебного заседания В.А. Синча, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственности «Корона-лифт» (ОГРН 115774649176)

к Муниципальному казенному учреждению  городской округ Алушта  Республики Крым  «Управление по административно-хозяйственному  обеспечению  Администрации города Алушты»  (ОГРН  1159102000232)

о взыскании денежных средств,

в отсутствие явки в судебное заседание уполномоченных представителей лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о дате, времени и месте судебного заседания.

установил:

общества с ограниченной ответственности «Корона-лифт» обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к  Муниципальному казенному учреждению  городской округ Алушта  Республики Крым  «Управление по административно-хозяйственному  обеспечению  Администрации города Алушты», согласно которому просит взыскать неустойку в размере  17 590,50 руб. за период с 03.09.2018 по  12.04.2021.

Исковые требования мотивированы несвоевременной оплатой ответчиком работ,  выполненных истцом  в соответствии с Муниципальным контрактом  №4О/85/2018 от 04.04.2018.  

Ответчик  направил в суд ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения.

Исследовав и оценив имеющиеся в деле документы, всесторонне и полно выяснив фактические обстоятельства, суд считает, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению ввиду следующего.

Судом установлено,  что 04.042018 между Муниципальным казенным учреждением городской округ Алушта Республики Крым «Управление по административно-хозяйственному обеспечению Администрации города Алушты» (далее –  заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Корона-лифт» (далее – исполнитель) заключен муниципальный контракт №4О/85/2018, по  условиям которого  заказчик поручает,  а исполнитель  принимает на себя обязательства выполнить работы (оказать услуги)  по разработке проектно-сметной  и технической документации для замены двух пассажирских лифтов в административном здании Администрации города Алушта Республики Крым по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта, пл. Советская,1. (далее – контракт).

В пункте 2.1 контракта стороны согласовали цену контракта в сумме 90 000,00 рублей.

В соответствии  с п. 2.3. контракта  оплата по контракту  осуществляется по факту  полного исполнения обязательств  исполнителя не позднее 15 рабочих дней с момента подписания заказчиком  акта приема-передачи результатов выполненных работ (оказанных услуг) и на основании выставленного счета-фактуры (счета на оплату).

Согласно п. 2.5 контракта  выполненные работы с отклонениями не подлежат оплате до устранения исполнителем недостатков.

В соответствии  с п.  4.1 контракта стороны установили срок выполнения работ – в течении 30 дней с момента подписания настоящего контракта.

Не позднее 5 рабочих дней  после получения от исполнителя документов, заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку  выполненных работ по настоящему контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем контракте и направляет заказным письмом с уведомлением, либо отдает нарочно исполнителю подписанный заказчиком 1 экземпляр акта приема- передачи результатов выполненных работ (оказанных услуг), либо  запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ и сроком их устранения. (пункт 4.6 контракта).

Во исполнение условий контракта, исполнитель направил 07.08.2018 адрес заказчика  акт от 03.08.2018, который получен ответчиком 10.08.2018.

В связи с неисполнением ответчиком обязательства по оплате,  и подписанию акта от 03.08.2018, истцом в адрес ответчика направлена претензия с требованием об уплате задолженности в размере 90 000,00 руб. с указанием на начисление неустойки в соответствии  с  р. 6 контракта.

Указанные обстоятельства  установлены вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Республики Крым  от  26.11.2020 по делу №А83-64/2020 по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Корона-лифт» к Муниципальному казенному учреждению городской округ Алушта Республики Крым «Управление по административно-хозяйственному обеспечению Администрации города Алушты» о взыскании 90 000,00 рублей задолженности  за выполненные  работы по контракту №4О/85/2018 от 04.04.2018.

Судом  при рассмотрении дела  №А83-64/2020 было  установлено,  что акт выполненных работ от 03.08.2018 получен ответчиком 10.08.2018. Суд признал приемку выполненных работ по контракту состоявшейся, а работы по контракту – фактически принятыми ответчиком без замечаний и возражений. 

Исковые требования  ООО «Корона – Лифт»  по  делу  №А83-64/2020 удовлетворены в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу. 

Обстоятельства, установленные судом при рассмотрении дела  №А83-64/2020 имеют преюдициальное и не подлежащее доказыванию значение в части обстоятельств надлежащего выполнения истцом своих обязательств по  контракту и предъявления их ответчику к приемке, а также обязательств ответчика по оплате выполненных истцом работ в сумме  90 000,00 руб.   

Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица (ст. 69 АПК РФ).

Истцом также заявлена ко взысканию неустойка за период  с 03.09.2018 по 12.04.2021 в размере 17 590,50 руб.  

Требование о взыскании неустойки подлежит частичному удовлетворению с учетом следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 314 ГК РФ если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Частью 1 статьи 329 ГК РФ  предусмотрено, что исполнение обязательств может обеспечиваться, в частности, неустойкой.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ  неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно ст. 12 ГК РФ взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права.

Не позднее 5 рабочих дней  после получения от исполнителя документов, заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку  выполненных работ по настоящему контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем контракте и направляет заказным письмом с уведомлением, либо отдает нарочно исполнителю подписанный заказчиком 1 экземпляр акта приема- передачи результатов выполненных работ (оказанных услуг), либо  запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ и сроком их устранения (пункт 4.6 контракта).

В соответствии  с п. 2.3. контракта  оплата по контракту  осуществляется по факту  полного исполнения обязательств  исполнителя не позднее 15 рабочих дней с момента подписания заказчиком  акта приема-передачи результатов выполненных работ (оказанных услуг) и на основании выставленного счета-фактуры (счета на оплату).

В соответствии с разделом 6 Контракта стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения  сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки  исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042.

Акт выполненных работ был получен  ответчиком 10.08.2018, следовательно, при отсутствии   претензий к выполненным работам, ответчик должен был  принять работы не позднее 17.08.2018 и оплатить их   не позднее 10.09.2018.

Требование истца о взыскании пени за период с 03.09.2018 по 10.09.2018 удовлетворению не подлежит.

Задолженность в размере 90 000,00 руб.  была погашена  ответчиком 12.04.2021 в результате исполнения решения суда. 

Судом произведен расчет пени:

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

 

с

по

дней

 

90 000,00

11.09.2018

Новая задолженность на 90 000,00 руб.

90 000,00

11.09.2018

16.09.2018

6

7.25

90 000,00 × 6 × 1/300 × 7.25% 

130,50 р.

90 000,00

17.09.2018

16.12.2018

91

7.5

90 000,00 × 91 × 1/300 × 7.5% 

2 047,50 р.

90 000,00

17.12.2018

16.06.2019

182

7.75

90 000,00 × 182 × 1/300 × 7.75% 

4 231,50 р.

90 000,00

17.06.2019

28.07.2019

42

7.5

90 000,00 × 42 × 1/300 × 7.5% 

945,00 р.

90 000,00

29.07.2019

08.09.2019

42

7.25

90 000,00 × 42 × 1/300 × 7.25% 

913,50 р.

90 000,00

09.09.2019

27.10.2019

49

7

90 000,00 × 49 × 1/300 × 7% 

1 029,00 р.

90 000,00

28.10.2019

15.12.2019

49

6.5

90 000,00 × 49 × 1/300 × 6.5% 

955,50 р.

90 000,00

16.12.2019

09.02.2020

56

6.25

90 000,00 × 56 × 1/300 × 6.25% 

1 050,00 р.

90 000,00

10.02.2020

26.04.2020

77

6

90 000,00 × 77 × 1/300 × 6% 

1 386,00 р.

90 000,00

27.04.2020

21.06.2020

56

5.5

90 000,00 × 56 × 1/300 × 5.5% 

924,00 р.

90 000,00

22.06.2020

26.07.2020

35

4.5

90 000,00 × 35 × 1/300 × 4.5% 

472,50 р.

90 000,00

27.07.2020

21.03.2021

238

4.25

90 000,00 × 238 × 1/300 × 4.25% 

3 034,50 р.

90 000,00

22.03.2021

12.04.2021

22

4.5

90 000,00 × 22 × 1/300 × 4.5% 

297,00 р.

Сумма основного долга: 90 000,00 руб.

Сумма неустойки: 17 416,50 руб.

Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

решил:

исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Муниципального казенного учреждения городской округ Алушта  Республики Крым  «Управление по административно-хозяйственному  обеспечению  Администрации города Алушты»  в пользу  общества с ограниченной ответственности «Корона-лифт» неустойку в размере  17 416,50 руб.  за период с 11.09.2018 по  12.04.2021, а также судебные расходы, связанные с уплатой государственной пошлины в размере 1 980,00 руб.

В остальной части исковых требований отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы, если оно не отменено и не изменено, со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, г. Севастополь, ул. Суворова, 21) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, г. Калуга, ул. Кирова, дом 4) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья                                                                                                           М.П. Гаврилюк