107_2004566  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 

Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-12316/2017

г. Белгород

29 мая 2018 года

Арбитражный суд Белгородской области  

в составе судьи Ивановой Л. Л. 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств  аудиозаписи и системы видео протоколирования секретарём судебного заседания  ФИО1  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Фонда  содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской  области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к ООО "Элитиум" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

третьи лица: Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального  ремонта», ООО «Тепловик», ООО «УК ЮЖНОЕ»  

об обязании устранить недостатки и дефекты выполненных работ, при участии в судебном заседании: от истца: представитель ФИО2 по доверенности от 09.11.2017г.  № ф01-1207, от ответчика: представитель ФИО3 по доверенности от 11.01.2018г., 

третьи лица: от ООО «Тепловик» - представитель ФИО4 по  доверенности 20.04.2016г.,  

от ООО «УК ЮЖНОЕ» - представитель ФИО5 по доверенности от  12.02.2018г.,  

от МБУ «Управление капитального ремонта»- не явился, извещен, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1.Исковые требования Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) удовлетворить частично.  

2.Обязать ООО "ЭЛИТИУМ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  течение 30 календарных дней с момента вступления решения в законную силу  устранить недостатки и дефекты выполненных работ по договору подряда  

 № КР 16-04 от 10.03.2016г., допущенных при проведении капитального ремонта  общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, а именно:  

- восстановить разрушенный штукатурный слой входных групп (ступени 1-4  подъезды);  

- восстановить пандусы выходных групп (2-4 подъезды); -восстановить штукатурный слой в местах прохода труб коммуникаций (инженерных сетей) через плиты перекрытия на техническом этаже. 

В случае неисполнения ООО "ЭЛИТИУМ" настоящего решения,  предоставить Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального  хозяйства Белгородской области право исполнить решение суда по устранению  указанных в настоящем решении недостатков и дефектов с взысканием с ООО  "ЭЛИТИУМ" расходов, понесенных фондом.  

В удовлетворении остальной части исковых требований Фонду содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области  отказать.  

3.Взыскать с ООО "ЭЛИТИУМ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  пользу Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  Белгородской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) государственную  пошлину в размере 6 000 рублей 00 копеек.  

4.Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную  силу.  

5.Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.  

Судья Иванова Л. Л.