АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

660049, 

<

...>, https://krasnoyarsk.arbitr.ru/

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Именем Российской Федерации

23 декабря 2025 года

Дело № А33-30273/2025

Руководствуясь статьями 15, 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

отказать в удовлетворении ходатайств публичного акционерного общества «Россети Сибирь» о рассмотрении настоящего дела по общим правилам искового производства, об установлении срока для исполнения решения суда в течение шести месяцев после вступления в законную силу.

Отказать в удовлетворении ходатайства публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о снижении размера договорной неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Исковые требования удовлетворить.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение месяца с даты вступления решения суда в законную силу в соответствии осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям с условиями договора от 04.10.2024 № 20.2400.10905.24.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу акционерного общества "Первая Башенная Компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 143 043,10 руб. неустойки за период с 05.04.2025 по 15.10.2025 по договору от 04.10.2024 № 20.2400.10905.24, с 16.10.2025 неустойку до полного исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 04.10.2024 № 20.2400.10905.24, а также 62 152 руб. расходов по уплате государственной пошлины, несение которых подтверждается платежным поручением от 16.10.2025 № 145839.

Удовлетворить ходатайство публичного акционерного общества «Россети Сибирь» о снижении судебной неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заявление акционерного общества "Первая Башенная Компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании судебной неустойки удовлетворить частично.

В случае неисполнения решения суда в полном объёме по истечению одного месяца с даты вступления решения суда в законную силу взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу акционерного общества "Первая Башенная Компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебную неустойку в размере 2 000 руб. за каждый календарный день просрочки исполнения решения суда до фактического исполнения решения суда.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части решения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя.

Судья

ФИО1