АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2

http://kostroma.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

Дело № А31-11136/2016

г. Кострома

07 февраля 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 02 февраля 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 07 февраля 2017 года.

Арбитражный суд Костромской области в составе судьи Паниной Светланы Леонидовны,     

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

с участием представителей сторон:

от истца: ФИО2– представитель по дов. от 26.05.2016,

 от ответчика: не явился, 

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра»- «Костромаэнерго», г. Кострома (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  к Обществу с ограниченной ответственностью «СМК-44» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 25 349 руб. 06 коп. неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 10.06.2015 № 2171-Ц/3(3)-ТП(2015)И, и

установил:

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра»- «Костромаэнерго»,  (далее – ПАО «МРСК Центра») обратилось с иском о взыскании  с Общества с ограниченной ответственностью «СМК-44» (далее – ООО «КомТранс») 25 349 руб. 06 коп. неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 10.06.2015 № 2171-Ц/3(3)-ТП(2015)И.

Ответчик, надлежащим образом уведомленный о месте и времени проведения заседания (уведомление – в деле), явку представителя не обеспечил, заявлений и ходатайств не представил.

Рассмотрев материалы дела, суд считает установленными следующие обстоятельства.

        10.06.2015 года между ОАО «МРСК Центра» (сетевая организация) и ООО «СМК-44» (заявитель) был заключен договор № 2171-Ц/3(3)-ТП(2015)И об     осуществлении     технологического присоединения к электрическим сетям.

        В  соответствии  с  условиями договора  сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств, необходимых для электроснабжения строящегося многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:  Костромская область, Мантуровский район, Октябрьское с/п, по. Октябрьский, ул. Клубная.

       Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения договора (пункт 5 договора).

В соответствии с разделом 3 договора размер платы за технологическое присоединение   определяется   в   соответствии    с   решением    Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 23 декабря 2014 года № 14/496 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формулы платы за технологическое присоединение для определения размера платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» на территории Костромской области на 2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2013 года № 13/561» и составляет 285 029 руб. 09 коп.

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется Заявителем в следующем порядке:

а)15 процентов платы за технологическое присоединение на сумму42 754 руб. 36 коп., т.ч. НДС 18% - 6 521 руб. 85 коп., вносятся в течение 15 дней со дня заключения Договора;

б)30 процентов платы за технологическое присоединение на сумму85 508 руб. 73 коп., в т.ч. НДС 18% - 13 043 руб. 70 коп., вносятся в течение 60 дней со дня заключения Договора;

в)45 процентов платы за технологическое присоединение на сумму128 263 руб. 09 коп., в т.ч. НДС 18% - 19 565 руб. 56 коп., вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

г)10 процентов платы за технологическое присоединение на сумму28 502 руб. 91 коп. в т.ч. НДС 18%  - 4 347 руб. 90 коп., вносятся в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения;

            В пункте 15 договора стороны согласовали, что договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Заявитель в праве при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть договор (пункт 16 договора).

          Истец в течение установленного срока исполнил свои обязательства и осуществил мероприятия по технологическому присоединению (п. 10.1 - 10.2. технических условий, являющихся приложением №1 к указанному договору) и в последующем уведомил Ответчика письмом от 14.01.2016 исх. №МРСК-КМ/5-2/123 о выполнении сетевой организацией мероприятий, для последующего осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств со стороны Ответчика.

          Ответчик о готовности выполнения мероприятий, возложенных на него, не сообщил, тем самым нарушил п.8. договора, п.11. технических условий, являющихся приложением №1 к указанному договору.

В соответствии  с пунктом 17 договора в случае нарушение одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой Стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств и послужило основанием для начисления неустойки, предусмотренной пунктом 17 в размере 25 349 руб. 06 коп., рассчитанной за период с 31.05.2016 года по 15.08.2016 года.

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему;

Согласно пункту 2 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

Договор технологического присоединения (в рассматриваемом случае - договор подключения) является самостоятельным видом гражданско-правового договора и не является смешанным, включающим в себя элементы договора возмездного оказания услуг и подряда.

Нормы, регламентирующие договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих (теплопринимающих) устройств, не включены в раздел IV "Отдельные виды обязательств" Гражданского кодекса Российской Федерации, однако эти нормы содержатся в специальных нормативных актах, закрепляющих правила подключения к системам тепло- и энергоснабжения.

В сфере энергоснабжения соответствующие нормы содержатся в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановлением Правительства РФ № 861 от 27 декабря 2004 года, (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3  Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличия технической возможности технологического присоединения.

Согласно пункту 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Существенные условия договора указаны в пункте 16 Правил. К ним относятся:

- мероприятия по технологическому присоединению и обязательства сторон по их выполнению;

- срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

Положения, закрепленные в пункте 18, предусматривают, что мероприятия по технологическому присоединению включают в себя в том числе разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий и осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата.

Доказательства осуществления ООО «СМК-44» в полном объеме своей части мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в установленный договором срок для осуществления технологического присоединения, в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлены.

Технологическое присоединение по договору не было осуществлено, при этом действие договора в установленном порядке сторонами не прекращено.

Обязательства сторон по спорному договору носят встречный характер, от своевременного выполнения обязательств одной стороной зависит выполнение встречных обязательств другой стороной.

Согласно пункту 2 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае непредоставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

Из приведенных норм следует, что ПАО «МРСК Центра» имеет право применить иные меры защиты нарушенных прав, для компенсации своих убытков.

Согласно статье 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Стороны предусмотрели ответственность за просрочку исполнения обязательства в виде неустойки, под которой  в статье 330 Гражданского кодекса Российской Федерации понимается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Предусмотренная статьей 331 Гражданского кодекса Российской Федерации письменная форма соглашения о неустойке была сторонами соблюдена.

Судом установлено, что ответчик допустил нарушение сроков оплаты и в этой связи требования  о взыскании неустойки правомерны.

Расчет ответчиком не оспорен.

Таким образом, иск является законным и обоснованным.

Расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика  (статья 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167 –171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СМК-44» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра»- «Костромаэнерго», г. Кострома (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> 349 руб. 06 коп. неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 10.06.2015 № 2171-Ц/3(3)-ТП(2015)И, а также 2 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

  Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия, а со дня вступления решения в законную силу – в кассационном  порядке в  Арбитражный суд Волго-Вятского округа течение двух месяцев при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

     Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Костромской области.

     Судья                                                                                    С.Л. Панина