И М Е Н Е М    Р О С С И Й С К О Й    Ф Е Д Е Р А Ц И И

         

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-17214/19-19-151

16 августа 2019 года

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 30 июля 2019 года

Полный текст решения изготовлен 16 августа 2019 года 

Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего: судьи Подгорной С.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1   

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Акционерного общества «ТАТЭНЕРГО» 

к ответчику Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ» 

о взыскании 73 710 000 руб. 00 коп.  

с участием:

от истца – ФИО2 по доверенности от 19.12.2018;

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 01.01.2019;

У С Т А Н О В И Л:

Акционерное общество «ТАТЭНЕРГО» обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ» о взыскании неустойки по договору подряда №Д370/1383 от 16.06.2016г. в размере 73 710 000 руб. 00 коп.  

Истец поддержал исковые требования в полном объеме, просил  иск  удовлетворить.   

Ответчик иск не признал, по доводам, изложенным в отзыве. 

Суд, рассмотрев материалы дела, в силу статей 67, 68, 71 АПК РФ исследовав и оценив представленные доказательства с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности, заслушав представителей истца и ответчика, считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению в части по следующим основаниям. 

Как усматривается из материалов дела между Акционерным обществом «ТАТЭНЕРГО»  и Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ» заключен договор подряда №Д370/1383 от 16.06.2016г. на «Строительство Казанской ТЭЦ-1 общей установленной мощностью 230 МВт».  Цена договора составляет 6 300 000 000 руб. 00 коп. 

Пунктом 1 ст.702 ГК РФ установлено, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Факт выполнения работ подтверждается актом №100 от 22.08.2018г., подписанным сторонами без претензий. 

Согласно разрешения от 22.08.2018г., ввод объекта в эксплуатацию завершен.

Гарантийный срок на выполненные на объекте работы исчисляется с 22.08.2018г. 

В соответствии с п.6.4.1 договора в качестве обеспечения исполнения обязательств подрядчика по устранению недостатков, а также по обеспечению бесперебойного функционирования объекта в течение гарантийного срока, предусмотренного в п.11.3 договора, подрядчик обязуется в срок до 01.06.2018г. предоставить заказчику безусловные безотзывные банковские гарантии на общую сумму 300 000 000 руб. 00 коп. по форме, письменно согласованной с Акционерное общество «ТАТЭНЕРГО».

Оформленные в установленном порядке разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и подписанный приемочной комиссией акт-14,свидетельствующие о завершении строительства объекта и сдаче его в эксплуатацию, могут являться документами для получения соответствующей банковской гарантии на установленную сумму.

В нарушение условия, закрепленного п.6.4.1 договора, ООО «УК «УЭС» до настоящего времени не представило банковскую гарантию на период гарантийного срока. 

В соответствии с п.14.3.1 договора в случае неисполнения подрядчиком обязанности, предусмотренной п.6.4.1 договора в течение 30 дней с момента подписания формы КС-14, подрядчик уплачивает заказчику пени в размере 0,01% от цены договора за каждый день просрочки, что составляет 73 710 000 руб. 00 коп.  

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе, предусмотренной законом или договором неустойкой.

Стороны, вступая в гражданско-правовые отношения, самостоятельно определяют меры ответственности за неисполнение обязательств.

По смыслу статьи 330 ГК РФ по основаниям возникновения неустойка подразделяется на законную (нормативную) и договорную (добровольную).

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Из смысла приведенных выше нормативных положений следует, что договорная неустойка устанавливается по соглашению сторон и, соответственно, ее размер, порядок исчисления, условия применения и т.п. определяются исключительно по их усмотрению. При этом Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает требования к форме соглашения сторон о неустойке (статья 331 ГК РФ): соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства (часть 1 статьи 331 ГК РФ); несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

В адрес ответчика была направлена претензия от 20.11.2018г. №119-17/7037 с требованием о выплате суммы задолженности. Однако до настоящего времени вышеуказанная сумма ответчиком не погашена.        

Суд считает, что заявленные требования истца сопряжены со злоупотреблением правом со стороны истца с целью необоснованного обогащения и причинения вреда ответчику. Действия стороны в нарушение положений ст. 10 ГК РФ являются основанием для отказа в защите такого права.

Согласно п.1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Правила статьи 10 Гражданского кодекса не исключают квалификации судом в качестве злоупотребления правом требования о взыскании неустойки в той ее части, которая является очевидно чрезмерной, при установлении судом этого факта на основании возражений привлекаемого к ответственности лица.

Истцом факт несения ущерба не доказан. Гарантийные обязательства по спорному договору, ответчик выполняет в полном объеме, замечаний со стороны истца не предъявляется.

На основании вышеизложенного, суд считает возможным произвести перерасчет неустойки.

Удовлетворяя требования истца в указанной части суд принимает во внимание п. 71 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016г. №7 «О применении судами некоторых положений гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (п. 1 ст. 2, п.1 ст. 6, п. 1 ст.333 ГК РФ).

На основании вышеизложенного, в связи с тем, что соответствующего заявления со стороны ответчика не поступило, судом произведен перерасчет неустойки, а не снижение на основании ст. 333 ГК РФ.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ суд относит на ответчика расходы истца по госпошлине. 

Учитывая ст. ст. 8, 12, 307-310, 330, 702, 711 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 65, 68, 71, 75, 110, 123, 137, 156, 167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ»  в пользу Акционерного общества «ТАТЭНЕРГО» 7 300 000 руб. 00 коп. неустойки, а также расходы  по уплате госпошлины в сумме 200 000 руб. 00 коп.

В остальной части иска – отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                       С.В. Подгорная