АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. КазаньДело № А65-34178/2019 

Дата принятия решения –  27 января 2020 года.

Дата объявления резолютивной части –  20 января  2020 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Галеевой Ю.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Валеевой А.Ф., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Индивидуального предпринимателя ФИО1, Тукаевский район (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Ак Барс Металл", (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), о взыскании 809 538 руб. 02 коп. долга,  32 226 руб. 27 коп. неустойки,

с участием: 

от истца –  ФИО2,  представитель по доверенности от 23.06.2015г.,

от ответчика – не явился, извещен,

У С Т А Н О В И Л:

Индивидуальный предприниматель ФИО1, Тукаевский район (далее – истец), обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Ак Барс Металл", г.Нбережные Челны (далее - ответчик), о взыскании 809 538 руб. 02 коп. долга,  32 226 руб. 27 коп. неустойки.

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен, корреспонденция суда, направленная по адресу, указанному в выписке из ЕГРЮЛ получена 26.12.2019г,  письменный отзыв не представил, иск не оспорил.

            В соответствии с ч. 4 ст. 137 АПК РФ, если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции.

            Возражений о рассмотрении дела по существу от   сторон  не поступило.

            С согласия истца, при отсутствии возражений ответчика, суд в соответствии с  ч. 4 ст. 137 АПК РФ и п. 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда №65 от 20.12.2006г., завершил предварительное судебное заседание и продолжил рассмотрение дела по существу.  

           Суд, руководствуясь п.  3 ст. 156 АПК РФ, определил рассмотреть дело без участия  ответчика.

Исследовав материалы дела, суд находит правовые основания для удовлетворения исковых требований исходя из следующего. 

Из материалов дела следует, что 08.05.2013г. между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен договор подряда №АБМ-47/15 на проведение ремонтных работ в административно-бытовом корпусе ООО «Ак Барс Металл», в редакции Дополнительного соглашения №2 от 31.05.2016., по условиям которого подрядчик обязуется в установленный договором срок за свой риск выполнить из своих материалов и оборудования, собственными либо привлеченными силами и средствами следующие работы: ремонтные работы в АБК ООО «Ак Барс Металл» (ремонт женской раздевалки на 1-ом этаже, ремонт системы вентиляции в женской раздевалке, ремонт актового зала на 3-ем этаже, ремонт лестничного марша №4), расположенного по адресу: г.Набережные Челны, БСИ промзона, проезд Огнеборья,8 в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика и иными документами, являющимися приложениями к настоящему договору и сдать, а Заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену.

Согласно п. 1.3. виды и объемы работ по ремонтным работам в АБК производимые подрядчиком, устанавливаются в Приложении № 1,2,3,4,5,6,7,8 являющемся неотъемлемой частью договора.

Согласно п. 2.1. договора договорная цена выполняемых работ на объекте является твердой, определена приложениями № 5,6,7,8 к настоящему договору и составляет 3 929 977 руб. 06 коп., в том числе НДС 18% - 707 395 руб. 87 коп. 

В соответствии с п. 3.1. договора начало работ, предусмотренные договором, осуществляются подрядчиком с момента подписания договора (при наличии аванса, датой начала выполнения работ по договору считается дата перечисления заказчиком первого авансового платежа.

Пунктом 3.2.договора предусмотрена, что работы,  осуществляются   подрядчиком поэтапно в следующем порядке:

- Первый этап - ремонтные работы в женской раздевалке согласно приложений №1,2,5,6. Продолжительность 40 рабочих дней при выполнении условий пункта 4.3.1.

- Второй этап - ремонтные работы в актовом зале на 3-ем этаже согласно приложений №3,7. Продолжительность 40 рабочих дня при выполнении условий пункта 4.3.1.

- Третий этап - ремонтные работы лестничного марша № 4 согласно приложений №4,8. Продолжительность 40 рабочих дней при выполнении условий пункта 4.3.1. Общая продолжительность работ составляет 120 рабочих дня.

По взаимной договоренности возможно одновременное выполнение работ по всем этапам.

Дополнительным соглашением №2 от 31.05.2016г. стороны пришли к соглашению о внесении нижеследующих изменений в договор:

- п. 1.1. - дополнить следующими видами работ: ремонт актового зала на 3-ем этаже АБК, ремонт женской раздевалки в АБК, ремонт кабинетов в АБК 2 этаж, монтаж системы вентиляции гардероба и душевой на 1 этаже в осях Б-Г 13-19 АБК; монтаж системы вентиляции в бытовых помещениях 2-го этажа АБК, монтаж системы вентиляции актового зала 3 этаж в АБК; монтаж общеобменной системы вентиляции на 2-ом этаже в АБК.

- п. 1.3. изложить и использовать в новой редакции: «Виды и объемы работ по ремонтным работам в АБК и производственном корпусе, производимые Подрядчиком, устанавливаются в Приложениях №1-27, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора».

- п.2.1. изложить и использовать в новой редакции: «Договорная цена выполняемых работ на объекте является твердой, определена приложениями №1-27 к настоящему Договору и составляет 16 081 101 (шестнадцать миллионов восемьдесят одна тысяча сто один) рубль 09 копеек, в том числе НДС 18% - 2 453 049,32 руб.

- п.3.2. дополнить следующими предложениями:

-14-й этап - ремонт актового зала на 3-ем этаже АБК согласно приложению №21. Продолжительность 90 рабочих дней с момента подписания дополнительного соглашения №2;

-15-й этап - ремонт женской раздевалки в АБК согласно приложению №22. Продолжительность 60 рабочих дней с момента подписания дополнительного соглашения №2;

-16-й этап - ремонт кабинетов в АБК 2 этаж согласно приложению №23. Продолжительность 30 рабочих дней с момента подписания дополнительного соглашения №2;

-17-й этап - монтаж системы вентиляции гардероба и душевой на 1 этаже в осях Б-Г 13-19 АБК согласно приложению №24. Продолжительность 40 рабочих дней с момента подписания дополнительного соглашения №2;

-18-й этап - монтаж системы вентиляции в бытовых помещениях 2-го этажа АБК согласно приложению №25. Продолжительность 50 рабочих дней с момента подписания дополнительного соглашения №2;

-19-й этап - монтаж системы вентиляции актового зала 3 этаж в АБК согласно приложению №26. Продолжительность 90 рабочих дней с момента подписания дополнительного соглашения №2;

-20-й этап - монтаж общеобменной системы вентиляции на 2-ом этаже в АБК согласно приложению №27. Продолжительность 90 рабочих дней с момента подписания дополнительного соглашения №2;

- п.4.9. дополнить следующим предложением: К отношениям сторон положения ст. 317.1. ГК РФ не применяются.

- п. 14.1. дополнить следующими приложениями: Приложение №21. Локально сметный расчет на ремонт актового зала на 3-ем этаже АБК; Приложение №22. Локально сметный расчет на ремонт женской раздевалки в АБК; Приложение №23. Локально сметный расчет на ремонт кабинетов в АБК 2 этаж; Приложение №24. Локально сметный расчет на монтаж системы вентиляции гардероба и душевой на 1 этаже в осях Б-Г 13-19 АБК;

Приложение №25. Локально сметный расчет на монтаж системы вентиляции в бытовых помещениях 2-го этажа АБК;

Приложение №26. Локально сметный расчет на монтаж системы вентиляции актового зала 3 этаж в АБК;

Приложение №27. Локально сметный расчет на монтаж общеобмениой системы вентиляции на 2-ом этаже в АБК.

Общая сумма дополнительного соглашения №2 является твердой, определена приложениями №21-27 и составляет 7 091 840 руб. 43 коп., в том числе НДС 18% -1 081 806 руб. 17 коп.

По Дополнительному соглашению №2 стороны согласовали следующие порядок и условия оплаты работ: 100 % оплата выполненных работ в течение 30 банковских дней после подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.

Во исполнение указанного выше договора истцом ответчику были произведены работы  на общую сумму 809 538 руб. 02 коп., которые подтверждаются материалами дела, а именно  справками о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 31.01.2019г., №2 от 31.01.2019г., №3 от 31.01.2019г.,  актами о приемке выполненных работ за январь 2019 №1 от 31.01.2019г., №2 от 31.01.2019г., №3 от 31.01.2019г., УПД от 31.01.2019г., подписанными со стороны ответчика без каких-либо замечаний и претензий.

   Ответчик, в свою очередь выполненные истцом работы не оплатил.

Претензия исх.№69 от 03.04.2019г., направленная истцом в адрес ответчика с требованием оплатить образовавшуюся задолженность, оставлена последним без удовлетворения, что в свою очередь послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в суд.

Статьями 307 – 310 ГК РФ установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договоров, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточного сроков выполнения работы.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно п. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Учитывая, что задолженность ответчика перед истцом подтверждается документально, доказательства оплаты долга ответчиком не представлены, требование истца о взыскании 809 538 руб. 02 коп. долга, в силу ст.ст.307-310, 702, 708 ГК РФ и п.3.1. ст.70 АПК РФ является правомерным и подлежит удовлетворению.

Истец  предъявил  требование  о взыскании  32 226 руб. 27 коп. неустойки за период с 15.03.2019 по 23.09.2019г. 

Факт просрочки подтверждается материалами дела, расчет проверен судом и признан верным.

Требование истца о взыскании 32 226 руб. 27 коп. неустойки, начисленной на сумму долга, за период с 15.03.2019 по 23.09.2019г. является правомерным и также подлежит удовлетворению судом.

Расходы по госпошлине в соответствии со ст.110 АПК РФ относятся на ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 112, 167–169, 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ, Арбитражный суд  Республики Татарстан,

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Ак Барс Металл", (ОГРН 1071650018582, ИНН 1650161286) в пользу Индивидуального предпринимателя Вагизова Мунира Талиповича, Тукаевский район (ОГРН 304165035902141, ИНН 165002848300) 809 538 руб. 02 коп. долга,  32 226 руб. 27 коп. неустойки и 19 835 руб. госпошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Председательствующий судьяЮ.Н. Галеева