086/2020-103180(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 

http://www.chuvashia.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А79-6264/2019

г. Чебоксары

15 октября 2020 года

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи  Филиппова Б.Н.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Стальской К.А.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

Министерства здравоохранения Чувашской Республики, ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, 428000, 

<

...>,  

к обществу с ограниченной ответственностью "Юман", ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, 428022, 

<

...>,  

о взыскании 20393 руб. 32 коп. и обязании выполнить работы, и по встречному иску 

общества с ограниченной ответственностью "Юман", ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, 428022, 

<

...>,  

к Министерству здравоохранения Чувашской Республики, ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, 428000, 

<

...>,  

о взыскании 208737 руб. 63 коп., 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета  спора:  

бюджетное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарская районная больница"  Министерства здравоохранения Чувашской Республики;  

казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого  заказчика" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального  хозяйства Чувашской Республики,  

общество с ограниченной ответственностью "СТЭП", ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, 429500, 

<

...>,  

при участии: от истца ФИО1 по доверенности от 08.11.2019, 

от ответчика Тришиной О.В. по доверенности от 01.04.2019, Гуриной Н.В.  (генерального директора),  

от третьего лица бюджетного учреждения Чувашской Республики "Чебоксарская  районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики-  ФИО4 по доверенности от 14.05.2020 № 4,  

эксперта ФИО5, 

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

иск Министерства здравоохранения Чувашской Республики удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Юман" в рамках  исполнения обязательств по государственному контракту от 05.06.2018 на  выполнение работ по строительству объекта "Модульный фельдшерско- акушерский пункт в с. Чемурша Чебоксарского района Чувашской Республики" в  течение 15 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу:  

- заменить аварийный электрический котел ЭВП-6 на исправный, не бывший  в эксплуатации, с проведением испытания его работоспособности;  

- устранить неисправности в монтаже системы безопасности (установить  расширительный бак на трубопровод подачи теплоносителя к  электронагревателю);  

- устранить несоответствие выполненных работ проектно-сметной  документации и дефекты выполненных работ, указанные в отчете по экспертизе,  выполненном экспертом ООО "Стройнадзор" ФИО5 (заменить полностью  во всех помещениях керамогранитные плиты с размера 300x300 на 400x400,  уложить линолеум сплошным приклеиванием на клей, уложить утеплитель  толщиной 200 мм, установить поперечные бруски и фиброцементные плиты  Latonit);  

- укрепить здание методом добавления деревянного каркаса в конструкцию  самонаборных плит перекрытия пола и устройства стяжек на отметке -0,394 и  0,000, согласно перечню работ, указанному в отчете по экспертизе, выполненном  экспертом ООО "Стройнадзор" ФИО5;  

- сдать результат работы по контракту от 05.06.2018 на выполнение работ по  строительству объекта "Модульный фельдшерско-акушерский пункт в с. Чемурша  Чебоксарского района Чувашской Республики" по акту приемки законченного  строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14, утвержденной  постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Юман" в пользу  Министерства здравоохранения Чувашской Республики 31 434 (Тридцать одна  тысяча четыреста тридцать четыре) руб. 18 коп. пени за период с 21.08.2018 по  08.10.2020. Начиная с 09.10.2020 по день приемки законченного строительством  объекта приемочной комиссией продолжить начисление и взыскание пеней.  

В удовлетворении встречного иска общества с ограниченной  ответственностью "Юман" отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Юман" в пользу  бюджетного учреждения Чувашской Республики "Чебоксарская районная  

больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики 28 000  (Двадцать восемь тысяч) руб. расходов на оплату судебной экспертизы.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Юман" в пользу  общества с ограниченной ответственностью "СтройНадзор" 54 624 (Пятьдесят  четыре тысячи шестьсот двадцать четыре) руб. дополнительных затрат, связанных  с выполнением судебной экспертизы.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Юман" в  федеральный бюджет 8 000 (Восемь тысяч) руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний  Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого  арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух  месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления  арбитражного суда.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики –  Чувашии.  

Судья Б.Н. Филиппов  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 11.08.2020 10:53:56

 Кому выдана Филиппов Борис Николаевич