АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-10542/2021

г. Новосибирск

15 октября 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 13 октября 2021 года      

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Герасимовой Д.И., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Топтрейд» (ОГРН 1185543010773), г. Новосибирск, 

к акционерному обществу "Сибирская энергетическая компания" (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск,

при участии в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Сибэнергострой" (ОГРН 

<

***>),

о взыскании задолженности в сумме 368 303 рублей 72 копеек, неустойки за период с 16.02.2021 по 13.04.2021 в сумме 2 502 рубля 45 копеек,

при участии:

от истца: ФИО1 (доверенность от 16.08.2021, паспорт, диплом);

от ответчика: ФИО2.(доверенность от 21.08.2020, паспорт, диплом);

от третьего лица: не явился,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Сибэнергострой" (далее –ООО «Сибэнергострой») обратилось в суд с исковым заявлением к акционерному обществу "Сибирская энергетическая компания" (далее – ответчик, АО «Сибэко») о взыскании задолженности в размере 368 303 рублей 72 копеек, неустойки в размере 2 502 рублей 45 копеек.

Определением арбитражного суда от 08.09.2021 произведена замена стороны истца на правопреемника - общество с ограниченной ответственностью «Топтрейд» (далее  - истец, ООО «Топтрейд»).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено  ООО "Сибэнергострой" (далее – третье лицо).

Ответчик исковые требования не признал по мотивам, изложенным в отзыве. 

 06.05.2020 между ООО «Сибэнергострой» и АО «Сибэко» заключен договор строительного подряда № НФТС-20/1140, по условиям которого подрядчик обязуется в установленный договором срок и в соответствии с Перспективным планом капитального ремонта на 2020-2024 года, выполнить работы по капитальному ремонту объектов филиала «Тепловые сети» АО «Си-бэко», г. Новосибирска в 2020 - 2024 годах, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Конкретные объекты, объемы работ и сроки их выполнения на 2020 год указаны в Техническом задании № НФТС-02/20 на выполнение работ по объектам:

1.«Капитальный ремонт теплотрассы (МТС) 2Ду700 от ТК710 до ТК710А па ул. Котовского, L=249 м»,

2.«Капитальный ремонт теплотрассы (ВКТС) 2Ду 50-200 по ул. Котовского-Широкая от ТК28-2 до ТК28-9, L=300 м»,

Объекты, объемы работ и сроки их выполнения на 2021 - 2024 годы определяются Перспективным планом капитального ремонта на 2021-2024 года.

Сроки выполнения работ по конкретным объектам определяются на основании Технического задания по данному объекту и утвержденному заказчиком календарному графику производства работ.

Во исполнение п. 2.1 договора заказчиком был утверждён календарный график производства работ, которым определены сроки выполнения работ.

Стоимость конкретных видов работ на каждый календарный год определяется на основании локальных сметных расчетов.

В соответствии с п. 3.3. договора расчет за выполненные работы производится заказчиком в следующем порядке: в течение 15 рабочих дней с момента выполнения работ и подписания заказчиком «Акта о приемке выполненных работ» формы КС-2, «Справки о стоимости вы-полненных работ и затрат» формы КС-3, «Акта о приеме-сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3, выставления счета-фактуры при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в срок, определенный условиями договора, либо с согласия заказчика досрочно, а так же при условии предоставления полного комплекта исполнительной на все виды выполненных работ в соответствии с Перечнем исполнительной документации объекта капитального ремонта.

Во исполнение условий договора в 2020-2021 году истцом выполнены, а ответчиком приняты выполненные работ на сумму 47 711 065 рублей 80 копеек, что подтверждается подписанными в двустороннем порядке актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат.

29.12.2020ООО «Сибэнергострой» в адрес АО «Сибэко» были направлены следующие документы: КС-2 №40, справка о стоимости выполненных работ, подтверждающие транспортные расходы, которые последним подписаны не были.

14.01.2021 в адрес ООО «Сибэнергострой» поступило письмо с требованием предоставить подтверждающие документы.

25.01.2020от ООО «Сибэнергострой» в адрес ответчика был направлен пакет документов, подтверждающий транспортные расходы по объектам:

-капитальный ремонт «Теплотрасса (ВКТС) по ул. Котовского-Широкая от ТК28-2 до ТК28-9, Ду70-200;Ь=300м.» на сумму 131 921 рублей 38 копеек;

-капитальный ремонт «Теплотрассы (МТС) 2Ду700 от ТК710 до ТК710А па ул. Котовско-го, L=249 м» на сумму 236 382 рублей 34 копеек.

Отказ ответчика возмещать транспортные расходы истца послужил поводом обращения с настоящим иском.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (часть 1 статьи 702 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 709 ГК РФ цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Согласно пункту 3 статьи 709 ГК цена работы может быть определена путем составления сметы. В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора  подряда с момента подтверждения ее заказчиком.

В соответствии с пунктом 3.2. договора приблизительная стоимость работ капитального ремонта 2020 года определяется на основании локальных сметных расчетов Приложения №3-22 и резерва средств на непредвиденные работы и затраты – 3%, составленных на основании утвержденной заказчиком рабочей документации по объектам капитального ремонта 2020 года.

Стоимость работ включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ согласно утвержденной рабочей документации, ПОС, ППР, Техническому заданию.

Локальные сметные расчеты объектов капитального ремонта 2020 года соответствуют согласованной заказчиком Рабочей документации и Требованиям к сметной документации объектов капитального ремонта 2020 года (Приложение №23).

Стоимость конкретных видов работ на каждый календарный год определяется на основании локальных сметных расчетов, составляемых заказчиком и направляемых подрядчику одновременно с техническим заданием на текущий год с учетом понижающего коэффициента, полученного по результатам торгов. После согласования данные локальные сметные расчеты являются приложением к настоящему договору.

Окончательная цена договора складывается из стоимости фактически выполненных работ на основании подписанных сторонами «Актов приемки выполненных работ формы КС-2»; «Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3».

Возражая против исковых требований, ответчик указал, что представленные истцом документы не подтверждают фактическое несение дополнительных транспортных  расходов. Все представленные истцом подтверждающие  документы учитывались при подписании актов формы КС-2 по выполненным работам на объектах.  Кроме того, согласно условиям договора, стоимость работ включает все затраты подрядчика.

Из материалов дела следует, что в подтверждение понесенных расходов истцом представлены договоры перевозки, счета-фактуры, товарные накладные,   путевые листы.

Оценив доводы сторон, суд приходит к следующему выводу.

При толковании условий договора в силу абзаца 1 статьи 431 ГК РФ судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений (буквальное толкование). Такое значение определяется с учетом их общепринятого употребления любым участником гражданского оборота, действующим разумно и добросовестно (пункт 5 статьи 10, пункт 3 статьи 307 ГК РФ), если иное значение не следует из деловой практики сторон и иных обстоятельств дела.

Так, согласно п.3.2. договора стоимость работ включает в себя все затраты подрядчика. Стоимость работ определяется локальными сметными расчетами. 

Согласно п.4.1. договора материалы, необходимые для выполнения работ подрядчик приобретает самостоятельно, в том числе своими силами и средствами осуществляет их доставку.

При этом, доводы истца о том, что подписанные сторонами акты выполненных работ не содержат транспортных расходов истца, судом отклоняется, поскольку противоречит представленным в материалы дела доказательствам.

Так,  все представленные акты выполненных работ содержат строку расходов: «машины и механизмы», накладные расходы. 

Доказательств тому факту, что указанная в актах выполненных работ стоимость материалов не включает транспортные расходы, которые были устно согласованы сторонами в размере 4,6 %, не представлено. Какие-либо документы, подтверждающие согласование сторонами таких условий не имеется.

Сметные цены учитывают все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузо-разгрузочные и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий и конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций - поставщиков до приобъектного склада строительства.

Пунктом 4.10. Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России № 15/1 от 05.03.2004 г., установлено, что стоимость, определяемая локальными сметными расчетами (сметами), может включать в себя прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль. Накладные расходы учитывают затраты строительно-монтажных организаций, связанные с созданием общих условий производства, его обслуживанием, организацией и управлением. 

Пункт 1.2. Методических указаний по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004), утвержденных Постановлением Госстроя России № 6 от 12.01.2004, определяет накладные расходы как совокупность затрат, связанных с созданием необходимых условий для выполнения строительных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ, а также их организацией, управлением и обслуживанием. 

В соответствии с пунктом 1.3. МДС 81-33.2004 сметная нормативная величина накладных расходов отражает среднеотраслевые общественно необходимые затраты, входящие в состав цены на строительную продукцию.

Соответственно, следует исходить из того, что расходы на доставку материалов и оборудования на объект строительства включены в стоимость материалов и оборудования, отраженную в актах выполненных работах либо учтены в силу договора в сметной прибыли подрядчика.

Истцом не приведено обоснованных доводов, что понесенные им дополнительные расходы подлежат отнесению на заказчика.

Аналогичная правовая позиция была изложена Седьмым арбитражным апелляционным судом при рассмотрении дела № А45- 13102/2021 по иску между теми же сторонами и по аналогичным обстоятельствам. 

В связи с чем, суд оказывает  в удовлетворении исковых требований в полном объёме. 

Судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171,  176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать. 

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал  в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья

О.В. Суворова