Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-14173/2022

29 мая 2022 года

г.Санкт-Петербург

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "СПГ ЛЕГИОН" (ОГРН: 

<

***>) 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА" (ОГРН: 

<

***>) 

при участии

- от истца: ФИО2 по д. от 01.11.2021; 

- от ответчика: ФИО3 по д. от 01.01.2022; 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "СПГ ЛЕГИОН" (далее – ООО "СПГ ЛЕГИОН") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА" (далее – ООО "СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА") о взыскании 2905900,09 руб. задолженности и 366143,41 руб. неустойки за период с 01.10.2021 по 03.02.2022 по договору от 11.05.2021 № 11/05-21 (далее – Договор).

Представитель истца поддержал исковые требования. Представитель ответчика возражал против удовлетворения иска.

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между ООО "СПГ ЛЕГИОН" (Подрядчиком) и ООО "СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА" (Заказчиком) заключен Договор, по условиям которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность своими силами, выполнить комплекс работ по ремонту фасадов зданий, расположенных по адресу: 

<

...>, на территории завода «Советская звезда», в объеме, сроки и по стоимости, указанные в настоящем Договоре и передать результаты работ Заказчику.

По п. 4.1. Договора стоимость работ по Договору составляет 4401619,68 руб. 

В силу п. 4.3. Договора оплата стоимости работ, указанной в 4.1 настоящего Договора производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного в адрес Заказчика счёта на оплату, или иным способом по обоюдному соглашению Сторон, в следующем порядке и в следующие сроки:

•перед началом выполнения работ (согласно Приложению) Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости Договора, составляющий 1320485,90 руб. в течение 5 (Пяти) банковских дней на основании соответствующего счета.

•оплата выполненных работ производится Заказчиком поэтапно, на основании подписанных Сторонами промежуточных актов сдачи-приемки работ и при наличии иных документов, указанных в п.5.1. настоящего Договора. Оплата производится в течение 5 (Пяти) банковских дней после подписания Заказчиком ежемесячных промежуточных Актов выполненных работ (по форме № КС-2) с пропорциональным зачетом оплаченного ранее аванса, составляющим 30% от суммы выполненных работ по акту КС-2 на основании выставленного Подрядчиком счета.

•датой оплаты является дата списания денежных средств с расчётного счета Заказчика, указанного в настоящем Договоре.

Согласно п. 5.1. Договора стороны пришли к соглашению о поэтапной сдаче-приемке работ. Подрядчик ежемесячно в срок до 5 го числа месяца, следующего за отчетным, направляет Заказчику (в т.ч. по эл.почте Заказчика - smeta@sovstarltd.com), промежуточный акт о сдаче-приемке фактически выполненных на дату составления Акта работ (форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Счет на оплату выполненных работ с учетом пропорционального зачета авансов.

В соответствии с п. 5.2. Договора Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.5.1. настоящего Договора, подписывает их или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работы. В случае отказа в подписании Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику мотивированное сообщение об отказе в течение 5 (пяти) дней со дня приемки, в противном случае работа будет считаться принятой Подрядчиком и подлежащей оплате.

По п. 7.3. Договора за задержку оплаты выполненных работ в соответствии с данным договором Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% в день от суммы задержанной оплаты.

Стороны Договора заключили дополнительное соглашение от 15.06.2021 № 1 к Договору, по условиям которого общая стоимость дополнительных работ, предусмотренных настоящим ДС, составляет 2447310,65 руб.; перед началом выполнения работ заказчик оплачивает подрядчику 30 % общей стоимости ДС, составляющей 743193,20 руб. 

По реестру от 16.08.2021 № 16 ООО "СПГ ЛЕГИОН" передало, а ООО "СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА" приняло акты о приемке выполненных работ от 25.06.2021 № 2 на сумму 1703975,20 руб., от 19.07.2021 № 3 на сумму 2447310,65 руб. и справки о стоимости выполненных работ и затрат. 

ООО "СПГ ЛЕГИОН" направило ООО "СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА" претензию от 02.11.2021 с требованием оплаты задолженности 

Отказ ООО "СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА" удовлетворить названное требование послужил основанием для обращения ООО "СПГ ЛЕГИОН" в суд с настоящим иском. 

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (статья 711 ГК РФ). 

В силу пункта 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований.

Факт сдачи-приемки работ подтверждается актами о приемке выполненных работ от 25.06.2021 № 2 на сумму 1703975,20 руб., от 19.07.2021 № 3 на сумму 2447310,65 руб., справками о стоимости выполненных работ и затрат, реестром на передачу документов от 16.08.2021 № 16.

Ответчик заявил, что принятая им часть работ по двусторонним актам по договору оплачена, а по приемке и оплате спорных работ на основании пункта 2.2 договора обязательства отсутствуют. 

При этом ООО "СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА" не отрицало получение актов формы КС-2 от 25.06.2021 № 2 и от 19.07.2021 № 3 и справок формы КС-3. 

Мотивированный отказ в приемке данных работ заказчик не заявил.

В отношении непередачи исполнительной документации необходимо отметить, что по смыслу статьи 726 ГК РФ сам по себе факт непредставления исполнительной документации не может являться основанием для отказа от оплаты выполненных работ. Отказываясь оплачивать переданные результаты подрядных работ по причине непередачи подрядчиком исполнительной документации, заказчик обязан доказать, что отсутствие такой документации исключает возможность использования результата работ.

На основании изложенного, суд удовлетворяет требование о взыскании 2905900,09 руб. задолженности.

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Истец начислил 366143,41 руб. неустойки за период с 01.10.2021 по 03.02.2022 по п. 7.3. Договора. 

Суд, проверив расчет неустойки, признает требование арифметически верным и подлежащим удовлетворению. 

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА" в пользу общества с ограниченной ответственностью "СПГ ЛЕГИОН" 2905900,09 руб. задолженности, 366143,41 руб. неустойки и 39360 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья Косенко Т.А.