4238/2018-588269(2) 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-47106/2018

11 октября 2018 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена 08 октября 2018 года. Полный текст решения изготовлен 11 октября 2018 года. 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:  судьи Евдошенко А.П.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.Д. Куделиной,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску:  

истец: Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  КРАТОН"  

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ "НАВИС"  

о взыскании 12 422 375 руб. 25 коп. при участии 

от истца: представитель ФИО1, доверенность от 16.04.2018  от ответчика: представитель ФИО2, доверенность от 10.04.2018  

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  КРАТОН" (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к  Обществу с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  "НАВИС" (далее – ответчик) о взыскании 12 422 375 руб. 25 коп., в том числе 461 522  руб. 54 коп. задолженности по договору № 08/08-2016 от 08.08.2016, 196 338 руб. 63  коп. задолженности по договору № 18/10-2016 от 18.10.2016, 11 747 руб. 60 коп.  задолженности по договору № 01/11-2016 от 01.11.2016, 21 063 руб. 90 коп.  задолженности по договору № ЖД2.1-17/11/2016 от 17.11.2016, 43 410 руб. 64 коп.  задолженности по договору № ЖД2.2-17/11/2016 от 17.11.2016, 16 719 руб. 11 коп.  задолженности по договору № ЖД3.1-17/11/2016 от 17.11.2016, 4 913 345 руб. 33 коп.  задолженности по договору № С-02/2017-М-ЗА от 15.02.2017, 996 329 руб. 71 коп.  задолженности по договору № С-02/2017-СТ-1.1 от 09.02.2017, 138 487 руб. 50 коп.  задолженности по договору № С-05/2017-ПК-2.2 от 19.05.2017, 1 174 022 руб. 48 коп.  задолженности по договору № С-05/2017-СТ-2.2 от 19.05.2017, 28 084 руб.  задолженности по договору № С-06/2017-ВХГ от 13.06.2017, 465 676 руб.  задолженности по договору № С-08/2017-КЛ-4А от 22.08.2017, 1 222 235 руб. 01 коп.  задолженности по договору № С-08/2017-СТ-3.1-К от 28.08.2017, 708 677 руб.  задолженности по договору № С-09/2017-М2-3А от 29.09.2017, 838 450 руб.  задолженности по договору № С-08/2017-СТ-3.2-К от 28.08.2017, 1 186 274 руб. 28 коп.  неустойки.  

Истец заявил ходатайство об уточнении размера исковых требований, в котором  истец просит суд взыскать с ответчика 9 960 334 руб. 53 коп. задолженности и 1 451 418  руб. 66 коп. неустойки.  

Судом ходатайство истца об уточнении размера исковых требований  удовлетворено, на основании статьи 49 АПК РФ.  

Ответчик по существу спора возражал по мотивам, изложенным в отзыве,  ссылаясь на то, что сторонами были заключены дополнительные соглашения к  договорам № ЖД2.1-17/11/2016 от 17.11.2016, № ЖД2.2-17/11/2016 от 17.11.2016, №  ЖД3.1-17/11/2016 от 17.11.2016, которыми сторонами был согласован новый порядок  оплаты работ, истец не исполнил обязательства по передаче исполнительной  документации ответчику, что, по мнению ответчика, является основанием для  приостановления оплаты работ; основания для выплаты суммы резервирования по  договорам № С-02/2017-СТ-1.1 от 09.02.2017, № С-05/2017-СТ-2.2 от 19.05.2017, № С- 05/2017-ПК-2.2 от 19.05.2017 отсутствуют ввиду того, что объект до настоящего  времени не введен в эксплуатацию, акты сдачи-приемки работ, подтверждающие  выполнение всего объема работ, не подписаны, исполнительная документация не  представлена. Также ответчик указал на неверный расчет неустойки истцом, который  произведен без учета установленного 5% ограничения размера неустойки.  

Также ответчик заявил ходатайство о снижении размера неустойки ввиду ее  чрезмерности.  

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд установил  следующие обстоятельства.  

Между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) были заключены 16  договоров подряда на выполнение комплекса строительных работ на объекте Жилой  комплекс «Шотландия».  

Пунктом 5.2 договоров № С-08/2017-СТ-3.2-К от 28.08.2017, № С-02/2017-СТ-1.1  от 09.02.2017, № С-02/2017-СТ-1.2 от 09.02.2017, № С-08/2017-СТ-3.1-К от 28.08.2017,   № С-05/2017-ПК-2.2 от 19.05.2017, № С-05/2017-СТ-2.2 от 19.05.2017, № С-06/2017- ВХГ от 13.06.2017 предусмотрено, что оплата выполненных работ осуществляется в  следующем порядке: 93 % стоимости работ оплачиваются в течение 20 банковских дней  от даты КС-2, КС-3, 7% стоимости работ оплачиваются в течение 20 рабочих дней с  даты подписания итогового акта работ.  

Во исполнение принятых обязательств истец выполнил, а ответчик принял  предъявленные к сдаче работы и затраты, что подтверждается актами по форме КС-2 и  справками по форме КС-3, подписанными ответчиком без претензий относительно  качества, объема и сроков их выполнения.  

В нарушение условий договоров ответчик свои обязательства по оплате  выполненных работ не исполнил надлежащим образом, в связи с чем у него перед  истцом образовалась задолженность в следующем размере:  

- 1 058 759 руб. 08 коп. по договору № С-08/2017-СТ-3.2-К от 28.08.2017;  - 888 495 руб. 61 коп. по договору № С-02/2017-СТ-1.1 от 09.02.2017;  

- 1 136 678 руб. 55 коп. по договору № С-08/2017-СТ-3.1-К от 28.08.2017;  - 138 478 руб. 50 коп. по договору № С-05/2017-ПК-2.2 от 19.05.2017;  

- 1 174 022 руб. 48 коп. по договору № С-05/2017-СТ-2.2 от 19.05.2017; - 28 084 руб. по договору № С-06/2017-ВХГ от 13.06.2017. 

Пунктом 5.2 договоров № С-09/2017-М2-3А от 29.09.2017, № ЖД3.1-17/11/2016 от  17.11.2016, № ЖД2.2-17/11/2016 от 17.11.2016, № ЖД2.1-17/11/2016 от 17.11.2016, №  01/11-2016 от 01.11.2016, № 18/10-2016 от 18.10.2016, № 08/08-2016 от 08.08.2016, № С- 08/2017-КЛ-4А от 22.08.2017 предусмотрено, что оплата выполненных работ  осуществляется в следующем порядке: 50 % стоимости работ оплачивается в течение 15  банковских дней с даты КС, 45 % стоимости работ оплачивается в течение 2 месяцев с  даты КС, 5% стоимости работ оплачивается в течение 15 рабочих дней с даты  подписания итогового акта.  

Во исполнение принятых обязательств истец выполнил, а ответчик принял  предъявленные к сдаче работы и затраты, что подтверждается актами по форме КС-2 и  справками по форме КС-3, подписанными ответчиком без претензий относительно  качества, объема и сроков их выполнения.  

В нарушение условий договоров ответчик свои обязательства по оплате  выполненных работ не исполнил надлежащим образом, в связи с чем у него перед  истцом образовалась задолженность в следующем размере:  

- 659 069 руб. 61 коп. по договору № С-09/2017-М2-3А от 29.09.2017;  - 16 719 руб. 11 коп. по договору № ЖД3.1-17/11/2016 от 17.11.2016;  - 43 410 руб. 64 коп. по договору № ЖД2.2-17/11/2016 от 17.11.2016;  - 21 063 руб. 90 коп. по договору № ЖД2.1-17/11/2016 от 17.11.2016;  - 11 747 руб. 60 коп. по договору № 01/11-2016 от 01.11.2016;  

- 196 338 руб. 63 коп. по договору № 18/10-2016 от 18.10.2016;  - 461 552 руб. 54 коп. по договору № 08/08-2016 от 08.08.2016;  - 433 078 руб. 68 коп. по договору № С-08/2017-КЛ-4А от 22.08.2017.  

Пунктом 5.3 договора № С-02/2017-М-ЗА от 15.02.2017 (с учетом дополнительных  соглашений № 1-4) предусмотрено, что оплата работ производится в следующем  порядке: 50 % стоимости работ оплачивается в течение 20 банковских дней с даты КС-2,  КС-3, 45 % стоимости работ оплачивается в течение 3 месяцев с даты КС-2, КС-3, 7%  стоимости работ оплачивается в течение 20 банковских дней с даты ввода объекта в  эксплуатацию. Согласно дополнительному соглашению № 3, расчет производится в  течение 20 банковских дней с даты подписания КС-2, КС-3.  

Во исполнение принятых обязательств истец выполнил, а ответчик принял  предъявленные к сдаче работы и затраты, что подтверждается актам по форме КС-2 и  справками по форме КС-3, подписанные ответчиком без претензий относительно  качества, объема и сроков их выполнения.  

В нарушение условий договора ответчик свои обязательства по оплате  выполненных работ не исполнил надлежащим образом, в связи с чем у него перед  истцом образовалась задолженность в размере 4 751 594 руб. 68 коп.  

Истец направил в адрес ответчика претензию Исх. № 47 от 19.02.2018 с  требованием оплатить возникшую задолженность.  

Неисполнение указанных требований послужило основанием для обращения  истца в суд с настоящим иском.  

Исследовав и оценив в соответствии с требованиями части 2 статьи 65, части 1  статьи 67, статей 68, 71, части 1 статьи 168 АПК РФ доказательства и доводы,  приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и  возражений, суд пришел к следующим выводам.  

Заключенный сторонами договор по своей правовой природе с учетом анализа его  условий является договором подряда, отношения по которому регулируются нормами  главы 37 ГК РФ.  

Согласно статьям 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона,  односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона  (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)  определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять  результат работы и оплатить его.  

Оплата выполненных подрядчиком работ в силу статьи 746 ГК РФ производится  заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые  установлены законом или договором строительного подряда.  

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются  актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).  

Таким образом, основанием для возникновения у заказчика обязанности по оплате  выполненных подрядчиком работ является факт их передачи подрядчиком и приемки  заказчиком, оформленный актом о приемке выполненных работ.  

Из материалов дела видно, что результат работ по договорам были приняты  ответчиком без замечаний относительно качества, объема и сроков их выполнения, что  являются достаточным подтверждением исполнения истцом своих обязательств.  Поскольку обязательства, обусловленные договорами, на основании подписанных без  замечаний форм КС-2, КС-3, были исполнены истцом надлежащим образом, у  ответчика в силу статей 328, 702, 711, 746, 753 ГК РФ возникли встречные  обязательства по оплате выполненных работ.  

Доказательств перечисления истцу денежных средств в счет оплаты выполненных  работ ответчик суду не представил. Обстоятельства наличия задолженности по оплате  выполненных работ в размере 9 960 334 руб. 53 коп. подтверждаются материалами дела,  ответчиком не опровергнуты.  

Оценив фактические обстоятельства, связанные с действиями сторон, исследовав  представленные в материалы дела документы по правилам статьи 71 АПК РФ, суд  приходит к выводу о доказанности факта выполнения и сдачи работ по договорам, и как  следствие, - о наличии правовых оснований для их оплаты в размере истребуемой  задолженности.  

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может  обеспечиваться неустойкой. В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой признается  определенная договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору  в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в  случае просрочки исполнения.  

В соответствии с условиями договоров истец начислил неустойку за просрочку  оплаты выполненных работ в общей сумме 1 451 418 руб. 66 коп.  

При расчете неустойки истец исходил из следующего. 

По договору № С-08/2017-СТ-3.2.-К от 28.08.2017 неустойка начислена в размере  52 937 руб. 96 коп. с учетом ограничения по сумме пеней 5% от стоимости этапа работ:  

А) КС № 1 от 31.08.2017 на сумму 441 587 руб. 25 коп. 

93% - 410 676 руб. 14 коп в срок до 28.09.2017г., пени подлежат начислению с  29.09.2017г. по 08.10.2018г. на сумму 39 021,06 (5% - 20 533.81 руб.), 7% - 30 911.11  коп. не предъявляется.  

Итоговая сумма пеней по КС № 1 от 31.08.2017г. составляет 20 533,81 коп.  Б) КС № 2 от 30.09.2017г. на сумму 696 863.37  

93% - 648082 руб. 93 коп в срок до 30.10.2017г., пени подлежат начислению с  31.10.2017г. по 08.10.2018г. на сумму (частичная оплата на сумму 300 000 26.01.2018г.)  - 36 980,55 (5% - 32 404,15 руб.), 7% - 48 780 руб. 44 коп. не предъявляется, итоговая  сумма пеней по КС № 2 от 30.09.2017г. составляет 32 404 руб. 15 коп.  

По договору № С-09/2017-М2-ЗА от 29.09.2017 неустойка начислена в размере  659069,61 руб. с учетом ограничения по сумме пеней- 5% (п..9.3.1.):  

А) КС № 1 от 31.10.2017г. на сумму 708 677,00 

50% - 354 338,50 руб. в срок до 29.11.2017г., пени подлежат начислению с  30.11.2017г. по 08.10.2018г. сумма пеней 27 535,06 (5% - 17 716,92); 43% - 304 731,11 в  срок до 31.12.2017г., пени подлежат начислению с 01.01.2018г. по 08.10.2018г., сумма  пеней 21 069,62 (5%- 15236,56); 7% - 49607,39 - не предъявляется ко взысканию  

Итоговая сумма пеней по КС № 1 от 31.10.2017г. 32 953,481 руб.  

По договору № ЖД3.1.-17/11/2016 от 17.11.2016 неустойка начислена в размере 8  630,23 руб. с учетом ограничения по сумме пеней- 5% (п..9.3.1.):  

А) КС № 1 от 31.12.2016 на сумму 238844,00 руб. (частичная оплата 23.05.2017г.  на сумму 222125,29)  

50% - 119422,00 руб. в срок до 30.01.2017 г., пени подлежат начислению с  31.01.2017г. по 23.05.2017г., сумма пеней 4 396,72 руб.  

45% - 107479,80 руб. в срок до 01.03.2017г., пени подлежат начислению с  02.03.2017 по 23.05.2017, сумма пеней 2 882,25 руб.  

5% - 11942,20 в срок до 11.01.2017г., пени подлежат начислению с 12.01.2017г. по  23.05.2017, сумма пеней 515,30 руб.  

По остатку в 16719.11 с 24.05.2017г. по 08.10.2018г. пени составляют 1 187,47 (5%  - 835,96). итого сумма пеней по КС № 1 от 31.12.2016г. составляет 8630,23 руб.  

По договору № ЖД2.2.-17/11/2016 от 17.11.2016г. неустойка начислена в размере  22509,31 руб. с учетом максимальной суммы пеней по платежу - 5% (п..9.3.1.):  

А) КС № 1 от 31.12.2016 на сумму 868212,90 руб. (оплаты 19.05.17 на сумму  484106,45, 04.07.17 на сумму 340 695,81)  

50% -434 106,45 руб. в срок до 30.01.2017 г., пени подлежат начислению с  31.01.2017г. по 19.05.2017г., сумма пеней 15 446,96 руб.;  

45% - 390695,80 руб. в срок до 01.03.2017г., пени подлежат начислению с  19.05.2017г. по 04.07.2017г. (с учетом переплаты на 50 000) сумма пеней 4 891,82 руб.  

5% - 43410,65 в срок до 24.12.2016г., пени подлежат начислению с 25.12.2016г. по  08.10.2018г., сумма пеней 7 926,79 (5%-2170,53), итого сумма пеней по КС № 1 от  31.12.2016г. составляет 22 509,31 руб.  

По договору № ЖД2.1-17/11/2016 от 17.11.2016г. неустойка начислена в размере 9  963,40 руб. с учетом максимальной суммы пеней по платежу - 5% (п..9.3.1.), частичная  оплата 23.03.2017 на сумму 210639,00, 26.05.2017 на сумму 189575,10 руб.  

А) КС № 1 от 31.12.2016 сумма 421278,00 руб. 

50% - 210639,00 руб. в срок до 30.01.2017 г., пени подлежат начислению с  31.01.2017г. по 23.03.2017г. сумма пеней 3 651,08 руб.  

45% -189575,10 руб. в срок до 01.03.2017г., пени подлежат начислению с  02.03.2017г. по 26.05.2017г.. сумма пеней 5 259,13 руб.  

5% - 21063,90 в срок до 25.12.2016г., пени подлежат начислению с 26.12.2016г. по  08.10.2018г. сумма пеней 3 839,25 (5%- 1053,19), итого сумма пеней по КС № 1 от  31.12.2016г. составляет 9963,40 руб.  

По договору № 01/11-2016 от 01.11.2016г. неустойка начислена в размере 5  595,97 руб. с учетом максимальной суммы пеней по платежу - 5% (п..9.3.1.):  

А) КС № 1 от 30.11.2016г. на сумму 234 792,00 руб. 50% - 117 396,00 руб. в срок до 21.12.2016г., пени не насчитаны 

45% - 105658,40 руб. в срок до 01.01.2017г., пени подлежат начислению с  02.01.2017г. по 26.05.2017г. сумма пеней 5 008,99 руб.  

5% - 11 747,60 в срок до 23.12.2016г., пени подлежат начислению с 24.12.2016г.  по 08.10.2018г. сумма пеней 2 149,04 (5% - 586,98), итого сумма пеней по КС № 1 от  30.11.2016г. составляет 5 595 руб.97 коп.  

По договору № 18/10-2016 от 18.10.2016г. неустойка начислена в размере  

139177,56 руб. с учетом максимальной сумма пеней по платежу - 5% (п..9.3.1.), оплаты  22.03.2017 105190, 23.06.2017 - 500 000 руб. , 04.07.2017 437660,95 руб.:  

А) КС № 1 от 31.10.2016 сумма 670 273,70 руб. 

50% -335136,85 руб. в срок до 22.11.2016г. пени подлежат начислению с  23.11.2016г. по 22.03.2017г. частично на сумму оплаты, сумма пеней 13 405,47 + (после  22.03.2017 по 23.06.2017г.) 9 830,69 = 23236,16 (5%- 16 756 руб.84 коп.)  

45% - 301623,20 руб. в срок до 01.01.2017г., пени подлежат начислению с  02.01.2017г. по 23.06.2017г., сумма пеней 15 122,96 руб. (5% - 15081,16)  

5% - 33513,69 в срок до 23.12.2016г., пени подлежат начислению с 24.12.2016 по  04.07.2017, сумма пеней 2087 руб. 90 коп. (5% - 1 675,68), итого сумма пеней по КС № 4  от 30.11.2016г. составляет 36 513 руб. 68 коп.  

Б) КС № 2 от 30.11.2016 сумма 1 873 311,00 руб. 

50% - 936655,50 руб. в срок до 21.12.2016г., пени подлежат начислению с  22.12.2016г. по 23.06.2017г., сумма пеней 55 887,11 руб. (5% - 46832,78)  

45% - 842990,00 руб. в срок до 01.01.2017г., пени подлежат начислению с  02.01.2017г. по 23.06.2017 сумма пеней 47 207,44 (5%-42149,50)  

5% - 93655,50 в срок до 23.12.2016г., пени подлежат начислению с 24.12.2016г. по  23.06.2017г. сумма пеней 5 525,67 (5%-4683,28), итого сумма пеней по КС № 2 от  30.11.2016г. составляет 93665 руб.55 коп.  

В) КС № 3 от 31.12.2016 сумма 210380 руб. 

50% - 105190,00 руб. в срок до 30.01.2017 г., пени подлежат начислению с  31.01.2017г. по 22.03.2017г. сумма пеней 1 788,23 руб.  

45% - 94671,00 руб. в срок до 01.03.2017г., пени подлежат начислению с  02.03.2017г. по 04.07.2017г. сумма пеней 3 752,13 руб.  

5% - 10519 в срок до 23.12.2016г., пени подлежат начислению с 24.12.2016г. по  04.07.2017г. ,сумма пеней 655,33 (5% - 525,95), итого сумма пеней по КС № 3 от  31.12.2016г. составляет 6066,31 руб.  

Г) КС № 4 от 31.10.2017 сумма 58 640,40 руб. 

50% - 29 320,20 руб. в срок до 22.11.2017 г., пени подлежат начислению с  23.11.2017г. по 08.10.2018г., сумма пеней 2 334,87 руб. (5%- 1 466,01)  

45% - 26 388, 18 руб. в срок до 30.12.2017г., пени подлежат начислению с  31.12.2017г. по 08.10.2018г., сумма пеней 1 831,34 (5% - 1319,41)  

5% - 6912,98 в срок до 29.11.2017г., пени подлежат начислению с 30.11.2017г. по  08.10.2018г., сумма пеней 537,20 (5% - 146,60), итого сумма пеней по КС № 4 от  31.10.2017г. составляет 2 932 руб. 02 коп.  

По договору № 08/08-2016 от 08.08.2016г. неустойка начислена в размере 299 815  руб. 98 коп. с учетом ограничения в размере 5% (п..9.3.1.), по ДС № 1 расчет  производится в течение 15 банковских дней с даты КС в полном объеме, дс № 1, 3, 4  согласно пункту 5.2. договора, ДС № 5 - в течение 20 банковских дней с даты КС,  итоговый акт подписан 02.12.2016г., частичная оплата 24.01.2017г. - 1375398,93,  22.03.2017г. - 28560, 31.03.2017 - 532913,45, 04.07.2017 - 25704 руб.  

A) КС № 1 от 31.08.2016 сумма 423 403 руб. 50 коп. 

50% - 211 701 руб. 75 коп в срок до 21.09.2016г., пени подлежат начислению с  22.09.2016г. по 24.01.2017г. сумма пеней 8 820,91 руб.  

45% - 190531 руб. 57 коп. в срок до 01.11.2016г., пени подлежат начислению с  24.01.2017г. по 24.01.2017г. сумма пеней 5 334,88 руб.  

5% - 21170,07 в срок до 23.12.2016г., пени подлежат начислению с 24.12.2016г. по  24.01.2017г. сумма пеней 225,81 руб. , итого сумма пеней по КС № 1 от 31.08.2016г.  составляет 14 381 руб. 60 коп  

Б) КС № 2 от 30.09.2016 сумма 1 744 068 руб. 00 коп 

50% -872 034 руб. 75 коп. в срок до 21.09.2016г., пени подлежат начислению с  22.09.2016г. по 24.01.2017г. сумма пеней 36 334,75 руб.  

45% - 784830 руб. 60 коп. в срок до 01.11.2016г., пени подлежат начислению с  02.11.2016г. по 24.01.2017г. по остатку и до 22.03.2017г. сумма пеней 21 975,26 + 1  545,69 = 23 520,95 руб.  

5% - 87 230,40 в срок до 23.12.2016г., пени подлежат начислению с 24.12.2016г.  по 22.03.2017г. . сумма пеней 2 587,84 + после 22.03.17 в сумме остатка188,48 - итого  2776,32, итого сумма пеней по КС № 2 от 30.09.2016г. составляет 62632 руб. 02 коп  

B) КС № 3 от 24.10.2016 сумма 3 056 415 руб. 40 коп. 

50% -1 528 507,70 руб. в срок до 15.11.2016 г., пени подлежат начислению с  

16.11.2016г. по 31.03.2017г., сумма пеней 69 228,67 + по остатку после платежа  

31.03.2017г. руб. и 04.07.2017г. + 146 868,92 (5% - 76 425 руб. 39 коп.)  

45% - 1 375387, 00 руб. в срок до 26.12.2016г., пени подлежат начислению с  

27.12.2016г. по 08.10.2018г. сумма пеней 236 016,43 (5% - 69769,35)  

5% - 152820,80 в срок до 23.12.2016г., пени подлежат начислению с 24.12.2016г.  

по 08.10.2018г. сумма пеней 27 956,02 (5%- 7641,04), итого сумма пеней по КС № 3 от  

24.10.2016г. составляет 153 835 руб. 78 коп. В) КС № 4 от 30.11.2016 сумма 1 184 252,10 руб. 

50% - 592126,05 руб. в срок до 21.12.2016 г., пени подлежат начислению с  

22.12.2016г. по 08.10.2018г. сумма пеней 108 714,34 руб. (5% - 29606 руб.30 коп.) 

45% - 532913, 40 руб. в срок до 01.01.2017г., пени подлежат начислению с  

02.01.2017г. по 08.10.2018г. сумма пеней 95 888,90 (5% - 26645,67)  

5% - 59212,61 в срок до 23.12.2016г., пени подлежат начислению с 24.12.2016г. по  

08.10.2018г. сумма пеней 10 831,96 (5%-2 956,13), итого сумма пеней по КС № 4 от  

30.11.2016г. составляет 59 208 руб. 10 коп. Г) КС № 5 от 31.12.2016 сумма 57120,00 руб. 

50% - 28 560,00 руб. в срок до 30.01.2017 г., пени подлежат начислению с  

31.01.2017г. по 08.10.2018г., сумма пеней 4 862,82руб. (5% - 1 428 руб. 00 коп.) 

45% - 25 704,00 руб. в срок до 01.03.2017г., пени подлежат начислению с  

02.03.2017г. по 08.10.2018г., сумма пеней 4 119,50 (5%- 1 253,70)  

5% - 2856 в срок до 23.12.2016г., пени подлежат начислению с 24.12.2016г. по  

08.10.2018г., сумма пеней 522,48 (5% - 142,80), итого сумма пеней по КС № 5 от  

31.12.2016г. составляет 2845 руб. 50 коп. Д) КС № 6 от 31.10.2017 сумма 138 259,60 руб. 

50% - 69 129,80 руб. в срок до 22.11.2017 г., пени подлежат начислению с  

23.11.2017г. по 08.10.2018г., сумма пеней 5 505,03 руб. (5% - 3 456,49)  

45% - 62216,82 руб. в срок до 30.12.2017г., пени подлежат начислению с  

31.12.2017г. по 08.10.2018г., сумма пеней 4 317,85 (5%-3 110,84)  

5% - 6912,98 в срок до 29.11.2017г., пени подлежат начислению с 30.11.2017г. по  

08.10.2018г., сумма пеней 537,20 (5%- 345,65), итого сумма пеней по КС № 6 от  

31.10.2017г. составляет 6 912 руб. 98 коп. 

По договору подряда № С-08/2017-КЛ-4А от 22.08.2017г. неустойка начислена в  

размере 21653,48 руб. с учетом максимальной суммы пеней по платежу - 5% (п..9.3.1.):  А) КС № 1 от 30.09.2017г. на сумму 465 676,00  

50% - 232838,00 руб. в срок до 30.10.2017г., пени подлежат начислению с  

31.10.2017г. по 08.10.2018г. сумма пеней 20 014,37 (5%- 11 641,90);  

43% - 200 240,68 в срок до 01.12.2017г., пени подлежат начислению с 02.12.2017г.  

по 08.10.2018г., сумма пеней 15 450,24 (5%- 10012,03); 

7% - 32 597,32 не предъявляется ко взысканию, итоговая сумма пеней по КС № 1  

от 30.09.2017г. 21653,93 руб. 

По договору № С02/2017-М-ЗА от 15.02.2017г. (к нему дополнительные  соглашения № 1, № 2, № 3, № 4) неустойка начислена в размере 541 690,20 руб.:  А) КС № 1 от 30.04.2017 сумма 1 034 569 руб. 00 коп.  

50% - 517 284 руб. 50 коп в срок до 01.06.2017г., пени подлежат начислению с  

02.06.2017г. по 14.08.2017г. сумма пеней 11 556,99 руб. 

43%- 444864 руб. 67 коп. в срок до 01.08.2017г., пени подлежат начислению с  

02.09.2017г. по 20.09.2017г. сумма пеней 6 650,71 руб. 

7% не выплачивается до ввода в эксплуатацию, итого сумма пеней по КС № 1 от  

30.04.2017г. составляет 18 207 руб. 70 коп Б) КС № 2 от 31.05.2017г. сумма 1 695 015 руб. 00 коп. 

50% - 847507 руб. 50 коп в срок до 29.06.2017г., пени подлежат начислению с  

30.06.2017г. по 08.10.2018г. сумма пеней 103 508,85 руб. (10% - 84 750 руб. 70 коп.) 

43% - 728856 руб. 45 коп. в срок до 01.09.2017, пени подлежат начислению с  

02.09.2017 по 20.09.2017, сумма пеней 75 242,27 (10% - 72 885.64) 

7% не выплачивается до ввода в эксплуатацию, итого сумма пеней по КС № 2 от  

31.05.2017г. составляет 157 636 руб. 34 коп. В) КС № 3 от 30.06.2017г. сумма 1 564 472 руб. 50 коп. 

50% - 782236 руб. 00 коп в срок до 28.07.2017г. по 08.10.2018г. сумма пеней 88  

731,64 руб. (10%-78 223 руб. 60 коп.) 

43% - 672722 руб. 96 коп. в срок до 01.10.2017г., пени подлежат начислению с  

02.09.2017г. по 08.10.2018г. сумма пеней 69 447,32 руб. (10% - 67272.30) 

7% не выплачивается до ввода в эксплуатацию, итого сумма пеней по КС № 3 от  

30.06.2017г. составляет 145 495 руб. 90 коп. Г) КС № 4 от 31.07.2017г. сумма 764 750 руб. 00 коп. 

50% - 517284 руб. 50 коп в срок до 28.08.2017г. по 08.10.2018г., сумма пеней 53  

866,50 руб. (10%- 51 728 руб. 45 коп.) 

4 3% - 444864 руб. 67 коп. в срок до 01.10.2017г. по 08.10.2018г., сумма  

пеней 42 017,47 руб. 

7% не выплачивается до ввода в эксплуатацию, итого сумма пеней по КС № 4 от  

31.07.2017г. составляет 93 745 руб. 92 коп. Д) КС № 5 от 31.08.2017г. по ДС № 3 сумма 1 338 063 руб. 00 коп. 

50% - 669 031 руб. 50 коп. до 28.09.2017г. по 08.10.2018г. сумма пеней - 63 569,15  

(пени с 29.09.2017г.) 

43% - 575367 руб. 09 коп. до 01.11.2017г. по 08.10.2018 сумма пеней 49 299,36 7%  

не выплачивается до ввода в эксплуатацию, итого сумма пеней по КС № 5 от  

31.08.2017г. составляет 112 868 руб. 51 коп. Е) КС № 6 от 30.09.2017г. по ДС № 3 сумма 100 110 руб. 

50% -50 055 руб. 50 коп. до 30.10.2017г., пени подлежат начислению с 31.10.2017  

по 08.10.2018г., сумма пеней - 4 302,69 руб. 

43% - 43047 руб. 30 коп. до 01.01.2018г., пени подлежат начислению с 02.01.2018  

по 08.10.2018, сумма пеней 2 965,24 руб. 

7% не выплачивается до ввода в эксплуатацию, итого сумма пеней по КС № 6 от  

31.08.2017г. составляет 7267 руб. 93 коп. Ж) КС № 7 ОТ 31.10.2017 по ДС № 3 сумма 49 730 руб. 00 коп. 

50% -24 865 руб. 00 коп. до 29.11.2017г., пени подлежат начислению с 30.11.2017  

по 08.10.2018г., сумма пеней - 1 932,21 

43% - 21383 руб. 90 коп. до 01.02.2018г., пени подлежат начислению с 02.02.2018  

по 08.10.2018, сумма пеней 1 301,74, 

7% не выплачивается до ввода в эксплуатацию, итого сумма пеней по КС № 7 от  

31.10.2017г. составляет 3233 руб. 95 коп. 3) КС № 8 от 31.10.2017г. по ДС № 3 сумма 49730 руб. 00 коп. 

50% -24 865 руб. 00 коп. до 29.11.2017г., пени подлежат начислению с 30.11.2017  

по 08.10.2018г., сумма пеней - 1 932,21 

43% - 21383 руб. 90 коп. до 01.02.2018г., пени подлежат начислению с 02.02.2018  

по 08.10.2018, сумма пеней 1 301,74 

7% не выплачивается до ввода в эксплуатацию, итого сумма пеней по КС № 8 от  

31.10.2017г. составляет 3233 руб. 95 коп. 

По Договору № С-02/2017-СТ-1.1 от 09.02.2017г. пени начислены в размере 132  

097 руб. 18 коп. с учетом ограничения по сумме пеней 10% от стоимости этапа работ: А) КС № 1 от 31.03.2017 на сумму 143 177 руб. 93 коп. 

93% -133 155 руб. 47 коп в срок до 28.04.2017г., пени подлежат начислению с  29.04.2017г. по 10.08.2017г. на сумму 4 217,70 руб.  

7% - 10 022,46 руб. не предъявляется, итоговая сумма пеней по КС № 1 от  31.03.2017г. составляет 4 217,70 руб.  

Б) КС № 2 от 30.04.2017 на сумму 1 285 033 руб. 01 коп. 

93% - 1 195 080 руб. 70 коп в срок до 01.06.2017г., пени подлежат начислению с  02.06.2017г. по 11.12.2017. на сумму 57 855,42, с 12.12.2017г. по 08.10.2018г. 117 437,80  7% - 89 952,31 руб. не предъявляется, итоговая сумма пеней по КС № 2 от 30.04.2017г.  составляет 117 437,80 руб.  

В) КС № 3 от 31.05.2017г. на сумму 112 276 руб. 15 коп. 

93% - 104 416 руб. 82 коп. в срок до 29.06.2017г., пени подлежат начислению с  30.06.2017г. по 08.10.2018г. на сумму 12 752,68 (10%- 10441,68) 7% - 7 859,33 - не  предъявляется, итоговая сумма пеней по КС № 2 от 31.05.2017г. составляет сумму 10  441,68 руб.  

По договору № С-02/2017-СТ-1.2 от 09.02.2017г. неустойка начислена в размере 94  724,55 руб. с учетом ограничения по сумме пеней 10% от стоимости этапа работ:  

А) КС № 1 от 30.04.2017 на сумму 391 923 руб. 21 коп. 

93% - 364 488 руб. 85 коп в срок до 01.06.2017г., пени подлежат начислению с  02.06.2017г. по 14.08.2017г. на сумму 8 143,29 + 387,43 - итого 8530,72 7% - 27 434,62  руб. не предъявляется, итоговая сумма пеней по КС № 1 от 30.04.2017г. составляет 8  530,72 руб.  

Б) КС № 2 от 31.05.2017г. на сумму 1 941 991 руб. 36 коп. 

93% - 1 806 051 руб. 96 коп. в срок до 29.06.2017г., пени подлежат начислению с  30.06.2017г. по 11.12.2017г.. на сумму 86 193,83, итоговая сумма пеней по КС № 2 от  31.05.2017г. составляет сумму 86 193,83 руб.  

По договору № С-08/2017-СТ-3.1-К от 28.08.2017г. неустойка начислена в размере  56 833 руб. 92 коп. с учетом ограничения по сумме пеней 5% от стоимости этапа работ:  

А) КС № 1 от 30.09.2017 на сумму 453 128 руб. 23 коп. 

93% - 421 409 руб. 25 коп в срок до 30.10.2017г., пени подлежат начислению с  31.10.2017г. по 08.10.2018г. на сумму 36 223,64 (5% - 21 070,46 руб.) 7% -31718,98 руб.  не предъявляется, итоговая сумма пеней по КС № 1 от 31.10.2017г. составляет 21070,46  руб.  

Б) КС № 2 от 31.10.2017 на сумму 769 106 руб. 78 коп. 

93% - 715 269 руб. 30 коп в срок до 29.11.2017г., пени подлежат начислению с  30.11.2017г. по 08.10.2018г. на сумму 55 582,38 (5% - 35 763,46 руб.) 7% - 53 837,47 руб.  не предъявляется, итоговая сумма пеней по КС № 2 от 31.10.2017г. составляет 35 763,46  коп  

По договору № С-05-2017-ПК-2.2. от 19.05.2017г. неустойка начислена в размере  6923 руб. 92 коп. с учетом ограничения по сумме пеней 5% от стоимости этапа работ:  

А) КС № 1 от 30.06.2017 на сумму 138 478 руб. 50 коп. 

93% - 128 785 руб. 00 коп в срок до 28.07.2017г., пени подлежат начислению с  29.07.2017г. по 08.10.2018г. на сумму 14 608,51 (5% - 6 439 руб. 25 коп.)  

7% - 9 693 руб. 50 коп. в срок до 16.10.2017г., пени подлежат начислению с  17.10.2017г. по 08.10.2018г. на сумму 871,59 (5%- 484 руб. 67 коп.), итоговая сумма  пеней по КС № 1 от 31.08.2017г. составляет 6923 руб. 92 коп.  

По Договору № С05/2017-СТ-2.2. от 19.05.2017г. неустойка начислена в размере  77542,77 руб. с учетом ограничения по сумме пеней 5% от стоимости этапа работ,  частичной оплаты 13.10.2017г. 444020,57руб., 23.11.2017г. - 128 785 руб.:  

А) КС № 1 от 31.05.2017 на сумму 477 441 руб. 58 коп. 

93% - 444 020 руб. 67 коп в срок до 29.06.2017г., пени подлежат начислению с  30.06.2017г. по 13.10.2017г. на сумму 13 159,75,  

7% - 23 872 руб. 08 коп. в срок до 14.08.2017г., пени подлежат начислению с  15.08.2017г. по 23.11.2017г. на сумму 913,70, итоговая сумма пеней по КС № 1 от  31.05.2017г. составляет 14 073 руб. 45 коп.  

Б) КС № 2 от 30.06.2017 на сумму 1 269386 руб. 57 коп. 

93% - 1 180 529 руб. 51 коп в срок до 28.07.2017г., пени подлежат начислению с  29.07.2017г. по 08.10.2018г. на сумму 133 911,40 (5% - 59 026 руб. 47 коп.)  

7% -88 857 руб. 06 коп. в срок до 14.08.2017г., пени подлежат начислению с  15.08.2017г. по 08.10.2018г. на сумму 9 626,18 (5%- 4 442 руб. 85 коп.), итоговая сумма  пеней по КС № 2 от 30.06.2017г. составляет 63469 руб. 32 коп.  

По Договору № С-06/2017-ВХГ от 13.06.2017г. неустойка начислена в размере 1  305 руб. 91 коп. с учетом ограничения по сумме пеней 5% от стоимости этапа работ:  

А) КС № 1 от 30.06.2017 на сумму 28 084 руб. 00 коп. 

93% - 26118 руб.12 коп до 28.07.2017г., пени подлежат начислению с 29.07.2017г.  по 08.10.2018г. на сумму 2 962,67 (5% - 1 305 руб. 91 коп.), итоговая сумма пеней по КС   № 1 от 31.05.2017г. составляет 1 305 руб. 91 коп.  

В силу пункта 1 и 2 статьи 421 ГК РФ юридические лица свободны в заключении  договора, в связи с чем могут заключить договор как предусмотренный, так и не  предусмотренный законом или иными правовыми актами. Установленная по  соглашению сторон неустойка является договорной, условия по ее применению  определены исключительно по их усмотрению. Ответчик является коммерческой  организацией и осуществляет свою предпринимательскую деятельность на свой риск.  

Наличие обстоятельств, при которых ответчик при той степени заботливости и  осмотрительности, какая от него требовалась по характеру договорных правоотношений  сторон, принял все зависящие от него меры для своевременного исполнения денежного  обязательств, из материалов дела не усматривается. Доказательств отсутствия своей  вины в нарушении принятого по договору обязательства не представил (пункты 2 и 3  статьи 401 ГК РФ). При заключении договора ответчик должен был предвидеть  наступление установленных договорами неблагоприятных последствий в случае  нарушения сроков оплаты.  

Доказательств явной несоразмерности предъявленной к взысканию неустойки  последствиям нарушения договорных обязательств и необоснованности выгоды  кредитора, ответчик в нарушение положений статьи 65 АПК РФ суду не представил.  

Расчет начисленной истцом неустойки за просрочку платежа судом проверен,  признан обоснованным, соразмерным последствиям нарушения договорных  обязательств и сумме долга, оснований для применения статьи 333 ГК РФ суд не  усматривает.  

Принимая во внимание, что ответчик не представил доказательств надлежащего  исполнения своих обязательств по договорам, исковые требования подлежат  удовлетворению в полном объеме, с отнесением расходов по госпошлине на ответчика в  соответствии со статьей 110 АПК РФ.  

В подтверждение судебных расходов по оплате услуг представителя в размере  150 000 руб. истец представил в материалы дела договор на оказание юридических  услуг № 08-02 от 08.02.2018, платежные поручения № 438 от 20.03.2018, № 264 от  22.02.2018 на сумму 150 000 руб., в назначении платежа которых имеются ссылки на  договорные отношения с представителем по оказанию истцу юридической помощи.  

Указанными документами подтверждается несение истцом 150 000 руб. расходов  по оплате услуг представителя, связанных с подготовкой правовых документов  (искового заявления, дополнения к иску с возражениями на отзыв ответчика,  ходатайства об уточнении исковых требований) и представлением интересов истца в  суде первой инстанции посредством участия его представителя в судебных заседаниях.  

Согласно пункту 11 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016   № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек,  связанных с рассмотрением дела» (далее – Постановление № 1), разрешая вопрос о  размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе  уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не  представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов.  

Вместе с тем, согласно абзацу второму того же пункта Постановления № 1 в целях  реализации задачи судопроизводства по справедливому публичному судебному  разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и  обязанностей сторон суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе  расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек,  исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный)  характер.  

Согласно пункту 13 Постановления № 1 разумными следует считать такие расходы  на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно  взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться  объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных  представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных  документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.  Разумность судебных издержек на оплату услуг представителя не может быть  обоснована известностью представителя лица, участвующего в деле.  

Таким образом, в соответствии с частью 2 статьи 110 АПК РФ и по смыслу  пунктов 11 - 13 Постановления № 1 судебные издержки, в том числе на оплату услуг  представителя, присуждаются каждой из сторон в разумных пределах и распределяются  в соответствии с правилом о пропорциональном распределении судебных расходов. При  этом оценка заявленных требований на предмет их разумности, чрезмерности является  обязанностью суда.  

Аналогичный подход нашел отражение в определение Конституционного Суда  Российской Федерации от 21.12.2004 № 454-О, согласно которому судам необходимо  оценивать разумность взыскиваемых судебных расходов в случаях, когда заявленная к  взысканию сумма судебных расходов носит явно неразумный, чрезмерный характер,  поскольку определение баланса интересов сторон является обязанностью суда,  относящейся к базовым элементам публичного порядка Российской Федерации.  

Оценив представленные доказательства разумности понесенных расходов, исходя  из фактического объема проделанной работы, ее качества, характера рассмотренного  спора, степени сложности дела, и времени, необходимого квалифицированному  специалисту для подготовки к рассмотрению данного дела, подготовки процессуальных  документов, правовой результат, достигнутый по делу, суд исходя из разумных пределов  полагает возможным удовлетворить требования истца о взыскании судебных расходов в  сумме 120 000 руб.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области  

решил:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ "НАВИС" в пользу Общество с ограниченной ответственностью  "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КРАТОН" 11 411 753 руб. 20 коп., в том числе  9 960 334 руб. 53 коп. задолженности по спорным договорам, 1 451 418 руб. 66 коп.  неустойки, а также 80 059 руб. расходов по оплате госпошлины и 120 000 руб. расходов  на представителя.  

Возвратить истцу из федерального бюджета 5 053 руб. излишне уплаченной  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия Решения.  

Судья Евдошенко А.П.