Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

ул. Курашова, д. 28, бокс 8, г. Якутск, 677980 

тел: +7 (4112) 34-05-80, https://yakutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-2348/2024

17 мая 2024 года

город Якутск

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Шамаевой Т. С. рассмотрев в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению "Администрации села Табага" муниципальное казенное учреждение Городского округа "Город Якутск" (ИНН 1435135453, ОГРН 1031402048259) к индивидуальному предпринимателю Ефремову Афанасию Николаевичу (ИНН 143500673199, ОГРН 304143507600251) о взыскании 58 861,40 рублей,

без вызова сторон,

В соответствии с п.4.1 муниципального контракта от 20.09.2022 № 11/675 ответчик как подрядчик производит выполнение работ в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 3), являющимся неотъемлемой частью контракта.

Срок выполнения подрядчиком своих обязательств по контракту с момента заключения контракта и в течение 30 календарных дней.

Цена контракта составляет 1 955 480 руб. без НДС (п.3.1 контракта).

Согласно п.7.6 контракта пени начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Контракт подписан электронно-цифровой подписью подрядчиком 13.09.2022, заказчиком 20.09.2022.

Решением от 20.09.2023 истец отказался в одностороннем порядке от исполнения обязательств по контракту; решение размещено в единой информационной системе по веб-адресу: https://zakupki.gov.ru

Ответчиком выполнены работы на сумму 1 464 814,20 руб., принятые истцом по акту от 25.11.2022, подписанному ЭЦП 13.12.2022-14.12.2022.

Ответчик в гарантийном письме от 24.11.2022 № 27 в адрес истца обязался произвести устройство покрытия из резиновой крошки «Мастерфайбер» на бетонное основание для сквера Знаний по контракту в срок до 22.05.2023.

Расчет договорной неустойки истцом произведен с 21.10.2022 по 02.10.2023 исходя из 1/300 ключевой ставки Банка России, имевшей место в соответствующие периоды, с учетом объема принятых работ, судом проверен, признан не противоречащим условиям контракта, требованиям действующего законодательства и не нарушающим права и интересы ответчика. 

Ответчиком ходатайство о снижении размера неустойки не заявлено, доказательств несоразмерности взыскиваемой неустойки, исключительности случая не представлено, суд оснований для снижения неустойки ввиду ее несоразмерности последствиям нарушения обязательства из материалов дела не установил.

При доказанности нарушения обязательства по контракту со стороны ответчика, принимая во внимание расторжение контракта истцом в одностороннем порядке, судом исковые требования удовлетворены полностью.

По результатам рассмотрения дела, на основании ч.3 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика подлежит взысканию в доход федерального бюджета государственная пошлина по делу.

Руководствуясь статьями 110, 170, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу "Администрации села Табага" муниципальное казенное учреждение Городского округа "Город Якутск" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку 58 861,40 руб.

2. Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину 2 354 руб.

3. Решение подлежит немедленному исполнению.

4. В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд  в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Саха (Якутия). 

Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-  телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru

Судья Т. С. Шамаева